Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город  Волгоград

« 11 » июля 2023 г.

Дело № А12-12279/2022

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 июля 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2023 года.  

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В. (до перерыва), помощником судьи Кисловой С.И. (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Территориального орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки и взыскании денежных средств, с участием в деле в качестве третьих  лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью «Лиммат», Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», ООО «РЕНОВАЦИО»

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность;

от ответчика – ФИО2, доверенность

установил:

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (далее – истец, Волгоградстат) обратился с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (далее – ответчик, ООО «ЛИНТ»)  в котором просит:

1.  Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области в виде:

-    устранения дефектов кровли здания Волгоградстата за счет Подрядчика и в полном объеме в соответствии с условиями проекта государственного контракта № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.;

-    устранения дефектов в виде трещин конструктивного элемента здания (антаблемента) в полном объеме за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

2.  Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

3.  Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 42 928 (сорок две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 30 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

4.  Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) в размере 103 611 рублей (сто три тысячи шестьсот одиннадцать) 89 копеек (размер неустойки на момент подачи искового заявления 06.05.2022) за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

5.  Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) в размере 13 923 рублей (тринадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 08 копеек (размер неустойки на момент подачи искового заявления 06.05.2022) за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 18.05.2022 исковое заявление Территориального орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области принято к производству, возбуждено дело № А12-12279/2022. 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 21.07.2022 года производство по делу приостановлено, в связи с назначением по делу судебной экспертизы, которая поручена «ООО «Профильный центр оценки «ПРОЭКС», эксперту ФИО3.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1)   Каковы причины возникновения, выявленных заказчиком, недостатков (дефектов) по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия). Являются ли они следствием нарушения подрядчиком обязательных для него требований, предусмотренных проектно - сметной документацией, условиями контракта, действующим законодательством, в том числе требованиям строительных норм и правил, применяемых к данным видам работ: - использование некачественных или иных, не предусмотренных проектной документацией материалов; - несоответствие выполненных работ техническим регламентам, стандартам, проекту.

2.    Могли ли на качество выполненных работ подрядчиком по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 повлиять действия третьих лиц или иные обстоятельства?

3.    Соответствует ли качество выполненных работ проектной документации, условиям государственного контракта № 182-11 от 01.09.2020? Если нет, то какие имеются отступления от требований, ухудшающие качество работ.

4.    Какие работы необходимо произвести, для того, чтобы устранить выявленные недостатки (дефекты) кровли по контракту № 182-11 от 01.09.2020 и какова стоимость работ по устранению указанных недостатков (дефектов)?

5.    Каковы причины возникновения, выявленных заказчиком, недостатков (дефектов) по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания (антаблемента внешнего фасада). Являются ли они следствием нарушения подрядчиком обязательных для него требований, предусмотренных проектно-сметной документацией, условиями контракта, действующим законодательством, в том числе требованиям строительных норм и правил, применяемых к данным видам работ: - использование некачественных или иных, не предусмотренных проектной документацией материалов; - несоответствие выполненных работ техническим регламентам, стандартам.

6.    Могли ли на качество выполненных работ подрядчиком по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 повлиять действия третьих лиц или иные обстоятельства?

7.    Соответствует ли качество выполненных работ проектной документации, условиям государственного контракта № 134-11 от 20.08.2021? Если нет, то какие имеются отступления от требований, ухудшающие качество работ.

8.    Какие работы необходимо произвести, для того, чтобы устранить выявленные недостатки (дефекты) внешнего фасада по контракту № 134-11 от 20.08.2021 и какова стоимость работ по устранению указанных недостатков (дефектов)?

9.    Определить причины затопления внутреннего помещения Волгоградстата (кабинет № 28), произошедшего 31.01.2022, объем ущерба и объем работ по устранению недостатков?

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 31.01.2023 г. производство по делу возобновлено.

07.06.2022г. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области обратился в Арбитражный суд Волгоградской области  с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» об обязании в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства в виде:

устранения дефектов внутреннего фасада административного здания Волгоградстата путем восстановления обрушившейся части карниза дворового фасада в полном объеме за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 рублей 19 коп.;

устранения дефектов входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.;

устранения дефектов входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.;

устранения дефектов работ по замене стеклопакетов путем замены оконных блоков во внутреннем кабинете № 55 административно-производственного здания Волгоградстата в полном объеме за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 558 306 рублей 00 коп.

устранения дефектов работ по замене стеклопакетов путем замены оконных блоков во внутреннем кабинете № 64 административно-производственного здания Волгоградстата в полном объеме за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 599 773 рублей 20 коп., 

- о взыскании штрафов в размере 5 000 руб. и неустойки 155 957 руб. 52 коп. за неисполнение и ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021, в размере 34 606 руб. 68 коп. и неустойки в размере 8 663 руб. 21 коп. за неисполнение и ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021, в размере 47 047 руб. 8 коп. и неустойки в размере 11 777 руб. 63 коп. за неисполнение и ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021, в размере 55 830 руб. 6 коп. и неустойки в размере 13 976 руб. 25 коп. за неисполнение и ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 143-11 от 25.08.2021, в размере 59 977 руб. 3 коп. и неустойки в размере 15 014  руб. 32 коп. за неисполнение и ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 127-11 от 20.08.2021 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 15.06.2022 исковое заявление Территориального орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области принято к производству, возбуждено дело № А12-14880/2022. 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 09.02.2023 по делу № А12-12279/2022 дела № А12-12279/2022 и А12-14880/2022 объединены в одно производство для совместного рассмотрения, сводному делу присвоен единый номер № А12-12279/2022. 

От истца поступило ходатайство об уточнении требований (исх. от 28.03.2023г.) в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором истец просит:

1.        Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области в виде:

-            устранения дефектов входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.;

-            устранения дефектов входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.

2.        Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской выполнить объем работ по устранению недостатков отделки внутреннего кабинета № 28 в виде:

A)      осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних оконных откосов на площади 4,3 м2:

1)        Демонтаж оконных откосов из ГКЛ (без демонтажа металл, профилей) - 4,3 м ;

2)        Обработка поверхности внутреннего оконного откоса антисептическими растворами для устранения образования грибка - 4,3 м ;

3)        Устройство оконных откосов из листов ГКЛ (без установки металл, профилей) - 4,3 м2;

4)        Шпатлевание поверхности листов из ГКЛ (выравнивание поверхности под окраску) – 4,3 м2;

5)        Окраска внутренних оконных откосов - 4,3 м ;

Б) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки наружных оконных откосов на площади 4,3 м2:

1)        Очистка поверхности оконных откосов от следы плесени металлической щеткой -1м;

2)        Обработка поверхности наружного оконного откоса антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка - 1 м2;

3)        Шпатлевание поверхности оконных откосов (после воздействия металлической щеткой) – 1  м2;

4)        Окраска поверхности оконных откосов -1м2.

B)       осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних стен и потолка в помещении № 28 на площади 6,4 м2 необходимо выполнить следующие работы:

1)        Очистка поверхности стен и потолка от следов плесени металлической щеткой - 6,4 м2;

2)        Обработка поверхности стен и потолка антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка - 6,4 м2;

3)        Шпатлевание поверхности стен и потолка (после воздействия металлической щеткой) – 6,4 м2;

4)        Окраска поверхности стен и потолка - 6,4 м2.

3.        Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере стоимости возмещения расходов на устранение недостатков работ, выполненных ООО «ЛИНТ», в размере 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

4.        Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области судебные расходы в размере оплаты судебной экспертизы в размере 79 200 (семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

5.        Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере оплаты работ по Государственному контракту № 132-14 от 21.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций в размере 60 000 рублей 00 копеек.

6.        Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере оплаты работ по Государственному контракту № 135-14 от 27.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата в размере 85 500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

7.        Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере оплаты работ по Государственному контракту № 177-14 от 02.12.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г. (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата) в размере 263 250 (двести шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

8.        Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 5 000 рублей за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 рублей 19 коп.

9.        Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 34 606 (тридцать четыре тысячи шестьсот шесть) рублей 68 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.

10.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 47 047 рублей 8 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.

11.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 55 830 (пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 6 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административнопроизводственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 558 306 рублей 00 коп.

12.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 3 копейки за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 599 773 рублей 20 коп.

13.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

14.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 42 928 рублей 30 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

15.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 303 488,05 рублей 05 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

16.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

17.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 40 781 рубль 89 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

18.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

19.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 548 239 рублей 49 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 рублей 19 коп.

20.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 рублей 19 коп.

21.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 30 453 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 88 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.

22.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.

23.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) неустойку (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 41 402 (сорок одна тысяча четыреста два) рубля 06 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.

24.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.

Уточнения приняты судом к рассмотрению.

В суд 26.06.2023 от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области поступило заявление в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в котором просит:

- Принять отказ от части исковых требований:

1.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере оплаты работ по Государственному контракту № 132-14 от 21.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций в размере 60 000 руб.

2.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере оплаты работ по Государственному контракту № 135-14 от 27.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата в размере 85 500 руб.

3.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере оплаты работ по Государственному контракту № 177-14 от 02.12.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г. (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата) в размере 263 250 руб.

4.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 303 488,05 (триста три тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 05 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

5.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

6.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 40 781 рубль 89 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

7.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.

8.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 548 239 (пятьсот сорок восемь тысяч двести тридцать девять) рублей 49 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 рублей 19 коп.

9.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 рублей 19 коп.

10.         Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 30 453 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 88 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.

11.         Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.

12.         Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) неустойку (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 41 402 (сорок одна тысяча четыреста два) рубля 06 копеек за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.

13.         Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.

- Принять уточнения исковых требований:

1.             Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области в виде:

- устранения дефектов входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп.;

- устранения дефектов входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп.

2.             Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской выполнить объем работ по устранению недостатков отделки внутреннего кабинета № 28 в виде:

А) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних оконных откосов на площади 4,3 м2:

1)             Демонтаж оконных откосов из ГКЛ (без демонтажа металл. профилей) – 4,3 м2;

2)             Обработка поверхности внутреннего оконного откоса антисептическими растворами для устранения образования грибка – 4,3 м2;

3)             Устройство оконных откосов из листов ГКЛ (без установки металл. профилей) – 4,3 м2;

4)             Шпатлевание поверхности листов из ГКЛ (выравнивание поверхности под окраску) – 4,3 м2;

5)             Окраска внутренних оконных откосов – 4,3 м2;

Б) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки наружных оконных откосов на площади 4,3 м2:

1)             Очистка поверхности оконных откосов от следы плесени металлической щеткой – 1 м2;

2)             Обработка поверхности наружного оконного откоса антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка – 1 м2;

3)             Шпатлевание поверхности оконных откосов (после воздействия металлической щеткой) – 1 м2;

4)             Окраска поверхности оконных откосов – 1 м2.

В) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних стен и потолка в помещении № 28 на площади 6,4 м2 необходимо выполнить следующие работы:

1)             Очистка поверхности стен и потолка от следов плесени металлической щеткой – 6,4 м2;

2)             Обработка поверхности стен и потолка антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка – 6,4 м2;

3)             Шпатлевание поверхности стен и потолка (после воздействия металлической щеткой) – 6,4 м2;

4)              Окраска поверхности стен и потолка – 6,4 м2.

3.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области убытки в размере стоимости  возмещения расходов на устранение недостатков работ, выполненных ООО «ЛИНТ», в размере 5 054 900 рублей 00 копеек (размер стоимости трех государственных контрактов № 34-14 от 14.03.2023, № 45-14 от 09.03.2023, № 46-14 от 09.03.2023, заключенных Волгоградстатом с ООО «РЕНОВАЦИО»).

4.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области судебные расходы в размере оплаты судебной экспертизы в размере  79 200 рублей 00 копеек (оплаченных по платёжному поручению № 662732 от 16.09.2022).

5.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 5 000 рублей за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 рублей 19 коп. (п. 7.5 госконтракта).

6.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 34 606 рублей 68 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 рублей 80 коп. (п. 8.5 госконтракта).

7.    Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 47 047 рублей 8 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 рублей 00 коп. (п. 8.5 госконтракта).

8.             Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 55 830) рублей 6 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту  № 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 558 306 рублей 00 коп. (п. 8.5 госконтракта).

9.             Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 59 977 рублей 3 копейки за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 599 773 рублей 20 коп. (п. 8.5 госконтракта).

10.         Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп. (п. 7.5 госконтракта).

11.         Взыскать с ООО «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области штраф в размере 42 928 (сорок две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 30 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп. (п. 8.5 госконтракта).

Согласно ч.1 ст.49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

В соответствии с ч.2 названной статьи АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Поскольку, отказ заявителя от требований не противоречит действующему законодательству и не нарушает права других лиц, суд принимает отказ от части требований.

В силу п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установил, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Уточнения приняты судом к рассмотрению и являются предметом рассмотрения.

В ходе судебного заседания истец поддержал требования.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ. 

Ответчик письменный мотивированный отзыв на иск в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил, возражений по существу иска не заявил.

Изучив представленные документы, оценив доводы лиц участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, согласно положениям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), между обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (Подрядчик) и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (Заказчик) заключены государственные контракты:

№ 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 3 194 611 руб. 00 коп. (далее - Контракт № 182-11);

№ 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп. (далее - Контракт № 134-11);

№ 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего фасада и входной группы объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 6 229 994 руб. 19 коп. (далее - Контракт № 173-11);

№ 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы №2;

внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 руб. 80 коп. (далее - Контракт № 138-11);

№ 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы №1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 руб. 00 коп. (далее - Контракт № 139-11);

№ 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 599 773 руб. 20 коп. (далее - Контракт № 127-11);

№ 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) на сумму 558 306 руб. 00 коп. соответственно (далее - Контракт № 143-11).

Согласно п. 1 ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве - п. 1 ст. 721 ГК РФ.

В соответствии со статьями 702, 708, 709 и 720 Гражданского кодекса РФ обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора (далее - основные обязательства): обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 Гражданского кодекса РФ).

В силу п. 2 ст.755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

 

                   Государственный контракт № 182-11 от 01.09.2020

Между Волгоградстатом и ООО «ЛИНТ» заключен государственный контракт № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>, на сумму 3 194 611 руб. 00 коп.

Контракт заключен в электронном виде на основании разрешения Облкультнаследия на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту кровли подписан сторонами 20.11.2020.

03.12.2020            работы оплачены Волгоградстатом в полном объеме в соответствии с платежным поручением № 497668.

Положения пунктов 4.13, 6.1-6.3 Контракта № 182-11 устанавливают, что гарантийный срок составляет 5 лет с момента завершения работ, в течении которого Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недостатки) за свой счет.

В течение гарантийного срока выявлены дефекты работы, выполненной Подрядчиком - протекание крыши здания в связи с несоответствием карнизного свеса кровли проекту Контракта №182-11.

Как следует из акта Волгоградстата от 31.01.2022, в ходе осмотра состояния помещений и конструкций в здании Волгоградстата выявлено протекание крыши здания, вследствие чего образовалось намокание внешнего фасада объекта культурного наследия регионального значения и затопление внутреннего кабинета № 28.

Выявленные нарушения свидетельствовали о ненадлежащем качестве выполненных Подрядчиком работ по Контракту № 182-11.

Истцом в адрес ООО «ЛИНТ» направлена претензия от 22.02.2022 № НС-12/705 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов кровли и трещин конструктивного элемента здания (антаблемента), а также восстановления обрушившейся части антаблемента Волгоградстата.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 40410967596856, получена адресатом 04.03.2022. Срок исполнения претензии истек 15.03.2022.

Поскольку ответ на претензию не поступил, Подрядчик к исполнению гарантийных обязательств не приступил, Истцом направлена повторная претензия с требованием об исполнении обязательств, уплате штрафа и неустойки от 15.03.2022 № НС-12/981 почтовым отправлением с идентификационным номером № 80082070023048.

Согласно отчету об отслеживании, полученного на официальном сайте ФГУП Почта России (https://www.pochta.ru/tracking), претензия от 15.03.2022 получена адресатом 21.03.2022.

В соответствии с правилами исчисления сроков, установленных главой 11 ГК РФ, срок исполнения претензии истек 01.04.2022.

Ответ на претензию в адрес Истца не поступил, Ответчик к исполнению гарантийных обязательств не приступил.

Разделом 7 Контракта № 182-11 установлены условия ответственности сторон, в том числе штраф в размере 5 000 рублей за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств (пункт 7.5). 

В нарушение положений Контракта № 182-11, дефекты не были устранены Подрядчиком в добровольном порядке в рамках исполнения гарантийных обязательств, что влечет за собой право Заказчика требовать уплаты штрафов.

Таким образом, у Волгоградстата возникло право требования взыскания суммы штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 (в соответствии с пунктом 7.5 Контракта).

В рамках дела № А12-12279/2022 определением Арбитражного суда Волгоградской области от 21.07.2022 года производство по делу приостановлено, в связи с назначением по делу судебной экспертизы, которая поручена «ООО «Профильный центр оценки «ПРОЭКС» эксперту ФИО3.

На разрешение эксперта поставлены, в том числе, следующие вопросы:

1)             Каковы причины возникновения, выявленных заказчиком, недостатков (дефектов) по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия). Являются ли они следствием нарушения подрядчиком обязательных для него требований, предусмотренных проектно - сметной документацией, условиями контракта, действующим законодательством, в том числе требованиям строительных норм и правил, применяемых к данным видам работ: - использование некачественных или иных, не предусмотренных проектной документацией материалов; - несоответствие выполненных работ техническим регламентам, стандартам, проекту.

2.           Могли ли на качество выполненных работ подрядчиком по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 повлиять действия третьих лиц или иные обстоятельства?

3.              Соответствует ли качество выполненных работ проектной документации, условиям государственного контракта № 182-11 от 01.09.2020? Если нет, то какие имеются отступления от требований, ухудшающие качество работ?

4.       Какие работы необходимо произвести, для того, чтобы устранить выявленные недостатки (дефекты) кровли по контракту № 182-11 от 01.09.2020 и какова стоимость работ по устранению указанных недостатков (дефектов)?

9.       Определить причины затопления внутреннего помещения Волгоградстата (кабинет №28), произошедшего 31.01.2022, объем ущерба и объем работ по устранению недостатков?

Согласно Заключению судебной экспертизы № 1397/10-01-23 от 10.01.2023, выполненной ООО ПЦО «ПРОЭКС» экспертом ФИО3, причинами возникновения выявленных Волгоградстатом недостатков (дефектов) по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) является невыполнение специалистами ООО «ЛИНТ» требований проектно-сметной документации по устройству длины карнизного свеса, согласно проектной документации длина карнизного свеса должна быть 800 мм, фактическая длина карниза свеса находится в диапазоне 555 мм - 615 мм (выводы по вопросу №1).

Качество работ не соответствует требованиям проектно-сметной документации (выводы по вопросу № 3).

Действия третьих лиц на результаты выполненных подрядчиком работ по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 повлиять не могли (выводы по вопросу № 2).

Однако установить на момент проведения экспертизы необходимые виды, объем и стоимость ремонтных работ для устранения недостатков (дефектов) кровли по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 технически не представлялось возможным в связи с необходимостью разработки проектной документации с определением, в том числе, несущей способности кирпичных стен, установления возможности устройства дополнительной нагрузки в виде увеличенной длины карнизного свеса (выводы по вопросу № 4).

В ходе судебного разбирательства, в адрес Истца поступило предостережение № ПМ 34220973400002737233 от 03.08.2022 о недопустимости нарушения обязательных требований Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (далее предостережение), согласно которому здание Волгоградстата находится в ненадлежащем техническом состоянии, вследствие обрушения многопрофильного карниза.

Указанным предостережением Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области обязывал Волгоградстат в срок до 15.01.2023 организовать проведение работ по сохранению объекта, в том числе противоаварийные работы с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Во исполнение предостережения Комитета Истцом заключены:

-           Государственный контракт № 132-14 от 21.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций. Стоимость контракта - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Оплачен 26.10.2022 (акт № 132-14 от 26.10.2022).

-           Государственный контракт № 135-14 от 27.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата. Стоимость контракта - 85 500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Оплачен 11.11.2022 (акт от 135-14 от 11.11.2022).

-          Государственный контракт № 177-14 от 02.12.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г. (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата). Стоимость контракта - 263 250 (двести шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Оплачен 08.12.2022 (акт № 177-14 от 08.12.2022).

Согласно выводам ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», изложенным в научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.», расположенное по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Володарского, 1, (капитальный ремонт карниза административного здания), раздел 3 Проект организации реставрации (строительства) 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-ПОС (Том 6), для проведения работ по сохранению объекта, а также противоаварийных работ с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимо произвести ремонтные работы конструкции крыши здания Волгоградстата, а также произвести капитальные ремонтные работы карниза по периметру здания.

При этом, как следует из выводов судебной экспертизы, выявленные Заказчиком недостатки и обрушения карниза здания Волгоградстата вызваны некачественно выполненными работами сотрудниками ООО «ЛИНТ».

На основании научно-проектной документации, разработанной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (тома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878 г.», а также проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата, разработанной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», раздел 3 Смета на строительство объекта капитального строительства (капитального ремонта) № 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-СМ (том 7) определена стоимость убытков по проведению капитального ремонта и устранению аварийного состояния объекта капитального строительства (административного здания Волгоградстата), вызванного некачественным выполнением ООО «ЛИНТ» обязательств в рамках исполнения государственных контрактов № 182-11 от 01.09.2020, № 134-11 от 20.08.2021, 173-11 от 12.10.2021 - 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

07.02.2023        на электронной торговой площадке Волгоградстатом опубликовано извещение о проведении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Начальная максимальная цена контракта определена проектно-сметным методом на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании научно - проектной документации (включающую сметную стоимость работ), разработанную и утвержденную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.03.2023            между Волгоградстатом и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 34-14 от 14.03.2023 на сумму 4 941 586 (четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) рублей 08 копеек выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями Госконтракта № 34-14 от 10.03.2023 был оплачен аванс в сумме 988 317,22 руб. платежным поручением № 684110 от 17.03.2023 года (п.2.1 Госконтракта).

Истец указал, что оставшаяся сумма будет оплачена за счет средств Федерального бюджета безналичным перечислением денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки выполненных работ (п.2.2., п.6.9 Госконтракта). Срок выполнения работ - 30.09.2023 (п.3.2 Госконтракта).

09.03.2023         между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 45-14 от 09.03.2023 на сумму 9 684 (девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 95 копеек на проведение авторского надзора и научного руководства за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Истец указал, что оплата оказанных услуг по указанному Госконтракту будет произведена в течение 10-ти рабочих дней с даты оформления акта оказанных услуг, путем безналичного перечисления денежных средств из средств Федерального бюджета (п.2.2.Госконтракта). Срок исполнения услуг-30.09.2023 (п. 1.7 Госконтракта).

09.03.2023          между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 46-14 от 09.03.2023 на сумму 103 628 (сто три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 97 копеек на проведение технического надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Истец указал, что оплата оказанных услуг по указанному Госконтракту будет произведена в течение 10-ти рабочих дней с даты оформления акта оказанных услуг, путем безналичного перечисления денежных средств из средств Федерального бюджета (п.2.2.Госконтракта). Срок исполнения услуг-30.09.2023 (п.1.7 Госконтракта).

Госконтракты заключены в соответствии с п. 19 ч.1 ст.93, ч.1 п.8 ст.ЗЗ Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Волгоградстат просит взыскать убытки в сумме 5 054 900 рублей (4 941 586,08 руб.+9 684,95 руб.+103 628,97 руб.) - общая стоимость трех вышеуказанных заключенных Госконтрактов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Пунктом 4 Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016 предусмотрено, что согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

Согласно пункту 14 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 при рассмотрении дел о возмещении убытков следует иметь в виду, что положение п.4 ст. 393 ГК РФ, согласно которому при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые стороной для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению убытков могут входить только расходы на осуществление таких мер и приготовлений.

Таким образом, Истцом понесены убытки на устранение недостатков работ, в том числе по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020, выполненных Ответчиком в сумме 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

Помимо этого, в исследовательской части к вопросу № 9 и выводам  судебного эксперта по указанному вопросу при проведении осмотра в помещении кабинета № 28 установлено наличие затечных пятен.

Также в судебной экспертизе указано, что причиной затопления внутреннего помещения Волгоградстата (кабинета № 28) является несоответствие карнизного свеса крыши проектно-сметной документации, в результате необходимом для безопасной эксплуатации конструкций стен здания, не осуществляется отвод природных осадков от стены здания, по причине которого происходит обильное намокание стен здания, с последующим попаданием влаги на элементы внутренней отделки.

Судебным экспертом определен объем работ по устранению недостатков отделки внутренних оконных откосов на площади 4,3 м2:

1)          Демонтаж оконных откосов из ГКЛ (без демонтажа металл, профилей) - 4,3 м2;

2)           Обработка поверхности внутреннего оконного откоса антисептическими растворами для устранения образования грибка - 4,3 м2;

3)           Устройство оконных откосов из листов ГКЛ (без установки металл, профилей) - 4,3 м2;

4)           Шпатлевание поверхности листов из ГКЛ (выравнивание поверхности под окраску) – 4,3 м2;

5)           Окраска внутренних оконных откосов - 4,3 м .

Для устранения недостатков отделки наружных оконных откосов на площади 4,3 м2 необходимо выполнить следующие работы:

1)          Очистка поверхности оконных откосов от следы плесени металлической щеткой -1м2;

2)           Обработка поверхности наружного оконного откоса антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка -1м2;

3)                  Шпатлевание поверхности оконных откосов (после воздействия металлической щеткой) – 1 м2;

4)           Окраска поверхности оконных откосов -1м2.

Для устранения недостатков отделки внутренних стен и потолка в помещении № 28 на площади 6,4 м2 необходимо выполнить следующие работы:

1)          Очистка поверхности стен и потолка от следов плесени металлической щеткой - 6,4 м2;

2)           Обработка поверхности стен и потолка антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка - 6,4 м2;

3)           Шпатлевание поверхности стен и потолка (после воздействия металлической щеткой) – 6,4 м2;

4)             Окраска поверхности стен и потолка - 6,4 м2.

Таким образом, затопление внутреннего кабинета № 28 здания Волгоградстата явилось следствием некачественно выполненных Ответчиком работ по контракту № 182-11 от 01.09.2020.

 

Государственный контракт № 134-11 от 20.08.2021

Между Волгоградстатом и ООО «ЛИНТ» заключен государственный контракт № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп. (далее - Контракт №134-11).

Контракт заключен в электронном виде.

Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту кровли подписан сторонами 20.09.2021.

27.09.2021            работы оплачены Волгоградстатом в полном объеме в соответствии с платежным поручением № 657776.

Пункт 7.3 Контракта № 134-11 закрепляет срок гарантии на выполненные работы - 18 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ, а также обязанность Подрядчика устранить недостатки в период гарантийного срока за свой счет.

Вместе с тем, в течение гарантийного срока выявлены дефекты работы, выполненной Подрядчиком - трещины, сколы, обрушение конструктивных элементов фасада здания (антаблемента).

Как следует из акта Волгоградстата от 31.01.2022, в ходе осмотра состояния помещений и конструкций в здании Волгоградстата выявлено протекание крыши здания, вследствие чего образовалось намокание внешнего фасада объекта культурного наследия регионального значения и затопление внутреннего кабинета № 28.

Согласно акту Волгоградстата от 02.02.2022 в ходе осмотра фасада здания выявлены трещины, сколы, обрушение конструктивных элементов здания (антаблемента).

Актом Волгоградстата от 16.02.2022 установлено, что в ходе осмотра здания обнаружено обрушение части конструктивного элемента здания (антаблемента) в размере 3 погонных метра. Также были выявлены значительные повреждения (разрушения) угловой части антаблемента.

Таким образом, выявленные Истцом нарушения свидетельствовали о ненадлежащем качестве выполненных Подрядчиком работ по Контракту № 134-11.

Истцом в адрес ООО «ЛИНТ» направлена претензия от 22.02.2022 № НС-12/705 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов кровли и трещин конструктивного элемента здания (антаблемента), а также восстановления обрушившейся части антаблемента Волгоградстата.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 40410967596856, получена адресатом 04.03.2022. Срок исполнения претензии истек 15.03.2022.

Поскольку ответ на претензию не поступил, Подрядчик к исполнению гарантийных обязательств не приступил, Истцом направлена повторная претензия с требованием об исполнении обязательств, уплате штрафа и неустойки от 15.03.2022 № НС-12/981 почтовым отправлением с идентификационным номером № 80082070023048.

Согласно отчету об отслеживании, полученного на официальном сайте ФГУП Почта России (https://www.pochta.ru/tracking), претензия от 15.03.2022 получена адресатом 21.03.2022.

В соответствии с правилами исчисления сроков, установленных главой 11 ГК РФ, срок исполнения претензии истек 01.04.2022.

Ответ на претензию в адрес Истца не поступил, Ответчик к исполнению гарантийных обязательств не приступил.

Пунктом 8.5, 8.6 Контракта № 134-11 установлены условия ответственности сторон, в том числе штраф за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, в размере 10% цены контракта - 429 283 руб. 00 коп. (т.е. штраф в размере 42 928,3 руб.).

В нарушение положений Контракта № 134-11, дефекты не были устранены Подрядчиком в добровольном порядке в рамках исполнения гарантийных обязательств, что влечет за собой право Заказчика требовать уплаты штрафов.

Таким образом, у Волгоградстата возникло право требования взыскания суммы штрафа в размере 42 928,3 (сорок две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 03 копеек за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 (в соответствии с пунктом 8.5 Контракта).

В рамках дела № А12-12279/2022 определением Арбитражного суда Волгоградской области от 21.07.2022 производство по делу приостановлено, в связи с назначением по делу судебной экспертизы, которая поручена «ООО «Профильный центр оценки «ПРОЭКС» эксперту ФИО3.

На разрешение эксперта поставлены, в том числе, следующие вопросы:

5.             Каковы причины возникновения, выявленных заказчиком, недостатков (дефектов) по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания (антаблемента внешнего фасада). Являются ли они следствием нарушения подрядчиком обязательных для него требований, предусмотренных проектно-сметной документацией, условиями контракта, действующим законодательством, в том числе требованиям строительных норм и правил, применяемых к данным видам работ: - использование некачественных или иных, не предусмотренных проектной документацией материалов; - несоответствие выполненных работ техническим регламентам, стандартам,

6.           Могли ли на качество выполненных работ подрядчиком по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 повлиять действия третьих лиц или иные обстоятельства?

7.              Соответствует ли качество выполненных работ проектной документации, условиям государственного контракта № 134-11 от 20.08.2021? Если нет, то какие имеются отступления от требований, ухудшающие качество работ?

8.           Какие работы необходимо произвести, для того, чтобы устранить выявленные недостатки (дефекты) внешнего фасада по контракту № 134-11 от 20.08.2021 и какова стоимость работ по устранению указанных недостатков (дефектов)?

Согласно Заключению судебной экспертизы ООО ПЦО «ПРОЭКС» № 1397/10-01-23 от 10.01.2023 эксперта ФИО3, (далее - Экспертиза), причинами возникновения недостатков, выявленных Заказчиком, по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания части карниза (антаблемента внешнего фасада) является нарушение подрядчиком обязательных для него требований, предусмотренных проектно-сметной документацией - использование некачественных или иных, не предусмотренных проектной документацией, материалов; несоответствие выполненных работ техническим регламентам, стандартам.

Также эксперт указывает, что на качество выполнения ООО «ЛИНТ» работ может влиять множественность причин, в том числе использование несоответствующего материала, нарушение технологии материала, невыполнение требований проектно-сметной документации по устройству карнизного свеса крыши (выводы по вопросу № 5).

На качество работ не могли повлиять действия третьих лиц и иные обстоятельства (выводы по вопросу № 6).

Качество работ по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 не соответствует условиям контракта, зафиксированы расслоение и разрушение штукатурного и шпатлевочного слоя, отсутствие адгезии штукатурного и шпатлевочного слоя с основанием (выводы по вопросу № 7).

Вместе с тем, установить виды и объем строительных работ для устранения выявленных дефектов (недостатков) по устройству наружной отделки внешнего фасада на момент проведения исследования невозможно, поскольку для устранения недостатков по гос.контракту № 134-11 от 20.08.2021 необходимо выполнить работы по устранению недостатков работ, выполненных по гос.контракту № 182-11 от 01.09.2020 (увеличить длину карнизного свеса), с разработкой проектной документации в том числе с определением несущей способности кирпичных стен, и определением необходимых видов и объемов работ для увеличения карнизного свеса, также необходимо определить объем и виды работ по полной перекладке разрушенного кирпичного карниза здания, с устройством архитектурных декоративных элементов. После выполнения работ по увеличению длины карнизного свеса и выполнения работ по полной перекладке кирпичного карниза здания, технически возможно определить необходимых объем работ по наружной отделке фасада здания (вопрос 8).

Таким образом, исходя из выводов судебной экспертизы, устранение недостатков выполненных работ по ремонту фасада здания должно решаться комплексно совместно с ремонтом кровли здания Волгоградстата.

Во время судебного разбирательства, в адрес Истца поступило предостережение № ПМ 34220973400002737233 от 03.08.2022 о недопустимости нарушения обязательных требований Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (далее предостережение), согласно которому здание Волгоградстата находится в ненадлежащем техническом состоянии, вследствие обрушения многопрофильного карниза.

Указанным предостережением Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области обязывал Волгоградстат в срок до 15.01.2023 организовать проведение работ по сохранению объекта, в том числе противоаварийные работы с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Во исполнение предостережения Комитета Истцом заключены:

-         Государственный контракт № 132-14 от 21.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций. Стоимость контракта - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Оплачен 26.10.2022 (акт № 132-14 от 26.10.2022).

-         Государственный контракт № 135-14 от 27.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата. Стоимость контракта - 85 500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Оплачен 11.11.2022 (акт от 135-14 от 11.11.2022).

-         Государственный контракт № 177-14 от 02.12.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878 г.» (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата). Стоимость контракта - 263 250 (двести шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Оплачен 08.12.2022 (акт № 177-14 от 08.12.2022).

Согласно выводам ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», изложенным в научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.», расположенное по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Володарского, 1, (капитальный ремонт карниза административного здания), раздел 3 Проект организации реставрации (строительства) 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-ПОС (Том 6), для проведения работ по сохранению объекта, а также противоаварийных работ с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимо произвести ремонтные работы конструкции крыши здания Волгоградстата, а также произвести капитальные ремонтные работы карниза по периметру здания.

Таким образом, Истцом понесены убытки вследствие оплаты трех вышеуказанных государственных контрактов, заключенных во исполнение предостережения Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области о принятии мер по устранению аварийного состояния административного здания Волгоградстата, заключенных с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», на общую сумму 354 750 (триста пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

При этом, как следует из выводов судебной экспертизы, выявленные Заказчиком недостатки и обрушения карниза здания Волгоградстата вызваны некачественно выполненными работами сотрудниками ООО «ЛИНТ».

На основании научно-проектной документации, разработанной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (тома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г., а также проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата, разработанной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», раздел 3 Смета на строительство объекта капитального строительства (капитального ремонта) № 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-СМ (том 7) определена стоимость убытков по проведению капитального ремонта и устранению аварийного состояния объекта капитального строительства (административного здания Волгоградстата), вызванного некачественным выполнением ООО «ЛИНТ» обязательств в рамках исполнения государственных контрактов № 182-11 от 01.09.2020, № 134-11 от 20.08.2021, 173-11 от 12.10.2021 - 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот 0) рублей 00 копеек.

07.02.2023        на электронной торговой площадке Волгоградстатом опубликовано извещение о проведении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Начальная максимальная цена контракта определена проектно-сметным методом на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании научно - проектной документации (включающую сметную стоимость работ), разработанную и утвержденную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.03.2023            между Волгоградстатом и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 34-14 от 14.03.2023 на сумму 4 941 586 (четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) рублей 08 копеек выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>.

09.03.2023          между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 45-14 от 09.03.2023 на сумму 9 684 (девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 95 копеек на проведение авторского надзора и научного руководства за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

09.03.2023          между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 46-14 от 09.03.2023 на сумму 103 628 (сто три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 97 копеек на проведение технического надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Таким образом, Истцом понесены убытки на устранение недостатков работ, в том числе по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021, выполненных Ответчиком.

 

Государственный контракт № 173-11 от 12.10.2021

Между Волгоградстатом и ООО «ЛИНТ» заключен государственный контракт № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего фасада и входной группы объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия) на сумму 5 229 994 руб. 19 коп. (далее - Контракт № 173-11).

Контракт заключен в электронном виде.

Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту кровли подписан сторонами 13.12.2021.

20.12.2021            работы оплачены Волгоградстатом в полном объеме в соответствии с платежным поручением № 713803.

Пункты 6.3, 4.14 Контракта № 173-11 закрепляет срок гарантии на выполненные работы - 5 лет с момента завершения работ, а также обязанность Подрядчика устранить недостатки в период гарантийного срока за свой счет.

Вместе с тем, в течение гарантийного срока выявлены дефекты работы, выполненной Подрядчиком - 5 марта 2022 г. произошло обрушение части конструктивного элемента здания (карниза) со стороны дворового фасада.

Согласно акту Волгоградстата от 05.03.2022, в результате эксплуатации крыши в зимний период произошло сильное обледенение карниза с образованием большого количества сосулек. Под действием веса наледи и сосулек потерялась связь кирпича с основной стеной, что привело к отслоению карниза. Образование наледи явилось следствием некачественного ремонта крыши. Свес кровли, согласно проекта Контракта № 182-11, должен составлять 800 мм от внешней части фасадной стены до края свеса, по факту свес составляет 530-550 мм. В связи с чем, происходит затекание воды с крыши на стену и образование толстого слоя наледи.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных Подрядчиком работ по Контракту № 173-11.

Во исполнение гарантийных обязательств по контракту № 173-11 Волгоградстатом была направлена претензия № НС-12/945 от 11.03.2022 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов кровли и трещин дворового фасада здания, а также восстановления обрушившейся части карниза дворового фасада Волгоградстата. Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80082070022942, получена адресатом 29.03.2022. Срок исполнения претензии истек 11.04.2022.

В связи с неисполнением претензии, Истцом направлена повторная претензия № НС-11/1464 от 12.04.2022 об исполнении гарантийных обязательств по государственным контрактам № 182-11, № 173-11 в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов кровли и трещин дворового фасада здания, а также восстановления обрушившейся части карниза дворового фасада Волгоградстата, уплаты суммы штрафа, неустойки за неисполнение гарантийных обязательств, проведении проверки конструктивного элемента (карниза) по периметру здания во избежание причинения вреда неограниченному кругу лиц, замены двух поврежденных сплит- систем.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером №80081971440589, получена Ответчиком 04.05.2022.

Ответ на претензию в адрес Истца не поступил, Ответчик к исполнению гарантийных обязательств не приступил.

Поскольку гарантийные обязательства не были исполнены Подрядчиком добровольно, у Заказчика возникло право требования уплаты суммы штрафа за неисполнение обязательств и неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 173-11.

Разделом 7 Контракта № 173-11 установлены условия ответственности сторон.

Согласно пункту 7.5 Контракта № 173-11 у Истца имеется право требовать уплаты суммы штрафа в размере 5 000 рублей за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных.

Как следует из исследовательской части вопроса № 7 судебной экспертизы, проведенной ООО ПЦО «ПРОЭКС» № 1397/10-01-23 от 10.01.2023, экспертом ФИО3, карнизный свес - выступ крыши от стены, защищающий ее от стекающей дождевой или талой воды. При фактической длине карнизного свеса кровли здания Волгоградстата, не выполняется защиты стен от воздействия природных осадков (страница 89 судебной экспертизы).

Поскольку карнизный свес крыши не соответствует проектному значению по всему периметру здания Волгоградстата, можно сделать вывод, что весь карниз здания Волгоградстата по периметру не защищен от воздействия природных осадков и, как следствие, подвержен разрушению.

Во время судебного разбирательства, в адрес Истца поступило предостережение № ПМ 34220973400002737233 от 03.08.2022 о недопустимости нарушения обязательных требований Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (далее - предостережение), согласно которому здание Волгоградстата находится в ненадлежащем техническом состоянии, вследствие обрушения многопрофильного карниза.

Указанным предостережением Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области обязывал Волгоградстат в срок до 15.01.2023 организовать проведение работ по сохранению объекта, в том числе противоаварийные работы с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Во исполнение предостережения Комитета Истцом заключены:

-         Государственный контракт № 132-14 от 21.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций. Стоимость контракта — 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Оплачен 26.10.2022 (акт № 132-14от 26.10.2022).

-         Государственный контракт № 135-14 от 27.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата. Стоимость контракта - 85 500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Оплачен 11.11.2022 (акт от 135-14 от 11.11.2022).

-         Государственный контракт № 177-14 от 02.12.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878 г.» (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата). Стоимость контракта - 263 250 (двести шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Оплачен 08.12.2022 (акт № 177-14 от 08.12.2022).

Согласно выводам ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», изложенным в научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.», расположенное по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Володарского, 1, (капитальный ремонт карниза административного здания), раздел 3 Проект организации реставрации (строительства) 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-ПОС (Том 6), для проведения работ по сохранению объекта, а также противоаварийных работ с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимо произвести ремонтные работы конструкции крыши здания Волгоградстата, а также произвести капитальные ремонтные работы карниза по периметру здания.

На основании научно-проектной документации, разработанной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (тома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г., а также проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата, разработанной

ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», раздел 3 Смета на строительство объекта капитального строительства (капитального ремонта) № 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-СМ (том 7) определена стоимость убытков по проведению капитального ремонта и устранению аварийного состояния объекта капитального строительства (административного здания Волгоградстата), вызванного некачественным выполнением ООО «ЛИНТ» обязательств в рамках исполнения государственных контрактов № 182-11 от 01.09.2020, № 134-11 от 20.08.2021, 173-11 от 12.10.2021 - 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

07.02.2023        на электронной торговой площадке Волгоградстатом опубликовано извещение о проведении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Начальная максимальная цена контракта определена проектно-сметным методом на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании научно - проектной документации (включающую сметную стоимость работ), разработанную и утвержденную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.03.2023            между Волгоградстатом и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 34-14 от 14.03.2023 на сумму 4 941 586 (четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) рублей 08 копеек выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>.

09.03.2023          между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 45-14 от 09.03.2023 на сумму 9 684 (девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 95 копеек на проведение авторского надзора и научного руководства за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

09.03.2023          между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 46-14 от 09.03.2023 на сумму 103 628 (сто три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 97 копеек на проведение технического надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Таким образом, Истцом понесены убытки на устранение недостатков работ, в том числе по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021, выполненных Ответчиком.

 

Государственный контракт № 138-11 от 25.08.2021

Между Волгоградстатом и ООО «ЛИНТ» заключен государственный контракт № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 346 066 руб. 80 коп. (далее - Контракт №138-11).

Контракт заключен в электронном виде.

Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту кровли подписан сторонами 13.12.2021.

16.12.2021            работы оплачены Волгоградстатом в полном объеме в соответствии с платежным поручением № 655872.

Согласно пункту 5.12 Контракта № 138-11 гарантийный срок качества выполненных работ составляет 3 года с момента завершения работ, в течении которого Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недостатки) за свой счет.

Согласно акту Волгоградстата от 10.01.2022, в течение гарантийного срока выявлены дефекты работ, выполненных Подрядчиком - 10 января 2022 г. выявлена не герметичность конструкций входной группы № 1 и № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата, в результате чего происходит затопление входных групп - протекание и скопление осадков на полу.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных Подрядчиком работ по Контракту № 138-11.

В рамках исполнения гарантийных обязательств во исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту №№ 138-11 Волгоградстатом направлена претензия № НС-12/944 от 11.03.2022 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов входных групп № 1 и № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата, устранения дефектов стеклопакетов во внутренних кабинетах № 55 и № 64 административно-производственного здания Волгоградстата.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80082070022942, получена адресатом 29.03.2022. Срок исполнения претензии истек 11.04.2022.

В связи с неисполнением претензии, Истцом направлена повторная претензия № НС-11/1463 от 12.04.2022 об исполнении гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов входных групп № 1 и № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в соответствии с условиями контракта № 138-11.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80081971440589, получена Ответчиком 04.05.2022.

Поскольку гарантийные обязательства не были исполнены Подрядчиком добровольно, у Заказчика возникло право требования уплаты суммы штрафа за неисполнение обязательств по гконтракту № 138-11. 

Разделом 8 Контракта № 138-11 установлены условия ответственности сторон.

Согласно п. 8.5 Контракта № 138-11 за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, устанавливается штраф в размере 10% цены контракта.

Таким образом, штраф 10% за неисполнение обязательств по контракту № № 138-11 исчисляется следующим образом:

Контракт № 138-11 на сумму 346 066 руб. 80 коп. * 10% = сумма штрафа 34 606,68 руб.

 

Государственный контракт № 139-11 от 25.08.2021

Между Волгоградстатом и ООО «ЛИНТ» заключен государственный контракт № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата на сумму 470 478 руб. 00 коп. (далее - Контракт №139-11).

Контракт заключен в электронном виде.

Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту кровли подписан сторонами 13.12.2021.

16.12.2021               работы оплачены Волгоградстатом в полном объеме в соответствии с платежным поручением № 655877.

Согласно пункту 5.12 Контракта № 139-11 гарантийный срок качества выполненных работ составляет 3 года с момента завершения работ, в течении которого Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недостатки) за свой счет.

Согласно акту Волгоградстата от 10.01.2022, в течение гарантийного срока выявлены дефекты работ, выполненных Подрядчиком - 10 января 2022 г. выявлена не герметичность конструкций входной группы № 1 и № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата, в результате чего происходит затопление входных групп - протекание и скопление осадков на полу.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных Подрядчиком работ по Контракту № 139-11.

В рамках исполнения гарантийных обязательств во исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 Волгоградстатом была направлена претензия № НС- 12/944 от 11.03.2022 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов входных групп № 1 и № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80082070022942, получена адресатом 29.03.2022. Срок исполнения претензии истек 11.04.2022.

В связи с неисполнением претензии, Истцом направлена повторная претензия № НС-11/1463 от 12.04.2022 об исполнении гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов входных групп № 1 и № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в соответствии с условиями контракта № 139-11; уплаты сумм штрафов и неустоек в связи с неисполнением гарантийных обязательств.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80081971440589, получена Ответчиком 04.05.2022.

Поскольку гарантийные обязательства не были исполнены Подрядчиком добровольно, у Заказчика возникло право требования уплаты суммы штрафа за неисполнение обязательств по контракту № 139-11 от 25.08.2021.

Разделом 8 Контракта № 139-11 установлены условия ответственности сторон.

Согласно п. 8.5 Контракта № 139-11 за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, устанавливается штраф в размере 10% цены контракта.

Таким образом, штраф 10% за неисполнение обязательств по контракту № 139-11 исчисляется следующим образом:

Контракт № 139-11 на сумму 470 478 руб. 00 коп. * 10% = сумма штрафа 47 047,8 руб.

 

Государственный контракт № 143-11 от 25.08.2021

Между Волгоградстатом и ООО «ЛИНТ» заключен государственный контракт № 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков в кабинетах № 55, 69, на лестничной клетке между

2 и 2 этажами) на сумму 558 306 руб. 00 коп. (далее - Контракт № 143-11).

Контракт заключен в электронном виде.

Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту кровли подписан сторонами 13.12.2021.

16.12.2021            работы оплачены Волгоградстатом в полном объеме в соответствии с платежным поручением № 655869.

Согласно пункту 5.12 Контракта № 143-11 гарантийный срок качества выполненных работ составляет 3 года с момента завершения работ, в течении которого Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недостатки) за свой счет.

Согласно акту Волгоградстата от 10.03.2022, в течение гарантийного срока выявлены дефекты работ, выполненных Подрядчиком - 10 марта 2022 г. при осмотре внутренних помещений выявлены трещины в стеклопакетах в кабинетах № 55 и № 64.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных Подрядчиком работ по Контракту № 143-11.

В рамках исполнения гарантийных обязательств во исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 143-11 Волгоградстатом была направлена претензия № НС- 12/944 от 11.03.2022 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов стеклопакетов во внутренних кабинетах № 55 и № 64 административно-производственного здания Волгоградстата.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80082070022942, получена адресатом 29.03.2022. Срок исполнения претензии истек 11.04.2022.

В связи с неисполнением претензии, Истцом направлена повторная претензия № НС-11/1463 от 12.04.2022 об исполнении гарантийных обязательств по государственному контракту № 143-11 в течении 10 дней со дня получения претензии: устранение дефектов работы по замене стеклопакетов путем замены оконных блоков во внутренних кабинетах № 55 и № 64 административно-производственного здания Волгоградстата в соответствии с условиями Контрактов № 127-11 и № 143-11; уплаты сумм штрафов и неустоек в связи с неисполнением гарантийных обязательств.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80081971440589, получена Ответчиком 04.05.2022.

Поскольку гарантийные обязательства не были исполнены Подрядчиком добровольно, у Заказчика возникло право требования уплаты суммы штрафа за неисполнение обязательств по контракту № 143-11 от 25.08.2021.

Разделом 8 Контракта № 143-11 установлены условия ответственности сторон.

Согласно п. 8.5 Контракта № 143-11 за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, устанавливается штраф в размере 10% цены контракта.

Таким образом, штраф 10% за неисполнение обязательств по контракту № 143-11 исчисляется следующим образом:

Контракт № 143-11 на сумму 558 306 руб. 00 коп. * 10% = сумма штрафа 55 830,6 руб.

В процессе судебного разбирательства, Ответчиком были произведены работы по замене поврежденных оконных блоков, в связи с чем Истец настаивает только на взыскании суммы штрафа за отказ от исполнения гарантийных обязательств в добровольном порядке после получения первой претензии от Истца исх. № НС-12/944 от 11.03.2022 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии, полученной Ответчиком 29.03.2022.

 

Государственный контракт № 127-11 от 20.08.2021

Между Волгоградстатом и ООО «ЛИНТ» заключен государственный контракт № 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков в кабинетах № 63, 64, 65, 66, 67, 68) на сумму 599 773 руб. 20 коп. (далее - Контракт № 127-11).

Контракт заключен в электронном виде.

Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту кровли подписан сторонами 13.12.2021.

16.12.2021            работы оплачены Волгоградстатом в полном объеме в соответствии с платежным поручением № 655883.

Согласно пункту 5.12 Контракта № 127-11 гарантийный срок качества выполненных работ составляет 3 года с момента завершения работ, в течении которого Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недостатки) за свой счет.

Согласно акту Волгоградстата от 10.03.2022, в течение гарантийного срока выявлены дефекты работ, выполненных Подрядчиком - 10 марта 2022 г. при осмотре внутренних помещений выявлены трещины в стеклопакетах в кабинетах № 55 и № 64.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных Подрядчиком работ по Контракту № 127-11.

В рамках исполнения гарантийных обязательств во исполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 127-11 Волгоградстатом была направлена претензия № НС- 12/944 от 11.03.2022 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии: устранения дефектов стеклопакетов во внутренних кабинетах № 55 и № 64 административно-производственного здания Волгоградстата.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80082070022942, получена адресатом 29.03.2022. Срок исполнения претензии истек 11.04.2022.

В связи с неисполнением претензии, Истцом направлена повторная претензия № НС-11/1463 от 12.04.2022 об исполнении гарантийных обязательств по государственному контракту № 127-11 в течении 10 дней со дня получения претензии: устранение дефектов работы по замене стеклопакетов путем замены оконных блоков во внутренних кабинетах № 55 и № 64 административно-производственного здания Волгоградстата в соответствии с условиями Контрактов № 127-11 и № 143-11; уплаты сумм штрафов и неустоек в связи с неисполнением гарантийных обязательств.

Претензия направлена почтовым отправлением с идентификационным номером № 80081971440589, получена Ответчиком 04.05.2022.

Поскольку гарантийные обязательства не были исполнены Подрядчиком добровольно, у Заказчика возникло право требования уплаты суммы штрафа за неисполнение обязательств по контракту № 127-11.

Разделом 8 Контракта № 127-11 установлены условия ответственности сторон.

Согласно п. 8.5 Контракта № 127-11 за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, устанавливается штраф в размере 10% цены контракта.

Таким образом, штраф 10% за неисполнение обязательств по контракту № 127-11 исчисляется следующим образом:

Контракт №127-11 на сумму 599 773 руб. 20 коп.* 10% = сумма штрафа 59 977,3 руб.

В процессе судебного разбирательства, Ответчиком были произведены работы по замене поврежденных оконных блоков, в связи с чем Истец настаивает только на взыскании суммы штрафа за отказ от исполнения гарантийных обязательств в добровольном порядке после получения первой претензии от Истца исх. № НС-12/944 от 11.03.2022 об исполнении гарантийных обязательств в течении 10 дней со дня получения претензии, полученной Ответчиком 29.03.2022.

В силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В рамках гарантийного срока существует презумпция вины подрядчика в некачественном выполнении работ. Бремя доказывания обстоятельств того, что недостатки работ возникли после передачи результата работы Истцу или по причинам, зависящим от Истца, лежит на Ответчике. Подобных доказательств Ответчиком не представлено.

На основании изложенного, требования Истца о понуждении Ответчика устранить недостатки работ, выполненных по государственным контрактам № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата и № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата, а также взыскания сумм штрафа за и сумм неустойки за просрочку исполнения гарантийных обязательств, подлежащими удовлетворению.

Требования истца о взыскании сумм штрафа за неисполнение гарантийных обязательств по государственным контрактам № 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков) и № 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков), также подлежат удовлетворению.

Статья 12 ГК РФ предусматривает в качестве одного из способов защиты гражданских прав присуждение к исполнению обязанностей в натуре.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать выплаты неустойки в соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения обязательства.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с частью 6 статьи 34 ФЗ № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате пени.

Частью 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вместе с тем, в нарушение положений Контрактов № 182-11, № 134-11, № 173-11 дефекты не были устранены Подрядчиком в добровольном порядке в рамках исполнения гарантийных обязательств, что влечет за собой право Заказчика требовать уплаты штрафов, а также выплаты неустойки.

Расчет штрафа по контрактам судом проверен, признан верным. Право истца на взыскание штрафа ответчиком не оспаривается.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера штрафа на основании ст. 333 ГК РФ. 

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки сумме возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. 

В соответствии с разъяснениями, указанными в пункте 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

Согласно пунктам 74, 75 Постановления N 7 возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.). При этом при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О изложена правовая позиция, согласно которой суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. 

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд, принимая во внимание фактические обстоятельства, учитывая компенсационную природу штрафа, не усматривает оснований для его снижения. 

В силу статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 722 ГК РФ,  в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В соответствии с п. 1,3 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-  соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

-  возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Согласно положениям ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Согласно пункту 1 статьи 393 Гражданского кодекса должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Исходя из смысла статей 15 и 393 Гражданского кодекса РФ для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего в себя наступление вреда и его размер, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между возникшим вредом и действиями указанного лица, а также вину причинителя вреда. Требование о возмещении вреда может быть удовлетворено только при доказанности всех названных элементов в совокупности.

В силу правовой позиции, сформированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. по делу № 310-ЭС14-142, А14-4486/2013 (Судебная коллегия по экономическим спорам), для применения гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков суду необходимо установить состав правонарушения, включающий наступление вреда, вину причинителя вреда, противоправность поведения причинителя вреда, наличие причинно- следственной связи между действиями причинителя вреда и наступившими у истца неблагоприятными последствиями, а также размер ущерба.

Требуя возмещения реального ущерба, лицо, право которого нарушено, обязано доказать размер ущерба, причиненную связь между ущербом и действиями лица, нарушившего право, а в случаях когда законом или договором предусмотрена презумпция невиновности должника - также вину.

На основании изложенного, учитывая выводы судебной экспертизы, суд считает доказанными вину, а также причинно-следственную связь между возникшим у Истца ущербом (понесенными убытками), а также расходами на устранение третьими лицами недостатков работ, выполненных ООО «ЛИНТ», и действиями (бездействием) ООО «ЛИНТ», выразившимися исполнении работ по государственным контрактам № 182-11 от 01.09.2020 (ремонт кровли), № 134-11 от 20.08.2021 (ремонт части внешнего фасада - антаблемента), № 173-11 от 12.10.2021 (ремонт внутреннего фасада), не отвечающим требованиям качества и условиям проектной документации, а также в уклонении Исполнителя от исполнения гарантийных обязательств.

Как следует из исследовательской части вопроса № 7 судебной экспертизы, проведенной ООО ПЦО «ПРОЭКС» № 1397/10-01-23 от 10.01.2023, экспертом ФИО3, карнизный свес

-  выступ крыши от стены, защищающий ее от стекающей дождевой или талой воды. При фактической длине карнизного свеса кровли здания Волгоградстата, не выполняется защиты стен от воздействия природных осадков (страница 89 судебной экспертизы).

Поскольку карнизный свес крыши не соответствует проектному значению по всему периметру здания Волгоградстата, можно сделать вывод, что весь карниз здания Волгоградстата по периметру не защищен от воздействия природных осадков и, как следствие, подвержен разрушению.

Также, согласно выводам судебной экспертизы, причинами выявленных недостатков - протекание крыши, обрушение внешней части фасада здания Волгоградстата, являются некачественно выполненные ООО «ЛИНТ» работы по государственным контрактам № 134-11 от 20.08.2021, № 182-11 от 01.09.2020.

Таким образом, у истца имеются основания требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков работ по ремонту крыши и карниза здания в соответствии с положениями статей 397, 723 ГК РФ.

Во время судебного разбирательства, в адрес Истца поступило предостережение № ПМ 34220973400002737233 от 03.08.2022 о недопустимости нарушения обязательных требований Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, согласно которому здание Волгоградстата находится в ненадлежащем техническом состоянии, вследствие обрушения многопрофильного карниза.

Указанным предостережением Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области обязывал Волгоградстат в срок до 15.01.2023 организовать проведение работ по сохранению объекта, в том числе противоаварийные работы с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Во исполнение предостережения Комитета Истцом заключены:

-         Государственный контракт № 132-14 от 21.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций. Стоимость контракта - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Оплачен 26.10.2022 (акт № 132-14 от 26.10.2022).

-         Государственный контракт № 135-14 от 27.09.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата. Стоимость контракта - 85 500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Оплачен 11.11.2022 (акт от 135-14 от 11.11.2022).

-         Государственный контракт № 177-14 от 02.12.2022 с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г. (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата). Стоимость контракта - 263 250 (двести шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Оплачен 08.12.2022 (акт№ 177-14 от 08.12.2022).

Согласно выводам ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», изложенным в научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.», расположенное по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Володарского, 1, (капитальный ремонт карниза административного здания), раздел 3 Проект организации реставрации (строительства) 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-ПОС (Том 6), для проведения работ по сохранению объекта, а также противоаварийных работ с соблюдением обязательных требований статьи 45 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимо произвести ремонтные работы конструкции крыши здания Волгоградстата, а также произвести капитальные ремонтные работы карниза по периметру здания.

На основании научно-проектной документации, разработанной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (тома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г., а также проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата, разработанной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», раздел 3 Смета на строительство объекта капитального строительства (капитального ремонта) № 177-14-В-ПСД-ОКН-2022-СМ (том 7) определена стоимость убытков по проведению капитального ремонта и устранению аварийного состояния объекта капитального строительства (административного здания Волгоградстата), вызванного некачественным выполнением ООО «ЛИНТ» обязательств в рамках исполнения государственных контрактов № 182-11 от 01.09.2020, № 134-11 от 20.08.2021, 173-11 от 12.10.2021 - 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

07.02.2023   на электронной торговой площадке Волгоградстатом опубликовано извещение о проведении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Начальная максимальная цена контракта определена проектно-сметным методом на выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании научно - проектной документации (включающую сметную стоимость работ), разработанную и утвержденную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.03.2023       между Волгоградстатом и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 34-14 от 14.03.2023 на сумму 4 941 586 (четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) рублей 08 копеек выполнение работ по капитальному ремонту карниза административного здания объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия), расположенного по адресу: 

<

...>.

09.03.2023     между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 45-14 от 09.03.2023 на сумму 9 684 (девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 95 копеек на проведение авторского надзора и научного руководства за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

09.03.2023     между Волгоградстатом и ООО «РЕНОВАЦИО» заключен государственный контракт № 46-14 от 09.03.2023 на сумму 103 628 (сто три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 97 копеек на проведение технического надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878г.».

Таким образом. Истцом понесены убытки на устранение недостатков работ по государственным контрактам № 182-11 от 01.09.2020 (ремонт кровли), № 134-11 от 20.08.2021 (ремонт части внешнего фасада - антаблемента). № 173-11 от 12.10.2021 (ремонт внутреннего фасада), выполненных Ответчиком в размере 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

Согласно заключению судебной экспертизы № 1397/10-01-23 от 10.01.2023 ООО ПЦО «ПРОЭКС» (эксперт ФИО3) причинами выявленных Истцом недостатков по государственным контрактам № 182-11 от 01.09.2020 и № 134-11 от 20.08.2021 является некачественно выполненные работы ООО «ЛИНТ». Вместе с тем, установить виды и объем строительных работ для устранения выявленных дефектов (недостатков) по устройству наружной отделки фасада на момент проведения исследования невозможно, равно как не представилось возможным установить на момент проведения экспертизы необходимые виды, объем и стоимость ремонтных работ для устранения недостатков (дефектов) кровли по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020, поскольку для определения затрат на устранения недостатков по государственным контрактам № 182-11 от 01.09.2020 и № 134-11 от 20.08.2021 необходимо выполнить работы по устранению недостатков работ, выполненных по контракту № 182-11 от 01.09.2020 (увеличить длину карнизного свеса), а также в связи с необходимостью разработки проектной документации с определением, в том числе, несущей способности кирпичных стен, установления возможности устройства дополнительной нагрузки в виде увеличенной длины карнизного свеса (выводы по вопросам № 4, 7).

В соответствии со статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

При этом суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Из пункта 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Стороны о назначении дополнительной судебной экспертизы не заявляли. 

Оснований для непринятия результатов судебной экспертизы № 1397/10-01-23, выполненной ООО ПЦО «ПРОЭКС», экспертом ФИО3 по мотиву недопустимости, а также для критической оценки заключения, у суда не имеется, недостоверность экспертизы сторонами не доказана. 

Исследовав и оценив выводы эксперта, суд приходит к выводу о возможности принятия экспертного заключения в качестве надлежащего доказательства (статьи 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности указанного заключения эксперта, а равно о необходимости назначения дополнительной или повторной экспертизы судом не установлено. 

Вместе с тем, Истцом во исполнение предостережения Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области о принятии мер по устранению аварийного состояния административного здания Волгоградстата, заключены государственные контракты:

на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций;

на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата;

на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление), 1878 г.» (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата), по результатам которых определена стоимость устранения недостатков.

Таким образом, требования Истца о взыскании с Ответчика стоимости затрат в размере 5 054 900 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей на устранение недостатков работ по государственным контрактам № 182-11 от 01.09.2020 (ремонт кровли), № 134-11 от 20.08.2021 (ремонт части внешнего фасада - антаблемента), № 173-11 от 12.10.2021 (ремонт внутреннего фасада), выполненных Ответчиком, подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Согласно статье 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможности эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

Предельный срок обнаружения недостатков по договорам подряда по правилам статьи 756 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет пять лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные данной статьей.  

По смыслу названых правовых норм, в пределах гарантийного срока устанавливается презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленные в пределах гарантийного срока.

Иными словами, в случае заявления заказчиком о недостатках работы, обнаруженных в пределах срока гарантии подрядчика, бремя доказывания возникновения недостатков по основаниям, не связанным с действиями подрядчика, возлагается на последнего.

В силу части 5 статьи 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Иными словами, в случае заявления заказчиком о недостатках работы, обнаруженных в пределах срока гарантии подрядчика, бремя доказывания возникновения недостатков по основаниям, не связанным с действиями подрядчика, возлагается на последнего.

Доказательств устранения в полном объеме выявленных дефектов в материалы дела не представлено.

Ответчиком вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ не представило суду достоверных доказательств того, что указанные выше дефекты произошли не по его вине, что могло служить основанием для освобождения подрядчика от ответственности по правилам пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Судебным экспертом определен объем работ по устранению недостатков отделки

Установив факт наличия дефектов в выполненных обществом работах, выявленных в пределах гарантийного срока, суд пришел к выводу о правомерности требований истца об исполнении ответчиком взятых на себя обязательств по соблюдению гарантийных сроков и устранению дефектов выполненных работ. 

Таким образом, требования истца о понуждении Ответчика устранить недостатки, возникшие в результате затопления кабинета № 28, поскольку, как следует из выводов судебной экспертизы, причиной затопления кабинета явилось некачественное выполнение ООО «ЛИНТ» работ по ремонту кровли здания Волгоградстата по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 обоснованы и подлежат удовлетворению.

С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление в корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Волгоградстатом понесены судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 79 200 руб. (платежное поручение № 662732 от 16.09.2022).

Расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и взыскиваются в доход федерального бюджета Российской Федерации, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска. 

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Принять отказ от иска в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области:

- убытков в размере оплаты работ по Государственному контракту № 132-14 от 21.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных конструкций в размере 60 000 руб.,  

- убытков в размере оплаты работ по Государственному контракту № 135-14 от 27.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания Волгоградстата в размере 85 500 руб., 

- убытков в размере оплаты работ по Государственному контракту № 177-14 от 02.12.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное статистическое управление)», 1878 г. (капитальный ремонт карниза административного здания Волгоградстата) в размере 263 250 руб., 

- неустойки (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 303 488,05 руб., за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия),

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия)

- неустойки (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 40 781,89  руб., за просрочку исполнения гарантийных обязательств гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния,

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283 руб. 00 коп.,

- неустойки (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 548 239,49 руб. за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия),

- неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия),

- неустойки (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 30 453,88 руб. за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата,

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата,

- неустойки (пени) за период с 12.04.2022  по 29.03.2023 в размере 41 402, руб. за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата,

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата.

Производство по делу №А12-12279/2023 в данной части прекратить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ»  (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств в течении одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу устранить недостатки (дефекты) работ, а именно:

- устранить дефекты входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата;

- устранить дефекты входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ»  (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств в течении одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу устранить недостатки отделки внутреннего кабинета № 28 в виде:

А) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних оконных откосов на площади 4,3 м2:

6)   Демонтаж оконных откосов из ГКЛ (без демонтажа металл. профилей) – 4,3 м2;

7)   Обработка поверхности внутреннего оконного откоса антисептическими растворами для устранения образования грибка – 4,3 м2;

8)   Устройство оконных откосов из листов ГКЛ (без установки металл. профилей) – 4,3 м2;

9)   Шпатлевание поверхности листов из ГКЛ (выравнивание поверхности под окраску) – 4,3 м2;

10)                  Окраска внутренних оконных откосов – 4,3 м2;

Б) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки наружных оконных откосов на площади 4,3 м2:

5)   Очистка поверхности оконных откосов от следы плесени металлической щеткой – 1 м2;

6)   Обработка поверхности наружного оконного откоса антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка – 1 м2;

7)   Шпатлевание поверхности оконных откосов (после воздействия металлической щеткой) – 1 м2;

8)   Окраска поверхности оконных откосов – 1 м2.

В) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних стен и потолка в помещении № 28 на площади 6,4 м2 необходимо выполнить следующие работы:

5)        Очистка поверхности стен и потолка от следов плесени металлической щеткой – 6,4 м2;

6)        Обработка поверхности стен и потолка антисептическими растворами для устранения возможного образования грибка – 6,4 м2;

7)        Шпатлевание поверхности стен и потолка (после воздействия металлической щеткой) – 6,4 м2;

8)         Окраска поверхности стен и потолка – 6,4 м2.

Взыскать общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ»  (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Территориального орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>):

- убытки в размере стоимости  возмещения расходов на устранение недостатков работ, выполненных ООО «ЛИНТ», в размере 5 054 900 руб.  (размер стоимости трех государственных контрактов № 34-14  от 14.03.2023, № 45-14 от 09.03.2023, № 46-14 от 09.03.2023, заключенных Волгоградстатом  с ООО «РЕНОВАЦИО»).

- штраф в размере 5 000 руб. за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия)

- штраф в размере 34 606,68 руб. за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата

- штраф в размере 47 047 руб. 8 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы  № 1 внутреннего двора административного здания Волгоградстата

- штраф в размере 55 830 руб. 6 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков)

- штраф в размере 59 977 руб. 3 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата (замена оконных блоков)

- штраф в размере 5 000 руб. за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия)

- штраф в размере 42 928 руб. 30 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания

- судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 79 200 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ»  (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 55 922 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                             Стрельникова Н.В.