ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дело № А40-91297/23

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 31 января 2024 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Бодровой Е.В., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2023г. (резолютивная часть от 24.10.2023г.) по делу № А40-91297/23 

по иску ООО            "АСПЕКТ" (ОГРН:5067746907124)          

к ООО "КАКОМ" (ОГРН: 

<

***>) о взыскании, 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 19.10.2023, ФИО3 по доверенности от 15.01.2024,

от ответчика: ФИО4 по приказу №02Гд от 31.03.2022 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "АСПЕКТ" (заказчик) предъявило  ООО "КАКОМ" (подрядчик) иск о взыскании неотработанного аванса в размере 2 329 044 руб. 82 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами с 25.04.2023 года по день фактического исполнения обязательства, неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 528 158 руб. 89 коп., неустойки за нарушение сроков устранения недостатков в размере 8 421 000 руб., убытков в размере 7 969 211 руб. 00 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 24.10.2023г., изготовленным в полном объеме 27.10.2023г. исковые требования удовлетворены частично.

Суд взыскал с ООО "КАКОМ" в пользу ООО "АСПЕКТ" неосновательное обогащение в размере 2 329 044 руб. 82 коп., проценты в размере 111 730 руб. 34 коп., дальнейшее начисление процентов производить на сумму 2 329 044 руб. 82 коп. по правилам ст. 395 ГК РФ, начиная с 25.10.2023 до фактической оплаты, неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 528 158 руб. 89 коп., неустойку за нарушение срока устранения недостатков в размере 742 000 руб., убытки в размере 7 969 211 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 72 273 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

В судебное заседание суда апелляционной инстанции явились Истец и Ответчик; заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает мировое соглашение подлежащим принятию судом, а производство по апелляционной жалобе – прекращению.

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное ООО "АСПЕКТ" (Истец) и ООО "КАКОМ" (Ответчик) по делу № А40-91297/23 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:

«Общество с ограниченной ответственностью «Аспект», в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, далее именуемое «Истец, Сторона 1» и общество с ограниченной ответственностью «КаКом», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, далее именуемое «Ответчик, Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1.На дату составления настоящего мирового соглашения Сторона 2 имеет перед Стороной 1 задолженность в размере 2 329 044 (два миллиона триста двадцать девять тысяч сорок четыре 82/100) рублей неотработанного аванса.

2.Также Сторона 2 имеет перед Стороной 1 задолженность в размере 7 969 211 (семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести одиннадцать) рублей в счет понесенных Стороной 1 из ненадлежащего исполнения Стороной 2 обязательств по договору подряда № АС.ПЖ.9/2021 от 28.06.2021 (Договор) убытков;

3.Сторона 2 имеет перед Стороной 1 задолженность в размере 1 381 889 (один миллион триста восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят девять 23/100) рублей, из них: 111 730 руб. 34 коп. - проценты на сумму неотработанного аванса (п.1 Соглашения); 528 158 руб. 89 коп. - неустойка за нарушение сроков выполнения по Договору (п. 11.2.1. Договора); 742 000 руб. - неустойка за нарушение срока устранения недостатков (п. 11.2.11 Договора);

4.Стороны договорились, что задолженность, указанная в пунктах 1, 2 и 3 Соглашения, погашается Стороной 2 путем выполнения дополнительных работ по Договору в следующем порядке:

а. В срок до «30» апреля 2024 года изготовить и установить накрывочную крышку (площадь 2, 4 м2) на балконе 6 этажа - секция Могамбо (Дворовой фасад. Оси 8-9/Е., запасной выход на кровлю);

b. В срок до «30» апреля 2024 года изготовить и установить 38 метров погонных декоративных уголков, окрашенных в цвет накладок на рамы, в местах примыкания оконного и дверного блоков к кирпичным откосам на 1 этаже корпуса Могамбо. (Фронтальный фасад. Оси 8-12/К-П);

с. В срок до «30» апреля 2024 года изготовить и установить накрывочную гранитную крышку (площадь 12 м2, толщина гранита 20 мм) на эвакуационном спуске в гараж (Стилобатная часть. Оси В - Г/Ось 1а);

d. В срок до «30» апреля 2024 года изготовить и установить 5.6 метров погонных отливов (натуральный известняк) в корпусе Альберт (центральный фасад. Оси 6-7/К);

е. В срок до «20» мая 2024 года произвести устройство навеса кровли (площадь 102 м*2) на деревянном каркасе на террасе 3 этажа на металлических балочных конструкциях коттеджа в поселке ОК «Бор» (адрес: МО, г.о. Домодедово, д. Одинцово, тер. ОК «Бор», коттедж).

5.Стороны договорились, что в случае однократного нарушения Стороной 2обязательств по мировому соглашению (полное или частичное невыполнение указанного объема работ, нарушение срока выполнения работ на срок более десяти дней), Сторона 2 обязуется оплатить неустойку в размере 0,01 % от суммы, определенной пунктами 1 и 2 настоящего соглашения. Указанные денежные средства Сторона 2 должна перечислить на расчетный счет Стороны 1, по реквизитам, указанным в мировом соглашении, в течение 30 рабочих дней с даты поступления требования Стороны 1 о такой выплате.

6.В случае неисполнения Стороной 2 обязательств по данному мировому соглашению Сторона 1 вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание со Стороны 2 указанных в пунктах 1 и 2 мирового соглашения сумм (ч.2 ст. 142 АПК РФ).

7.Оплата неустойки по настоящему мировому соглашению производитсяСтороной 2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1 по следующим реквизитам:   р/с   

<

***>   Дополнительный   офис   "Московский" АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» к/с 30101810800000000701, БИК 042406701.

В графе назначение платежа платежного поручения следует указывать: «оплата по мировому соглашению по делу № А40-91297/2023».

8.Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

9.Настоящее мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы в соответствии со статьей 141 АПК РФ.

10.Последствия заключения настоящего Соглашения, предусмотренные пунктом 13 статьи 141 АПК РФ, сторонам понятны.

11.Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах: первый экземплярприобщается к материалам дела А40-91297/2023; второй экземпляр - ООО «Аспект»; третий экземпляр - ООО «КаКом»». 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2023г. (резолютивная часть от 24.10.2023г.) по делу № А40-91297/23 отменить.

Производство по делу прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                        Е.Е. Кузнецова

 

Судьи                                                                                                 О.Н. Семикина 

 

                                                                                                            Е.В. Бодрова     

 

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.