АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-2619/2021

г. Ярославль

18 августа 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена  22 июля 2021 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Лапочкиной И.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Промтерра" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Химпромпроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   3810000.00  руб.,

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Химпромпроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Промтерра" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о взыскании 195200.00 руб.

при участии:

от истца - ФИО2 по доверенности от 11.06.2021 года и диплому 

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 01.06.2020 года и диплому 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Промтерра" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Химпромпроект" о   взыскании   3 810 000  руб.

Определением суда от 24.05.2021 к производству принят встречный иск общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Химпромпроект" к обществу с ограниченной ответственностью "Промтерра" о взыскании 195200 руб.

В судебном заседании истец по первоначальному иску исковые требования поддержал, ответчик сумму долга не оспаривал, поддержал встречные исковые требования. Ответчик заявил ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ, истец возражал.

В ходе судебного разбирательства ответчик по первоначальному иску представил письменный отзыв, указал, что не согласен с расчетом пени истца, представил контррасчет.

Ответчик по встречному иску представил письменный отзыв, в котором указал, что ООО ПСК «Химпромпроект» не доказан факт нарушения обязательства по договору № ПТ-02-417-И от 07.02.2020, им не указано, когда именно были переданы в распоряжение ООО «Промтерра» необходимые для начала работ исходные данные в утвержденном техническом задании. ООО «Промтерра» представило доказательства получения таких данных и выполнения всех работ в срок, указанный договором.

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ был объявлен перерыв до 22 июля 2021 года до 15 час. 50 мин. 

После перерыва дело рассматривается судом без участия представителей сторон в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и представленные документы, выслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующее.

07 февраля 2020 года между ООО «Промтерра» и ООО Проектно-строительная компания «ХимПромПроект» заключен договор № ПТ-02-417-И, в соответствии с п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания изыскания на объектах: «Создание единой производственной площадки ФГУП «ЦЭНКИ» на земельном участке 

<

...>», «Строительство корпуса испытательного стенда ФГУП «ЦЭНКИ», расположенных по адресу: 

<

...> и представить результаты в соответствии с настоящим Договором Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Основной состав, объем, исходные данные и другие технические требования к работам определяются Техническим заданием к настоящему Договору (Приложение №1). Срок выполнения работ- 35 (тридцать пять) рабочих дней. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору с момента его подписания, получения авансового платежа и исходных данных, указанных в Техническом задании. Датой начала работ является дата исполнения Заказчиком всех условий данного пункта Договора. По соглашению Сторон Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения работ, а также продлен на срок, необходимый для выполнения работ. Сдача-приемка выполненных работ производится путем подписания акта выполненных работ.

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Договора Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, составляет - 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) рублен 00 копеек, в том числе НДС - 20%. Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости работ по договору, что составляет: 3 050 000 (Три миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Договора. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется на основании подписанного акта о приемке выполненных работ, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня их подписания. Обязательство Заказчика по оплате Подрядчику считается исполненным с момента поступления оплаты на расчетный счет Подрядчика.

Согласно разделу 3 Договора Заказчик передает Подрядчику Договорные документы и исходные данные, указанные в Техническом задании и необходимые последнему для выполнения принятых обязательств, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. Передача документов и исходных данных от Заказчика Подрядчику происходит с обязательным подписанием Акта приема-передачи. В случае не передачи документов и исходных данных, срок начала работ, указанный в п.1.4. настоящего Договора увеличивается на то количество дней, на которое была задержана передача документов и исходных данных. В случае, если передача документов и исходных данных задерживается более чем на 20 календарных дней, условия Договора подлежат изменению, с оформлением дополнительного соглашения. Состав и комплектность документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется в Техническом задании. Заказчик подписывает Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, либо направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приема результата выполненных работ, с указанием недостатков и желаемых сроков их устранения. Недостатки устраняются в согласованные Сторонами Дополнительным соглашением сроки. Обязательства Подрядчика считаются выполненными после подписания Акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем. В случае не подписания Акта выполненных работ и не направления мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи, работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате. В случае остановки или прекращения работ по настоящему Договору по требованию Заказчика, он обязан: Известить в письменной форме Подрядчика о предстоящей остановке или прекращения работ за 15 (пятнадцать) календарных дней; Оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных им на момент прекращения Заказчиком работ. Подрядчик передает результаты работ, являющиеся предметом настоящего Договора Заказчику, и несет перед ним ответственность за качество выполненной работы.

В соответствии с п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Договора За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. В случае задержки перечисления авансового платежа со стороны Заказчика сроки начала выполнения работ переносятся на срок задержки. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору более чем на 5 (пять) календарных дней, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку, в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. За нарушение срока сдачи выполненных работ по договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме. Если Подрядчик нарушил условия настоящего Договора, повлекшие за собой ухудшение качества работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению Сторон срок.

Работы, выполненные Истцом в соответствии с Договором на общую сумму 6 100 000 рублей 00 копеек приняты Ответчиком без замечаний, о чем свидетельствуют подписанный акт сдачи-приемки работ № 1 от 12 мая 2020 г., а также акт сверки взаимных расчетов.

06 марта 2020 года между ООО «Промтерра» и ООО Проектно-строительная компания «ХимПромПроект» заключен договор № ПТ-03-418-ГМ, в соответствии с п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания на объектах: «Создание единой производственной площадки ФГУП «ЦЭНКИ» на земельном участке 

<

...>», «Строительство корпуса испытательного стенда ФГУП «ЦЭНКИ», расположенных по адресу: 

<

...> и представить результаты в соответствии с настоящим Договором Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Основной состав, объем, исходные данные и другие технические требования к работам определяются Техническим заданием к настоящему Договору (Приложение №1). Срок выполнения работ-20 (двадцать) рабочих дней. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору с момента его подписания, получения авансового платежа и исходных данных, указанных в Техническом задании. Датой начала работ является дата исполнения Заказчиком всех условий данного пункта Договора. По соглашению Сторон Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения работ, а также продлен на срок, необходимый для выполнения работ. Сдача-приемка выполненных работ производится путем подписания акта выполненных работ. В дальнейшем, если у Заказчика появится потребность в привлечении Подрядчика к выполнению дополнительных работ на этом, или других объектах Заказчика, Стороны составляют дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем, стоимость и сроки выполнения работ.

В соответствии с п.п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, составляет - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20%. Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости работ по договору, что составляет: 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублен 00 копеек, в том числе НДС 20% в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Договора. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется на основании подписанного акта о приемке выполненных работ, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня их подписания. Обязательство Заказчика по оплате Подрядчику считается исполненным с момента поступления оплаты на расчетный счет Подрядчика.

Согласно разделу 3 Договора Заказчик передает Подрядчику Договорные документы и исходные данные, указанные в Техническом задании и необходимые последнему для выполнения принятых обязательств, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. Передача документов и исходных данных от Заказчика Подрядчику происходит с обязательным подписанием Акта приема-передачи. В случае не передачи документов и исходных данных, срок начала работ, указанный в п. 1.4. настоящего Договора увеличивается на то количество дней, на которое была задержана передача документов и исходных данных. В случае, если передача документов и исходных данных задерживается более чем на 20 календарных дней, условия Договора подлежат изменению, с оформлением дополнительного соглашения. Состав и комплектность документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется в Техническом задании. Заказчик подписывает Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней либо направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приема результата выполненных работ, с указанием недостатков и желаемых сроков их устранения. Недостатки устраняются в согласованные Сторонами Дополнительным соглашением сроки. Обязательства Подрядчика считаются выполненными после подписания Акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем. В случае не подписания Акта выполненных работ и не направления мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи, работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате. В случае остановки или прекращения работ по настоящему Договору по требованию Заказчика, он обязан: Известить в письменной форме Подрядчика о предстоящей остановке или прекращения работ за 15 (пятнадцать) календарных дней; Оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных им на момент прекращения Заказчиком работ. Подрядчик передает результаты работ, являющиеся предметом настоящего Договора Заказчику, и несет перед ним ответственность за качество выполненной работы.

В соответствии с п.п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. В случае задержки перечисления авансового платежа со стороны Заказчика сроки начала выполнения работ переносятся на срок задержки. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору более чем на 5 (пять) календарных дней, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку, в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. За нарушение срока сдачи выполненных работ по договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме. Если Подрядчик нарушил условия настоящего Договора, повлекшие за собой ухудшение качества работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению Сторон срок.

Работы, выполненные Истцом в соответствии с Договором на общую сумму 250 000 рублей 00 копеек приняты Ответчиком без замечаний, о чем свидетельствуют подписанный акт сдачи-приемки работ № 1 от 17 апреля 2020 г., а также акт сверки взаимных расчетов.

Полагая, что за ответчиком числится задолженность за выполненные работы по Договорам на общую сумму 3 175 000 рублей, 21 августа 2020 года в адрес Ответчика направлена претензия с требованием о погашении имеющейся задолженности.

Неисполнение обязанности по оплате выполненных работ послужило основанием для обращения в арбитражный суд с первоначальным иском.

Нарушение сроков выполнения работ послужило поводом для подачи встречного иска.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает встречные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Истцом по встречному иску ко взысканию заявлена неустойка за просрочку выполнения работ.

Статьей 330 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право сторон определить в договоре неустойку – денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Из материалов дела следует, что работы не выполнены на даты, установленные договорами.

Факт просрочки исполнения обязательства подтверждается представленными в дело доказательствами, ответчиком не оспаривается.

Доводы ответчика по встречному иску о невозможности выполнения работ в связи с непредставлением исходных данных судом  отклоняются, как несостоятельные.

Пунктом 1 ст. 719 Гражданского кодекса РФ установлено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 Гражданского кодекса РФ).

По смыслу названной нормы права подрядчик вправе приостановить выполнение работ при таком нарушении заказчика, которое объективно препятствует подрядчику выполнять работу. 

Доказательств приостановки работ в порядке, предусмотренном ст. 716, 719 Гражданского кодекса РФ, суду не представлено.

Учитывая изложенное, требование по встречному иску о взыскании неустойки соответствует условиям договора и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает первоначальные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений. 

Факт сдачи результата работ подтверждается документами, представленными истцом в материалы дела: актами выполненных работ, имеющими подписи уполномоченных представителей сторон.

Акты выполненных работ подписаны без возражений и замечаний.

Согласно п.3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенное, а также тот факт, что ответчиком доказательств оплаты задолженности либо наличия ее в меньшем размере суду не представлено, первоначальные исковые требования в части основного долга подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Также истцом заявлены требования о взыскании неустойки за просрочку оплаты.        

Факт просрочки исполнения обязательства подтверждается представленными в дело доказательствами, ответчиком не оспаривается.

Ходатайство ответчика (истца по встречному иску) об уменьшении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судом отклонено. 

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии с пунктами 69, 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» размер неустойки может быть снижен судом в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

ООО ПСК "Химпромпроект" доказательств явной несоразмерности предъявленной суммы неустойки последствиям нарушения обязательства не представил. При указанных обстоятельствах основания для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда отсутствуют.

Требования о взыскании неустойки являются обоснованными, соответствуют условиям договоров и подлежат удовлетворению.

В силу ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца подлежат возмещению за счет ответчика по первоначальному иску пропорционально удовлетворенным требованиям, расходы истца по встречному иску подлежат возмещению за счет ответчика

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Химпромпроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Промтерра" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 3 175 000,00 руб. долга, 635 000,00 руб. неустойки, 42 050,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промтерра" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Химпромпроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 195 200,00 руб. неустойки, 6 856,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

После зачета взаимных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Химпромпроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Промтерра" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 2 979 800,00 руб. долга, 635 000,00 руб. неустойки, 35 194,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Лапочкина И.М.