АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, дом 14, город Владимир, 600025

тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

город Владимир                                                                        

«10» марта 2021 года                                                    Дело № А11-8734/2020

Резолютивная часть объявлена 02.03.2021 года.

Полный текст решения изготовлен 10.03.2021 года.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой – Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: ул. Щербакова, д. 12, кв. 38, г. Муром, Владимирская обл., 602254)

к обществу с ограниченной ответственностью «ОкаДрев» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: п. Фабрики им ФИО2,  уч. 88, эт. 2, пом. № 3, Владимирская обл., 602209) 

о взыскании 14 415 200 рублей 00 копеек.

при участии:

от истца – не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет;

от ответчика – не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет,

установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (далее – ООО «Арт-Строй», истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ОкаДрев» (далее – ООО «ОкаДрев», ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда от 05.10.2018 № 180 в сумме 2 960 000 рублей 00 копеек, неустойки в размере 11 455 200 рублей 00 копеек.

Ответчик в отзыве на исковое заявление от 30.11.2020 в удовлетворении иска просил отказать в полном объеме. При этом пояснил, что 19.10.2018 заказчик выплатил подрядчику предварительную оплату по договору в размере 5 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 918.

Также сообщил, что в период действия договора (03.02.2020) от ООО «Арт-Строй» в адрес ООО «ОкаДрев» поступили следующие документы: акт о приемке выполненных работ № 1 от 27.01.2020 на сумму 8 791 558 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.01.2020 на сумму 8 791 558 рублей.

Кроме того, ответчик указал, что согласно пп. 5.13 и 5,14. подрядчик обязан приступать к выполнению последующих работ только после сдачи представителю заказчика подлежащих закрытию скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ; подготовить и передать заказчику в полном объеме исполнительную и техническую документацию, предусмотренную действующим законодательством; вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ и другие специальные журналы. Однако, в нарушение действующих норм и правил и условий договора, акты скрытых работ, исполнительная и техническая документация, журнал производства работ истцом ответчику представлены не были. 

В связи с отсутствием данных документов, принять часть выполненной работы ответчик не мог.

По мнению ответчика, поскольку дополнительные соглашения к договору об изменении объема работ стороны не подписывали, следовательно, подрядчик должен выполнить работы в объеме согласно договору на общую сумму 10 000 000 рублей. 

Истец свои обязательства по договору в полном объеме не выполнил, поэтому, у ответчика отсутствует обязательство по выплате ему денежных средств.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) 05.10.2018 заключен договор подряда № 180, согласно пункту 1.1. которого подрядчик обязуется выполнить работу согласно заданию заказчика на асфальтирование территории предприятия ООО «ОкаДрев», в том числе площадок, подъездных путей и дороги на территории (Приложение № 1 к договору) и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1.3 договора подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего договора, действующими нормативными актами, требованиями государственных стандартов, норм и правил, локального ресурсного сметного расчета (Приложение № 2 к договору), схемы выполнения работ (Приложение № 3 к договору) и другой технической документацией, определяющей требования, предъявляемые к строительству и связанным с ним работам, в сроки, предусмотренные настоящим договором, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Согласно пункту 2.1. договора стоимость работ по договору, согласно Приложению №1 - составляет: 10 000 000 рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%, - 1 525 423 рубля 73 копейки.

Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, выполняемых подрядчиком, все затраты, связанные с приобретением материалов, эксплуатацией механизмов и машин приобретением оборудования, предназначенного для выполнения работ по договору, с учетом транспортных расходов, оплату всех сопутствующих работ и услуг, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей (пункт 2.2 договора).

В силу пункта 2.3 договора платежи производятся сторонами в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в следующем порядке:

Авансовые платежи по договору: 

- в течение трех банковских дней после подписания договора – 5 000 000 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18 % - 762 711 рублей 86 коп.;

- окончательная оплата выполненных работ производится заказчиком за фактически выполненные работы не позднее пяти рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС № 2 и справке о стоимости по форме КС № 3 и счета – фактуры.

При необходимости заказчик может оплатить отдельные этапы производства работ на основании счетов, выставленных подрядчиком.

Пунктом 2.4 договора предусмотрено, что в срок не позднее пяти рабочих дней после подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ или после расторжения договора, подрядчик передает заказчику счет-фактуру на сумму выполненных работ по договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2011 № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

В разделе 3 договора стороны определили сроки выполнения работ: начало работ – не позднее пяти рабочих дней с момента подписания договора;  окончания работ – не позднее 10 ноября 2018 года. Стороны вправе изменить сроки выполнения работ по договору путем подписания дополнительного соглашения.

В соответствии с пунктом 8.1 договора сдача-приемка результата выполненных подрядчиком работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленному на основании фактически выполненных объемов работ.

Акт о приемке выполненных работ подрядчик предоставляет заказчику в срок не, позднее 10 ноября 2018 года в количестве не менее трех экземпляров, один из которых предназначен для подрядчика, два - для заказчика (пункт 8.2 договора).

В силу пункта 8.3 договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой получения от подрядчика акта о приемке выполненных работ, заказчик обязан организовать приемку выполненных подрядчиком работ и передать подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ (один экземпляр), либо мотивировать отказ от приемки выполненных подрядчиком работ. В случае получения подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить акт заказчику.

Пунктом 8.4 договора предусмотрено, что в течение трех дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ подрядчик составляет и передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 на выполненные работы по договору в количестве не менее трех экземпляров, один из которых предназначен для подрядчика, два - для заказчика. Несоответствие сведений, включенных подрядчиком в справку о стоимости выполненных работ и затрат, подписанному сторонами акту о приемке выполненных работ является основанием для отказа в подписании справки по форме № КС-3.

Несоответствие результата выполненных работ сметной документации (заданию) является основанием для отказа заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (пункт 8.5 договора).

Пунктом 10.1 договора определено, что заказчик имеет право изменить объем работ по договору. Такое изменение согласовывается сторонами путем подписания дополнительного соглашения к договору.

В случае просрочки оплаты выполненной работы подрядчик вправе потребовать уплаты заказчиком пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Заказчик выплачивает подрядчику пени после выставления подрядчиком письменной претензии, содержащий расчет суммы пени. При не выставлении претензии данный пункт договора считается не действующим, т.е. пени не начисляется и не уплачивается (пункт 12.5 договора).

В соответствии с пунктом 13.1 договора заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обращения в суд, путем направления подрядчику письменного уведомления в следующих случаях:

- нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на один месяц;

- систематического несоблюдения подрядчиком требования по качеству работ;

- аннулирования свидетельства о допуске на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.

В соответствии с условиями договора ООО «ОкаДрев» платежным поручением от 19.10.2018 № 918 перечислило подрядчику денежные  средства (аванс) в сумме 5 000 000  рублей 00 копеек.

Как указал истец, в исковом заявлении работы выполнены им надлежащим образом в объеме 3980м2; в не полном объеме по инициативе ответчика работы были приостановлены в связи с ранними осадками в виде снега.

Подрядчик частично выполнил работы, предусмотренные договором на сумму 7 960 000 рублей 00 копейки, в подтверждение указанного представил в материалы дела: акт о приемке выполненных работ КС-2 от 27.01.2020, справку о стоимости выполненных работ КС-3 от 27.01.2020.

После выполнения части работ (завершения этапа работ, по – мнению истца) ООО «Арт-Строй» направило в адрес заказчика для подписания документы, подтверждающие сдачу этапа работ (акт выполненных работ формы КС-2 от 27.01.2020, справку о стоимости выполненных работ КС-3 от 27.01.2020, счет-фактуру).  

Ответчик подписанные документы не возвратил, выполненные работы (этап) по акту выполненных работ КС-2 от 27.01.2020 не оплатил, в связи с чем, подрядчик 27.01.2020 направил в адрес заказчика претензию с требованием об оплате образовавшейся задолженности в размере 2 960 000 рублей 00 копеек и неустойки в размере 11 455 200 рублей 00 копеек. 

05.08.2020 истец повторно направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность и неустойку.

Неисполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по спорному договору подряда послужило истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

На основании части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Проанализировав представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 702 и статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации начальный и конечный срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

Пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результат работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

В соответствии с пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктом 2.1. договора стоимость работ по договору, согласно Приложения №1 - составляет: 10 000 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%, - 1 525 423 рубля 73 копейки.

Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, выполняемых подрядчиком, все затраты, связанные с приобретением материалов, эксплуатацией механизмов и машин приобретением оборудования, предназначенного для выполнения работ по договору, с учетом транспортных расходов, оплату всех сопутствующих работ и услуг, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей (пункт 2.2 договора).

Истец представил в материалы дела односторонние акт о приемке выполненных работ КС-2 от 27.01.2020 и справку о стоимости выполненных работ КС-3 от 27.01.2020 на сумму 7 960 000 рублей (содержат подпись и печать истца). 

В то же время, ответчиком представлены в материалы дела, акт о приемке выполненных работ КС-2 от 27.01.2020 и справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 27.01.2020, полученные от истца (содержат подпись и печать истца), на сумму 8 791 558 рублей 29 копеек. 

Каких – либо иных доказательств выполнения работ в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 1.3 договора подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего договора, действующими нормативными актами, требованиями государственных стандартов, норм и правил, локального ресурсного сметного расчета (Приложение № 2 к договору), схемы выполнения работ (Приложение № 3 к договору) и другой технической документацией, определяющей требования, предъявляемые к строительству и связанным с ним работам, в сроки, предусмотренные настоящим договором, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Как указано ранее, в силу пункта 2.3 договора платежи производятся сторонами в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в следующем порядке:

Авансовые платежи по договору: 

- в течение трех банковских дней после подписания договора – 5 000 000 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18 % - 762 711 рублей 86 коп.;

- окончательная оплата выполненных работ производится заказчиком за фактически выполненные работы не позднее пяти рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС № 2 и справке о стоимости по форме КС № 3 и счета – фактуры.

При необходимости заказчик может оплатить отдельные этапы производства работ на основании счетов, выставленных подрядчиком.

В силу пунктов 3.1, 3.2, 3.3 договора начало работ – не позднее пяти рабочих дней с момента подписания договора;  окончания работ – не позднее 10 ноября 2018 года. Стороны вправе изменить сроки выполнения работ по договору путем подписания дополнительного соглашения.

Пунктами 4.1, 4.2 договора определено, что подрядчик обязан выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.2. настоящего договора. Подрядчик может обратиться к заказчику с письменной просьбой о переносе даты завершения работ, в результате возникновения следующих обстоятельств:

а)   увеличение объема работ по инициативе заказчика, принятое подрядчиком без соответствующего подписания дополнительного соглашения о переносе даты завершения работ;

б)   обстоятельства непреодолимой силы;

в)   приостановления работ по инициативе заказчика при отсутствии виновных действий подрядчика.

В тоже время, доказательств приостановления работ по инициативе заказчика истцом в материалы не представлено, ровно, как и доказательств не допуска подрядчика на объект.

Каких – либо обращений от истца в адрес ответчика о приостановлении работ и/или об уменьшении объемов и стоимости работ также не представлено.

В случаях предусмотренных пунктом 4.2 договора, заказчик принимает решение о том, следует ли продлевать дату завершения работ и на сколько времени ее следует продлевать в течение семи рабочих дней после поступления просьбы со стороны подрядчика принять такое решение. При этом подрядчиком представляются все подтверждающие сведения, необходимые для принятия заказчиком решения. Если подрядчик не сделал заблаговременного предупреждения о задержке или не содействовал ее устранению, то возникшая задержка не принимается во внимание при вынесении решения о новой дате завершения работ.         

Согласно пункту 4.4 договора решение о переносе даты завершения работ, в случае принятия такого решения заказчиком, оформляется путем подписания дополнительного соглашения к договору и вступает в силу с момента подписания такого соглашения уполномоченными представителями сторон.

Дополнительных соглашений о переносе даты завершения работ истцом в материалы дела также не представлено.

Кроме того, в представленном приложении № 1 к договору, сроки  выполнения отдельных видов работ (этапов), как и сроки их оплаты, сторонами  не согласованы, иных  приложений или соглашений  к договору, о   согласовании сроков выполнения  отдельных  этапов  работ в  материалы  дела  не представлено.

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Таким образом, суд считает, что исходя из буквального содержания договора, оценив в совокупности его условия, последним не предусмотрена сдача отдельных этапов работ по договору.

Ссылка в договоре на то, что заказчик может оплатить отдельные этапы производства работ на основании счетов, выставленных подрядчиком,  фактически не является установленными этапами работ (исходя из самого понятия), требующими исполнения каждого в определенные для него сроки  договором установлен единый период для исполнения всех видов работ, общий перечень которых имеется в приложении № 1 к договору и является, исходя из буквального толкования, правом, но не обязанностью заказчика.

Таким образом, исходя из совокупности всех установленных ранее обстоятельств, доводов сторон, суд приходит к выводу об отсутствии со стороны заказчика оснований для удовлетворения требования об оплате работ в заявленной части.

Сведений о том, что договор сторонами расторгнут соглашением или в одностороннем порядке, в материалы дела не представлено.

Согласно пояснению сторон в ходе судебного разбирательства договор не расторгнут и продолжает свое действие. Доказательств того, что заказчик (ответчик) препятствует исполнению договора со стороны истца также не представлено.

Кроме того, суд учитывает, что при невозможности исполнения договора в полном объеме, истец не лишен права принять меры и действия для расторжения договора в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Оценив в полном объеме имеющиеся в деле документы, доводы и пояснения сторон, в том числе возражения ответчика, арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований  для удовлетворения  требований истца, поскольку данные требования заявлены преждевременно, как и требование об оплате неустойки.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде государственной пошлины в сумме 95 076 рублей 00 копеек относятся на истца и подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 167 – 171, 176, 180, 181 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л :

1.       В удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» отказать.

2.       Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 95 076 рублей 00 копеек.

Выдача исполнительных листов осуществляется по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

 Судья                                                                      Ю.В. Бондарева-Битяй