219/2018-45825(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru  

http://astrahan.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А06-7248/2017

г. Астрахань

07 августа 2018 года

Резолютивная часть дополнительного решения оглашена 02 августа 2018года.  

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Богатыренко С.В.  

 при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Снесаревой  Е.К.  

рассмотрев вопрос о принятии дополнительного решения по делу № А06-7248/2017 по  иску Службы записи актов гражданского состояния Астраханской области к  

Строительно-промышленной компании Обществу с ограниченной ответственностью  "Сервис-Б" об обязании ответчика выполнить условия государственного контракта и  безвозмездно за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки, о  взыскании штрафа в сумме 452 757 руб. 69 коп. и расходов по проведению строительно- технической экспертизы в сумме 32 000 руб.  

при участии: 

от истца: Слугин В.В., представитель по доверенности от 01.06.2018г., паспорт.  от ответчика: не явился, извещен.  

 Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области в  соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 4  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратилась в  арбитражный суд с иском к Строительно-промышленной компании Обществу с  ограниченной ответственностью "Сервис-Б" об обязании ответчика выполнить условия  государственного контракта и безвозмездно за свой счет и своими силами устранить  выявленные недостатки, о взыскании штрафа в сумме 452 757 руб. 69 коп. и расходов  по проведению строительно-технической экспертизы в сумме 32 000 руб.  

 В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации истцом заявлено ходатайство об изменении предмета иска в части требования  об устранении недостатков, исходя из выводов эксперта Ланга В.Н. Согласно измененным  требованием истец просит обязать ответчика: 1. В течение 50 дней с даты вступления в  законную силу судебного решения, выполнить за свой счет работы по устранению  недостатков возведенного вентилируемого фасада, влекущих проникновение воды во  время выпадения атмосферных осадков в помещении здания службы ЗАГС,  расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Академика Королева, 39а, путем подведения  вентилируемого фасада под кровлю; 2. В течение 30 дней с даты вступления в силу  судебного решения выполнить за свой счет необходимые работы по приведению в  соответствии с проектом (380х380 мм) кирпичных столбов металлического ограждения с  колпаками таких столбов, территории, прилегающей к зданию службы ЗАГС,  расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Академика Королева, 39а; 3. В течение 30  

дней с даты вступления в силу судебного решения выполнить за свой счет перильные  ограждения (пять секций) пандуса на входной части здания службы ЗАГС,  расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Академика Королева, 39а.; 4. В течение 30  дней с даты вступления в силу судебного решения привести в соответствие с технической  документацией установленную беспроводную системы вызова персонала для инвалидов  колясочников (маломобильных групп).  

Судом изменение предмета иска судом принято.  Решением Арбитражного суда Астраханской области от 30 июня 2018года 

суд обязал Строительно-промышленную компанию Общество с ограниченной  ответственностью «Сервис-Б» за свой счет и своими силами устранить недостатки  выполненных работ по государственному контракту от 09.07.2014 г., а именно: 1. В  течение 50 дней с даты вступления в законную силу судебного решения, выполнить  работы по устранению недостатков возведенного вентилируемого фасада, влекущих  проникновение воды во время выпадения атмосферных осадков в помещении здания  службы ЗАГС, расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Академика Королева, 39а,  путем подведения вентилируемого фасада под кровлю; 2. В течение 30 дней с даты  вступления в силу судебного решения выполнить необходимые работы по приведению в  соответствии с проектом (380х380 мм) кирпичных столбов металлического ограждения с  колпаками таких столбов, территории, прилегающей к зданию службы ЗАГС,  расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Академика Королева, 39а; 3. В течение 30  дней с даты вступления в силу судебного решения выполнить перильные ограждения  (пять секций) пандуса на входной части здания службы ЗАГС, расположенного по адресу:  г.Астрахань, ул.Академика Королева, 39а.; 4. В течение 30 дней с даты вступления в силу  судебного решения привести в соответствие с технической документацией  установленную беспроводную систему вызова персонала для инвалидов колясочников  (маломобильных групп).  

С Строительно-промышленной компании Общества с ограниченной  ответственностью «Сервис-Б» в пользу Службы записи актов гражданского состояния  Астраханской области взыскаг штраф за ненадлежащее исполнений условий  государственного контракта в сумме 452 757 руб. 69 коп., расходы, связанные с  проведением строительно-технической экспертизы в сумме 32 000 руб., а также судебные  расходы по оплате за проведение судебной экспертизы в сумме 38 200 руб.  

 При вынесении решения судом не был разрешен вопрос о распределении  судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

 Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим  образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судебное заседание в соответствии с пунктом 2 статьи 178 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации проводится в отсутствие представителя  ответчика.  

 Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд  Установил: 

 Судом 28 июня 2018 года было рассмотрено дело по иску Службы записи актов  гражданского состояния Астраханской области к Строительно-промышленной  компании Обществу с ограниченной ответственностью "Сервис-Б" об обязании  ответчика выполнить условия государственного контракта и безвозмездно за свой счет и  своими силами устранить выявленные недостатки, о взыскании штрафа в сумме  452 757 руб. 69 коп. и расходов по проведению строительно-технической экспертизы в  сумме 32 000 руб. по результатам которого вынесено решение в виде резолютивной части  от 28 июня 2018 г.и полный текст изготовлен 30 июня 2018 г.  

 При вынесении решения судом не был разрешен вопрос о распределении  судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В соответствии со статьей 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в  законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе  принять дополнительное решение в случае, если:  

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле,  представили доказательства, судом не было принято решение;  

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной  денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые  обязан совершить ответчик;  

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек,  связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

 Истцу при подаче искового заявления была предоставлена отсрочка по уплате  государственной пошлины до рассмотрения спора по существу.  

Поскольку исковые требования истца удовлетворены в полном объеме, то  государственная пошлина в сумме 18 055 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход  федерального бюджета Российской Федерации.  

 При таких обстоятельствах, суд полагает, что имеются основания для принятия  дополнительного решения по делу № А06-7248/2017 в части распределения судебных  расходов по уплате госпошлины.  

Руководствуясь статьями 110, 178 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Строительно-промышленной компании Общества с ограниченной  ответственностью «Сервис-Б» в доход федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в сумме 18 055 руб.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия,  через Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет –  сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья С.В. Богатыренко