15/2020-37671(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-6510/2020

город Саранск

28 января 2021 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное  управление № 1" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени в сумме 39 783 265 рублей 02 копейки и штрафа в сумме  3 259 382 рубля 93 копейки,  

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление № 1"  

к Государственному казенному учреждению "Управление капитального  строительства Республики Мордовия"  

о взыскании задолженности в сумме 77 572 255 рублей, пени в сумме 219 788  рублей 06 копеек и по день фактического исполнения обязательств, штрафа в  сумме 400 000 рублей и убытков в сумме 15 372 518 рублей 75 копеек,  

при участии в заседании: 

от ГОСУКСа: ФИО2 – представителя по доверенности № 01/21 от  11.01.2021,  

от ООО "СМУ № 1": ФИО3 – представителя по доверенности от  28.12.2020,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Исковые требования Государственного казенного учреждения  "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление № 1" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) пени в сумме 6 483 033 рубля 61 копейку и штраф в сумме  3 259 382 рубля 93 копейки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление № 1" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 45 200 рублей.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 154 800 рублей.  

2. Встречные исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью "Строительно-монтажное управление № 1" удовлетворить  частично.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное управление № 1" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) задолженность в сумме 65 936 416 рублей 75 копеек, пени в сумме  186 819 рублей 85 копеек, пени на сумму долга за каждый день просрочки с  21.10.2020 по день фактического исполнения обязательства в размере 1/300  ключевой ставки Банка России, действующей на дату оплаты неустойки, штраф  

в сумме 100 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 141 600 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

3. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному  искам, взыскать Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное управление № 1" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) денежную сумму 56 480 820 рублей 06 копеек, пени на сумму  долга (65 936 416 рублей 75 копеек) за каждый день просрочки с 21.10.2020 по  день фактического исполнения обязательства в размере 1/300 ключевой ставки  Банка России, действующей на дату оплаты неустойки, и расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 141 600 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление № 1" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 45 200 рублей.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 154 800 рублей.  

4. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение  месяца со дня вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Элект ронная п одпись  действит ельна. С.Н. Макеева 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.07.2020 11:40:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна