АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная  ул., д. 8, г. Кемерово, 650000,

тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05

e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-16470/2019

город Кемерово

14 ноября 2019 года

Резолютивная часть объявлена 07 ноября 2019 года

Полный текст решения  изготовлен 14 ноября 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод», г. Новосибирск

к  обществу с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж», г. Новосибирск

о взыскании  долга, процентов за пользование чужими денежными средствами,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж», г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод», г. Новосибирск о взыскании неустойки, 

при участии: от истца – ФИО2, доверенность № 10/54 от 10.01.2019, паспорт

от ответчика – ФИО3, доверенность № 2/19 от 01.01.2019, паспорт

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод» (ООО «Новосибирскбурвод») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» (ООО «Сибшахтмонтаж») о взыскании 32 065 705,55 руб. долга по договорам от 06.11.2018                 № 06/11/18 и №06/11/18/820 (далее вместе – Договоры), 703 264,35 руб. процентов  за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 30.06.2019, с дальнейшим взысканием процентов по день погашения задолженности. Определением от 14.08.2019 дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании на 24.09.2019. 

18.09.2019 от общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» поступило встречное исковое заявление о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод» 8 519 211,88 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 06.11.2018 № 06/11/18/820. Определением от 20.09.2019 встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» принято судом к рассмотрению. 

В судебном заседании 24.09.2019 суд на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принял к рассмотрению ходатайство ООО «Новосибирскбурвод» об увеличении суммы иска о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами до 1 295 793,10 руб., с дальнейшим взысканием процентов по день погашения задолженности.

В отзыве на встречное исковое заявление ООО «Новосибирскбурвод» просило отказать во встречных исковых требованиях. Договоры датированы 06.11.2018, однако, фактически подписаны были сторонами только в январе 2019 года. Площадка для размещения бурового оборудования передана подрядчику не была, следовательно, сроки начала и окончания работ не наступили. Подрядчик в порядке пункта 4.3 Договоров приостанавливал выполнение работ. 

В настоящем судебном заседании от ООО «Новосибирскбурвод» истца представлено ходатайство об уменьшении суммы иска о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами до 1 240 782,31 руб. От ООО «Сибшахтмонтаж» представлено ходатайство об уменьшении суммы иска о взыскании неустойки до 2 505 650,55 руб. На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточненные требования сторон приняты судом к рассмотрению. 

Заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил.

В соответствии с договором № 06/11/18 от 06.11.2018 между ООО «Сибшахтмонтаж» (заказчиком) и ООО «Новосибирскбурвод»  (подрядчиком) подрядчик обязался выполнить своими или привлеченными силами работы по бурению двух газоотсасывающих скважин d325мм, каждая глубиной 324,5 метра, общая глубина на две скважины 649 метров, для дегазации пласта Байкаимский Шахтоучастка «Октябрьский», согласно техническому заданию, геолого-технического проекта и прилагаемых к договору локального сметного расчета № 2. 

В соответствии с договором № 06/11/18/820 от 06.11.2018 между ООО «Сибшахтмонтаж» (заказчиком) и ООО «Новосибирскбурвод»  (подрядчиком) подрядчик обязался выполнить своими или привлеченными силами работы по бурению двух газоотсасывающих скважин d820мм, каждая глубиной 324,5 метра, общая глубина на две скважины 324,5 метра, для дегазации пласта Байкаимский Шахтоучастка «Октябрьский», согласно техническому заданию, геолого-технического проекта и прилагаемых к договору локального сметного расчета № 1.

В пунктах 4.1 Договоров заказчик оплачивает выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в срок не позднее пятнадцати календарных дней на основании подписанных обеими сторонами акта сдачи-приемки работ и справки о стоимости работ типовых форм КС-2 и КС-3 и счета-фактуры или иным другим способом, предусмотренным действующим законодательством.  

В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ заказчик уплачивает подрядчику проценты от суммы задолженности в соответствии со статей 395 ГК РФ, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ. 

Согласно исковому заявлению, подрядчик выполнил и сдал заказчику работы, предусмотренные Договорами на общую сумму 32 065 705,55 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 от 20.02.2019, 28.02.2019, 31.03.2019, 31.05.2019 и соответствующими им справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Заказчик в установленный Договорами срок оплату не произвел, в претензии № 10/12 ООО «Новосибирскбурвод» просил погасить задолженность по Договорам и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. После чего ООО «Новосибирскбурвод» обратился в суд с исковым заявлением. 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. 

За просрочку оплаты работ по Договорам ООО «Новосибирскбурвод» правомерно предъявило к взысканию 1 240 782,31 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности по каждому акту, по состоянию на 24.09.2019. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 Гражданского кодекса РФ и разъяснениями, содержащимися в пункте 48 Постановления  № 7, с 25.09.2019 проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению и взысканию с ответчика в пользу истца по той же методике.

ООО «Сибшахтмонтаж» расчет процентов, а также наличие задолженности не оспорила. В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению.  Государственная пошлина, в уплате которой истцу судом предоставлялась отсрочка при принятии искового заявления, исчисляется от окончательной цены иска и подлежит взысканию с ответчика по первоначальному иску в доход федерального бюджета.

Встречный иск ООО «Сибшахтмонтаж» также подлежит удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В пункте 5.1 договора № 06/11/18/820 от 06.11.2018 установлены следующие сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 20 октября 2018, окончание работ – февраль 2019.

Согласно пункту 8.5 Договора в случае нарушения срока выполнения работ по договору подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости всего объема работ по договору за каждый день просрочки. За каждый день просрочки сдачи выполненных работ свыше 30 дней подрядчик уплачивает пеню в размере 0,5% от общей стоимости работ, но не более 10% от общей стоимости работ. 

В соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В случае просрочки исполнения обязательства должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку (штраф, пени) – пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ.

Работы по договору № 06/11/18/820 от 06.11.2018 сданы подрядчиком по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 от 28.02.2019, 31.03.2019, 31.05.2019. С учетом корректировочной счет-фактуры от 19.06.2019 общая стоимость работ составила 25 056 505,55 руб.

Работы сданы заказчику с нарушением срока, установленного пунктом 5.1, в связи с чем, ООО «Сибшахтмонтаж» правомерно предъявило к взысканию с ООО «Новосибирскбурвод» неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ. 

Согласно расчетам ООО «Сибшахтмонтаж» неустойка рассчитана за период с 01.03.2019 по 31.05.2019 и ограничена 10% от общей стоимости выполненных работ. Размер неустойки составил 2 505 650,55 руб. 

Возражения ООО «Новосибирскбурвод» судом отклонены по следующим основаниям. Ответчиком по встречному иску не представлено доказательств изменения сроков выполнения работ по договору. 

По смыслу части 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации просрочка кредитора имеет место в случае, если должник не мог исполнить свое обязательство. Для применения названной нормы и освобождения должника от ответственности необходимо, чтобы просрочка кредитора лишила должника возможности надлежащим образом исполнить обязательство. 

С учетом изложенного, встречные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, в сумме 2 505 650,55 руб., с отнесением на ООО «Новосибирскбурвод» расходов ООО «Сибшахтмонтаж» по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ судом производится зачет взаимных требований сторон, в результате чего взысканию с ООО «Сибшахтмонтаж» в пользу ООО «Новосибирскбурвод»  подлежит 30 765 309,31 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л :

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод» удовлетворить.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод»  32 065 705 руб. 55 коп. долга, 1 240 782 руб. 31 коп. процентов за пользование чужими денежными за период с 08.03.2019 по 24.09.2019, и далее взыскать проценты с 25.09.2019 по день фактического исполнения обязательства, начисляемые на сумму долга 32 065 705 руб. 55 коп.  (ее остаток) исходя из ключевой ставки рефинансирования Банка России, действующей в периоды просрочки.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» 2 505 650 руб. 55 коп. неустойки, 35 528 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего 2 541 178 руб. 55 коп.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод» 30 765 309  руб. 31 коп.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Сибшахтмонтаж» в доход федерального бюджета 159  464 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                                А.Е. Логинова