АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236040 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А21- 10812 /2023

13 ноября 2023 года

г. Калининград

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Калининградской области  

Р Е ШИ Л:

Исковые требования специализированной некоммерческой организации  Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах» удовлетворить полностью.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  «СТАНДАРТ» в месячный срок с момента вступления в законную силу решения  суда выполнить гарантийные обязательства по устранения дефектов по договору от  10.04.2020 2773000001ОКН/ПСД/СМР-20/С на оказание услуг и (или) выполнение  работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке  проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия,  выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории  муниципального образования «Советский городской округ», на объекте,  расположенном по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Ломоносова, д.  10, в частности, произвести работы следующего характера: устранить причины  затекания атмосферных осадков в районе дымовентиляционных каналов (3 шт.) в  жилом помещении кв. № 7; произвести работы по восстановлению штукатурного  слоя на дымовентиляционных трубах (5 шт.); устранить нарушения герметизации в  местах примыкания кровельного покрытия к вертикальным поверхностям (к  

 2 Дело № А21-10812/2023  дымовентиляционным трубам, фронтону, брандмауэрным стенам); произвести  работы по восстановлению штукатурного слоя на фронтоне со стороны крыши, на  торцевой стене МКД № 12 со стороны крыши; произвести работы по  восстановлению окрасочного, штукатурного слоя на декоративных (всех)  элементах на фронтоне (шар, столб); устранить разгерметичность фальцев в  нескольких местах; устранить причины появления биопоражения (плесени) в  жилой комнате кв. № 7 (спальная комната) в дальнем левом углу; произвести  работы по восстановлению штукатурного слоя на оконных откосах в 2-х жилых  комнатах кв. № 7 (спальная, гостиная).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «СТАНДАРТ» в пользу специализированной некоммерческой  организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах» государственную пошлину в размере 6000  рублей, оплаченной по платёжному поручению № 35670 от 28.08.2023.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок  со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Калининградской области.  

 Судья М.С. Глухоедов