542/2020-163646(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел.: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-4435/2020

07 сентября 2020 года

город Саратов

 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Спарт» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г.Саратов в месячный срок со дня вступления решения в законную силу устранить  

недостатки выполненных работ на капитальный ремонт здания клуба, расположенного по  

адресу: 

<

...> по государственному контракту  

 № К12/05/2017 от 12.05.2017, а именно: 

- Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок)  

шириной: до 1 м (покрытие парапета) на площади 0,12 м. НР (60 руб.): 83% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.); 

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для  

прочих отделочных работ на площади 6,5 м2. (ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к pa ex.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) HP (3436 руб.): 122% от ФОТ (2816 руб.) СП (2253 руб.): 80% от ФОТ (2816 руб.); 

- Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли  

и лесов на площади 6,5 м2. НР (844 руб.): 80% от ФОТ (1055 руб.) СП (528 руб.): 50% от ФОТ (1055 руб.); - Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором на площади 6,5 м2. НР (153 руб.): 80% от ФОТ (191 руб.) СП (9В руб.): 50% от ФОТ (191 руб.); 

- Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей: пористых  

(камень, кирпич, бетон и т.д.) на площади 6,5 м2 57,85 = 268,30 - 13,8 X 15,25 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=7,75; ТЗМ=1,25; 

НР (271 руб.): 105% от ФОТ (258 руб.)  СП (142 руб.): 55% от ФОТ (258 руб.);  - Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ 130 кг.;  

- Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен на  площади 6,5 м2.  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)  НР (5563 руб.): 105% от ФОТ (5296 руб.)  

СП (2914 руб.): 55% от ФОТ (5298 руб.;  - Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- 

поливинилацетатным составом: с лесов и земли на площади 6,5 м2 

205,81 = 312,22 - 0,012 х 3 210,50 - 0,003 х 16 385,00 - 0,012 x 586,47 - 0,0047 x 74,68 - 1,4 x  8,09  

НР (1068 руб.): 80% от ФОТ (1335 руб.)  СП (668 руб.): 50% от ФОТ (1335 руб.);  - Шпатлевка фасадная ВГТ 1, 56 т;  

- Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности  на площади 6,5 м2.  

НР (825 руб.): 105% от ФОТ (786 руб.)  СП (432 руб.): 55% от ФОТ (786 руб.);  - Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см. на площади 1,41 м2.  

НР (1383 руб.): 78% от ФОТ (1773 руб.)  СП (887 руб.): 50% от ФОТ (1773 руб.);  - Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- 

известковым раствором: с земли и лесов на площади 0,2 м2. 

НР (475 руб.): 79% от ФОТ (601 руб.)  СП (301 руб.): 50% от ФОТ (601 руб.);  - Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности  

на площади 0,2 м2. 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  НР (29 руб.): 105% от ФОТ (28 руб.)  

СП (15 руб.): 55% от ФОТ (28 руб.); 

- Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусор;  строительного с погрузкой вручную 1,995 тонн груза  

НР 0% от ФОТ  СП 0% от ФОТ; 

- Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I  класс фуза до 10 км 1,995 тонн груза  

НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спарт» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г.Саратов в пользу Управления Федеральной службы войск национальной  гвардии Российской Федерации по Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г.Саратов штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному  контракту № К12/05/2017 от 12.05.2017 в размере 93 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спарт» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г.Саратов в пользу Федерального бюджетного учреждения Саратовская  лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (ОГРН 

<

***>  402193113, ИНН 

<

***>), г.Саратов судебные расходы за проведение экспертизы в размере  26 100 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спарт» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г.Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 9 720 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 22.08.2019 10:31:33

 Кому выдана ФИО1