Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-13321/18

20 апреля 2018 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 20 апреля 2018 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гузеевой О.С., при ведении протокола судебного заседания  секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального казенного предприятия «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГЕОДЕЗИЯ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков и дефектов, возникших в результате выполнения строительно-монтажных работ в рамках гарантийных обязательств

при участии сторон в судебном заседании- согласно протоколу с/з от 17.04.18г.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

ФКП «НИИ Геодезия» обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием к ООО «Москапстрой» об обязании до 01 мая 2018 г. устранить недостатки и дефекты, возникшие в результате выполнения СМР по государственному контракту № 0548100000216000005/251.4889.К16 от 09.08.2016 г. в рамках гарантийных обязательств.

В судебном заседании истец заявил об уточнении исковых требований.

Ходатайство истца было принято судом к рассмотрению.

Ответчик заявил о признании исковых требований в полном объеме.

Рассмотрев материалы искового заявления, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично в связи со следующим.

09.08.16г. между Министерством промышленности и торговли РФ, от имени которого действует ФКП «НИИ Геодезия» и ООО «Москапстрой» был заключен государственный контракт 0548100000216000005/251.4889.К16, согласно которому ответчик обязался выполнить работы на условиях контракта.

Согласно п. 5.2 контракта сторонами были установлены сроки работ с даты  заключения контракты до 15.11.16г.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня приемки работ (п. 6.2 контракта).

Ответчиком работы были выполнены и сданы истцу, что подтверждается актами КС-2.

Однако в процессе эксплуатации результата работ истцом были обнаружены недостатки в выполненных ответчиком работах.

На основании статьи 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения взятых на себя обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. 

В силу п. 2 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженные в течение гарантийного срока.

В судебном заседании ответчик заявил о признании заявленных исковых требований в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания.

Частью 3 названной статьи установлено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, представленные в материалы дела доказательства, а также признание представителем ответчика в судебном заседании иска в полном объеме, суд приходит к выводу, что требования истца об обязании устранить недостатки в выполненных работах подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

 Обязать ООО «МОСКАПСТРОЙ»  до 01 мая 2018 года устранить недостатки и дефекты, возникшие в результате выполнения строительно-монтажных работ по государственному контракту № 0548100000216000005/251.4889.К16 от 09.08.2016 г. в рамках гарантийных обязательств, а именно:

№№

п.п.

Наименование 

оборудования

Мероприятия по

 устранению 

замечаний

1.

Многофункциональный комплекс термической резки "Термит" ППлЦ-2-12 с ЧП – 1 шт.

Комплекс необходимо доукомплектовать недостающими опциями:

-автономная система охлаждения;

-пульт управления с коммутационным блоком для нанесения покрытий;

-плазмотрон для нанесения покрытий;

-дозатор порошков.

2.

Обрабатывающий центр фрезерный с ЧПУ . 6С-500МФ4 – 1 шт.

Установить в проектное положение.

3.

Токарный станок с ЧПУ СКЕ6150Z/1000 (аналог 16А20Ф3) – 2 шт.

Установить в проектное положение.

4.

Станок токарный с УЦИ  МК6056П – 2 шт.

Установить в проектное положение.

5.

Станок универсальный заточной  

В3-818ЕСПА – 1 шт.

Установить в проектное положение.

6.

Автоматический лентопильный станок мод.8С6000 – 1 шт.

Установить в проектное положение.

7.

Гидравлический пресс листогибочный с ЧПУ ЛГС-29 - 1 шт. 

Установить в проектное положение.

8.

Гальванический участок.

Смонтировать 

линии: анодирования;

обезжиривания;

фосфатирования;

накопительную подземную емкость

9.

Покрасочный участок

1. Установка нанесения покрытий в составе: - камера напыления  - фильтр-рекуператор с вибролотком - эл/пульт - пневмоблок - пневмофильтр - светильник - обдувочный пистолет Внешние габаритные размеры (2100х1980х2250)мм Проем камеры 2150х1250 мм Комплект распылительного оборудования -КРВП-21-60-К - распылитель  ручной - блок управления -ЗУ - эжектор Мощность = 8кВт Объем вентилируемого воздуха – 7000м3/час Расход сжатого воздуха 6м3/час (0,4-0,6)МПа   Печь формирования ПФП-250-Т Внутренние габариты – 1800х1600х2500 мм Температура полимеризации – 180-2000С Продолжительность цикла работы печи – 40мин. Мощность – 25кВт. Транспортная система – поворотные траверсы дл.1200мм (в кол. 1 шт.).

2. Дополнительная опция - Вибросито пневматическое ВС-1 (в кол. 1 шт.).

Поставить на объект и

смонтировать.

Поставить на объект

и смонтировать.

10.

Участок печатных плат.

1.Настольный  сверлильно/фрезеровально/грави-ровальный станок 220В/1ф/0,15кВт  Марка Everprecision ЕР 2006.Рабочая область 340х230мм Производительность по сверлению – 90отв. в мин Габариты 350х570х380мм Шумо-пылезащитный кожух -1 шт. (в кол. 1 шт.).

2. Установка металлизации Размеры заготовок до 220х330мм Рабочий раствор на основе CuSO4. Аноды – медь с содержанием фосфора  Габариты ванны металлизации 250х430х300 мм 

Габариты источника питания – 210х360х185мм Мощность – 0,15кВтц. Марка ЕР-РТН. (в кол. 1 шт.).

3. Настольный ламинатор. Габаритные размеры 600х600х500 мм Мощность – 0,75кВт -1шт.

Марка MODEL -305 (в кол. 1 шт.).

4.Установка экспонирования заготовок печатных плат. Габариты 510х410х150 мм Источник УФ излучения: 2 группы х 3 х15Вт ламп с длиной волны 350-420нм Размеры фотошаблона, мм: 406х240.  Экспонируемая область, мм: 370х220 Мощность – 0,2кВт/200В/1ф . Марка MASTERHSB UY.  (в кол. 1 шт.).

Поставить на объект

и смонтировать.

Поставить на объект

и смонтировать.

Поставить на объект

и смонтировать.

Поставить на объект

и смонтировать.

11.

Термический участок.

1. Электропечь камерная с защитной атмосферой Объем камеры – 40л Максимальная температура нагрева – 1100оС Рабочее пространство O350х450(длина) мм Габаритные размеры печи с подставкой и газовым щитом – 1000х1120х2000мм Мощность – 20кВт/380В. Марка –СНЗМ3.5,4.5/11.  (в кол. 1 шт.).

Поставить на объект

и смонтировать.

12.

Радиомонтажный участок.

1.  Конвекционная конвейерная печь . Число зон нагрева сверху – 5 конвекционных Число зон нагрева снизу – 2 инфракрасные, 5 конвекционных (опц.) Длина зоны нагрева 1260мм Длина зоны охлаждения 250мм Габариты печи без подставки (1982х750х125)мм Габариты печи с подставкой 1982х750х670)мм Максимальное энергопотребление 13кВт/380В/3ф/60Гц Среднее энергопотребление – 4,5 кВт Время разогрева – 18мин. Управление ручное, микропроцессорное Диапазон температур (комнатная – 350 гр.С) Максимальные габариты заготовки (300х30)мм Для охлаждения плат на выходе используется вентилятор. Марка ВМ530. (в кол. 1 шт.).

Поставить на объект

и смонтировать.

13.

Отделение управления конструкторскими, технологическими, эксплуатационными данными.

Автоматизированное рабочее место  (12 шт.):

 1. ПЭВМ C5000MB (C5302LNi): Core i3-540/ 2 Гб/ 250 Гб/ DVDRW/ WinXP Pro. Поставка ООО NIX ;

http://www.nix.ru/autocatalog/nix_computers/C5000MB

C5302LNi_Core_i3540_DVDRW_106154.html 1.2 Монитор:  23" MONITOR 

 с поворотом экрана (LCD, Wide, 1920x1080, DVI) Марка-Samsung B2340 MBV Блок бесперебойного питания 

<

1200E Black> LCD, USB Мар Марка-CyberPower Клавиатура Black 

 Ergo 104КЛ+8КЛ М/Мед 

<

967740> Марка-Logitech Internet 350 Keyboard Y-SAG76A Мышь Logitech Optical Mouse 

 (OEM) PS/2 3btn+Roll Марка-Logitech Optical Mouse .

2. Принтер лазерный Марка-HP Laser Jet 1020

(в кол. 2 шт.).

3. Многофункциональное устройство  Марка-Brother MFC-8570DN (в кол.1шт.).

4. Широкоформаторный сканер KSC11A (в кол. 1 шт.).

5. Рулонный ламинатор RSH-1651 (в кол. 1 шт.).

6. Широкоформатный режущий планшетный плоттер НС-1290  (в кол. 1 шт.).

7. Цветной струйный плоттер EpsonSureColor SC-T5200  с подставкой и стартовым комплектом чернил CvMYmKpKемкостью 110мл  (в кол. 1 шт.).

Установить на рабочие места после окончания отделки помещений.

Поставлены принтеры марки HP Laser Jet Pro104M, т.к. заявленные сняты с производства, установить на рабочие места после окончания отделки помещений.

Поставлено МФУ марки Brother MFC-L2740DWR, т.к. заявленное устройство снято с производства, установить на рабочее место после окончания отделки помещений.

Поставлен в комплекте с цветным струйным плоттером, установить на рабочее место после окончания отделки поме-щений.

Поставлен ламинатор марки BFT-1600RSZ, подлежит замене, т.к. ламинатор RSH-1651 не снят с производства.

Поставить на объект. 

Поставлен, установить на рабочее место после окончания отделки помещений.

Устранить следующие недостатки и дефекты в рамках выполнения работ по Контракту на пл. 7 зд. 105/2:

№

п/п

Недостатки

Кол-во

Мероприятия по устранению

1

2

3

4

Кровля

1.

Не выполнены работы по разборке и устройству кровли.

2 700 м2.

Выполнить работы по разборке и устройству кровли.

Фасад

1.

Не заменены оконные блоки деревянные.

7 шт.

Заменить оконные блоки на деревянные в соответствии с ГОСТ 11214-2003.

2.

Не заменены ворота стальные.

4 шт.

Заменить ворота 1 шт.

3.

Не заменены решетки стальные наружные

4 шт.

Заменить решетки стальные наружные 4 шт.

4.

Не заменена входная группа из алюминиевых комбинированных профилей.

25,89 м2.

Заменить входную группу из алюминиевых комбинированных профилей.

5.

Не заменен витраж алюминиевый на фасаде.

91,2 м2.

Заменить витраж алюминиевый.

6.

Не выполнена облицовка стен фасада сайдингом металлическим и устройство теплоизоляционного слоя.

1542 м2.

Выполнить облицовку стен фасада сайдингом металлическим и устройство теплоизоляционного слоя.

7.

Не выполнена асфальтовая отмостка вокруг здания.

309 м2.

Выполнить асфальтовую отмостку вокруг здания.

Внутренняя отделка

1.

Не заменены внутренние противопожарные дверные блоки.

10 шт.

Заменить внутренние противопожарные дверные блоки.

2.

Не заменены внутренние деревянные дверные блоки.

82 шт.

Заменить внутренние деревянные дверные блоки 48 шт.

3.

Не выполнена шлифовка бетонных покрытий пола тип 1.

1 925,6 м2.

Выполнить шлифовку бетонных покрытий пола тип 1 с применением шлифмашины и карборунда.

4.

Не выполнены полы из плиток керамогранитных тип 2

47,8 м2.

Выполнить полы из плиток керамогранитных тип 2 в пом. 11, 56, 60, 75.

5.

Не выполнены полы из плиток керамических тип 3

146, 3м2.

Завершить полы из плиток керамических тип 3 в кол-ве 10%.

6.

Не выполнены полы из линолеума тип 4.

416,4 м2.

Завершить подготовку под чистые полы тип 4 и уложить линолеум в кол-ве 50%.

7.

Не выполнены полы из плиток кислотоупорных тип 6.

356,9 м2.

Завершить устройство пола тип 6 из плиток кислотоупорных в кол-ве 15%.

8.

Не выполнены полы терраццо из плит мозаично-бетонных безискровых тип 7.

226,4 м2.

Завершить устройство пола тип 7 терраццо из плит мозаично-бетонных безискровых в кол-ве 50%.

9.

Не выполнены полы терраццо из плит мозаично-бетонных тип 8.

47,5 м2.

Выполнить полы терраццо из плит мозаично-бетонных тип 8 на крыльце главного входа.

10.

Не закончено устройство подвесных потолков типа «Армстронг».

215,1 м2.

Закончить устройство подвесных потолков типа «Армстронг» в кол-ве 30%.

11.

Не выполнен подвесной потолок из алюминиевой рейки.

327,1 м2.

Закончить устройство подвесных потолков из алюминиевой рейки в кол-ве 30%.

12.

Не выполнена окраска потолков эмалью ХС-710 за 2 раза по грунтовке ХС-724.

625,63 м2.

Выполнить окраску потолков эмалью ХС-710 за 2 раза по грунтовке ХС-724 в кол-ве 15%.

13.

Не закончена окраска потолков и металлических несущих конструкций ферм огнезащитным составом КОКС.

1861 м2.

Завершить окраску потолков и металлических несущих конструкций ферм огнезащитным составом КОКС в кол-ве 10%.

14.

Не закончена штукатурка стен цементно-известковым или цементным раствором.

4814,2 м2.

Закончить штукатурку стен цементно-известковым или цементным раствором в кол-ве 20%.

15.

Не закончена шпатлевка стен.

4014,2 м2.

Закончить шпатлевку стен в кол-ве 20%.

16.

Не закончена окраска стен ПФ-115 за 2 раза.

370,53 м2.

Закончить окраску стен ПФ-115 за 2 раза в кол-ве 20%.

17.

Не выполнена окраска откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ПФ-170.

169,05 м2.

Закончить окраску откосов ПФ-115 за 2 раза в кол-ве 20%.

18.

Не закончена облицовка стен, откосов глазурованной плиткой.

622,9 м2.

Закончить облицовку стен, откосов глазурованной плиткой в кол-ве 50%.

19.

Не выполнена окраска стен эмалью КО 870.

957,6 м2.

Закончить окраску стен эмалью КО 870 в кол-ве 30%.

Козырек главного входа

1.

Не выполнены работы по облицовке козырька крыльца сайдингом. 

51 м2.

Выполнить работы по облицовке козырька крыльца сайдингом. 

2.

Не выполнена штукатурка низа козырька цем.раствором М200 по сетке рабица.

61,4 м2.

Выполнить штукатурку низа козырька цем.раствором М200 по сетке рабица.

3.

Не выполнены полы крыльца из плит терраццо.

47,5 м2.

Выполнить полы крыльца из плит терраццо.

4.

Не выполнена окраска торцов крыльца эмалью КО-174 за 2 раза.

11,4 м2.

Выполнить окраску торцов крыльца эмалью КО-174 за 2 раза.

5.

Не выполнена окраска металла крыльца эмалью ПФ-115 за 2 раза.

5 м2.

Выполнить окраску металла крыльца эмалью ПФ-115 за 2 раза.

6.

Не выполнены козырьки над входами из листового поликарбоната.

5 шт.

Выполнить

козырьки над входами из листового поликарбоната в кол-ве 10 шт.

Отопление

1.

Не выполнено отопление бытовых помещений

Не выполнена теплоизоляция трубопроводов отопления трубками из вспененного полиэтилена 13 мм.

978 м.

Завершить монтаж на 10%, завершить окраску ПФ-115 за 2раза.

Завершить теплоизоляцию трубопроводов отопления трубками из вспененного полиэтилена 13 мм.

Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод

1.

Не выполнена замена хозяйственно-производственно-противопожарного водопровода.

920 м.

Завершить комплектацию шкафов рукавами технической воды и оформить актом.

2.

Не установлены рукава 51 мм латексные (в сборе с головкой и стволом) на Ру= 16 кгс/см2, скатка- 20 м системы пожаротушения.

280 м.

Завершить комплектацию шкафов рукавами технической воды и оформить актом.

3.

Не установлен рукав В(2)-10-25-36-У (напорный для технической воды) Д(ВН)25.

140 м.

Завершить комплектацию шкафов рукавами технической воды и оформить актом.

4.

Не установлены унитазы с бачками.

8 к-тов.

Установить унитазы 4 шт. с бачками.

5.

Не установлены умывальники со смесителями.

14 к-т.

Установить умывальники 10 шт. со смесителями.

6.

Не установлены писсуары.

4 шт.

Установить писсуар 1 шт.

7.

Не установлены смесители для душа со стационарной душевой трубкой.

12 шт.

Установить смесители для душа со стационарной душевой трубкой 12 шт.

8.

Не выполнена замена труб коррозионностойких спецканализации.

102 м.

Выполнить замену труб коррозионностойких спецканализации.

9.

Не установлены задвижки клиновые диаметром 50 мм фланцевые.

31 шт.

Установить задвижки клиновые диаметром 50 мм, 100 мм фланцевые.

10.

Не выполнена замена наружного участка спецканализации из труб полиэтиленовых диаметром 150 мм.

45 м.

Выполнить замену наружного участка спецканализации из труб полиэтиленовых диаметром 150 мм.

Вентиляция

1.

Не выполнена замена приточных вентиляционных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6 с установкой вентиляторов, водяных воздухонагревателей, шумоглушителей, диффузоров, воздухораспределителей, прокладкой воздуховодов, установкой дроссель-клапанов, клапанов воздушных, противопожарных клапанов Клоп с электромеханическим приводом.

6 к-тов.

Выполнить замену приточных вентиляционных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6 с установкой вентиляторов, водяных воздухонагревателей, шумоглушителей, диффузоров, воздухораспределителей, прокладкой воздуховодов, установкой дроссель-клапанов, клапанов воздушных, противопожарных клапанов Клоп с электромеханическим приводом.

2.

Не выполнена замена вытяжных систем принудительной вентиляции В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В22, В23 В24 с установкой вентиляторов, шумоглушителей, диффузоров, прокладкой воздуховодов, установкой дроссель-клапанов, клапанов воздушных, противопожарных клапанов Клоп с электромеханическим приводом, решеток вентиляционных.

24 к-та.

Выполнить замену вытяжных систем принудительной вентиляции В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В22, В23 В24 с установкой вентиляторов, шумоглушителей, диффузоров, прокладкой воздуховодов, установкой дроссель-клапанов, клапанов воздушных, противопожарных клапанов Клоп с электромеханическим приводом, решеток вентиляционных.

3.

Не выполнена замена вытяжных систем естественной вентиляции ВЕ1, ВЕ2 с установкой дефлекторов.

2 к-та.

Выполнить замену вытяжных систем естественной вентиляции ВЕ1, ВЕ2 с установкой дефлекторов.

4.

Не выполнена замена вытяжных систем дымоудаления ДУ1, ДУ2, ДУ3 с установкой вентиляторов крышных дымоудаления с пределом огнестойкости 2 часа ВКРМ-5ДУ-02, клапанов противопожарных дымовых с эл. приводом BELIMO КДМ-2 800х500, клапанов обратных КЛ-630, прокладка воздуховодов с огнезащитным покрытием составом на основе Эндотерм ХТ-150.

3 к-та.

Выполнить замену вытяжных систем дымоудаления ДУ1, ДУ2, ДУ3 с установкой вентиляторов крышных дымоудаления с пределом огнестойкости 2 часа ВКРМ-5ДУ-02, клапанов противопожарных дымовых с эл. приводом BELIMO КДМ-2 800х500, клапанов обратных КЛ-630, прокладка воздуховодов с огнезащитным покрытием составом на основе Эндотерм ХТ-150.

5.

Не выполнена замена вытяжных систем местной принудительной вентиляции ВМ1, ВМ2, ВМ3 с установкой вентиляторов радиальных ВР 86-77-4,0, шумоглушителей СSА400/900, фильтров для очистки воздуха, зонтов вентиляционных систем диаметром шахты до 600 мм, дроссель-клапанов в обечайке с сектором управления, прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 600 мм.

3 к-та.

Выполнить замену вытяжных систем местной принудительной вентиляции ВМ1, ВМ2, ВМ3 с установкой вентиляторов радиальных ВР 86-77-4,0, шумоглушителей СSА400/900, фильтров для очистки воздуха, зонтов вентиляционных систем диаметром шахты до 600 мм, дроссель-клапанов в обечайке с сектором управления, прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 600 мм.

Теплоснабжение приточных установок

1.

Не выполнен монтаж системы теплоснабжения приточных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6 с прокладкой трубопроводов отопления и теплоизоляцией труб.

6 к-тов.

Выполнить монтаж системы теплоснабжения приточных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6 с прокладкой трубопроводов отопления и теплоизоляцией труб в комплексе с узлом регулирования монтажом трубопроводов, с пробивкой и заделкой проемов в стенах.

Автоматизация вентиляции и отопления

1.

Не выполнена автоматизация системы вентиляции приточных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6 с прокладкой кабелей контрольных марки КВВГнг, с прокладкой кабелей силовых марки ВВГнг, монтажом шкафа автоматики и управления.

6 к-тов.

Выполнить автоматизацию системы вентиляции приточных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6 с прокладкой кабелей контрольных марки КВВГнг, с прокладкой кабелей силовых марки ВВГнг, монтажом шкафа автоматики и управления.

2.

Не выполнена автоматизация к вентиляторам дымоудаления систем ДУ1, ДУ2, ДУ3 с прокладкой силовых и контрольных кабелей.

3 к-та.

Выполнить автоматизацию к вентиляторам дымоудаления систем ДУ1, ДУ2, ДУ3 с прокладкой силовых и контрольных кабелей.

3.

Не выполнена автоматизация теплового узла системы отопления.

1 к-т.

Выполнить автоматизацию теплового узла системы отопления.

Пусконаладка отопления и вентиляции

1.

Не выполнена пусконаладка теплового узла системы отопления.

1к-т.

Выполнить пусконаладку теплового узла системы отопления.

2.

Не выполнена пусконаладка системы вентиляции приточных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6.

6 к-тов.

Выполнить пусконаладку системы вентиляции приточных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6.

3.

Не выполнена пусконаладка вытяжных систем принудительной вентиляции В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В22, В23 В24.

24 к-та.

Выполнить пусконаладку вытяжных систем принудительной вентиляции В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В22, В23 В24.

4.

Не выполнена пусконаладка вытяжных систем дымоудаления ДУ1, ДУ2, ДУ3.

3 к-та.

Выполнить пусконаладка вытяжных систем дымоудаления ДУ1, ДУ2, ДУ3.

5.

Не выполнена пусконаладка вытяжных систем естественной вентиляции ВЕ1, ВЕ2.

2 к-та.

Выполнить пусконаладку вытяжных систем естественной вентиляции ВЕ1, ВЕ2.

6.

Не выполнена пусконаладка вытяжных систем местной вентиляции ВМ1, ВМ2, ВМ3.

3 к-та.

Выполнить пусконаладку вытяжных систем местной вентиляции ВМ1, ВМ2, ВМ3.

Проверка заземления оборудования

1.

Не выполнена проверка заземления вентиляционного оборудования.

36 шт.

Выполнить проверку заземления вентиляционного оборудования.

Электроосвещение

1.

Не выполнена замена электроосвещения в здании с прокладкой кабельных трасс, монтажом электрических осветительных щитов, светильников.

Выполнить замену электроосвещения в здании с прокладкой кабельных трасс, монтажом электрических осветительных щитов, светильников.

Электрооборудование

1.

Не выполнена замена электрооборудования в здании с прокладкой кабельных трасс, монтажом электрических силовых и распределительных щитов.

Выполнить замену электрооборудования в здании с прокладкой кабельных трасс, монтажом электрических силовых и распределительных щитов.

2.

Не выполнен контур заземления внутри и снаружи здания, молниезащита.

Выполнить контур заземления внутри и снаружи здания, молниезащиту.

Пусконаладка силового электрооборудования

1.

Не выполнена пусконаладка силового электрооборудования.

Выполнить пусконаладку силового электрооборудования.

Пусконаладка технологического оборудования

1.

Не выполнена наладка механической части станков в механическом участке пом. 22.

6 шт.

Выполнить наладку механической части станков в механическом участке пом. 22.

2.

Не выполнена наладка механической части станков в заготовительном участке пом. 24.

3 шт.

Выполнить наладку механической части станков в заготовительном участке пом. 24.

3.

Не выполнена наладка электрической части станков.

9 шт.

Выполнить наладку электрической части станков.

4.

Не выполнена наладка автоматизированной системы управления станков.

7 шт.

Выполнить наладку автоматизированной системы управления станков.

5.

Не выполнена наладка: Линия анодирования алюминия. Гальванический участок.

1 линия.

Выполнить наладку: Линия анодирования алюминия. Гальванический участок.

6.

Не выполнена наладка: Линия обезжиривания деталей перед сваркой и покраской. Гальванический участок.

1 линия.

Выполнить наладку: Линия обезжиривания деталей перед сваркой и покраской. Гальванический участок.

7.

Не выполнена наладка: Линия фосфортирования деталей перед сваркой и покраской. Гальванический участок.

1 линия.

Выполнить наладку: Линия фосфортирования деталей перед сваркой и покраской. Гальванический участок.

8.

Не выполнена общая наладка на гальванику с замером полного сопротивления цепи «фаза-нуль». Гальванический участок.

3 линии.

Выполнить общую наладку на гальванику с замером полного сопротивления цепи «фаза-нуль». Гальванический участок.

9.

Не выполнена пусконаладка автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (гальванический участок датчики температуры).

3 системы.

Выполнить пусконаладку автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (гальванический участок датчики температуры).

10.

Не выполнена наладка: 

Установка нанесения покрытий ,

Комплект распылительного оборудования

Печь формирования ПФП-250-Т

Автоматизированные системы управления

1к-т

1к-т

1к-т.

1 к-т.

Выполнить наладку: 

Установка нанесения покрытий ,

Комплект распылительного оборудования

Печь формирования ПФП-250-Т

Автоматизированные системы управления

11.

Не выполнена наладка: Настольный сверлильно - фрезеровально -гравировальный станок. Участок печатных плат.

1 шт.

Выполнить наладку: Настольный сверлильно - фрезеровально -гравировальный станок. Участок печатных плат.

12.

Не выполнена наладка: Установка металлизации. Участок печатных плат.

1 шт.

Выполнить наладку: Установка металлизации. Участок печатных плат.

13.

Не выполнена наладка: Настольный ламинатор. Участок печатных плат.

1 шт.

Выполнить наладку: Настольный ламинатор. Участок печатных плат.

14.

Не выполнена наладка: Установка экспонирования заготовок печатных плат.

1шт.

Выполнить наладку: Установка экспонирования заготовок печатных плат.

15.

Не выполнена проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль. Участок печатных плат.

4 точки

Выполнить проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль. Участок печатных плат.

16.

Не выполнена пусконаладка автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2. Участок печатных плат.

4 системы.

Не выполнена пусконаладка автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2. Участок печатных плат.

17.

Не выполнена наладка: Электропечь камерная с защитной атмосферой. Термический участок.

1 шт.

Выполнить наладку:

Электропечь камерная с защитной атмосферой. Термический участок

18.

Не выполнена проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль. Термический участок.

3 линии

Выполнить проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль. Термический участок.

19.

Не выполнена наладка: Конвекционная конвейерная печь Марка-ВМ530. Радиомонтажный участок.

1 шт.

Выполнить наладку: Конвекционная конвейерная печь Марка-ВМ530. Радиомонтажный участок.

20.

Не выполнена проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль. Термический участок.

1 линия

Выполнить проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль. Термический участок.

21.

Не выполнена наладка технологического комплекса, включающего в себя управляемые участки в количестве до 20 шт. Отделение управления конструкторскими, технологическими и эксплуатационными данными.

1 комплекс

Выполнить наладку технологического комплекса, включающего в себя управляемые участки в количестве до 20 шт. Отделение управления конструкторскими, технологическими и эксплуатационными данными.

22.

Не выполнена наладка: Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2(технологический комплекс).

1 система

Выполнить наладку:

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2(технологический комплекс).

23.

Не выполнен монтаж: Система автоматического пожаротушения, включая модули пожаротушения тонко-распыленной водой взрывозащищенные «ТРВ-Гарант-15,5-01» (85) 16шт., Блок обработки сигналов взрывозащищенный «БОС» 16шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ Молния 12В 1шт., Блок управляющих реле взрывозащищенный «БУР-КЦ» 1шт., Брелок диагностики «БД» (вз) 1шт.

1 комплекс

Выполнить монтаж: Система автоматического пожаротушения, включая модули пожаротушения тонко-распыленной водой взрывозащищенные «ТРВ-Гарант-15,5-01» (85) 16шт., Блок обработки сигналов взрывозащищенный «БОС» 16шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ Молния 12В 1шт., Блок управляющих реле взрывозащищенный «БУР-КЦ» 1шт., Брелок диагностики «БД» (вз) 1шт.

24.

Не выполнена пусконаладка системы автоматического пожаротушения.

1 комплекс

Выполнить пусконаладку системы автоматического пожаротушения.

25.

Не выполнен монтаж системы пожарно-охранной сигнализации, включая систему автоматической пожарной сигнализации АПС из извещателей пожарных дымовых 84шт, извещателей пожарных ручных 13шт., извещателей пожарных тепловых 12шт., систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) из 17 громкоговорителей и 10 световых настенных указателей, Систему охранной сигнализации (СОС) из извещателей на стекле окон (ИО 409-30) 84шт., извещателей на открывание окон, дверей 72 шт.

1 комплекс

Выполнить монтаж системы пожарно-охранной сигнализации, включая систему автоматической пожарной сигнализации АПС из извещателей пожарных дымовых 84шт, извещателей пожарных ручных 13шт., извещателей пожарных тепловых 12шт., систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) из 17 громкоговорителей и 10 световых настенных указателей, Систему охранной сигнализации (СОС) из извещателей на стекле окон (ИО 409-30) 84шт., извещателей на открывание окон, дверей 72 шт.

26.

Не выполнена пусконаладка системы пожарно-охранной сигнализации.

1 комплекс

Выполнить пусконаладку системы пожарно-охранной сигнализации.

27.

Не выполнен монтаж системы телефонизации из 13 аппаратов и АТС 1 шт.

1 комплекс

Выполнить монтаж системы телефонизации из 13 аппаратов и АТС 1 шт.

Взыскать с ООО «Москапстрой» в пользу ФКП «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГЕОДЕЗИЯ» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Десятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья                                             О.С. Гузеева