14/2023-27028(1) 

 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ

Дело № А26-7605/2022

г. Петрозаводск

24 марта 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2023 года.  

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Богданова О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 (до  перерыва) и помощником судьи Жуковой А.А. (после перерыва),  

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску индивидуального  предпринимателя ФИО2  

к акционерному обществу "Кондопожское лесопромышленное хозяйство" о взыскании 1 332 554 руб. 21 коп при участии представителей: истца, - ФИО3 по доверенности от 07.09.2022 

ответчика, - ФИО4 по доверенности от 01.01.2023 (до перерыва)  

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2  (далее – истец, предприниматель, ИП ФИО2) обратилась в Арбитражный  суд Республики Карелия с иском к акционерному обществу "Кондопожское  лесопромышленное хозяйство" (далее – ответчик, Общество, АО «КЛПХ») о  взыскании 1 332 554 руб. 21 коп., из них: 1 271 100 руб. задолженности по  договору от 02.01.2019, 61 454 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 15.10.2019 по 31.03.2022.  

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 309, 310, 702, 740, 753  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, условиями  договора подряда оказания возмездных услуг по строительству лесных дорог от  02.01.2019.  

В мотивированном отзыве на иск и дополнительных пояснениях ответчик  требования не признал, указав, что акт № 29 от 07.10.2019 подписан  неуполномоченным лицом; акты приемки-сдачи выполненных работ в адрес  ответчика не поступали, работы не приняты; надлежащим образом оформленные  документы, подтверждающие простой, не представлены.  

В судебном заседании 14.03.2023 представитель истца заявил ходатайство об  уточнении заявленных требований в части процентов, просит взыскать с ответчика  1 502 621 руб. 26 коп., из них: 1 271 100 руб. задолженности по договору от  02.01.2019, 231 521 руб. 26 коп. процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 15.10.2019 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 14.03.2023 и до  

даты фактического исполнения обязательства. Поддержал заявленные требования в  полном объеме по основаниям, изложенным в иске.  

Представитель ответчика в удовлетворении иска просил отказать, поддержав  позицию, изложенную в отзыве и дополнительных пояснениях.  

Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации принял к рассмотрению уточненные требования истца.  

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 час. 40 мин. 17.03.2023,  которое продолжено в отсутствие ответчика с участием того же представителя  истца, выступившего в прениях.  

Заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд  считает установленными следующие обстоятельства по делу.  

Из материалов дела следует, что 02.01.2019 между АО «КЛПХ» (заказчик) и  предпринимателем (подрядчик) заключен договор возмездного оказания услуг по  строительству лесных дорог, согласно которому подрядчик обязуется по заданию  заказчика оказать своими или привлеченными силами и средствами услуги по  строительству лесных дорог в объеме, предусмотренном договором, а заказчик  обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы (пункт 1.1.).  

В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость работ по договору  определена в приложении № 1 к договору (протокол согласования цены).  Конкретный объем работ строительства определяется по фактически выполненным  работам в соответствии с подписанными актами выполненных работ.  

Срок выполнения работ с 02.01.2019 по 31.12.2019 (пункт 3.4).  

Оплата работ производится в течение 5-ти рабочих дней после подписания  сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (пункт 3.2).  

Истец считает, что свои обязательства по договору исполнил в полном  объеме на сумму 5 806 950 руб., однако выполненные работы ответчик оплатил  частично в сумме 4 535 850 руб. Наличие задолженности в сумме 1 271 100 руб.  послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями  делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная  оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить  подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок  либо с согласия заказчика досрочно.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской  Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены  договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  подрядчику.  

В силу пункта 4 статьи 753 Кодекса сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При  отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт  подписывается другой стороной.  

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть  признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от  подписания акта признаны им обоснованными.  

Как указано в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000  N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда",  статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает  возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает  интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего  оформления документов, удостоверяющих приемку. В соответствии с  разъяснениями, данными ВАС РФ в пункте 8 указанного Информационного  письма, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате  выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Общее правило распределения бремени доказывания между участниками  спора закрепляет главный элемент состязательного начала арбитражного процесса:  каждому заинтересованному лицу надлежит доказывать факты, которые  обосновывают его юридическую позицию по делу.  

В обоснование заявленных требований истцом представлены акт приема-сдачи выполненных работ за период с 17.09.2019 по 04.10.2019 с указанием объема  работ автогрейдера 238 час., подписанный со стороны ответчика работниками  ФИО5 и ФИО6, акт № 29 от 07.10.2019 с указанием объема работ  автогрейдера 238 час. на сумму 476 000 руб., подписанный со стороны ответчика  работником ФИО7, а также односторонние акты № 30 от 07.10.2019 на  сумму 224 400 руб., № 34 от 01.11.2019 на сумму 164 700 руб., № 35 от 02.12.2019 на  сумму 183 000 руб., № 38 от 30.12.2019 на сумму 223 000 руб.  

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 182 ГК РФ полномочие может  явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в  розничной торговле, кассир и т.п.).  

В пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений  раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, указано, что  равным образом об одобрении могут свидетельствовать действия работников  представляемого по исполнению обязательства при условии, что они основывались  на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий  явствовало из обстановки, в которой они действовали (абзац второй пункта 1  статьи 182 ГК РФ).  

Полномочия ФИО7, ФИО6, ФИО5 на представление  интересов подрядчика по вопросам строительного контроля явствовали из  обстановки (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), что подтверждается материалами дела, в  том числе представленными в материалы дела должностными инструкциями.  

Так, из трудового договора от 19.10.2017, заключенного с ФИО6,  следует, что он принят на должность мастера по строительству и эксплуатации  дорог. Из должностной инструкции мастера по строительству и эксплуатации  дорог следует, что в должностные обязанности мастера входит: под руководством  начальника ЦПУ организует дорожные работы с привлечением подрядных  организаций; производит приемку выполненных работ и составляет акты  выполненных работ (по предварительному согласованию с начальником ЦПУ и  последующей подтверждающей подписью начальника ЦПУ); координирует и  контролирует работу подрядных организаций (пункты 2.4, 2.8, 3.4 инструкции).  

Допрошенный в ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля ФИО6, работающий в спорный период в АО «КЛПХ» мастером по строительству и  эксплуатации дорог, пояснил, что на акте за октябрь 2019 года содержится его  подпись; он контролировал проведение работ, проверял объем работ,  подготавливал акт и отдавал его начальнику ЦПУ (ФИО5); в период  работы подрядчика ФИО2 претензий не было, объемы работ  подтверждали.  

Из трудового договора от 21.10.2013, заключенного с ФИО7,  следует, что он принят на должность начальника отдела лесных ресурсов. Из  должностной инструкции начальника отдела лесных ресурсов следует, что в его  должностные обязанности входит, в том числе: организует и контролирует работу с  подрядными организациями по строительству и содержанию дорог (пункт 12).  

Кроме того, в материалы дела представлены акты за иные периоды,  подписанные указанными лицами, работы по которым ответчиком оплачивались и  не оспаривались.  

Судом установлено, что сопроводительным письмом от 07.10.2019, которое  поступило в адрес Общества 08.10.2019, истец направил в адрес ответчика акты  выполненных работ согласно приложения: акт № 29 от 07.10.2019 с указанием  объема работ автогрейдера 238 час. на сумму 476 000 руб., подписанный со  стороны ответчика работником ФИО7, а также односторонний акт № 30  от 07.10.2019 на сумму 224 400 руб. с указанием объема работ экскаватора- погрузчика 132 час (т. 1 л.д. 16-20).  

 В связи с чем, судом отклоняются доводы ответчика о том, что заказчик не  был надлежащим образом уведомлен об окончании работ и готовности подрядчика  к сдаче выполненных работ, а также доводы о неполучении спорных актов  выполненных работ. Мотивированного отказа от приемки результата работ  Обществом не заявлялось. На наличие в работах предпринимателя существенных и  неустранимых недостатков Общество не ссылалось, доказательств таких  недостатков суду не представлено.  

Оценив с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности собранные по  делу доказательства, руководствуясь положениями статьи 720 Гражданского  кодекса Российской Федерации, при отсутствии доказательств наличия  недостатков в выполненных работах суд пришел к выводу о наличии в материалах  дела достаточных доказательств выполнения предпринимателем работ в объеме,  указанном актами № 29 и № 30 от 07.10.2019, поступивших в Общество 08.10.2019,  в связи с чем, в соответствии с положениями статьями 702, 711 Гражданского  кодекса Российской Федерации признаёт заявленные требования о взыскании  

задолженности за выполненные работы в сумме 700 400 руб. на основании актов   № 29 и № 30 от 07.10.2019 правомерными и подлежащими удовлетворению.  

В силу пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации  общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в  соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации,  если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со  дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том,  кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.  

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока  исковой давности начинается по окончании срока исполнения (пункт 2 статьи 200  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 16 Постановления № 43,  согласно пункту 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации,  течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к  несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено  законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях  течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для  проведения этой процедуры.  

Учитывая изложенные нормы права, а также сроки оплаты, установленные  пунктом 3.2 договора, принимая во внимание, что исковое заявление поступило в  суд 22.09.2019, суд отклоняет довод Общества о пропуске истцом срока исковой  давности по требованиям, вытекающим из актов № 29 и № 30 от 07.10.2019.  

Рассматривая остальные требования предпринимателя, вытекающие из актов   № 34 от 01.11.2019 на сумму 164 700 руб. (простой по вине заказчика), № 35 от  02.12.2019 на сумму 183 000 руб. (простой по вине заказчика), № 38 от 30.12.2019  на сумму 223 000 руб. (183 000 руб. – простой по вине заказчика, 40 000 руб.  услуги трала), суд не усматривает оснований для их удовлетворения.  

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт  простоя по вине заказчика, в материалы дела не представлены. Суд критически  относится к актам простоя, представленным ответчиком (т. 1 л.д. 132-133),  учитывая, что допрошенные в ходе судебного заседания свидетели ФИО8  и ФИО9, чьи подписи содержаться на указанных актах, пояснили, что  данные акты переподписывали уже позже в 2022 году.  

Из буквального содержания условий договора подряда не предусмотрено, что  подрядчик будет обеспечен работой постоянно, а его техника задействована ежедневно  или в какие-то конкретные периоды, объем работ и график работ также не указаны в  договоре. В адрес ответчика уведомления о начале простоя и акты простоя по вине  Заказчика не поступали, заявки на выдачу техзаданий не поступали, доказательств иного  суду не представлено.  

Требования Истца о возмещении услуг трала в размере 40 000 руб. для  перебазировки техники предпринимателя также не подлежат удовлетворению, так  как в договоре возмездного оказания услуг по строительству лесных дорог  обязанность ответчика (Заказчика) по возмещению затрат исполнителя на  перебазировку техники отсутствует. Доказательств оказания услуг трала именно в  рамках выполнения работ по договору от 02.01.2019 не представлено. При этом,  суд также принимает во внимание, что согласно договору на перевозку от  

15.12.2019 № ЛЗ-15/12/19, выставленном счету на оплату № 116 от 22.19.2019, акту   № 114 от 24.12.2019 стоимость услуг перевозки автогрейдера составляет 18 800 руб.  

Истцом также предъявлены требования о взыскании 231 521 руб. 26 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.10.2019  по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 14.03.2023 и до даты фактического исполнения  обязательства.  

Поскольку требования истца в части основного долга удовлетворены судом  частично в сумме 700 400 руб., требования истца о взыскании процентов на  основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации также  подлежат удовлетворению частично. По расчету суда сумма процентов за период с  16.10.2019 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по 17.03.2022 (с учётом Постановления  Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел  о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами") составляет 131 453 руб.  51 коп.  

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование  чужими денежными средствами по день фактической оплаты.  

Согласно пункта 3 статьи 395 ГК РФ проценты подлежат уплате за весь  период пользования чужими средствами по день фактической уплаты этих средств  кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не определен  более короткий срок.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 48 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств" проценты за пользование чужими  денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих  средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих  взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения  указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения  обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического  исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору,  включается в период расчета процентов.  

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование  чужими денежными средствами начиная с даты принятия решения по настоящему  делу по день фактической оплаты также подлежит удовлетворению.  

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению частично.  Расходы по госпошлине суд в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации относит на стороны пропорционально  удовлетворенным требованиям.  

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично. 

2. Взыскать с акционерного общества "Кондопожское лесопромышленное  хозяйство" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 831 853 руб. 51 коп., из них:  700 400 руб. задолженности по договору от 02.01.2019, 131 453 руб. 51 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на  17.03.2023 и, начиная с 18.03.2023 проценты за пользование чужими  денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса  Российской Федерации до даты фактической уплаты основного долга  (700 400 руб.), а также расходы по уплате госпошлины в сумме 15 515 руб.  В остальной части иска отказать.  

3. Взыскать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 1 700 руб. 46 коп.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Богданова О.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 02.03.2022 9:31:00

Кому выдана Богданова Ольга Викторовна