Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А12- 33922/2019

г. Волгоград

27 ноября 2019 г.

Резолютивная часть решения оглашена 20 ноября 2019 г.

Решение изготовлено в полном объеме 27 ноября 2019 г.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СК ЮгВолгаСтрой» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков выполненных работ  по договору,

 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность  от 24.12.2018 г.,

от ответчика – не явился, извещен; 

 

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями  к  ответчику в котором просит обязать его в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ по № 70-к от 09.06.2017, а именно:

         1.На стенах цоколя и первого яруса по всему периметру здания на площади 400 м2 отремонтировать штукатурку с выполнением всех работ (согласно тех.заданию).

        2.Выполнить ремонт штукатурки дверных откосов ДН1, ДН2, ДНЗ (выход из переходов ВГ РДВ, два складских помещения со стороны засыпки в здании В Г правая сторона, склад для хранения водолазных принадлежностей     и  оборудования, склад для хранения принадлежностей судопропускников, вход в устой ВГ правая сторона, вход в помещение инженера связи в здании ВГ правая сторона; складское помещение и мастерская электриков, вход в устой ВГ левая сторона (согласно тех.заданию), общая площадь откосов 22 м2.

3. На двери ДН 1 (выход из переходов ВГ РДВ, два складских помещения со стороны засыпки в здании ВГ правая сторона, склад для хранения водолазных принадлежностей и оборудования, склад для хранения принадлежностей судопропускников, вход в устой ВГ правая сторона, вход в помещение инженера связи в здании ВГ правая сторона; складское помещение и мастерская электриков, вход в устой ВГ левая сторона) приобрести (изготовить) и установить декоративные элементы из дерева, декоративные элементы из металла в полном объеме.

 4. На двери ДН 2 (два складских помещения со стороны засыпки в здании ВГ правая сторона) приобрести (изготовить) и установить декоративные элементы из металла в полном объеме.

          5. На двери ДН 3 в количестве 7 шт. (склад для хранения водолазных принадлежностей и оборудования, склад для хранения принадлежностей судопропускников, вход в устой ВГ правая сторона, вход в помещение инженера связи в здании ВГ правая сторона; складское помещение и мастерская электриков, вход в устой ВГ левая сторона) приобрести (изготовить) и установить декоративные элементы из дерева в полном объеме.

          6. На двери ДН 3 (склад для хранения водолазных принадлежностей и оборудования, склад для хранения        принадлежностей судопропускников, складское помещение электриков) приобрести и установить дверные ручки в количестве 5 шт.

          7.Выполнить ремонт штукатурки внутренних оконных откосов ОК1-ОК6 верхней головы по правая и левая стороны на общей площади 56 м (OKI в помещениях механизмов рабочих ворот, актового зала, насосной; ОК2- в помещениях механизмов галерей, в коридорах перед помещениями механизмов галерей, судопропускников, помещение электриков ВГ правая и левая сторона; ОКЗ- на лестничных маршах ВГ правая и левая стороны; ОК4 - в кабинете ИТР, в помещении диспетчера движения, центрального пульта управления, в помещении комплектной щитовой; ОК5- в мастерской электриков, в кабинете инженера связи; ОК6- в помещении трансформаторной).

        8.Приобрести (изготовить) и установить подоконники пластиковые шириной 300 мм на все окна ВГ, общая длина подоконников 57 п.м.

         9. Приобрести (изготовить) и установить подоконные отливы из оцинкованного железа шириной 150 мм на все окна ВГ, общая длина отливов 57 п.м.

10.       Приобрести   (изготовить) и установить флагодержатели в количестве 2 шт. (ВГ правая сторона).

11.       Выполнить    ремонт кровли на стыке 3-го и 4-го ярусов правой стороны.

12.       Приобрести   и заменить в окнах стеклопакеты в количестве 7 шт. (ВГ правая сторона: лестничный марш - 1 шт., насосная - 2 шт., помещение APB - 1 шт.; ВГ левая сторона: актовый зал - 1 шт., помещение APB - 1 шт., мастерская электриков - 1 шт.).

13.       Приобрести   и заменить механизмы оконных ручек в количестве 21 шт. (в помещениях механизмов галерей - 14 шт., в коридорах перед помещениями механизмов галерей - 2 шт., судопропускников - 1 шт., помещение электриков — 1 шт., актового зала — 1 шт, лестничных маршах - 2 шт.).

Истец  просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, письменного отзыва не представил.

В силу ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела,  выслушав истца, оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,  суд  находит исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела,  между  ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и ООО «СК ЮгВолгаСтрой» был заключен договор № 70-к от 09.06.2017 г.   на выполнение работ по Капитальному ремонту фасадов и кровель здания верхней головы шлюза №14 Цимлянского РГСиС - филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон», по условиям которого ООО «СК ЮгВолгаСтрой» обязался выполнить работы в соответствии с техническим заданием ФБУ «Администрация «Волго-Дон» в срок, установленный договором, а ФБУ «Администрация «Волго-Дон» обязался принять и оплатить выполненные работы в срок, установленный договором.

Сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Истцом произведена оплата выполненных работ.

Однако, в период гарантийной   эксплуатации объекта были выявлены  недостатки, указывающие на некачественное выполнение  ответчиком строительных работ, предусмотренных договором, согласно актам от 14.06.2019, от  17.04.2019.

Недостатки проведенных работ выявлены Заказчиком в пределах гарантийного срока, установленного договором.

В адрес ответчика 24.04.2019 направлена претензия с требованием устранения недостатков.

Ответа на претензию от ответчика не поступило. Недостатки до настоящего времени не устранены.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору, истец   обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Между сторонами заключен договор строительного подряда. Отношения сторон по

договору подряда и строительного подряда регулируются главой 37 ГК РФ (параграфы 1 и 3).

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы  должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям - обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором,

результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно статье 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможности эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

В соответствии с пунктом 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

В соответствии с пунктом 1 статьи 724 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки,

установленные данной статьей.

В силу пункта 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Как следует из представленных актов от 14.06.2019, от  17.04.2019, в течение гарантийного срока истцом были выявлены недостатки выполненных ответчиком по договору работ.

Ответчик приглашался истцом для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки работ и согласования порядка их устранения (письмо от 18.03.2019 № 02/1-106/161, письмо от 13.05.2019 № 01-14/280).

Для осмотра и составления акта, ответчик своего представителя не направил, письмом от 16.05.2019 № 3 сообщил истцу, что в срок до 21.05.2019 будет направлен график устранения замечаний выявленных в результате осмотра.

До настоящего времени недостатки ответчиком не устранены.

Таким образом, исходя из установленных  обстоятельств и в силу указанных норм закона, суд находит требования истца о понуждении устранить недостатки выполненных работ правомерными и  подлежащими удовлетворению.

В силу ст.110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «СК ЮгВолгаСтрой» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  устранить недостатки выполненных работ по договору № 70-к от 09.06.2017, а именно:

         1.На стенах цоколя и первого яруса по всему периметру здания на площади 400 м2 отремонтировать штукатурку с выполнением всех работ (согласно тех.заданию).

        2.Выполнить ремонт штукатурки дверных откосов ДН1, ДН2, ДНЗ (выход из переходов ВГ РДВ, два складских помещения со стороны засыпки в здании В Г правая сторона, склад для хранения водолазных принадлежностей     и  оборудования, склад для хранения принадлежностей судопропускников, вход в устой ВГ правая сторона, вход в помещение инженера связи в здании ВГ правая сторона; складское помещение и мастерская электриков, вход в устой ВГ левая сторона (согласно тех.заданию), общая площадь откосов 22 м2.

3. На двери ДН 1 (выход из переходов ВГ РДВ, два складских помещения со стороны засыпки в здании ВГ правая сторона, склад для хранения водолазных принадлежностей и оборудования, склад для хранения принадлежностей судопропускников, вход в устой ВГ правая сторона, вход в помещение инженера связи в здании ВГ правая сторона; складское помещение и мастерская электриков, вход в устой ВГ левая сторона) приобрести (изготовить) и установить декоративные элементы из дерева, декоративные элементы из металла в полном объеме.

 4. На двери ДН 2 (два складских помещения со стороны засыпки в здании ВГ правая сторона) приобрести (изготовить) и установить декоративные элементы из металла в полном объеме.

          5. На двери ДН 3 в количестве 7 шт. (склад для хранения водолазных принадлежностей и оборудования, склад для хранения принадлежностей судопропускников, вход в устой ВГ правая сторона, вход в помещение инженера связи в здании ВГ правая сторона; складское помещение и мастерская электриков, вход в устой ВГ левая сторона) приобрести (изготовить) и установить декоративные элементы из дерева в полном объеме.

          6. На двери ДН 3 (склад для хранения водолазных принадлежностей и оборудования, склад для хранения        принадлежностей судопропускников, складское помещение электриков) приобрести и установить дверные ручки в количестве 5 шт.

          7.Выполнить ремонт штукатурки внутренних оконных откосов ОК1-ОК6 верхней головы по правая и левая стороны на общей площади 56 м (OKI в помещениях механизмов рабочих ворот, актового зала, насосной; ОК2- в помещениях механизмов галерей, в коридорах перед помещениями механизмов галерей, судопропускников, помещение электриков ВГ правая и левая сторона; ОКЗ- на лестничных маршах ВГ правая и левая стороны; ОК4 - в кабинете ИТР, в помещении диспетчера движения, центрального пульта управления, в помещении комплектной щитовой; ОК5- в мастерской электриков, в кабинете инженера связи; ОК6- в помещении трансформаторной).

        8.Приобрести (изготовить) и установить подоконники пластиковые шириной 300 мм на все окна ВГ, общая длина подоконников 57 п.м.

         9. Приобрести (изготовить) и установить подоконные отливы из оцинкованного железа шириной 150 мм на все окна ВГ, общая длина отливов 57 п.м.

10.       Приобрести   (изготовить) и установить флагодержатели в количестве 2 шт. (ВГ правая сторона).

11.       Выполнить    ремонт кровли на стыке 3-го и 4-го ярусов правой стороны.

12.       Приобрести   и заменить в окнах стеклопакеты в количестве 7 шт. (ВГ правая сторона: лестничный марш - 1 шт., насосная - 2 шт., помещение APB - 1 шт.; ВГ левая сторона: актовый зал - 1 шт., помещение APB - 1 шт., мастерская электриков - 1 шт.).

13.       Приобрести   и заменить механизмы оконных ручек в количестве 21 шт. (в помещениях механизмов галерей - 14 шт., в коридорах перед помещениями механизмов галерей - 2 шт., судопропускников - 1 шт., помещение электриков — 1 шт., актового зала — 1 шт, лестничных маршах - 2 шт.).

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК ЮгВолгаСтрой» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  в пользу  федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в сумме 6000 руб.   

        Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия  через арбитражный суд Волгоградской области.   

Судья                                                                                                   Л.А. Кремс