1382/2017-106629(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 16 мая 2017 года 

по делу А33-7861/2017 Красноярск 

16 мая 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт от 11.02.2016 № 1/15/К, заключенный  между обществом с ограниченной ответственностью "Стиль" и Краевым государственным  автономным профессиональным образовательным учреждением «Красноярский колледж  олимпийского резерва»:  

исключить из пункта 10.3 контракта от 11.02.2016 № 1/15/К слова «но не позднее  31.12.2016»,  

изложить пункт 1.4 контракта от 11.02.2016 № 1/15/К в следующей редакции: «Срок  выполнения работ: 1 год 3 (три) месяца 17 (семнадцать) дней с момента заключения  контракта с учетом получения всех необходимых согласований и положительного  заключения государственной экспертизы.  

Дата начала выполнения работ - 12 февраля 2016 года. Дата завершения работ - 29 мая 2017 года». 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья И.В. Яковенко