Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-21390/2022

г. Хабаровск

14 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2023 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания И.В. Лагоша,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Русмедлайн» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 680052, 

<

...>)

к краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>)

об обязании принять оборудование, предусмотренное государственным контрактом № 0122200002520004891-АЕ от 07.09.2020,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности от 01.06.2020, диплом,

от ответчика – ФИО2 по доверенности № 3/2023 от 09.01.2023, диплом.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Русмедлайн» (далее – истец, ООО «Русмедлайн») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (далее – ответчик, КГКУ «Служба заказчика Минстроя края») об обязании принять оборудование, предусмотренное государственным контрактом № 0122200002520004891-АЕ от 07.09.2020.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении иска по доводам, изложенным в отзыве, ссылался на невозможность принятия оборудования в связи с низкой технической готовностью объекта капитального строительства

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ и пункта 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 20.12.2006. № 65 суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

По результатам аукциона в электронной форме  между КГКУ «Служба заказчика Минстроя края» (Заказчик) и ООО «Русмедлайн» (Поставщик) заключен государственный контракт № 0122200002520004891-АЕ от 07.09.2020 на поставку медицинских изделий: аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых (32.50.21.122) (далее - оборудование) в соответствии со спецификацией (приложение № l к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих оборудование, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования (далее - услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образом оказанные услуги (пункт 1.1 контракта).

Номенклатура оборудования и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к контракту), технические показатели - технической частью (приложение № 2 к контракту) (пункт 1.2 контракта).

Поставка оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 

<

...> В 5 этаж объекта капитального строительства «палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» (далее - место доставки). Оказание услуг осуществляется Поставщиком в месте доставки (пункт 1.3 контракта).

Согласно пункту 2.2 контракта цена контракта составляет 24 721 624 руб. 90 коп.

В соответствии с пунктами 3.3.2, 3.3.3 контракта Заказчик обязан:

- обеспечить условия для оказания Поставщиком услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 3.3.2);

- своевременно принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образом оказанные услуги (пункт 3.3.3).

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки: с 20.01.2021 по 30.03.2021 (с учётом сроков приёмки в соответствии с разделом 6 контракта, а также сроков оказания услуг в соответствии с разделом 7 контракта).

По факту приёмки оборудования Поставщик и Заказчик подписывают акт приёма-передачи оборудования (приложение № 3 к контракту) (пункт 6.1 контракта).

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.4 контракта, направляет Поставщику подписанный акт приёма-передачи оборудования (приложение № 3 к контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения (пункт 6.3 контракта).

Согласно пункту 7.2 контракта услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, производятся в рабочие дни с 9-00 до 15-00 часов (время местное) и должны быть оказаны Поставщиком после подписания сторонами акта приёма-передачи оборудования в соответствии с разделом 6 контракта в срок, не превышающий 15 дней.

По окончании оказания услуг Заказчик и Поставщик подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к контракту) (пункт 7.7 контракта).

Поставщик письмом за исх. № 151 от 30.03.2021 уведомил Заказчика о запланированной поставке оборудования.

Заказчик письмом исх. № 1619 от 07.04.2021 сообщил Поставщику о неготовности принять оборудование в связи с низкой технической готовностью объекта капитального строительства, планируемый срок выполнения строительных работ был назначен на 30.06.2021.

Поставщик письмом за исх. № 251 от 01.10.2021 повторно уведомил Заказчика о запланированной поставке оборудования, просил предоставить информацию о готовности объекта капитального строительства.

Письмом исх. № 6515 от 30.11.2022 заказчик повторно  ообщил Поставщику о неготовности принять оборудование в связи с низкой технической готовностью объекта капитального строительства, указал, что о готовности объекта и о возможности поставки оборудования будет сообщено дополнительно.

В связи с тем, что заказчик не совершил действий по приемке поставленного оборудования, помещение для установки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию не представил, ООО «Русмедлайн» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах по поставке товаров для государственных нужд и регулируются нормами параграфа 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общими положениями ГК РФ об исполнении обязательств, а также нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами ГК РФ. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, применяются иные законы.

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (статья 526 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 531 ГК РФ установлено, что в случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 ГК РФ.

В силу статьи 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

Пунктом 3 статьи 484 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик необоснованно уклоняется от приемки товара надлежащего качества со всеми необходимыми документами.

Как следует из материалов дела, истец готов исполнить обязательства по поставке товара, однако ответчик товар не принимает.

Возражая на иск, ответчик ссылается на то, что по состоянию на 31.01.2023 объект капитального строительства «Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», являющегося местом поставки оборудования и оказания услуг не сдан по независящим от заказчика причинам, срок сдачи объекта капитального строительства не определен.

В пункте 6.1 контракта стороны определили, что приёмка поставленного оборудования осуществляется в ходе передачи оборудования Заказчика в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного оборудования на соответствие спецификации (приложение № 1 к контракту) и технической части (приложение № 2 к контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на оборудования: регистрационных удостоверений, документа, выданного уполномоченными органами (организациями), подтверждающего соответствие оборудования, если таковой предусмотрен постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 или техническим регламентом;

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного оборудования.

Приёмка оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приёмки оборудования Поставщик и Заказчик подписывают акт приёма-передачи оборудования (приложение № 3 к контракту).

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.4 контракта, направляет Поставщику подписанный акт приёма-передачи оборудования (приложение № 3 к контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указывает недостатки и сроки их устранения (пункт 6.3 контракта).

Таким образом, Заказчик был обязан в соответствии с положениями статьи 513 ГК РФ и условием пункта 6.1 контракта осуществить приёмку оборудования в месте доставки - по адресу: 

<

...> В 5 этаж  объекта капитального строительства «Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» (далее - место доставки).

Истец письмами за исх. № 151 от 30.03.2021,  № 251 от 01.10.2021 уведомил Заказчика о запланированной поставке оборудования.

Поставщик письмами за исх. № 251 от 01.10.2021, № 6515 от 30.11.2022 сообщил о неготовности принять оборудования, в связи с продлением сроков строительства объекта капитального строительства «Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», являющегося местом поставки оборудования и оказания услуг, на неопределенный срок.

Материалами дела подтверждается, что истец готов поставить оборудование, предусмотренное контрактом.

Заказчик в нарушение условий контракта действий по приемке поставленного оборудования не совершил, обусловленное контрактом помещение для установки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию не предоставил.

При изложенных обстоятельствах исковые требования ООО «Русмедлайн» об обязании КГКУ «Служба заказчика Минстроя края» принять у общества с ограниченной ответственностью «Русмедлайн» оборудование, предусмотренное государственным контрактом № 0122200002520004891-АЕ от 07.09.2020, заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Обязать Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» принять у общества с ограниченной ответственностью «Русмедлайн» оборудование, предусмотренное государственным контрактом № 0122200002520004891-АЕ от 07.09.2020.

Взыскать с краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русмедлайн» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                                      А.Ю. Милосердова