ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-103069/18

29 мая 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена  22 мая 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  29 мая 2019 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего-судьи Иевлева П.А., 

судей Диаковской Н.В., Панкратьевой Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1, 

при участии в заседании: 

от истца по делу - ООО «Корпорация Р-Индустрия» - ФИО2 по доверенности от 03.05.2018, 

от ответчика по делу - ООО «ПромСтрой» - представитель не явился, извещен,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Корпорация РИндустрия» на решение Арбитражного суда Московской области от 25 февраля 2019 года по делу № А41-103069/18, принятое судьей Машиным П.И., по заявлению ООО «Корпорация Р-Индустрия» к ООО «ПромСтрой» об обязании, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Корпорация Р-Индустрия» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «ПромСтрой» об обязании ООО «ПромСтрой» передать исполнительную документацию по договору №120/01/2014 от 30.04.2014 в составе:

Наименование работ

Состав исполнительной документации

Подготовка территории строительства

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Демонтажные работы здания кипятилки

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Демонтаж теплотрассы (строительные работы)

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Демонтаж

Акты на выполненные (скрытые) работы

Теплотрассы (трубопроводы)

Исполнительные схемы

Демонтажные работы здания багажного склада

Протокол измерения сопротивления  

Изоляции 

Акт технической готовности электромонтажных работ 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов 

Акты выполненные (скрытые) работы 

Исполнительные схемы

Освещение и электрооборудование. Временное помещение билетных касс

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Работы для временного размещения ж.д. касс в помещении кипятильной

Основные объекты

Строительства

Акт освидетельствования ответственных конструкций 

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Вокзал

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Общестроительные работы. Навес пассажирской платформы

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Реставрационные работы здания вокзала

Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Реконструкция здания санузла

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта Ведомость недоделок Справка о ликвидации недоделок Акт о готовности строительной части помещений Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ Кабельный журнал Исполнительные схемы

Автоматизация систем наружного пожаротушения

Объекты энергетического хозяйства

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Реконструкция фидера № 1 ячейки № 4 ТП Верхотурье

Протокол уложенных кабелей Кабельный журнал Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Наружная электрическая сеть 0,4 кВ

Протокол испытания кабеля 10 кВ Протокол уложенных кабелей Кабельный журнал Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Воздушная линия 10 кВ от ТП Верхотурье до КТП – 2

Протокол испытания кабеля 10 кВ Протокол уложенных кабелей Кабельный журнал 

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Кабельная линия 10 кВ от ТП Верхотурье до КТП-2

Протокол испытания кабеля 10 кВ Протокол уложенных кабелей Кабельный журнал Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Установка и подключение КТП № 1, КТП №2 к В Л-10 кВТ ПЭ

Протокол испытания кабеля 10 кВ Протокол уложенных кабелей Кабельный журнал Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Реконструкция КТП № 1. Внутри- площадочные сети

Протокол испытания кабеля 10 кВ Протокол уложенных кабелей Кабельный журнал Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Реконструкция КТП №2. Внутри- площадочные сети

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Исполнительные схемы

Наружное освещение

Наружные сети и

сооружения водоснабжения,

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Акт освидетельствования наружных сетей

водопровода

Акт о проведении приемочного

гидравлического испытания напорного

трубопровода на прочность и

герметичность

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Исполните

Наружный водопровод

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Исполнительные схемы

Исполнительн

Пожарные

резервуары емк 70 мЗ (2шт.)

(2 шт.)

Акт освидетельствования наружных сетей

водопровода

Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Наружная канализация

Акты на выполненные работы

Выгреб емкостью 50

Акт освидетельствования наружных сетей

водопровода

Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Теплотрасса

(строительные работы)

Акт освидетельствования наружных сетей водопровода

Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Акт о пр

Теплотрасса (трубопроводы)

Благоустройство и

Озеленение территории

Территории

Акты на выполненные работы

Исполнительные схемы

Вертикальная планировка

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Благоустройство

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Озеленение

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Малые формы

Акты на выполненные работы Исполнительные схемы

Ограждение

Акты на демонтажные работы Талоны на размещение ТБО Товарно-транспортные накладные Копия лицензии на размещение отходов

Уборка мусора при демонтаже ограждения и покрытия проездов

Акты на выполненные работы

Исполнительные схемы

Мусороконтейнерная площадка

Площадка

Временные здания и сооружения

Акты на выполненные работы

Исполнительные схемы

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Затраты

Программы ПНР, Акты на выполнение

ПНР

Пусконаладочные работы АПТ, ПТ, ОС,

ТВН, АВК

"вхолостую"Подготовка территории строительства

Протокол измерения сопротивления изоляции 

Акт технической готовности электромонтажных работ 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания освещения 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов 

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

изоляции

Временное

электроснабжение

зданий на период

ремонта здания вок-

зала

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания освещения Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Освещение и

электрооборудование.

Временное

помещение зала

ожидания пассажиров

Основные объекты

Строительства

Акты на выполненные работы

Исполнительные схемы

Общестроительные

работы. Вокзал

Акты на выполненные работы

Исполнительные схемы

Общестроительные

работы (по узлу 3,

лист 4)

Акты на выполненные работы

Исполнительные схемы

Общестроительные

работы - доп. Работы

Акты на выполненные работы

Исполнительные схемы

Сантехнические

работы

Акт визуального осмотра сварных швов

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

Акт освидетельствования внутренней системы теплоснабжения Акты на выполненные (скрытые) работы Технический паспорт системы вентиляции

Исполнительные схемы

Вентиляция

Акт визуального осмотра сварных швов Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

Акт освидетельствования внутренней системы теплоснабжения Акты на выполненные (скрытые) работы Технический паспорт системы вентиляции Исполнительные схемы

Кондиционирование

Акт визуального осмотра сварных швов Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

Акт освидетельствования внутренней системы теплоснабжения Акты на выполненные (скрытые) работы Технический паспорт системы вентиляции Исполнительные схемы

Отопление и теплоснабжение

Акт визуального осмотра сварных швов Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

ИТП

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок Акт о готовности строительной части помещений

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ Акты на выполненные (скрытые) работы Акт технической готовности электромонтажных работ Кабельный журнал Исполнительные схемы

Пожаротушение

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Акт проверки осветительной сети на

правильность зажигания внутреннего

освещения

Акт проверки осветительной сети на

функционирование и правильность

установочных аппаратов

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Освещение

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного

оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Пожарно-охранная

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного

оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Силовое

Электрооборудование

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного

оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Система оповещения

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного

оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ Кабельный

журнал Исполнительные схемы

Видеонаблюдение

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Сети связи

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного

оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Автоматизация

системы водопровода и канализации

и канализации

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Автоматизация

системы отопления и

вентиляции

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного

оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Автоматика системы

Теплоснабжения

Протокол измерения сопротивления

изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части

помещений

Ведомость смонтированного

оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Автоматизация

Пожаротушения

Акт технической готовности

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Молниезащита

Паспорта и сертификаты на оборудование

Технологическое

Оборудование

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Архитектурно-лепной

Декор

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Воссоздание окон и дверей

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Реставрация кровли центральной части и фасадом

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Ремонтно-

строительные работы

Объекты

энергетического

хозяйства

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания освещения Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Архитектурное освещение

Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения,теп- лоснабжения и газоснабжения

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Фундаменты под пожарные резервуары

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Фундаменты под выгребную емкость

Основные объекты строительства

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Двери

индивидуального изготовления

Акт визуального осмотра сварных швов Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Переустройство трубопроводов в ИТП

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Исполнительные схемы

Реставрация

кирпичной кладки

фасадов

центрального объема

здания

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Реставрация фронтонов

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Реставрация лепнины

Объекты

Энергетического хозяйства

Хозяйства

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Окраска КТП №1, КТП №2

Благоустройство и

озеленение

территории

Акт освидетельствования ответственных

конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Платформа

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Деревянные скамьи и зал ожидания

зал ожидания

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Журнал входного контроля;

Журнал авторского надзора;

Общий журнал работ КС-6;

Приказы на ответственных лиц;

Паспорта и сертификаты на используемые

материалы и оборудование;

Свидетельства СРО организаций,

привлеченных к работам на Объекте

Решением Арбитражного суда Московской области от 25.02.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

ООО «Корпорация РИндустрия» не согласилось с выводами суда, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, по мотивам, изложенным в жалобе. 

Судебное заседание проведено в соответствии с нормами статей 121-123, 153, 156 АПК РФ, в отсутствие представителя ООО «ПромСтрой», надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации в картотеке арбитражных дел на сайте (www.//kad.arbitr.ru) в соответствии с положениями ч. 6 ст. 121 АПК РФ. 

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ООО «Корпорация Р-Индустрия» поддержал доводы апелляционной жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив апелляционную жалобу, материалы дела, выслушав представителя ООО «Корпорация Р-Индустрия», суд апелляционной инстанции с учетом требований статьи 71 АПК РФ установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что 30 апреля 2014 года между ООО «Корпорация Р-Индустрия» (генподрядчик) и ООО «ПромСтрой» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 120/01/2014 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции объекта - вокзала станции Верхотурье в составе титула: «Реконструкция вокзала ст. Верхотурье» (бизнес код 001.2011.10003544) на Свердловской железной дороге - филиале ОАО «РЖД» в интересах Дирекции пассажирских обустройств, в составе инвестиционной программы «Реконструкция вокзального строительно-монтажных пригородных пассажирских перевозок (далее - договор).

Цена работ, подлежащих выполнению субподрядчиком по договору, является твердой и в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 1 к договору) составляет 52254394 руб. 00 коп., кроме того НДС 18% - 9144194 руб. 22 коп., всего с НДС 18% - 61398588 руб. 22 коп. (п. 2.1 договора).

В соответствии с пунктом 2.4.1 договора работы, фактически выполненные, сданные субподрядчиком и принятые генподрядчиком до 20 - го числа (включительно) каждого текущего месяца, оплачиваются генподрядчиком в размере 95% (девяносто пяти) процентов от их стоимости в течение 75 (семидесяти пяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления субподрядчиком исполнительной документации на выполненный объем работ, счета и счета-фактуры, при условии поступления финансирования генподрядчику от заказчика.

В пункте 5.3. договора указано, что субподрядчик до 20 числа каждого месяца составляет и передает генподрядчику промежуточную исполнительную документацию на выполненные объемы работ.

Согласно пункту 4.1.14 договора ответчик с момента начала работ и до их завершения обязан вести всю необходимую и требуемую документацию по учету работы в капитальном строительстве в соответствии с требованиями СНиП, в том числе журнал производства работ, в котором отражается ход фактического производства работ, факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях генподрядчика и субподрядчика. Каждая запись в журнале подписывается субподрядчиком.

31 декабря 2015 года ответчик передал истцу результат работы, что подтверждается актом выполненных работ от 31.12.2015 и не оспаривается сторонами по существу.

Полагая, что ООО «ПромСтрой» нарушило свои договорные обязательства в части предоставления ООО «Корпорация Р-Индустрия» исполнительной документации, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в иске, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Для защиты гражданских прав, возможно, использовать один либо несколько способов из перечисленных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способов. Однако если норма права предусматривает для конкретного правоотношения только определенный способ защиты, стороны правоотношений вправе применить только определенный способ защиты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.

Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных кодексом и другими законами.

Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило. Указанные положения разъяснены в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».

В соответствии с абзацем 7 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав заключается в понуждении должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства (договора).

Требование о понуждении к исполнению обязанности в натуре может быть удовлетворено при условии, что данная обязанность предусмотрена законом либо договором.

Таким образом, суд удовлетворяет требования кредитора о возложении на должника обязанности по исполнению обязательства в натуре при установлении следующих обстоятельств - наличие согласованных сторонами соответствующих условий договора, представление истцом достаточной совокупности доказательств, подтверждающих нарушение его прав действиями ответчика, установление факта наличия неисполненной обязанности ответчика.

Согласно статье 726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать, в том числе ведение исполнительной документации.

Состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006) (далее - Требования).

В силу пункта 5 Требований исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в главе II Порядок ведения исполнительной документации.

Императивных норм устанавливающих обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации подлежащей передаче подрядчику, нормы действующего законодательства не содержат.

В этой связи, в случае закрепления в договоре подряда обязанности подрядчика по передаче исполнительной документации сторонами должны быть согласованы условия о составе исполнительной документации подлежащей передаче подрядчиком, позволяющие определить перечень такой документации.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что заключенный между сторонами договор субподряда № 120/01/2014 от 30.04.2014 не регулирует отношения по ведению исполнительной документации субподрядчиком.

Сам перечень исполнительной документации, подлежащий передаче субподрядчиком генподрядчику, ни договором № 120/01/2014 от 30.04.2014, ни иными соглашениями сторон, не определен.

Условиями договора не предусмотрена обязанность субподрядчика передать именно тот перечень исполнительной документации, который запрашивает истец.

В силу пункта 4.1.21 договора субподрядчик обязался передать генподрядчику по окончанию выполнения работ, при подписании Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости работ и затрат по форме № КС-3, исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных, пуско-наладочных работах, а также схемы расположения и каталоги координат, высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания (при необходимости), согласованные в установленном порядке в инспектирующих организациях.

Истец путем подписания актов о приемке выполненных работ, составленных по унифицированной форме №КС-2, без замечаний и возражений принял выполненные ответчиком работы, что исходя из буквального значения содержащихся в пунктах 4.1.21, 5.3, 5.5 договора слов и выражений и принципа добросовестности участников гражданских правоотношений, свидетельствует о том, что исполнительная документация была передана генподрядчику.

Факт передачи ответчиком истцу исполнительной документации подтверждается также накладными от 15.10.2015 и от 22.12.2016.

Доказательств того, что без истребуемой исполнительной документации, невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре, истец не представил.

В свою очередь, как пояснил представитель ответчика в судебном заседании, объект строительства эксплуатируется, что также подтверждается Актом приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта от 27.12.2017.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что истец не представил суду бесспорные доказательства наличия у ответчика обязанности по предоставлению истребуемых документов, основанной на нормах права или возникшей из договора, в связи с чем основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты во внимание, поскольку в материалы дела не представлены какие-либо доказательства направления ответчику в период с 2016 года до июля 2018 года претензий, связанных с отсутствием исполнительной документации, акт выполненных работ подписан сторонами без каких-либо возражений. 

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства и не могут повлиять на законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Из доводов апелляционной жалобы, материалов дела, оснований для отмены решения суда первой инстанции не усматривается.

Руководствуясь статьями 266, 268, п. 1 ст. 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 25.02.2019 по делу № А41-103069/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий cудья

П.А. Иевлев

Судьи

Н.В. Диаковская

Н.А. Панкратьева