АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-3314/2015

г. Южно-Сахалинск

13 апреля 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации  муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к федеральному  государственному бюджетному образовательному учреждению  профессионального образования «Сахалинский государственный  университет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании  устранить недостатки при выполнении работ по муниципальному  контракту № 49/2012 «на выполнение инженерных изысканий по объекту:  Строительство полигона твердых бытовых отходов в МО «Южно- Курильский городской округ» о. Кунашир, в том числе (ПИР)» и  взыскании неустойки,  

руководствуясь статьями 49, 110, 151, 167-170, 174 и 176 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Принять отказ администрации муниципального образования «Южно- Курильский городской округ» от исковых требований к федеральному  государственному бюджетному образовательному учреждению  профессионального образования «Сахалинский государственный  университет» об обязании устранить недостатки работ по муниципальному  контракту № 49/2012 «на выполнение инженерных изысканий по объекту:  Строительство полигона твердых бытовых отходов в МО «Южно- Курильский городской округ» о. Кунашир, в том числе (ПИР)» в части:  выполнения раздела 6 технического задания «Изыскания источников  водоснабжения на базе подземных вод»; проведения изыскания  источников водоснабжения на базе поземных вод с представлением  

лицензии и электронной версии отчета по изысканиям. Производство по  делу в указанной части прекратить.  

Исковые требования в остальной части удовлетворить. 

Обязать федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение профессионального образования «Сахалинский  государственный университет» в шестидесятидневный срок после  вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  недостатки работ по муниципальному контракту № 49/2012 «на  выполнение инженерных изысканий по объекту: Строительство полигона  твердых бытовых отходов в МО «Южно-Курильский городской округ» о.  Кунашир, в том числе (ПИР)» путем дополнения технической  документации, а именно:  

- уточнить сейсмичность площадки строительства; 

- дополнить технический отчет характеристиками природных и  техногенных условий объекта строительства: прогнозом возможных их  изменений и рекомендациями по учету особенностей этих условий при  строительном освоении территории (участка, площадки, трассы) для  различных видов строительства с детальностью, отвечающей этапу  (стадии) разработки предпроектной и проектной документации; оценкой  опасности природных процессов: риском от природных и техноприродных  процессов;  

- создать геодезическую сеть специального назначения для  строительства;  

- по вновь созданной геодезической сети специального назначения  для строительства представить схему создания планово-высотной опорной  и (или) съемочной геодезической сети;  

- представить высотные отметки по скважинам, каталог координат и  высот оформить в математических (прямоугольных) координатах;  

- представить справку Сахалинского УГМС по приложению 1 п. 5.1.  Технического задания на производство инженерных изысканий;  

- провести камеральную обработку протоколов лабораторных  исследований приведенных в отчете по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям, обосновать расчетные данные  результатов инженерных изысканий, провести прогноз их изменений в  процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;  

- произвести оценку потенциальной подтопляемости территории  площадки, описать в отчетах цунами. Указать высоту захлеста волн,  определить их характеристик для обоснования проектных и строительных  мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов;  

- провести исследование атмосферного воздуха в объеме,  необходимом и достаточном для последующих прогнозов, расчетными  методами загрязнения атмосферного воздуха от проектируемого объекта с  получением официальных данных Росгидромета;  

- провести и дать оценку химического загрязнения почв и грунтов; 

- дополнить отчет по инженерно-экологическим изысканиям  необходимыми графическими приложениями, а также разделами и  сведениями об особо охраняемых природных территориях и других  экологических ограничениях природопользования;  

- представить электронную версию отчетов в соответствии с  содержаниями книг в бумажном виде согласно ГОСТ 21.1101-2009 (п.  5.1.2.) (ГОСТ Р 21.1101-2013).  

Взыскать с федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения профессионального образования  «Сахалинский государственный университет» в пользу администрации  муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  136 020 рублей 65 копеек неустойки, 552 000 рублей в счет возмещения  расходов на оплату судебной экспертизы, проведенной по делу, всего  688 020 рублей 65 копеек.  

Взыскать с федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения профессионального образования  «Сахалинский государственный университет» в доход федерального  бюджета 11 081 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев