АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-14519/2018

г. Нижний Новгород                                                               15 августа 2019 года

резолютивная часть решения объявлена                               25 июля 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Трясковой Надежды Викторовны (шифр 9-556),

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску: индивидуального предпринимателя ФИО2                         (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Спектр-НН»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 23 175 415 руб. 27 коп., (с учетом уточнения 22 530 535 руб.82 коп).

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 – паспорт гражданина Российской Федерации, ФИО3 (доверенность от 02.04.2018);

от ответчика: ФИО4 (доверенность от 13.03.2017);

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2(далее - ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, уточненным на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Спектр-НН» о взыскании 15 670 841 руб. неосновательного обогащения по договору генерального подряда от 25.07.2014 №02/14,1 828 999 руб. неустойки по договору генерального подряда от 25.07.2014 №02/14, 4 215 990 руб. 68 коп. неосновательного обогащения по договору по сопровождению проектных работ от 23.03.2015 №П1-15,474 125 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с 11.01.2018 по 10.07.2019  с начислением по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды,150 000 руб. неосновательного обогащения, перечисленного по платежному поручению от 07.04.2016 №57. Кроме того, истец просит отнести на ответчика расходы на оплату услуг специалистов в размере 190 579 руб. 44 коп. 

Исковые требования заявлены на основании статей 309, 310, 395, 708, 715, 740, 743, 753, 758, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств в рамках подписанных с истцом договоров, а также невыполнением работ на перечисленную ответчику сумму.  Согласно техническому заключению ООО "НН-Оргтехкровля" от 01.06.2017 стоимость фактически выполненных ответчиком строительно-монтажных работ с учетом оказанных услуг охраны составляет по двум договорам генерального подряда 15 894 896 рублей. Иные денежные средства, перечисленные ответчику в рамках договоров генерального подряда, договора по сопровождению проектных работ, договора на выполнение проектных и изыскательских работ, который не был в последующим подписан сторонами, - являются неосновательным обогащением ответчика и подлежат возврату истцу.

Ответчик предъявленные требования не признал. Согласно позиции, изложенной письменно в отзыве на исковое заявление, работы по строительству торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...>, по состоянию на февраль 2015 года выполнены ориентировочно на 70%, работы по сопровождению проектных работ выполнены на 63,4%, оставшуюся часть работ ответчик не смог выполнить в связи с непредставлением истцом необходимой технической документации. Стоимость фактически выполненных ответчиком работ значительно превышает сумму, указанную специалистами ООО "НН-Оргтехстрой".

Определением суда от 13.02.2019 производство по делу приостановлено в связи с назначением по ходатайству ответчика судебной экспертизы, проведение которой поручено эксперту ООО "Приволжский центр финансового консалтинга и оценки" ФИО5. После окончания экспертизы определением суда от 16.05.2019 производство по делу возобновлено, заключение эксперта от 30.04.2019 № 7СТЭ-9 приобщено к материалам дела.

В ходе судебного заседания 10.07.2019 ответчиком заявлено ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы.

Ответчик полагает, что при проведении экспертизы эксперт не произвел необходимых исследований и измерений, построив свои выводы преимущественно на экспертном заключении ООО "НН-Оргтехстрой", проведение которой было инициировано истцом до обращения с исковым заявлением в суд.

Кроме того, ООО "Спектр-НН" считает, что эксперт нарушил требования статьи 16 Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также нормы процессуального права, поскольку в ходе проведения экспертизы обращался к представителям ответчика с требованием представить дополнительные документы (акты выполненных работ, проект и т.д.)

В целях объективного рассмотрения дела в судебном заседании 25.07.2019 заслушаны пояснения эксперта  ФИО5 по выполненному заключению, которые отражены в протоколе судебного заседания (аудиозапись). 

Эксперт, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пояснил, что оценке подвергались исключительно документы, представленные сторонами в ходе судебных заседаний. Никаких новых документов, копии которых судом не передавались эксперту, он у сторон не запрашивал. Данные показания отражены в протоколе  судебного заседания. Кроме того, эксперт пояснил, что необходимые замеры им осуществлялись, сведения, содержащиеся в экспертизе, проведенной ООО "НН-Оргтехстрой", также были им учтены и эти сведения и измерения соответствуют фактическим обстоятельствам, выявленным в ходе осмотра объекта капитального строительства.

Оценив, экспертное заключение, суд нашел его соответствующим требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отражающим все предусмотренные частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения, основанным на материалах дела.

Ходатайство ответчика судом рассмотрено и отклонено, поскольку назначение повторной экспертизы на основании статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится к праву арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора. В рассматриваемом случае с учетом пояснений эксперта такая необходимость судом не установлена. Несогласие с выводами эксперта не свидетельствует о необоснованности и противоречивости экспертного заключения. Обоснованных доводов для подтверждения необходимости проведения повторного экспертного исследования по установленным законом основаниям заявителем не приведено.

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела в целях формирования правовой позиции по представленному экспертному заключению и пояснениям эксперта в судебном заседании.

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд отклонил его, поскольку оно направлено на необоснованное затягивание судебного разбирательства. Ответчик располагал достаточным временем для формирования позиции по делу и представления документов в опровержение доводов истца.

Как следует из материалов дела, 15.04.2014 ИП ФИО2 (заказчик) иООО "Спектр Нижний Новгород" (генподрядчик) подписали договор генерального подряда № 06/04-14, по условиям которого заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательства по строительству торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...>,  в соответствии с представленной заказчиком проектно-сметной документацией № 2012-120-РП, выполненной ИП ФИО6

Согласно сводному сметному расчету стоимости строительства общая стоимость работ по договору составила 39 756 380 рублей.

В пунктах 3.1, 3.2 договора и в соответствии с графиком производства работ по строительству торгового центра стороны согласовали, что работы должны быть выполнены до 28.02.2015 с возможностью увеличения срока выполнения работ не более чем на 2 месяца.

В рамках исполнения договора стороны подписали акт о приемке выполненных работ от 30.07.2014 на сумму 5 651 520 руб., перечисленных истцом ответчику в период с 03.06.2014 по 16.07.2014, что подтверждается соответствующими платежными поручениями.

На основании письма от 08.08.2014 № 1 и с согласия истца ООО "Спектр Нижний Новгород" передало обязательства по договору от 15.04.2014 № 06/04-14 ООО "Спектр НН", которое в свою очередь возложило на себя обязательства по исполнению условий договора.

В целях дальнейшего строительства торгового центра ИП ФИО2 и ООО "Спектр-НН" 25.07.2014 подписали договор генерального подряда№ 02/14, стоимость которого составила 34 104 859 руб.

В пунктах 3.1, 3.2 договора и в соответствии с графиком производства работ по строительству торгового центра стороны согласовали, что работы должны быть выполнены до 28.02.2015 с возможностью увеличения срока выполнения работ не более чем на 2 месяца.

В пункте 7.1 договора стороны согласовали, что в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, сторона, виновно  допустившая просрочку, уплачивает другой стороне неустойку из расчета 0,1 процента от стоимости невыполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, но не более 10процентов от стоимости не выполненных в срок обязательств.

Истец и ответчик 26.09.2014 подписали дополнительное соглашение № 1 к договору генерального подряда № 02/14 на выполнение работ по газоснабжению торгового центра  стоимостью 401 500 руб. и 16.02.2015 - дополнительное соглашение № 2 на осуществление охраны здания стоимостью 90 руб. в час за работу одного охранника.

По итогам выполнения работ стороны подписали акты о приемке выполненных работ на общую сумму 21 151 719 руб. 72 коп.

В период с 25.07.2014 по 08.06.2016 по договору от 25.07.2014 № 02/14 истец перечислил ответчику 26 522 720 рублей.

Всего по двум договорам генерального подряда истец перечислил ответчику32 174 240 руб.,  подписав при этом акты о приемке выполненных работ на26 803 239 руб. 72 коп.

Специалистами ООО "Гидротехник" 06.07.2016 в присутствии истца, генерального директора ООО "Спектр-НН" ФИО7, а также автора проекта ИП ФИО6 произведено обследование незавершенного строительством здания торгового центра, по результатам которого составлен акт недостатков, подлежащих устранению. От подписания данного акта ответчик отказался. 

В связи с уклонением ответчика от устранения недостатков выполненных работ и завершения строительства торгового центра истец обратился в специализированную организацию ООО "НН-Оргтехстрой" в целях установления объемов и стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ.

Согласно техническому заключению ООО "НН-Оргтехстрой" от 13.12.2016 сметная стоимость выполненных строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом строительства 2012-10-РП, по состоянию на ноябрь 2016 составляет15 607 866 руб.

В претензии от 21.12.2017 истец уведомил ответчика об отказе от договора подряда от 25.07.2014 № 02/14 и потребовал вернуть 17 245 334 руб. 68 коп. неотработанных денежных средств.

Кроме того,  23.03.2015 ИП ФИО2 (заказчик) и ООО "Спектр-НН" (генподрядчик) подписали договор по сопровождению проектных работ № П1-15, по условиям которого заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательства по сопровождению разработки проектной документации (работа с проектной организацией, сбор необходимой документации) для реконструкции торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с представленным заказчиком техническим заданием.

Стоимость договора составила 3 250 000 рублей, из них за сопровождение разработки проектной документации - 3 000 000 рублей, за прохождение государственной экспертизы - 250 000 рублей.

В пункте 3.1 договора стороны определили, что работы должны быть выполнены до 31.12.2015. При завершении работ генподрядчик должен был передать заказчику проектную документацию по выполненному этапу работ, счет-фактуру, акт сдачи-приемки.

Во исполнение договора истец в период с 31.03.2015 по 16.06.2016 перечислил ответчику авансовый платеж в общей сумме 4 215 990 руб. 68 коп.

Поскольку в согласованный срок результат работ не был передан истцу, в уведомлении от 21.12.2017 ИП ФИО2 сообщил ответчику об отказе от договора от 23.03.2015 № П1-15 и потребовал возвратить неотработанный аванс.

В ответе от 10.01.2018 № 01  на претензии истца ответчик сообщил о необоснованности требований истца и отказался вернуть полученные денежные средства.

Кроме того, 05.04.2016 ответчик в целях дальнейшего заключения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в отношении другого земельного участка в г.Дзержинске выставил ИП ФИО2 счет № 12 на сумму 150 000 рублей с указанием основания: авансовый платеж по договору по сбору исходных данных № П2-4/16 от 04.04.2016.

По платежному поручению от 07.04.2016 № 57 истец перечислил ответчику150 000 рублей с назначением платежа, соответствующим выставленному счету. 

В последующем договор сторонами заключен не был.

Неисполнение ответчиком требования о возврате денежных средств послужило ИП ФИО2 основанием для обращения в суд с соответствующим исковым требованием.

Оценив представленные сторонами доказательства и установленные по делу обстоятельства, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок, а также вследствие неосновательного обогащения.

На основании статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

На основании статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По правилам статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В статьях 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора подряда.

Материалами дела подтверждено, что истец направил ответчику письма от 21.12.2017  № 1 и 2 о расторжении договора от 23.03.2015 по сопровождению проектных работ № П1-15 и от 25.07.2014 № 02/14 на выполнение работ по строительству торгового центра и о необходимости возврата неотработанного аванса, что в силу пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет расторжение договоров. Ответы на данные письма с отказом возвратить полученные денежные средства датированы ответчиком 10.01.2018, следовательно, получены не позднее названной даты.

Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено, и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

На основании пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

При этом наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ (пункт 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Возражения ООО «Спектр-НН» сводятся к тому, что большая часть работ им выполнена, а требование о возврате неотработанного аванса в заявленном размере не соответствует фактическим объемам не выполненных работ. 

В пункте 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 

Согласно выводам заключения судебной экспертизы от 30.04.2019 № 7СТЭ-19 стоимость фактически выполненных строительно- монтажных работ ООО «Спектр-НН» по договорам генерального подряда от 15.04.2014 №06/04-14 и от 25.07.2014 № 02/14 составляет 16 216 369 руб., что подтверждает данные локально-сметного расчета, выполненного ООО "НН-Оргтехстрой". Фактически установленные выполненные объемы работ приведены в таблице № 1 экспертного заключения.

Кроме того, согласно заключению экспертизы работы велись с отклонением от проектной документации, исполнительная документация не велась в полном объеме, изменена этажность здания с 2-х до 3-х и заменена конструкция покрытия. Построенное здание не соответствует параметрам здания, указанным в разрешении на строительство № ru 52302000-446 и проекту 2012-10-РП, что противоречит требованиям статьи 51 Градостроительного РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и установленные по настоящему делу обстоятельства, суд считает, что в рассматриваемом случае стоимость работ, подлежащих оплате по двум выше названным договорам, составляет 16 216 369 руб.

Согласно представленным платежным поручениям ИП ФИО2 перечислил платежи в размере 32 174 240 руб. по договорам генерального подрядаот 15.04.2014 №06/04-14 и от 25.07.2014 № 02/14.

Поскольку отсутствие у ответчика правовых оснований для удержания полученных денежных средств подтверждено материалами дела, доказательств возврата денежных средств ООО «Спектр-НН» не представлено, требование ИП ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения является правомерным и подлежит удовлетворению в размере 15 670 841 рубль (с учетом оказанных ответчиком охранных услуг на сумму 287 030 руб.) на основании статей 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 25.07.2014 № 02/14.

По правилам статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может быть обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойки (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан платить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку наличие просрочки выполнения работ в полном объеме подтверждено материалами дела, ответственность ООО "Спектр-НН" за нарушение сроков исполнения обязательства предусмотрена положениями закона и условиями договора (пункт 7.1), начисление неустойки от стоимости невыполненных работ с учетом 10-и процентного ограничения в размере 1 828 999 руб. за период с 29.04.2015 по 10.01.2018 (дата расторжения договора) является обоснованным.

Кроме того, истцом во исполнение договора от 23.03.2015 № П1-15 по сопровождению проектных работ перечислено ООО "Спектр-НН" 4 215 990 руб. 68 коп.

Также по платежному поручению от 07.04.2016 № 57 истец перечислил ответчику 150 000 рублей в качестве аванса по договору, заключение которого предполагалось в будущем.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Каких-либо доказательств выполнения работ на полученные от истца денежные средства ответчик не представил.

Не является таким документом и ответ на уведомление истца от 21.12.2017 № 1, в котором ответчик сообщил о выполнении проектной документации на 63,4%, поскольку в отсутствие первичных документов и доказательств фактического выполнения работ такое заявление ответчика не имеет правового значения. Суд неоднократно предлагал ответчику представить документы в обоснование правомерности удержания денежных средств, но таких документов ответчик в ходе рассмотрения спора не представил.

Относительно денежных средств, полученных от истца по выставленному счету от 05.04.2016 № 12 представитель ООО "Спектр-НН" пояснил, что доказательств выполнения работ на сумму 150 000 рублей представить не может, равно как  и не может дать каких-либо пояснений относительно того, какие работы подлежали выполнению.

Следовательно, требование истца о взыскании с ответчика 4 215 990 руб. 68 коп. и 150 000 рублей подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика  474 125 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму 4 215 990 руб. 68 коп. с 11.01.2018 по 10.07.2019 с начислением по день фактического исполнения денежного обязательства.

Статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства в виде возможности взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Поскольку обязательство по возврату неосновательно удерживаемых денежных средств не исполнено, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с суммы долга 4 215 990 руб. 68 коп. с 11.01.2018 по 10.07.2019, и далее с 11.07.2019  по дату фактической оплаты с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, подлежит удовлетворению.

Кроме того, в целях определения стоимости работ, выполненных ответчиком по договорам генерального подряда от 15.04.2014 №06/04-14 и от 25.07.2014 № 02/14 истцом понесены расходы на проведение инженерного обследования здания    специалистами ООО "Гидротехник" и ООО "НН-Оргтехстрой". За составление технического заключения на основании договора от 22.11.2016 № 84/16 и уточняющего расчета ООО "НН-Оргтехстрой" перечислено190 579 рублей 44 копейки по платежным поручениям от 23.11.2016 № 648, от 19.12.2016 № 703 и от 19.05.2017 № 27. 

Данные расходы были необходимы для составления акта о недостатках по зданию и обоснования претензий, направленных ответчику, а потому подлежат взысканию в пользу истца на основании статей 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины и на проведение судебной экспертизы относятся на ответчика. 

Изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спектр-НН"(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) 15 670 841 рубль неотработанного аванса по договорам генерального подряда от 15.04.2014 № 06/04-14 и от 25.07.2014 № 02/14,1 828 999 рублей неустойки, 4 215 990 руб. 68 коп. неосновательного обогащения по договору по сопровождению проектных работ от 23.03.2015 № П1-15,474 125 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с 11.01.2018 по 10.07.2019  с начислением по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды,150 000 рублей неосновательного обогащения, 190 579 руб. 44 коп. расходов на проведение технического обследования здания, 134 699 руб. 78 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) из федерального бюджета4177 руб. 30 коп. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.04.2018 № 235.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья                 Н.В. Тряскова