1196_685698 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-14803/2019

19 июня 2020 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГБУ РК «Крымский информационно- консультационный центр агропромышленного комплекса» к ООО «Производственно- торговая копания «Пелификс ЛТД» при участии в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора Министерство  сельского хозяйства Республики Крым, ООО «ГОССТРОЙИНВЕСТ» о взыскании,  

при участии: от истца – директор ФИО2; 

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности б/н от 22.10.2019г., диплом;  ФИО4  

от третьего лица (Министерство сельского хозяйства Республики Крым) – ФИО5,  представитель по доверенности № 102 от 27.12.2019;  

от третьего лица (ООО «ГОССТРОЙИНВЕСТ»)- ФИО6, представитель по  доверенности № 11/06-20-1-д от 11.06.2020  

эксперт- ФИО7; от третьего лица – ФИО8, представитель по доверенности № 300120 от 13.01.2020 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать Ответчика ООО «ПТК «Пелификс» безвозмездно устранить недостатки работ,  выявленные в течение гарантийного периода, а именно:  

 1. Осуществить демонтаж разрушенного гнилостным грибком пола (черновые  доски 25 мм, основание по пола - древесностружечные плиты OSB 18 мм, линолеум) и  пароизоляционной пленки, уложенной между черновыми досками пола и деревянными  балками по всей площади второго этажа административного здания по адресу: 

<

...> а.  

 2. Осуществить монтаж черновой доски 25 мм и основание пола -  древесностружечные плиты OSB 18 мм, с соблюдением строительных норм и правил,  предварительно предусмотрев вентиляцию пола и проведение мероприятий по химическим  мерам защиты древесины (антисептирование, нанесение влагозащитных покрытий,  огнезащитную обработку).  

 3. Произвести замену покрытия пола (линолиума) по всей площади второго этажа  административного здания по адресу: 

<

...>.   Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПТК «Пелификс»  

(ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу ГБУ РК «Крымский информационно- консультационный центр агропромышленного комплекса» (ИНН: 

<

***>  

ОГРН: 

<

***>) судебные расходы по госпошлине в сумме 6 000,00 руб. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке  апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011,  

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня  принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.   Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья В.И. Гайворонский