АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

                                                                                                          Дело № А27-11615/2024

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

 

30 сентября 2024 г.                                                                                                г. Кемерово

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2024 г.

Решение в полном объеме изготовлено 30 сентября 2024 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи 

Лобойко О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем 

ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей

истца по доверенности от 01.03.2022

ответчика по доверенности от 30.03.2022

ФИО2

ФИО3

дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Алком» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс 

к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Красноярск 

об обязании исполнить договор о технологическом присоединении № 20.4200.1796.2 от 03.07.2023, взыскании 20 902 руб. 42 коп. неустойки, неустойки по день фактического исполнения обязательства,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Алком» (далее – истец, ООО «Алком») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ответчик, ПАО «Россети Сибирь») об обязании ПАО «Россети Сибирь» исполнить договор о технологическом присоединении к электрическим сетям № 20.4200.1796.23 от 03.07.2023, взыскании 20 902 руб. 42 коп. неустойки, начисленной с 09.01.2024 по 17.06.2024, неустойку в размере 129 руб. 83 коп. за каждый день просрочки, начиная с 18.06.2024 по день фактического исполнения договора.

Исковые требования со ссылкой на статьи 332, 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4, 21, 23.1, 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.

Определением арбитражного суда от 21.06.2024 исковое заявление принято к производству, спор рассмотрен в судебном заседании 18.09.2024 с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.  

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против взыскания неустойки за отсутствием вины, поддержал доводы отзыва.  

Третье лицо в заседание не явилось, извещено надлежащим образом, о причинах неявки не сообщило, ходатайств об отложении не заявляло, отзыв не представило. Дело рассмотрено в отсутствие третьего лица.

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Обществом с ограниченной ответственностью «Алком» (заявитель) 03.07.2023 был заключен договор о технологическом присоединении к электрическим сетям № 20.4200.1796.23.

Согласно пункту 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) "Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 30 кВт; 

- категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны). 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Объекта торговли (магазин, торговый центр, прочее)", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, Загорское сельское поселение, п. 75-й пикет, территория Рынок оптовой торговли Алком, кадастровый номер земельного участка 42:09:0312002:54 (пункт 2 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью Договора. Срок действия технических условий 2 года (пункт 4 Договора). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.11.2022 № 947 и составляет 51931,44 руб. (пункт 10 договора).

Согласно пункту 17 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

ООО «Алком» направлял обращение с просьбой уточнить срок исполнения договора (приложение к иску в электронном виде). 08 мая 2024г. истцом была направлена претензия об исполнении обязательств по договору. Однако, сетевая организация не исполнила обязанности, предусмотренные договором, что явилось основанием для обращения в суд  с настоящим иском.

Возражая на заявленные требования, ответчик поясняет следующее. Процедура технологического присоединения определена Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).

Согласно п. 10.2 технических условий (приложение к договору № 20.4200.1796.23) для осуществления технологического присоединения необходимо выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ. Для строительства линейного объекта необходимо согласование собственника земельного участка, по которому будет проходить такой объект. 

Несмотря на неоднократные запросы, такое согласование получено лишь 05.06.2024 (распоряжение КУМИ администрации Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса № 1320).

Ответчик не имел возможности исполнить договор № 20.4200.1796.23 ранее получения согласования владельца земельного участка, следовательно, начисление неустойки за просрочку, допущенную не по вине ответчика, неправомерно.

Согласно Федеральному закону от 26Ю3.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике устанавливает порядок технологического присоединении энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям, утверждает правила оптового рынка и основные положения функционирования розничных рынков.

Пункт 1 ст. 26 Федерального Закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» говорит о том, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В пункте 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 16 Правил № 861 одним из необходимых условий договора технологического присоединения является условие о размере платы за технологическое присоединение, который определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики.

Пунктами 17 и 30 Правил размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий составляет шесть месяцев со дня заключения договора.  

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Сетевая организация мероприятия, предусмотренные п. 6 договора, п. 10.2 технических условий (приложение к договору № 20.4200.1796.23), не выполнила.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Учитывая, что факт неисполнения ответчиком обязательств по договору технологического присоединения подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен, заявленные исковые требования являются обоснованными.

При этом судом отклоняется довод ответчика об отсутствии его вины в просрочке исполнения обязательства как основание для освобождения от уплаты неустойки, поскольку согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность и при отсутствии вины.

В связи с неисполнением обязательств по осуществлению технологического присоединения в установленные договором сроки (срок исполнения Договора истек «03» января 2024г. включительно), истцом в порядке ст. 17 договора начислена неустойка в размере 20902 руб. 42 коп., исходя из следующего расчета:

период                                 дни   ставка, % неустойка, руб.

09.01.2024-31.01.2024          23        0,25     2 986,06

01.02.2024-29.02.2024          29        0,25     3 765,03

01.03.2024-31.03.2024          31        0,25     4 024,69

01.04.2024-30.04.2024          30        0,25     3 894,86

01.05.2024-31.05.2024          31        0,25     4 024,69

01.06.2024-17.06.2024          17        0,25     2 207,09 

Сумма неустойки за период с 09.01.2024 по 17.06.2024 -  20 902,42 руб.

Порядок расчёта: плата за ТП х 0,25 / 100 х количество дней просрочки.

Расчет судом проверен, признан арифметически верным, соответствующим законодательству и обстоятельствам дела.

На основании изложенного требование о взыскании неустойки за период с 09.01.2024 по 17.06.2024 в размере 20 902,42 руб. и неустойки в размере 129 руб. 83 коп. за каждый день просрочки, начиная с 18.06.2024 по день фактического исполнения договора, но не более чем по 08.01.2025, подлежат удовлетворению.  

При этом срок исполнения договора о технологическом присоединении к электрическим сетям № 20.4200.1796.23 от 03.07.2023 суд считает целесообразным установить следующим образом - в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Расходы по уплате государственной пошлины согласно части 1 статьи 110 АПК относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) исполнить договор о технологическом присоединении № 20.4200.1796.2 от 03.07.2023 в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Алком» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 20 902 руб. 42 коп. неустойки за период с 09.01.2024 по 17.06.2024, неустойку в размере 129 руб. 83 коп. за каждый день просрочки, начиная с 18.06.2024 по день фактического исполнения договора, но не более чем по 08.01.2025, а также 8 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области. 

 

Судья                                                                                               О.В. Лобойко