225/2018-74752(1) 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-16441/2018

г. Челябинск

30 ноября 2018 года

Дело № А07-14206/2018  

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2018 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 30 ноября 2018 года.  

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Карпачевой М.И., судей Ермолаевой Л.П., Пирской О.Н., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  

ограниченной ответственностью «Компания «Нефтехимпромсервис» на  

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.09.2018 по делу  

 № А07-14206/2018 (судья Касьянова С.С.). 

Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных  трубопроводов» (далее – АО «Гипротрубопровод», истец) обратилось в  Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу  с ограниченной ответственностью «Компания «Нефтехимпромсервис» (далее –  ООО «Компания «НХПС», ответчик) о взыскании задолженности по договорам  подряда в общей сумме 3 598 453 руб. 64 коп., неустойки в сумме 359 845 руб.  36 коп. (л.д.6-10 т.1)  

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.09.2018  (резолютивная часть от 05.09.2018) с учетом определения об исправлении  опечатки от 22.10.2018 исковые требования удовлетворены, также с ответчика в  пользу истца взысканы расходы по оплате государственной пошлины в сумме  42 792 руб. (л.д.112-124 т.2).  

С вынесенным решением не согласился ответчик, обжаловал его в  апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ООО «Компания «НХПС»  (далее также – податель жалобы, апеллянт) просит решение суда отменить,  принять новый судебный акт.  

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ссылается на то,  что истец взятые на себя обязательства по передаче результатов работ не  исполнил надлежащим образом – проекты производства работ (ППР) в 2  экземплярах не переданы заказчику.  

Кроме того, ООО «Компания «НХПС» обращает внимание суда на то, что  судом первой инстанции в решении указаны противоречащие друг другу  суммы.  

До начала судебного заседания от АО «Гипротрубопровод» поступил  

отзыв на апелляционную жалобу (вх. № 54289 от 22.11.2018), приобщенный  судебной коллегией к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения  апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание  представители не явились.  

В отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, и в соответствии со  статьями 123, 156, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие  сторон.  

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным  судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  15.03.2017 между ООО «Компания «НХПС» (заказчик) и АО  «Гипротрубопровод» (подрядчик) заключен договор на выполнение работ   № 15043-УТНП/ГТП/02/0320-к НХПС (л.д.27-32 т.1), по условиям которого  подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с письмами АО  «Транснефть-Урал» от 13.03.2017 № ТУР-21-43-16/7977, ООО «АК  «Транснефть» от 18.01.2016 № АК-08-01-06/1672 и условиями договора  выполнить разработку проекта производства работ (ППР) по объекту:  «Резервуарный парк ЛПДС «Черкассы» (РВСП-10000 № 25-28) Уфимское ПО.  Техническое перевооружение». Заказчик обязуется принять и оплатить  результаты работы в соответствии с условиями договора (п.1.1 договора).  

Договорная стоимость работ составляет 1 123 360 руб., кроме того НДС  18% - 202 204 руб. 80 коп., итого с НДС 1 325 564 руб. 80 коп., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

В соответствии с п. 5.1.1 договора подрядчик направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков;  

- направить подрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление подрядчику  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Порядок оплаты предусмотрен разделом 6 договора. 

Подрядчик не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами  акта сдачи приемки работ предоставляет заказчику надлежащим образом  оформленный счет на оплату и счет-фактуру. Оплата выполненных и принятых  работ осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней, следующих за  датой получения заказчиком оригинала счета, счета-фактуры (п. 6.1, п. 6.2  договора).  

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае, если заказчик  нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик обязан  уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости  работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного исполнения ими своих обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован календарный план работ и согласована  договорная цена (л.д.33-34 т.1).  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую  сумму 1 325 564 руб. 80 коп., в подтверждение чего в материалы дела  предоставлен акт сдачи-приемки работ от 31.03.2017 № 263-У (л.д.37 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.03.2017 № У20170331064/2 и счет от 31.03.2017   № 263-У (л.д.38-39 т.1).  

Также 15.03.2017 между ООО «Компания «НХПС» (заказчик) и АО  «Гипротрубопровод» (подрядчик) заключен договор на выполнение работ   № 16018-УТНП/ГТП/03/0321-к НХПС (л.д.42-47 т.1), по условиям которого  подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с письмами АО  «Транснефть-Урал» от 13.03.2017 № ТУР-21-43-16/7977, ООО «АК  «Транснефть» от 18.01.2016 № АК-08-01-06/1672 и условиями договора  выполнить разработку проекта производства работ (ППР) по объекту:  «Резервуар РВС-10000 № 44 ЛПДС «Черкассы» (инв. № 11200046) Техническое  перевооружение». Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы в  соответствии с условиями договора (п.1.1 договора).  

Договорная стоимость работ составляет 280 840 руб., кроме того НДС  18% - 50 551 руб. 20 коп., итого с НДС 331 391 руб. 20 коп., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

В соответствии с п. 5.1.1 договора подрядчик направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков;  

- направить подрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление подрядчику  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Порядок оплаты предусмотрен разделом 6 договора. 

Подрядчик не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами  акта сдачи приемки работ предоставляет заказчику надлежащим образом  оформленный счет на оплату и счет-фактуру. Оплата выполненных и принятых  работ осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней, следующих за  датой получения заказчиком оригинала счета, счета-фактуры (п. 6.1, п. 6.2  договора).  

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае, если заказчик  нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик обязан  уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости  работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного исполнения ими своих обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован календарный план работ и согласована  договорная цена (л.д.48-49 т.1).  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую  сумму 331 391 руб. 20 коп., в подтверждение чего в материалы дела  предоставлен акт сдачи-приемки работ от 31.03.2017 № 265-У (л.д.52 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.03.2017 № У20170331065/2 и счет от 31.03.2017   № 265-У (л.д.53-54 т.1).  

Судом первой инстанции установлено, что 15.03.2017 между ООО  «Компания «НХПС» (заказчик) и АО «Гипротрубопровод» (подрядчик)  заключен договор на выполнение работ № 16009-УТНП/ГТП/03/0322-к НХПС  (л.д.57-62 т.1), по условиям которого подрядчик обязуется по заданию  заказчика в соответствии с письмами АО «Транснефть-Урал» от 13.03.2017   № ТУР-21-43-16/7977, ООО «АК «Транснефть» от 18.01.2016 № АК-08-01- 06/1672 и условиями договора выполнить разработку проекта производства  работ (ППР) по объекту: «Резервуар РВС-10000 № 45 ЛПДС «Черкассы» (инв.   № 11200047) Техническое перевооружение». Заказчик обязуется принять и  оплатить результаты работы в соответствии с условиями договора (п.1.1  договора).  

Договорная стоимость работ составляет 280 840 руб., кроме того НДС  

18% - 50 551 руб. 20 коп., итого с НДС 331 391 руб. 20 коп., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

В соответствии с п. 5.1.1 договора подрядчик направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков;  

- направить подрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление подрядчику  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Порядок оплаты предусмотрен разделом 6 договора. 

Подрядчик не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами  акта сдачи приемки работ предоставляет заказчику надлежащим образом  оформленный счет на оплату и счет-фактуру. Оплата выполненных и принятых  работ осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней, следующих за  датой получения заказчиком оригинала счета, счета-фактуры (п. 6.1, п. 6.2  договора).  

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае, если заказчик  нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик обязан  уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости  работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного исполнения ими своих обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован календарный план работ и согласована  договорная цена (л.д.63-64 т.1).  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую  сумму 331 391 руб. 20 коп., в подтверждение чего в материалы дела  предоставлен акт сдачи-приемки работ от 31.03.2017 № 264-У (л.д.67 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.03.2017 № У20170331063/2 и счет от 31.03.2017   № 264-У (л.д.68-69 т.1).  

Кроме того, 15.03.2017 между ООО «Компания «НХПС» (заказчик) и АО  

«Гипротрубопровод» (подрядчик) заключен договор на выполнение работ   № 17052-УСМН/ГТП/РППР/03/0384-к НХПС (л.д.72-77 т.1), по условиям  которого подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с письмом  ООО «Компания «Нефтехимпромсервис» от 24.01.2017 № 148 (Приложение № 1  к договору) и условиями договора выполнить разработку разделов  (пояснительная записка, технологические карты на монтаж  металлоконструкций) проекта производства работ (ППР) по объекту:  «Резервуары РВС (П)-5000 № 8,10,18 ЛПДС «Хохлы». Восточное ПО.  Техническое перевооружение». Заказчик обязуется принять и оплатить  результаты работы в соответствии с условиями договора (п.1.1 договора).  

Договорная стоимость работ составляет 989 628 руб. 81 коп., кроме того  НДС 18% - 178 133 руб. 19 коп., итого с НДС 1 167 762 руб., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

В соответствии с п. 5.1.1 договора подрядчик направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков;  

- направить подрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление подрядчику  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Порядок оплаты предусмотрен разделом 6 договора. 

Подрядчик не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами  акта сдачи приемки работ предоставляет заказчику надлежащим образом  оформленный счет на оплату и счет-фактуру. Оплата выполненных и принятых  работ осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней, следующих за  датой получения заказчиком оригинала счета, счета-фактуры (п. 6.1, п. 6.2  договора).  

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае, если заказчик  нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик обязан  уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости  работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного исполнения ими своих обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован календарный план работ и согласована  договорная цена (л.д.78-79 т.1).  

Дополнительным соглашением от 22.08.2017 (л.д.82 т.1) стороны внесли  изменения в п. 2.1 договора:  

«Договорная стоимость работ составляет 1 167 762 руб., кроме того НДС  18% - 210 197 руб. 16 коп., итого с НДС 1 377 959 руб. 16 коп.»  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую  сумму 1 167 762 руб., в подтверждение чего в материалы дела предоставлен акт  сдачи-приемки работ от 31.03.2017 № 242-У (л.д.85 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.03.2017 № У20170331027/2 и счет от 31.03.2017   № 242-У (л.д.86-87 т.1).  

ООО «Компания «НХПС» перечислило денежные средства на расчетный  счет истца по платежным поручениям от 19.05.2017 № 1015 на сумму 167 762  руб. и от 08.06.2017 № 1186 в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за  проведение экспертизы и согласования ППР по дог. № 17052- УСМН/ГТП/РППР/03-0384-к НХПС от 26.01.20178 с/но счета № 242-У от  31.03.2017» (л.д.90-91 т.1).  

Судом первой инстанции установлено, что 31.01.2017 между ООО  «Компания «НХПС» (заказчик) и АО «Гипротрубопровод» (подрядчик)  заключен договор на выполнение работ № 17053-УСМН/ГТП/РППР/03/0383-к  НХПС (л.д.92-97 т.1), по условиям которого подрядчик обязуется по заданию  заказчика в соответствии с письмом ООО «Компания «Нефтехимпромсервис»  от 31.01.2017 № 229 (Приложение № 1 к договору) и условиями договора  выполнить разработку разделов (пояснительная записка, технологические  карты на монтаж металлоконструкций) проекта производства работ (ППР) по  объекту: «Резервуар РВСП-5000 № 15 ЛПДС «Хохлы». Восточное ПО.  Техническое перевооружение». Заказчик обязуется принять и оплатить  результаты работы в соответствии с условиями договора (п.1.1 договора).  

Договорная стоимость работ составляет 329 876 руб. 27 коп., кроме того  НДС 18% - 59 377 руб. 73 коп., итого с НДС 389 254 руб., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

В соответствии с п. 5.1.1 договора подрядчик направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков;  

- направить подрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление подрядчику  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Порядок оплаты предусмотрен разделом 6 договора. 

Подрядчик не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами  акта сдачи приемки работ предоставляет заказчику надлежащим образом  оформленный счет на оплату и счет-фактуру. Оплата выполненных и принятых  работ осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней, следующих за  датой получения заказчиком оригинала счета, счета-фактуры (п. 6.1, п. 6.2  договора).  

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае, если заказчик  нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик обязан  уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости  работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного исполнения ими своих обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован календарный план работ и согласована  договорная цена (л.д.98-99, 103-104 т.1).  

Дополнительным соглашением от 22.08.2017 (л.д.102 т.1) стороны внесли  изменения в п. 2.1 договора:  

«Договорная стоимость работ составляет 389 254 руб., кроме того НДС  18% - 70 065 руб. 72 коп., итого с НДС 459 319 руб. 72 коп.»  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую  сумму 1 167 762 руб., в подтверждение чего в материалы дела предоставлен акт  сдачи-приемки работ от 31.03.2017 № 242-У (л.д.85 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.03.2017 № У20170331031/2 и счет от 31.03.2017   № 214-У (л.д.106-107 т.1).  

ООО «Компания «НХПС» перечислило денежные средства на расчетный  счет истца по платежным поручением от 08.06.2017 № 1169 в сумме  389 254 руб. с назначением платежа «за проведение экспертизы и согласования  ППР по дог. № 17053-УСМН/ГТП/РППР/01/0369-к НХПС от 16.01.20178 с/но  счета № 214-У от 31.03.2017» (л.д.110 т.1).  

Так из материалов дела следует, что 26.01.2017 между ООО «Компания  «НХПС» (заказчик) и АО «Гипротрубопровод» (подрядчик) заключен договор  на выполнение работ № 17056-УСМН/ГТП/РППР/03/0385-к НХПС (л.д.111-116  т.1), по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика в  соответствии с письмом ООО «Компания «Нефтехимпромсервис» от 24.01.2017   № 148 (Приложение № 1 к договору) и условиями договора выполнить  

разработку разделов (пояснительная записка, технологические карты на монтаж  металлоконструкций) проекта производства работ (ППР) по объекту:  «Резервуар РВС-2000 № 2 с технологическими трубопроводами ЛПДС  «Бердяуш». Восточное ПО. Строительство». Заказчик обязуется принять и  оплатить результаты работы в соответствии с условиями договора (п.1.1  договора).  

Договорная стоимость работ составляет 329 876 руб. 27 коп., кроме того  НДС 18% - 59 377 руб. 73 коп., итого с НДС 389 254 руб., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

В соответствии с п. 5.1.1 договора подрядчик направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков; 

- направить подрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление подрядчику  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Порядок оплаты предусмотрен разделом 6 договора. 

Подрядчик не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами  акта сдачи приемки работ предоставляет заказчику надлежащим образом  оформленный счет на оплату и счет-фактуру. Оплата выполненных и принятых  работ осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней, следующих за  датой получения заказчиком оригинала счета, счета-фактуры (п. 6.1, п. 6.2  договора).  

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае если заказчик  нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик обязан  уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости  работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного исполнения ими своих обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован календарный план работ и согласована  договорная цена (л.д.117-188,122-123 т.1).  

Дополнительным соглашением от 22.08.2017 (л.д.121 т.1) стороны внесли  изменения в п. 2.1 договора:  

«Договорная стоимость работ составляет 256 880 руб., кроме того НДС  18% - 46 238 руб. 40 коп., итого с НДС 303 118 руб. 40 коп.»  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую  сумму 389 254 руб., в подтверждение чего в материалы дела предоставлен акт  сдачи-приемки работ от 31.03.2017 № 239-У (л.д.124 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.03.2017 № У20170331028/2 и счет от 31.03.2017   № 239-У (л.д.125-126 т.1).  

Судом первой инстанции установлено, что 31.01.2017 между ООО  «Компания «НХПС» (заказчик) и АО «Гипротрубопровод» (подрядчик)  заключен договор на выполнение работ № 17097-УСМН/ГТП/РППР/03/0386-к  НХПС (л.д.129-134 т.1), по условиям которого подрядчик обязуется по заданию  заказчика в соответствии с письмом ООО «Компания «Нефтехимпромсервис»  от 31.01.2017 № 229 (Приложение № 1 к договору) и условиями договора  выполнить разработку разделов (пояснительная записка, технологические  карты на монтаж металлоконструкций) проекта производства работ (ППР) по  объекту: «Резервуар РВСП-20000 № 9 ЛПДС «Нурлино». Черкасское НУ.  Техническое перевооружение». Заказчик обязуется принять и оплатить  результаты работы в соответствии с условиями договора (п.1.1 договора).  

Договорная стоимость работ составляет 329 876 руб. 27 коп., кроме того  НДС 18% - 59 377 руб. 73 коп., итого с НДС 389 254 руб., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

В соответствии с п. 5.1.1 договора подрядчик направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков;  

- направить подрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление подрядчику  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Порядок оплаты предусмотрен разделом 6 договора. 

Подрядчик не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами  акта сдачи приемки работ предоставляет заказчику надлежащим образом  оформленный счет на оплату и счет-фактуру. Оплата выполненных и принятых  работ осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней, следующих за  датой получения заказчиком оригинала счета, счета-фактуры (п. 6.1, п. 6.2  договора).  

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае, если заказчик  нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик обязан  уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости  работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного исполнения ими своих обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован календарный план работ и согласована  договорная цена (л.д.135-136, 140-141 т.1).  

Дополнительным соглашением от 22.08.2017 (л.д.139 т.1) стороны внесли  изменения в п. 2.1 договора:  

«Договорная стоимость работ составляет 389 254 руб., кроме того НДС  18% - 70 065 руб. 72 коп., итого с НДС 459 319 руб. 72 коп.»  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую  сумму 389 254 руб., в подтверждение чего в материалы дела предоставлен акт  сдачи-приемки работ от 31.03.2017 № 228-У (л.д.142 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.03.2017 № У20170331029/2 и счет от 31.03.2017   № 228-У (л.д.143-144 т.1).  

ООО «Компания «НХПС» перечислило денежные средства на расчетный  счет истца по платежным поручением от 08.06.2017 № 1169 в сумме  389 254 руб. с назначением платежа «за проведение экспертизы и согласования  ППР с/но счета № 228-У от 31.03.2017» (л.д.147 т.1).  

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что 13.06.2017 между  ООО «Компания «НХПС» (заказчик) и АО «Гипротрубопровод» (исполнитель)  заключен договор на оказание услуг № 17107-ТУР/ГТП/ППР/02/0454-НХПС  (л.д.148-154 т.1), по условиям которого исполнитель обязуется по заданию  заказчика в соответствии с письмом ООО «Компания «Нефтехимпромсервис»  от 24.05.2017 № 1442 (Приложение № 1 к договору) и условий договора оказать  услуги по проведению экспертизы и согласованию проекта производства работ  (ППР) по объекту: «Резервуар РВС-5000 № 11 ЛПДС «Шпаково». ФИО2. Техническое перевооружение». Заказчик обязуется принять и оплатить  результаты работы в соответствии с условиями договора (п.1.1 договора).  

Договорная стоимость работ составляет 108 754 руб., кроме того НДС  18% - 19 575 руб. 72 коп., итого с НДС 127 329 руб. 72 коп., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

Положениями п. 2.2 договора предусмотрено, что оплата услуг  производится заказчиком в срок не позднее 5 банковских дней с момента  

получения счета на оплату исполнителя, оформленного в соответствии с  требованиями действующего законодательства Российской Федерации с  указанием номера и даты договора, по которому оформлялся счет на оплату.  

В соответствии с п. 5.1.1 договора исполнитель направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков; 

- направить исполнителю экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление исполнителю  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Пунктом 8.2.2 договора предусмотрено, что в случае нарушения  заказчиком сроков оплаты по п. 2.2 договора исполнитель вправе взыскать с  заказчика пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый  день просрочки, но не более 10% стоимости работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  заключается на неопределенный срок, действуя до полного исполнения  сторонами принятых на себя обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован протокол согласования цены,  календарный план работ и согласована договорная цена (л.д.155-157, 161 т.1).  

Во исполнение условий договора истец оказал услуги на общую сумму  128 329 руб. 72 коп., в подтверждение чего в материалы дела предоставлен акт  сдачи-приемки работ от 31.07.2017 № 594-У (л.д.164 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.07.2017 № У20170731086/2 и счет от 31.07.2017   № 597-У (л.д.165-166 т.1).  

Также 13.06.2017 между ООО «Компания «НХПС» (заказчик) и АО  «Гипротрубопровод» (исполнитель) заключен договор на оказание услуг   № 17109-ТУР/ГТП/ППР/02/0453-НХПС (л.д.169-175 т.1), по условиям которого  исполнитель обязуется по заданию заказчика в соответствии с письмом ООО  «Компания «Нефтехимпромсервис» от 24.05.2017 № 1442 (Приложение № 1 к  договору) и условиями договора оказать услуги по проведению экспертизы и  согласованию проекта производства работ (ППР) по объекту: «Резервуар  РВСП-5000 № 12 ЛПДС «Языково». ФИО2. Техническое  перевооружение». Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы в  

соответствии с условиями договора (п.1.1 договора).  

Договорная стоимость работ составляет 108 754 руб., кроме того НДС  18% - 19 575 руб. 72 коп., итого с НДС 127 329 руб. 72 коп., согласована  сторонами в соглашении о договорной цене (Приложение № 3), является  твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных договором  (п. 2.1 договора).  

Положениями п. 2.2 договора предусмотрено, что оплата услуг  производится заказчиком в срок не позднее 5 банковских дней с момента  получения счета на оплату исполнителя, оформленного в соответствии с  требованиями действующего законодательства Российской Федерации с  указанием номера и даты договора, по которому оформлялся счет на оплату.  

В соответствии с п. 5.1.1 договора исполнитель направляет заказчику с  сопроводительным письмом результаты работ, а также 2 экземпляра  подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по форме  Приложения № 5 к договору.  

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения результатов работ и  акта сдачи-приемки работ обязан:  

- рассмотреть, принять или отклонить их при наличии недостатков; 

- направить исполнителю экземпляр подписанного акта сдачи-приемки  работ или мотивированный отказ о приемке результатов работ (этапа работ) с  перечнем замечаний (п. 5.1.2).  

Согласно п. 5.2 договора подписание акта сдачи-приемки работ по этапу,  предусмотренному календарным планом, и его предоставление исполнителю  производится заказчиком в следующие сроки:  

- до 15 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 01 по  10 число отчетного месяца;  

- до 25 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 11 по  20 число отчетного месяца;  

- до 03 числа отчетного месяца – в случае приемки работ в период с 21 по  30 (31) число отчетного месяца.  

Пунктом 8.2.2 договора предусмотрено, что в случае нарушения  заказчиком сроков оплаты по п. 2.2 договора исполнитель вправе взыскать с  заказчика пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый  день просрочки, но не более 10% стоимости работ по договору.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  заключается на неопределенный срок, действуя до полного исполнения  сторонами принятых на себя обязательств (п. 11.1 договора).  

К договору сторонами согласован протокол согласования цены,  календарный план работ и согласована договорная цена (л.д.176-178,182 т.1).  

Во исполнение условий договора истец оказал услуги на общую сумму  128 329 руб. 72 коп., в подтверждение чего в материалы дела предоставлен акт  сдачи-приемки работ от 31.07.2017 № 595-У (л.д.185 т.1).  

Для оплаты выполненных работ АО «Гипротрубопровод» ответчику  выставлены счет-фактура от 31.07.2017 № У20170731087/2 и счет от 31.07.2017   № 595-У (л.д.186-187 т.1).  

Поскольку ответчиком выполненные работы оплачены частично,  

образовалась задолженность в общей сумме 3 341 794 руб. 20 коп.  

В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес  ответчика претензию от 27.03.2018 № ГТП-110-05/10/30856 (л.д.12-14 т.1) с  просьбой оплатить задолженность и сумму пени.  

Оставление указанной претензии без удовлетворения явилось основанием  для обращения истца в арбитражный суд с настоящими исковыми  требованиями.  

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой  инстанции исходил из того, что ответчиком доказательств оплаты выполненных  работ и оказанных услуг в материалы дела не предоставил.  

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, на основании  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены  обжалуемого судебного акта.  

Статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по  заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или  осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти  услуги.  

Статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации определено,  что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке,  которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской  Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком  оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из  сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается  другой стороной.  

По смыслу статьи 307, статьи 309 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья  310 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Как следует из материалов дела, факт выполнения работ и оказания услуг  АО «Гипротрубопровод» подтвержден актами сдачи-приемки выполненных  работ от 31.03.2017 № 263-У, от 31.03.2017 № 265-У, от 31.03.2017 № 264-У, от  31.03.2017 № 242-У, от 31.03.2017 № 242-У, от 31.03.2017 № 239-У, от 31.03.2017  

 № 228-У, от 31.07.2017 № 594-У, от 31.07.2017 № 595-У.  

Акты приемки выполненных работ подписаны сторонами без замечаний и  возражений, скреплены печатями организаций. О фальсификации  соответствующих доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком в суде первой и  апелляционной инстанции не заявлено.  

Оснований для критической оценки указанных доказательств у суда  апелляционной инстанции не имеется.  

Доказательств того, что работы, услуги выполнены истцом с  недостатками, которые являются существенными, неустранимыми и которые  повлекли невозможность использования результата выполненных работ,  ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации не представлено.  

Акты приемки выполненных работ, как соответствующие доказательства  установленной формы истцом в материалы дела представлены, ответчиком не  опровергнуты. Письменных претензий или требований ответчика к истцу о  невыполнении работ в спорный период, об их ненадлежащем качестве в деле не  имеется.  

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, с  учетом доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел  к выводу, что в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации документально подтверждено выполнение  истцом и принятие ответчиком работ, наличие задолженности в спорной сумме.  

В силу положений статей 702, 711, 781 Гражданского кодекса Российской  Федерации у ООО «Компания «НХПС» возникли обязательства по оплате  выполненных истцом работ и оказанных услуг.  

Между тем, как указано истцом, ответчиком данные обязательства  надлежащим образом не исполнены.  

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно счел  подлежащими удовлетворению исковые требования АО «Гипротрубопровод» о  взыскании с ООО «Компания «НХПС» задолженности по оплате выполненных  работ в сумме 3 598 453 руб. 64 коп.  

Также истцом заявлено требование о взыскании неустойки в общей сумме  359 845 руб. 36 коп.  

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве  способов обеспечения исполнения обязательств предусмотрены неустойка,  залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия,  задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки  кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии с пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или  договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить  кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может  быть установлен в твердой сумме - в виде периодически начисляемого платежа  - пени или штрафа.  

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме  независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной  формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Пунктом 7.3 договоров подряда предусмотрено, что в случае если  заказчик нарушил сроки оплаты работ, установленные договором, заказчик  обязан уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от  суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10%  стоимости работ по договору.  

Пунктом 8.2.2 договоров оказания услуг предусмотрено, что в случае  нарушения заказчиком сроков оплаты по п. 2.2 договора исполнитель вправе  взыскать с заказчика пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за  каждый день просрочки, но не более 10% стоимости работ по договору.  

Поскольку условие о неустойке указано в тексте договоров, то требование  о письменной форме соглашения о неустойке сторонами выполнено.  

Включенная в договор неустойка выполняет обеспечительные функции и  является дополнительным к основному (акцессорным) обязательством.  Удовлетворение требований о взыскании договорной неустойки возможно  только в случае наличия факта нарушения (ненадлежащего исполнения)  должником основного обязательства.  

Установив, что имеющиеся в деле доказательства позволяют сделать  вывод о ненадлежащем исполнении обязательств по внесению платы, суд  первой инстанции правомерно посчитал требования истца о взыскании  договорных пени за просрочку внесения оплаты по спорным договорам  обоснованными.  

Представленный истцом расчет пени судом первой инстанции проверен и  признан верным.  

Ответчиком контррасчет не предоставлен, ходатайство о применении  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено.  

Поскольку несвоевременное исполнение ответчиком обязательства по  оплате выполненных работ и оказанных услуг подтверждено материалами дела,  требование истца о взыскании неустойки является обоснованным.  

Судебной коллегией рассмотрены и отклонены доводы ответчика о том,  что истец взятые на себя обязательства по передаче результатов работ не  исполнил надлежащим образом – проекты производства работ (ППР) в 2  экземплярах не переданы заказчику.  

Непредставление проекта производства работ, требования использования  результатов работ, исполнительской документации, (при условии подписания  без замечаний акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о  

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)) в качестве  обстоятельства, освобождающего подрядчика по спорному договору от  обязательства по оплате работ, ни положениями закона, ни условиями  договора, не предусмотрено.  

В соответствии со статьей 726 Гражданского кодекса Российской  Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы  информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета  договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер  информации таков, что без нее невозможно использование результата работы  для целей, указанных в договоре.  

Непредставление подрядчиком такой документации также не является  безусловным основанием для отказа в оплате выполненных работ. По смыслу  статьи 726 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказываясь  оплачивать переданные результаты подрядных работ по причине не передачи  подрядчиком исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что  отсутствие такой документации исключает возможность использования  принятого им объекта подряда по прямому назначению. В иных случаях  заказчик не лишен возможности истребовать необходимые документы у  подрядчика, а выполненные и принятые работы обязан оплатить.  

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции установлено, что в  материалы дела предоставлены акты приемки законченного строительством  объекта приемочной комиссией от 29.12.2017 № 2326, от 29.12.2017 № 62-17,  от29.12.2017 № 49-ТПР, от 29.12.2017 № 29-ТПР, от 29.12.2017 № 28-ТПР, от  29.12.2017 № 39-ТПР, от 29.12.2017 № 38-ТПР (л.д.45-76 т.2), согласно которым  объекты, предусмотренные спорными договорами подряда, выполнены в  соответствии с проектом и вводятся в эксплуатацию.  

Доводы апеллянта о том, что решение содержит в мотивировочной части  противоречащие друг другу суммы подлежат отклонению судом  апелляционной инстанции, поскольку указанное противоречие исправлено  судом первой инстанции путем вынесения определения об исправлении описок,  опечаток и арифметических ошибок от 22.10.2018 в порядке статьи 179  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (л.д.123-124  т.2).  

Судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно  установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и  объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и  взаимосвязи с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и  сделаны правильные выводы по делу.  

Оснований для переоценки данных выводов суда первой инстанции у  судебной коллегии не имеется.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для  отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной  инстанции не установлено.  

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле,  

процессуального кодекса Российской Федерации, и в связи с оставлением  апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на подателя жалобы.  

В соответствии с подпунктом 3, 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового  кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 21.07.2014   № 221-ФЗ) при подаче апелляционной жалобы на обжалуемый судебный акт по  настоящему делу податель жалобы должен был уплатить государственную  пошлину в размере 3000 руб. Указанная обязанность апеллянтом не исполнена.  

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда о  принятии апелляционной жалобы к производству на заявителя апелляционной  жалобы была возложена обязанность представить в судебное заседание  доказательства уплаты государственной пошлины по апелляционной жалобе в  размере 3000 руб.  

Поскольку указанное требование заявителем выполнено не было и  документ, подтверждающий уплату государственной пошлины по  апелляционной жалобе, обществом в судебное заседание не представлен, с  названного лица подлежит взысканию в доход федерального бюджета 3000  руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе (подпункт 12 пункта  1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).  

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  апелляционной инстанции  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.09.2018 по  делу № А07-14206/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Компания  «Нефтехимпромсервис» - без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания  «Нефтехимпромсервис» в доход федерального бюджета государственную  пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3 000 рублей.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного  производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со  дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд  первой инстанции.  

Председательствующий судья М.И. Карпачева  

Судьи Л.П. Ермолаева  

О.Н. Пирская