74/2018-156791(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-12670/2017

г. Чебоксары

16 августа 2018 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Кисаповой Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

администрации Янтиковского района Чувашской Республики  (

<

...>, ОГРН 

<

***>),  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско- юношеская спортивная школа – физкультурно-спортивный комплекс "Аль"  Янтиковского района Чувашской Республики  

(

<

...>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой"  (

<

...>, ОГРН 

<

***>)  об устранении недостатков,  

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, Министерства физической культуры и  спорта Чувашской Республики, Государственного унитарного предприятия  Чувашской Республики "Республиканское управление капитального  строительства" Министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Чувашской Республики, Федерального государственного  бюджетного учреждения "Судебно-экспертное учреждение Федеральной  противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Чувашской  Республике-Чувашии", общества с ограниченной ответственностью "АБ  "Классика",  

при участии: 

от 1-го истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2018,  от 2-го истца: ФИО3 директор,  

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 15.01.2016,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" в  месячный срок с момента вступления судебного решения в законную силу  выполнить следующий комплекс работ в соответствии с требованиями проекта,  строительных норм и правил, на объекте физкультурно-спортивный комплекс с  бассейном в с. Янтиково Янтиковского района, расположенном по адресу:  

<

...>, а  именно:  

на металлоконструкциях колонн по осям: Е-2, Ж-2, К-2, Л-2, М-2, Н-2, П-2,  С-2, С-4, С-5, С-6, П-6, Н-6, М-6, Л-6, К-6, Ж-6, Е-6, С-7, С-8, С-9, С-10, П-10, Н-10,  М-10, Л-10, К-10, Ж-10, Е-10 и металлических фермах ГФУ36.2.1-2.1 по осям: С- Е/2; С-Е/4; С-Е/5; С-Е/6; С-Е/7; С-Е/8; С-Е/9; С-Е-10, находящихся в помещениях  бассейна и спортивного зала произвести:  

- очистку поверхности металлоконструкций от отслоившейся краски общей  площадью 6,5 кв. м.;  

- обеспыливание поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5  кв.м.;  

- обезжиривание поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5  кв.м.;  

- огрунтовку поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5 кв.м.; 

- окраску металлических огрунтованных поверхностей краской  огнезащитной "ВД-554" общей площадью 6,5 кв. м. на толщину сухого покрытия  окрашиваемой поверхности равной 1,74 мм.;  

- окраску металлических огрунтованных поверхностей краской  огнезащитной "ВД-554" общей площадью 1236,36 кв.м. на толщину сухого  покрытия окрашиваемой поверхности равной 1,39 мм.;  

на козырьке над главным входом в здание произвести: 

- разборку покрытий полов из керамической плитки общей площадью 15,36  кв.м.;  

- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для  полов многоцветных на площади 15,36 кв.м. с частичной заменой плитки на  площади 3,24 кв.м.;  

Произвести монтаж системы автоматического оповещения и музыкальной  трансляции (линейный усилитель "Октава-80Б" мощностью 80 Вт) - 1 шт.  увеличив выходную мощность, подключая дополнительный (линейный) усилитель.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 (Шесть  тысяч) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  

арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Н.В. Кисапова