И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-134168/24-126-1056

20 декабря 2024 года

город Москва

Резолютивная часть решения оглашена 09.12.2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 20.12.2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Антоновским,

рассматривает в судебном заседании дело

по иску АО "МОСЛИФТ" (ИНН 

<

***>)

к ООО "РСТ-ГЕНПОДРЯД" (ИНН 

<

***>)

о взыскании 32 823 086,22 руб.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: ФИО1, доверенность от 22.10.2024

от ответчика: ФИО2, доверенность от 14.09.2023

У С Т А Н О В И Л:

С учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, иск заявлен о взыскании задолженности в размере 26 437 763 руб. 52 коп.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

В ходе судебного заседания объявлялся перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ с 27.11.2024 по 09.12.2024. 

Представитель истца требования поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований в виду следующего.

Из материалов дела следует, что во исполнение договора № 01-12/19 Г-17, заключенного 01.12.2019г. (далее – Договор 1) между ООО «РСТ-Генподряд» (далее – Ответчик, Генподрядчик) и АО «Мослифт» (далее – Истец, Подрядчик), Истец выполнил работы по поставке и монтажу лифтового оборудования в соответствии с утверждённой Проектной и Рабочей документацией, а также в соответствии со Сметой, оформленной в виде Приложения № 1 к Договору 1, определяющей объем и цену работ в сроки, предусмотренные п. 2.1. Договора 1, (далее по тексту - «Работы») на объекте: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Черемушки, ул. Гарибальди, вл. 17 (далее по тексту - «Объект»).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора 1, общая стоимость Работ по Договору составляет сумму 10 722 345 (Десять миллионов семьсот двадцать две тысячи триста сорок пять) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% в сумме 1 787 057,50 руб.

В соответствии с пунктом 3.4 Договора 1, Генподрядчик производит оплату  гарантийного удержания (п. 3.12 Договора) в сумме 536 117,25 руб., в том числе НДС 20% - 107 223,40 руб. - через 30 (тридцать) календарных дней после приемки Оборудования в эксплуатацию: выполнения Подрядчиком всех условий содержащихся в «Разграничении обязанностей сторон» (Приложение № 4 к Договор 1), в том числе, п. 6.2 Приложения № 4; подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, Приложение № 5 к Договору 1) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), а также представления Генподрядчику всего комплекта исполнительной документации без замечаний со Стороны Генподрядчика.

Истец своевременно предоставил Ответчику документы, необходимые для оплаты, однако в нарушение условий Договора 1, Ответчик не исполнил обязательства по оплате.

Ответчиком не исполнены обязательства по оплате гарантийного удержания в сумме 536 117,25 руб., в том числе НДС 20% - 89 352,88 руб. по Договору 1, в связи с чем просроченная задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 14.06.2024г. составляет 536 117,25 руб..

Во исполнение договора № 01-12/19 Ш-6, заключенного 01.12.2019г. (далее – Договор 2) между ООО «РСТ-Генподряд» (далее – Ответчик, Генподрядчик) и АО «Мослифт» (далее – Истец, Подрядчик), Истец выполнил работы по поставке и монтажу лифтового оборудования в соответствии с утверждённой Проектной и Рабочей документацией, а также в соответствии со Сметой, оформленной в виде Приложения № 1 к Договору 2, определяющей объем и цену работ в сроки, предусмотренные п. 2.1. Договора 2, (далее по тексту - «Работы») на объекте: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 

<

...>, район Академический, Юго-Западный административный округ г. Москвы (далее по тексту - «Объект»).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора 2, общая стоимость Работ по Договору 2 составляет сумму 10 974 007,96 (Десять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семь) руб. 96 коп., в т.ч. НДС 20% в сумме 1 829 001,33 руб.

В соответствии с пунктом 3.4 Договора 2, Генподрядчик производит оплату гарантийного удержания (п. 3.12 Договора) в сумме 548 700,40 руб., в том числе НДС 20% - 91 450,07 руб. - через 30 (тридцать) календарных дней после приемки Оборудования в эксплуатацию: выполнения Подрядчиком всех условий содержащихся в «Разграничении обязанностей сторон» (Приложение № 4 к Договору 2), в том числе, п. 6.2 Приложения № 4; подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, Приложение № 5 к Договору 2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), а также представления Генподрядчику всего комплекта исполнительной документации без замечаний со Стороны Генподрядчика.

Истец своевременно предоставил Ответчику документы, необходимые для оплаты, однако в нарушение условий Договора 2, Ответчик не исполнил обязательства по оплате.

Ответчиком не исполнены обязательства по оплате гарантийного удержания в сумме 548 700,40 руб., в том числе НДС 20% - 91 450,07 рублей по Договору 2, в связи с чем просроченная задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 14.06.2024г. составляет 548 700,40 руб..

Во исполнение договора № 01-12/19 Г-18, заключенного 27.12.2019г. (далее – Договор 3) между ООО «РСТ-Генподряд» (далее – Ответчик, Генподрядчик) и АО «Мослифт» (далее – Истец, Подрядчик), Истец выполнил работы по поставке и монтажу лифтового оборудования в соответствии с утверждённой Проектной и Рабочей документацией, а также в соответствии со Сметой, оформленной в виде Приложения № 1 к Договору 3, определяющей объем и цену работ в сроки, предусмотренные п. 2.1. Договора 3, (далее по тексту - «Работы») на объекте: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Обручевский, ул. Гарибальди, вл. 18 (далее по тексту - «Объект»),

В соответствии с пунктом 3.1 Договора 3, общая стоимость Работ по Договору 3 составляет сумму 9 736 023, (Девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двадцать три рубля) руб. 60 коп., в т.ч. НДС 20% в сумме 1 622 670,60 руб.

В соответствии с пунктом 3.4 Договора 3, Генподрядчик производит оплату гарантийного удержание (п. 3.12 Договора 3) в сумме 486 801,18 руб., в том числе НДС 20% - 81 133,53 руб. – через 30 (тридцать) календарных дней после приемки Оборудования в эксплуатацию: выполнения Подрядчиком всех условий содержащихся в «Разграничении обязанностей сторон» (Приложение № 4 к Договору 3), в том числе, п. 6.2 Приложения № 4; подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, Приложение № 5 к Договору 3) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), а также представления Генподрядчику всего комплекта исполнительной документации без замечаний со Стороны Генподрядчика.

Истец своевременно предоставил Ответчику документы, необходимые для оплаты, однако в нарушение условий Договора 3, Ответчик не исполнил обязательства по оплате.

Ответчиком не исполнены обязательства по оплате гарантийного удержания в сумме 486 801,18 руб., в том числе НДС 20% - 81 133,53 руб. по Договору 3, в связи с чем просроченная задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 14.06.2024г. составляет 486 801,18 руб.

Во исполнение договора № Сев.28/01062021, заключенного 01.06.2021 (далее – Договор 4) между ООО «РСТ-Генподряд» (далее – Ответчик, Генподрядчик) и АО «Мослифт» (далее – Истец, Подрядчик), Истец выполнил работы по поставке и монтажу лифтового оборудования в соответствии с утверждённой Проектной и Рабочей документацией, а также в соответствии со Сметой, оформленной в виде Приложения № 1 к Договорам, определяющей объем и цену работ в сроки, предусмотренные Договорами, (далее по тексту - «Работы») на общую сумму 34 020 682,00 руб.

Истец своевременно предоставил Ответчику документы, необходимые для оплаты, однако в нарушение условий Договора 4, Ответчик не исполнил обязательства по оплате.

Ответчиком не исполнены обязательства по оплате работ, выполненных Истцом по Договору 4, в связи с чем просроченная задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 14.06.2024г. составляет 24 069 513,95 рублей.

Во исполнение договора № 02-18/20 А-2, заключенного 18.02.2020г. (далее – Договор 5) между ООО «РСТ-Генподряд» (далее – Ответчик, Генподрядчик) и АО «Мослифт» (далее – Истец, Подрядчик), Истец выполнил работы по поставке и монтажу лифтового оборудования в соответствии с утверждённой Проектной и Рабочей документацией, а также в соответствии со Сметой, оформленной в виде Приложения № 1 к Договору 5, определяющей объем и цену работ в сроки, предусмотренные п. 2.1. Договора 5, (далее по тексту - «Работы») на объекте: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Ломоносовский, ул. Архитектора ФИО3 влд. 2. Юго-Западный административный округ (далее по тексту - «Объект»).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора 5, общая стоимость Работ по Договору 5 составляет сумму 13 117 076,35 (Тринадцать миллионов сто семнадцать тысяч семьдесят шесть рублей) 35 коп., в т.ч. НДС 20% в сумме 2 186 179,40 руб.

В соответствии с пунктом 3.4 Договора 4, Генподрядчик производит оплату выполненных Подрядчиком в соответствующем этапе Договора Работ в следующем порядке:

- платёж в сумме 8 526 099 (Восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девяносто девять рублей) 63 коп., в том числе НДС 20% - 1 421 016 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча шестнадцать рублей) 61 коп. - не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных механо-монтажньтх работ, при условии предоставления Подрядчиком документов согласно п. 3.8. Договора.

- гарантийное удержание (п. 3.12 Договора) в сумме 655 853 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля) 82 коп. в том числе НДС 20% - 109 308 (Сто девять тысяч триста восемь рублей) 97 коп. - через 30 (тридцать) календарных дней после приемки Оборудования в эксплуатацию: выполнения Подрядчиком всех условий содержащихся в «Разграничении обязанностей сторон» (Приложение № 4 к Договору), в том числе, п. 6.2 Приложения № 4; подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, Приложение № 5 к Договору) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), а также представления Генподрядчику всего комплекта исполнительной документации без замечаний со Стороны Генподрядчика.

Истец своевременно предоставил Ответчику документы, необходимые для оплаты, однако в нарушение условий Договора 5, Ответчик не исполнил обязательства по оплате.

Ответчиком не исполнены обязательства по оплате по Договору 5, в связи с чем просроченная задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 14.06.2024г. составляет 7 181 953,44 руб.

Учитывая зачет требований, произведенных между Истцом и Ответчиком, Истец, в порядке ст. 49 АПК РФ, уточняет размер исковых требований к Ответчику, в связи с чем, просроченная задолженность Ответчика перед Истцом, возникшая в следствие неисполнения Ответчиком обязательств по оплате работ, выполненных Истцом по Договорам № Сев.28/01062021 от 01.06.2021г., № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г. по состоянию на 28.08.2024г. составляет 26 437 763,52 (двадцать шесть миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 52 копейки.

Во исполнение договора № Сев.28/01062021, заключенного 01.06.2021г. между ООО «РСТ-Генподряд» (далее – Ответчик, Генподрядчик) и АО «Мослифт» (далее – Истец, Подрядчик), Истец выполнил работы по поставке и монтажу лифтового оборудования в соответствии с утверждённой Проектной и Рабочей документацией, а также в соответствии со Сметой, оформленной в виде Приложения № 1 к Договору № Сев.28/01062021 от 01.06.2021г., определяющей объем и цену работ в сроки, предусмотренные Договором № Сев.28/01062021 от 01.06.2021г., (далее по тексту - «Работы») на общую сумму 34 020 682,00 руб.

Истец своевременно предоставил Ответчику документы, необходимые для оплаты, однако в нарушение условий Договора № Сев.28/01062021 от 01.06.2021г., Ответчик не исполнил обязательства по оплате работ, выполненных Истцом, в связи с чем просроченная задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 28.08.2024г. составляет 24 069 513,95 (двадцать четыре миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 95 копеек.

Во исполнение договора № 02-18/20 А-2, заключенного 18.02.2020 (далее –между ООО «РСТ-Генподряд» (далее – Ответчик, Генподрядчик) и АО «Мослифт» (далее – Истец, Подрядчик), Истец выполнил работы по поставке и монтажу лифтового оборудования в соответствии с утверждённой Проектной и Рабочей документацией, а также в соответствии со Сметой, оформленной в виде Приложения № 1 к Договору № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г., определяющей объем и цену работ в сроки, предусмотренные п. 2.1. Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г., (далее по тексту - «Работы») на объекте: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Ломоносовский, ул. Архитектора ФИО3 влд. 2. Юго-Западный административный округ (далее по тексту - «Объект»).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020, общая стоимость Работ по Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020 составляет 13 117 076,35 руб., в т.ч. НДС 20% в сумме 2 186 179,40 руб.

В соответствии с пунктом 3.4 Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020, Генподрядчик производит оплату выполненных Подрядчиком в соответствующем этапе Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020 работ в следующем порядке:

- платёж в сумме 8 526 099 (Восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девяносто девять рублей) 63 коп., в том числе НДС 20% - 1 421 016 руб. 61 коп. - не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных механо-монтажных работ, при условии предоставления Подрядчиком документов согласно п. 3.8. Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г.

- гарантийное удержание (п. 3.12 Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г.) в сумме 655 853 руб. 82 коп. в том числе НДС 20% - 109 308 (Сто девять тысяч триста восемь рублей) 97 коп. - через 30 (тридцать) календарных дней после приемки Оборудования в эксплуатацию: выполнения Подрядчиком всех условий содержащихся в «Разграничении обязанностей сторон» (Приложение № 4 к Договору № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г.), в том числе, п. 6.2 Приложения № 4; подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, Приложение № 5 к Договору № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г.) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), а также представления Генподрядчику всего комплекта исполнительной документации без замечаний со Стороны Генподрядчика.

Истец своевременно предоставил Ответчику документы, необходимые для оплаты, однако в нарушение условий Договора № 02-18/20 А-2 от 18.02.2020г., Ответчик не исполнил обязательства по оплате работ, выполненных Истцом, в связи с чем просроченная задолженность Ответчика перед Истцом по состоянию на 28.08.2024г., с учетом произведенного зачета требований, составляет 2 368 249,57 (два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч двести сорок девять) рублей       57 копеек.

Ответчику направлены Претензии с требованием оплатить просроченную задолженность № 1721/23 от 29.06.2023г., почтовый идентификатор № 80081486591073, № 3736/23 от 12.12.2023г., почтовый идентификатор № 80081691935372.

В результате переговоров сторонам не удалось урегулировать спор в досудебном порядке.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 307-310, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

По результатам исследования совокупности представленных в материалы дела доказательств, судом установлена обоснованность требований истца к ответчику на сумму 24 080 875 руб. 60 коп., за исключением требований истца в части гарантийного удержания по договору №Сев.28/01062021 от 01.06.2021 на сумму 1 701 034 руб. 10 коп. и гарантийного удержания по договору №02-18/20 А-2 от 18.02.2020 на сумму 655 853 руб. 82 коп., поскольку в нарушение требований ст. 65 АПК РФ, доказательств того, что итоговые акты направлялись и предъявлялись к приемке ответчику.

Учитывая, что условия договоров по предъявлению документации, необходимой для приемке работ истцом в данной части не соблюдены, требования истца к ответчику обоснованы на сумму 24 080 875 руб. 60 коп.

В остальной части в удовлетворении требований суд отказывает.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению в части.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 10, 12, 307-310, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "РСТ-ГЕНПОДРЯД" (ИНН 

<

***>) в пользу АО "МОСЛИФТ" (ИНН 

<

***>) 24 080 875 (двадцать четыре миллиона восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 60 коп. задолженности, а также 141 354 (сто сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать

Возвратить АО "МОСЛИФТ" (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета сумму излишне уплаченной государственной пошлины в размере  31 926 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков