АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ . 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-1576/2024

14 ноября 2024 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кофановой Ю.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Корвус» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу, выполненных по договору № РТС246А190065(Д) от 29.05.2019, по адресу: 

<

...>: устранить причину залития над квартирами № 46 и № 47, а именно: произвести демонтаж, монтаж кровельного наплавляемого покрытия – 5 м²; произвести демонтаж, монтаж устройства примыканий – 1 п.м.,  

о взыскании неустойки в размере 278 632,43 руб. согласно подпункту 11.4.4 договора (с учетом уточнения).  

Третье лицо: ООО «Управляющая компания – 1». 

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» удовлетворить в полном объеме.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Корвус» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу, выполненных по договору №  

РТС246А190065(Д) от 29.05.2019, по адресу: 

<

...>: устранить причину залития над квартирами № 46 и № 47, а именно: произвести демонтаж, монтаж кровельного наплавляемого покрытия – 5 м²; произвести демонтаж, монтаж устройства примыканий – 1 п.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Корвус» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 278632,43 руб., а также 14573 руб. расходов, понесенных по уплате государственной пошлины.  

Возвратить фонду «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1000 руб., уплаченную по платежному поручению № 521 от 14.03.2024.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Ю. Арцыбашева