АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-7675/2022

г. Белгород

21 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2022 года. Полный текст решения изготовлен 21 ноября 2022 года.

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Карнауховой И.П., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО ППП "Факел" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании исполнить обязательства, предусмотренные техническими условиями № 19К от 16.06.2016,  

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 16.05.2022, ФИО2 – представитель по доверенности от 12.01.2022;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

УСТАНОВИЛ:

ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ" (истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО ППП "Факел" (ответчик) об обязании исполнить обязательства, предусмотренные техническими условиями № 19К от 16.06.2016 в 30-тидневный срок с даты вступления решения в законную силу.

 В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования в части перечня выполнения технических условий. Уточненные требования приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Требование истца обосновано осязания ответчика исполнить условия  заявки в виде выполнения работ, предусмотренных  техническими условиями №19К от 16.06.2016 необходимыми для подключение к централизованной системе водоотведения объекта в с. Новая Таволжанка.

В судебном заседании представитель истца иск поддержал по основаниям в нем указанным представленным документам.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

В силу ст. 121 АПК РФ, информационного письмом ВАС РФ от 19.09.2006г. № 113 Постановления Пленума ВАС РФ №12 от 17.02.2011г, сведения о дате, времени и месте судебного заседания по делу № А08-7675/2022 размещены арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.

Учитывая, что ответчик, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии со ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ, дело рассмотрено  в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам, при отсутствии заявлений и возражений относительно рассмотрения дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон в ходе рассмотрения дела, оценив в силу статей 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд находит уточненные исковые требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В ГУП «Белоблводоканал» от ООО «ППП «Факел»» поступило заявление на выдачу технических условий на подключение к централизованной системе водоотведения объекта в с. Новая Таволжанка».

По результатам рассмотрения заявки, ГУП «Белоблводоканал» выдало технические условия №19К от 16.06.2016, факт получения технических условий заявителем подтверждается обращением МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» №46-6-3- 02/530 от 02.12.2020.

ГУП «Белоблводоканал» осуществило подключение к централизованной системе водоотведения, оплата за данные услуги от заявителя не поступила, технические условия ответчиком на подключение к централизованной системе водоотведения, не соблюдены и не исполнены, в с вязи с чем, по результатам претензионного порядка урегулирования спора истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее по тексту - Закон о водоснабжении и водоотведении), ГУП «Белоблводоканал» является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского округа «Город Белгород» и Белгородского района Белгородской области.

В соответствии с уставом целями и предметом деятельности ГУП «Белоблводоканал» являются создание единой структуры управления коммунальными ресурсами для решения социальных задач в сфере водоснабжения и очистки стоков на территории Белгородской области, получение прибыли и обеспечение производственного и социального развития предприятия.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона о водоснабжении и водоотведении, водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения осуществляются на основании договоров холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 (далее по тексту - Правила № 354), предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется на основании возмездного договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

В силу ч.1 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон №416) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ч.2 ст. 18 Закона №416).

Согласно ч.З ст. 18 договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Материалами дела подтверждается обращение ООО «ППП «Факел»» в ГУП «Белоблводоканал» с заявлением на выдачу технических условий на подключение к централизованной системе водоотведения объекта в с. Новая Таволжанка».

По результатам рассмотрения заявки, ГУП «Белоблводоканал» выдало технические условия №19К от 16.06.2016, факт получения технических условий заявителем подтверждается обращением МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» №46-6-3- 02/530 от 02.12.2020.

ГУП «Белоблводоканал» осуществило подключение к централизованной системе водоотведения, что ответчиком с позиции ст. 65 АПК РФ, не оспаривается. 

В силу ст. 65, 67, 68, 75 АПК РЫФ, достоверных и допустимых доказательств выполнение работ связанных указанных в технических условиях №19К от 16.06.2016г необходимыми на подключение к централизованной системе водоотведения объекта в с. Новая Тавалжанка, а равно их исполнение в материалы дела истцом, ответчиком, не представлено. 

В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ). 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

На основании ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Поскольку ответчик, не выполнил работы связанные с выданными техническими условиями №19К от 16.06.2016 необходимыми на подключение к централизованной системе водоотведения объекта в с. Новая Таволжанка», суд считает требования истца законными и обоснованными и на основании ст. ст. 307-309, 310, 314, ГК РФ подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п.3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчику сведений, доказательств опровергающих доводы истца ответчик суду не представил, не оспорил.

Указанное обстоятельство расценивается судом, исходя из основного принципа судопроизводства - состязательности сторон (ст.9 АПК РФ), как отсутствие у ответчика  каких-либо возражений по иску.

 Сторонам судом разъяснены положения части 2 статьи 268 АПК РФ о том, что дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. 

Дело возникло по вине ответчика, на которого суд относит расходы по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Обязать ООО «ППП «Факел»» выполнить работы, предусмотренные техническими условиями №19К от 16.06.2016 в 30-ти дневный срок, с момента вступления решения в законную силу, а именно:

1 .По канализационным насосным станциям

1.1.КНС №5:

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС №5;

- Оборудовать проезд к КНС №5 из щебеночного покрытия в полном объеме -согласно проекту; 

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС №5.

1.2.КНС №4:

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС №4;

- Оборудовать проезд к КНС №4 из щебеночного покрытия в полном объеме согласно проекту; 

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС №4.

1.3.КНС №3:

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС №3; 

- Оборудовать проезд к КНС №3 из щебеночного покрытия в полном объеме согласно проекту;

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС №3.;

- Укрепить площадку вокруг КНС №3.

1.4.КНС №2:

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС №2; 

- Оборудовать проезд к КНС №2 из щебеночного покрытия в полном объеме согласно проекту; 

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС№2.

1.5.КНС №1:

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС №1.

- Оборудовать проезд к КНС №1 из щебеночного покрытия в полном объеме согласно проекту.

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС№1

2.По сетям самотечной канализации.

2.1.Участок сети самотечной канализации ул. Харьковская (КНС-5):

- Восстановить в колодцах №164, №162 - полимерный комплект и отмостку.

- В колодце №165 - установить полимерный комплект, построить лотковую часть колодца.

- В колодце б/н (на углу фасада здания школы) - построить отмостку колодца.

- Очистить колодец №174 от строительного и прочего мусора.

- В колодце №180 построить лотковая часть.

- Построить колодец № 181 согласно проекта

2.2.Участок сети самотечной канализации ул.9 мая, ул.Садовая (КНС-4):

- Восстановить отмостку колодца б/н (рядом с колодцем №149).

- Очистить колодец №149 от строительного и прочего мусора, построить отмостку колодца.

- Колодец №155- укоротитьвыпускдлявозможности технического обслуживания канализационного колодца.

- Построить колодец № 160 согласно проекта.

- Колодец №161 - выполнить установку полимерного комплекта без смещения.

- Колодцы №136, №138 - восстановить канализационные колодцы и привести их в технически исправное состояние.

- Построить лотковую часть в колодце 142.

- Колодец №143 - восстановить канализационный колодец и привести его в технически исправное состояние.

- Колодец №157 - выполнить устройство лотковой части.

- Выполнить герметизацию выпусков из МКД в колодцах № 155, № 156.

2.3.Участок сети самотечной канализации ул.Кирова, 9 мая, ул.Молодежная (КНС-2):

- Выполнить отмостку колодца №130.

- Выполнить герметизацию выпуска от МКД в колодце № 131.

- Колодец №133 - восстановить канализационный колодец и привести его в технически исправное состояние.

- Очистить от мусора колодец № 128.

- Очистить от мусора колодец № 127. Оборудовать отмостку указанного колодца.

- Колодец №125 - построить лотковую часть колодца.

-  Колодец № 123 и КГ - необходимо выполнить замену разрушенных полимерных комплектов на чугунные тип "Т", выполнить отмостку канализационных колодцев.

- Колодцы № № 122, 121, 120, 119, 118, 117 - построить лотковую часть колодцев, оборудовать отмостку указанных колодцев

- Колодец № 118 -построить лотковую часть колодца.

- Колодцы №№116,115— построить лотковую часть,

оборудовать отмостку колодцев.

- Колодцы №№114, 113 — построить лотковую часть.

- Колодцы б/н (в количестве 2 шт., перед входом на территорию детского сада) — оборудовать отмостку колодцев.

- Территория в районе колодцев №№183, 184, 185 - выполнить отсыпка грунтом и планировку территории.

- Во всех колодцах расположенных по ул.Молодежная - построить лотковая часть.

- Колодцы №№52,1,9 — оборудовать отмостку колодцев.

- Колодцы №№8, 56 - оборудовать отмостку колодцев, устранить проседание грунта.

- Колодцы №№54, 56а, 58, 12, 63, 74 — устранить проседание грунта.

- Колодец №36 — оборудовать отмостку колодца.

- Колодцы №№81, 82, 83 — построить лотковая часть, оборудовать отмостку.

- Колодец №83- выполнить устройство бермы (пологая поверхность в канализационном колодце, предназначенная для его технологического обслуживания), произвести замену разрушенного полимерного комплекта на чугунный тип «Т».

- Колодец б/н (на углу дома №2 по ул.Молодежная) — отчистить колодец от мусора, построить лотковую часть, заменить полимерный комплект и оборудовать отмостку колодца.

- Колодцы №№89, 90, 91 - построить лотковая часть.

- Колодец б/н (расположен между колодцами №92 и №91) — очистить от мусора, заменить бетонную крышку колодца.

- Колодец №93 - восстановить герметичность железобетонного кольца канализационного колодца, привести в работоспособное технически исправное состояние, выполнить устройство лотковой части.

- Колодцы №№94а, 98 — построить лотковую часть.

- Колодцы №№96, 97 - восстановить канализационные колодцы и привести их в работоспособное технически исправное состояние.

- Колодец №99 - устранить проседание грунта.

- Участок самотечной канализации от канализационного колодца №31 в сторону ул.Железнодорожная - выполнить строительство отсутствующего участка самотечной канализации.

- Выполнить отмостку всех канализационных колодцев с применением бетона М 100.

- Загерметизировать все выпуски от МКД в колодцах.

3.По участкам прохождения напорных трубопроводов.

3.1 На участке от КНС №2 до КНС № 1:

- Переход под ж/д полотном - выполнить строительство смотровых камер 1а-2а в соответствии с проектом;

- Выполнить планировку грунта при необходимости с подсыпкой. Выполнить строительство напорного коллектора от У Г -110 до КНС № 1 в соответствии с проектом.

3.2 На участке от КНС №1 до очистных сооружений:

- Переход через автодорогу Белгород-Волоконовка - выполнить установку комплектов чугунных тип "Т" на камерах №4 - №5 (участок №15).

- Устранить проседание грунта в районе устройства проколов и по всей трассе напорного коллектора.

- Переход под автодорогой Шебекино-Волчанск (участок №24) - устранить проседание грунта, оборудовать смотровые камеры.

- Выполнить планировку грунта по всей трассе прохождения напорного коллектора.

- Предоставить разрешительную документацию на прокладку напорного коллектора по участкам № 24 и № 25, который проложен по землям сельскохозяйственного назначения.

3.3 На участке от КНС №5 до КНС №4:

- На напорном коллекторе от КНС до колодца-гасителя выполнить монтаж гильзы

4.По КИП и А

- Заменить источники бесперебойного питания на КНС №№1, 2, 4, 5.

- Проверить датчики затопления и установить их в соответствии с уровнем.

5.По электрической части

5.1 по КНС №1:

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект контура заземления, акты проверки контура заземления.

- Шкаф управления установить без отклонения от вертикали.

- Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля 0,4 кВ к ШУ.

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего устройства.

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их вводом в эксплуатацию.

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.

- Предоставить документацию по узлу учета.

5.2 по КНС №2:

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект контура заземления, акты проверки контура заземления.

- Шкаф узла учета установить на высоту не менее 1 метра от уровня земли.

- Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля0,4 кВ к ШУ.

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего устройства.

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их вводом в эксплуатацию.

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.

- Предоставить документацию по узлу учета.

5.3 по КНС№3:

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект контура заземления, акты проверки контура заземления.

- Выполнить защиту согласно ПУЭ вводного и отходящего кабелей от узла учета на высоту 2 м.

- Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля 0,4 кВ к ШУ.

-  Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего устройства.

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их вводом в эксплуатацию.

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.

- Предоставить документацию по узлу учета.

- Предусмотреть защиту отходящего от ШУ к КНС кабеля.

5.4 по КНС №4:

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект контура заземления, акты проверки контура заземления.

- Выполнить защиту согласно ПУЭ вводного кабеля от узла учета на высоту 2м.

- Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля0,4 кВ к ШУ.

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего устройства.

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их вводом в эксплуатацию.

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.

- Предоставить документацию по узлу учета.

5.5 по КНС №5

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект контура заземления, акты проверок контура заземления.

- Выполнить защиту согласно ПУЭ отходящего кабеля от узла учета на высоту 2м.

- Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля 0,4 кВ к ШУ

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего устройства.

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их вводом в эксплуатацию.

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.

- Предоставить документацию по узлу учета.

- Предусмотреть защиту отходящего от ШУ к КНС кабеля.

6.Документация.

- Предоставить актуальную исполнительную схему объекта - «Строительство объекта водоотведения с. Новая Таволжанка».

Взыскать с ООО «ППП «Факел»» в пользу ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ" государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Исполнительнее листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Ю.Ю. Дробышев