Арбитражный суд Пензенской области

440000, г. Пенза, ул. Кирова, д. 35/39, 

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А49-702/2023

26 апреля 2023 г.

г. Пенза

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 апреля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2023 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Кудинова Р.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (440062, 

<

...>, помещ. 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строй-С" (446013, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 962435 руб. 22 коп.,

без явки сторон (извещены),

установил:

истец – региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Строй-С" (далее – ответчик) о взыскании 962435 руб. 22 коп. неустоек по договорам № 3000/СП2020 от 29.04.2020, № 2961/СП2020 от 21.04.2020, № 3199/СП2020 от 26.06.2020, № 2960/СП2020 от 04.03.2020, № 2922/СП2021 от 10.04.2020, № 2605/СП2020 от 13.0З.2020, № 2910/СП2020 от 09.04.2020, № 2886/СП2020 от 07.04.2020, № 2999/СП2020 от 29.04.2020, № 3095/СП2020 от 22.05.2020, № 3200/СП2020 от 26.06.2020, № 2709/СП2020 от 25.03.2020, № 2846/СП2020 от 02.04.2020, № 3574/СП2020 от 28.12.2020, № 3255/СП2020 от 09.07.2020. 

Определением суда от 26.01.2023 исковое заявление принято к производству.

Истец и ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом. В нарушение ст. 131 АПК РФ отзыв ответчиком не представлен. В связи с этим суд рассмотрел требования в отсутствие сторон в соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, дав оценку представленным доказательствам, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Между региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – истец, заказчик) и ООО "СТРОЙ С" (далее – ответчик, подрядчик) в 2020 г. заключено 15 договоров: 

1) № 3000/СП2020 от 29.04.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, подвального помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>. Согласно п. 1.1 договора подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, подвального помещения указанного МКД, сдать результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5466 от 12.05.2020, № 10025 от 30.12.2020.

Ответчик свои обязательства в части выполнения работ в согласованный срок сторонами исполнил ненадлежащим образом. Пунктом 3.2 договора и дополнительным соглашением № 3 от 04.08.2020 установлен срок окончания всех работ по договору - 18.08.2020.

В соответствии с п. 3.5 договора фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 25.12.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Сроком окончания выполнения работ подрядчиком на объекте является 25.12.2020.

Общая стоимость работ по договору № 3000/СП2020 от 29.04.2020 согласно дополнительному соглашению № 4 от 25.12.2020 составляет 2419992 руб. 78 коп.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним пени с учетом снижения и применения ставки процента законной неустойки за период с 19.08.2020 по 25.12.2020 в размере 102058,54 руб. (2419992,78 х 129 х 1/130 х 4.25%), где 129 - количество дней просрочки; 4,25%-ключевая ставка ЦБ РФ на момент предъявления претензии.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 17.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 112058 руб. 54 коп.;

2) № 2961/СП2020 г от 21.04.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5468 от 12.05.2020 и № 9855 от 23.12.2020.

Пунктом 3.2. договора установлен срок окончания всех работ по договору - 29.06.2020. 

16.12.2020 сторонами договора подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 2961/СП2020 от 21.04.2020 согласно дополнительному соглашению № 1 от 16.12.2020 составляет 1553889,16 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним пени с учетом снижения и применения ставки процента законной неустойки за период с 30.06.2020 по 16.12.2020 в размере 86360,38 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 28.06.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 96360 руб. 38 коп.;

3) № 3199/СП2020 от 26.06.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5234 от 14.04.2020, № 8410 от 15.10.2020, № 8412 от 16.10.2020 и № 8439 от 19.10.2020.

Пунктом 3.2. договора установлен срок окончания всех работ - 27.08.2020.

06.10.2020 сторонами договора подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 3199/СП2020 от 26.06.2020 согласно дополнительного соглашения № 1 от 11.12.2020 составляет 638790,31 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним пени с учетом снижения и применения ставки процента законной неустойки за период с 28.08.2020 по 06.10.2020 в размере 22136,54 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 26.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 32136 руб. 54 коп.;

4) № 2960/СП2020 от 04.03.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: капитальный ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5467 от 12.05.2020, № 8570 от 23.10.2020 , № 8470 от 21.10.2020.

Пунктом 3.2. договора и дополнительным соглашением № 3 от 27.07.2020 установлен срок окончания всех работ - 10.08.2020.

09.10.2020 сторонами договора подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 2960/СП2020 от 04.03.2020 согласно дополнительному соглашению № 4 от 09.08.2020 составляет 969141,23 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 11.08.2020 по 09.10.2020  в размере 19010,08 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 09.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 29010 руб. 08 коп.;

5) № 2922/СП2021от 10.04.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, тепло-снабжения, электроснабжения (далее - Работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5234 от 14.04.2020, № 8439 от 19.10.2020, № 8412 от 16.10.2020 и № 8410 от 15.10.2020.

Пунктом 3.2. договора и дополнительным соглашением № 3 от 16.07.2020 - установлен срок окончания всех работ - 30.07.2020.

06.10.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 2922/СП2021 от 10.04.2020 согласно дополнительного соглашения № 4 от 06.10.2020 составляет 1769851,78 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 31.07.2020 по 06.10.2020 в размере 39345,17 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение Заказчика не позднее 29.07.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения. 

Общая сумма штрафных санкций составляет 49345 руб. 17 коп.;

6) № 2605/СП2020 от 13.03.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, подвального помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 7559 от 01.09.2020 и № 4347 от 19.03.2020.

Пунктом 3.2. договора и дополнительным соглашением № 2 от 11.06.2020 установлен срок окончания всех - 28.06.2020.

21.08.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

Общая стоимость работ по договору № 2605/СП2020 от 13.03.2020 согласно дополнительному соглашению № 3 от 21.08.2020 составляет 3801916, 02 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 29.06.2020 по 21.08.2020 в размере 67118,44 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 27.06.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения. 

Общая сумма штрафных санкций составляет 77118 руб. 44 коп.;

7) № 2910/СП2020 от 09.04.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате аванса в размере 30% от стоимости договора в согласованные сроки, что подтверждается платежным поручением № 5231 от 14.04.2020, № 7655 от 09.09.2020, № 7731 от 14.09.2020 и № 7746 от 18.09.2020.

Пунктом 3.2 договора и дополнительного соглашения № 4 от 29.07.2020 установлен срок окончания всех работ - 02.08.2020.

31.08.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 2910/СГ12020 от 09.04.2020 согласно дополнительному соглашению № 5 от 31.08.2020 составляет 1702643,47 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 03.08.2020 по 31.08.2020 в размере 16142,37 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 01.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения. 

Общая сумма штрафных санкций составляет 26142 руб. 37 коп.;

8) № 2886/СП2020 от 07.04.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и установка узла управления и регулирования потребления тепловой энергии в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5230 от 14.04.2020, № 7914 от 24.09.2020 и № 7938 от 25.09.2020.

Пунктом 3.2. договора и дополнительным соглашения № 3 от 13.07.2020 установлен срок окончания всех работ - 27.07.2020.

10.09.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 2866/СП2020 от 07.04.2020 согласно дополнительному соглашению № 4 от 10.09.2020 составляет 1336 51,79 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 28.07.2020 по 10.09.2020 в размере 19667,15 руб. 

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 09.09.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения. 

Общая сумма штрафных санкций составляет 29667 руб. 15 коп.;

9) № 2999/СП2020 от 29.04.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения (далее - работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5465 от 12.05.2020, № 8980 от 13.11.2020, № 8971 от 11.11.2020 и № 9081 от 18.11.2020.

Пунктом 3.2 договора и дополнительного соглашения № 3 от 29.07.2020 установлен срок окончания всех работ - 17.08.2020.

02.11.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 2999/СП2020 от 29.04.2020 согласно дополнительному соглашению № 4 от 02.11.2020 составляет 2441416,18 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 18.08.2020 по 02.11.2020 в размере 61457,96 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 16.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения. 

Общая сумма штрафных санкций составляет 71457 руб. 96 коп.; 

10) № 3095/СП2020 от 22.05.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5826 от 03.06.2020, № 9256 от 25.11.2020, № 9310 от 01.12.2020.

Пунктом 3.2 договора установлен срок окончания всех работ - 30.07.2020.

09.11.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 3095/СП2020 от 22.05.2020 согласно дополнительного соглашения № 1 от 09.11.2020 составляет 1502403,20 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 31.07.2020 по 09.11.2020 в размере 50099,37 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение Заказчика не позднее 16.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 60099 руб. 37 коп.; 

11) № 3200/СП2020 от 26.06.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 6548 от 07.07.2020, № 8972 от 11.11,2020.

Пунктом 3.2. договора установлен срок окончания всех работ - 27.08.2020.

29.10.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 3200/СП2020 от 26.06.2020 согласно дополнительному соглашению № 1 от 29.10.2020 составляет 374407,97 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 28.08.2020 по 29.10.2020 в размере 7711,36 руб. 

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение Заказчика не позднее 26.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 17711 руб. 36 коп.;

12) № 2709/СП2020 от 25.03.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 4758 от 30.03.2020, № 7965 от 28.09.2020 и № 8106 от 29.09.2020.

Пунктом 3.2. договора и дополнительным соглашением № 3 от 30.06.2020 установлен срок окончания всех работ - 11.07.2020.

11.09.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3. 

Общая стоимость работ по договору № 2709/СП2020 от 25.03.2020 согласно дополнительному соглашению № 4 от 02.12.2020 составляет 2536628,83 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 12.07.2020  по 11.09.2020 в размере 51415,52 руб..

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение Заказчика не позднее 26.08.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 61415 руб. 52 коп.;

13) № 2846/СП2020 от 02.04.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 5229 от 14.04.2020, № 9751 от 18.12.2020, № 9591 от 10.12.2020, № 9589 09.12.2020, № 9584 09.12.2020, № 9583 09.12.2020.

Пунктом 3.2. договора и дополнительным соглашением № 3 от 08.07.2020 установлен срок окончания всех работ - 22.07.2020.

02.12.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 2846/СП2020 от 02.04.2020 согласно дополнительному соглашению № 4 от 02.12.2020 составляет 2628500,54 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 23.07.2020 по 02.12.2020 в размере 114289,23 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение Заказчика не позднее 21.07.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 124289 руб. 23 коп.; 

14) № 3574/СП2020 от 28.12.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 334 от 29.01.2021, № 6032 от 09.07.2021.

Пунктом 3.2. договора установлен срок окончания всех работ - 14.03.2021.

31.05.2021 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 3574/СП2020 от 28.12.2020 согласно дополнительному соглашению № 1 от 31.05.2021 составляет 1962871,66 руб.

В соответствии с п. 15.2. договора в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1 договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним неустойку за период с 15.03.2021 по 31.05.2021 в размере 153103,99 руб. (1962871,66 * 78 х 0.1%), где 78 - количество дней просрочки.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору..

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 13.03.2021. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 163103 руб. 99 коп.; 

15) № 3255/СП2020 от 09.07.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

В соответствии с условиями договора истец выполнил свои обязательства по договору по оплате в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 6686 от 16.07.2020, № 73 от 15.01.2021.

Пунктом 3.2. договора установлен срок окончания всех работ- 09.09.2020.

28.12.2020 сторонами договора были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка об их стоимости по форме КС-3.

Общая стоимость работ по договору № 3255/СП2020 от 09.07.2020 согласно дополнительному соглашению № 1 от 29.12.2020 составляет 241708,75 руб.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец числит за ним пени с учетом снижения и применения ставки процента законной неустойки за период с 10.09.2020 по 28.12.2020 в размере 8692,22 руб.

Согласно п. 6.1.11 договора подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение заказчика не позднее срока окончания работ, указанного в п. 3.2 раздела 3 настоящего договора, исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (приложением № 3 к договору, далее - перечень), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

Согласно подпункту "д" п. 10.2 договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 договора, сдать в полном объеме заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по объекту в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 3 к договору.

Таким образом, исполнительная документация должная быть представлена в распоряжение заказчика не позднее 08.09.2020. Указанный срок подрядчиком был нарушен. Пунктом 15.3 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных настоящим договором сроков предоставления исполнительной документации и/или информации, предусмотренных п.п 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый имевший место факт нарушения.

Общая сумма штрафных санкций составляет 18692 руб. 22 коп.

19.01.2020 за № 209/21п, 16.02.2021 за № 162/21п, 03.12.202.1 за № 505/21п в адрес ответчика направлялись претензии о добровольном погашении неустойки и штрафа по вышеуказанным договорам, однако до настоящего времени требование истца ответчиком оставлено без удовлетворения.

29.03.2021 было заключено соглашение о зачете встречных однородных требований. После проведения взаимозачета задолженность по неустойке и штрафу за просрочку выполнения работ по договору № 3255/СП2020 от 09.07.2020 составила 12519 руб. 12 коп.

Описанные правоотношения сторон обусловлены заключенными сторонами договорами подряда, поэтому к нему применимы нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

В соответствии со ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе, неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Материалами дела подтверждена просрочка выполнения работ, обстоятельства дела и расчет неустойки ответчиком не оспорены. Заявление о применении ст. 333 ГК РФ в материалы дела от ответчика не поступало.

Согласно положениям ст. ст. 9, 65, 71 (ч. 3.1) АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд на основании ст. ст. 8, 309, 310, 330 ГК РФ удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины, суд относит на ответчика (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

исковые требования удовлетворить, расходы по делу отнести на ответчика.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй-С" (ИНН 

<

***>) в пользу регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (ИНН 

<

***>) 962435 руб. 22 коп. неустойки, а также 22249 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня вынесения в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области.

СудьяКудинов Р.И.