АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

24 февраля 2025 года

Дело № А33-37716/2024

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства отказать (в том числе потому, что сетевой организацией представлено письмо истца об аннулировании иного договора технологического присоединения).

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в течение календарного месяца с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.10.2020              № 20.2400.4972.20, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя антенно-мачтового сооружения, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

...> часть земельного участка площадью 1 кв.м., входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:341507, в точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 5 кВт.

Линия (0,4) Проектируемая

ТП ТП 6178 ООО ЖСК «Гранд»

ПС ПС № 71 «Весна» 110/10 кВ

Основной источник питания: ПС № 71 «Весна» 110/10 кВ

Резервный источник питания: отсутствует,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000422250:

? выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 6178 ООО ЖСК «Гранд»;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров о внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) 136,33 руб. неустойки за 17.11.2024 (1 день), а также неустойку с 18.11.2024 по день фактического исполнения обязательств по договору технологического присоединения из расчёта 136,33 руб. за каждый день просрочки, а также 60 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.

В случае неисполнения решения суда в части неимущественного требования в полном объёме в течение календарного месяца с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) судебную неустойку в размере  504,42 руб. (как произведение 136,33 руб. предусмотренной законной неустойки за 1 день просрочки и 3,7 (с 17.11.2024 по 24.02.2025) месяцев неисполнения обязательств перед заявителем ко дню вынесения резолютивной части судебного акта) за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдаётся только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО1