9080/2023-234504(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 Дело № А43-29278/2023 

г. Нижний Новгород  18 декабря 2023 года  

Дата объявления резолютивной части решения 12 декабря 2023 года. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Окорокова Дмитрия  Дмитриевича (шифр 17-756) при ведении протокола судебного заседания помощником  судьи Шиповой Аленой Дмитриевной, рассмотрев дело по иску  

Департамента городского хозяйства Администрации г. Сарова (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саров,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "СпецСанТех" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Саров,  

третье лицо: акционерное общество "Саровская теплосетевая компания", г. Саров,  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

- об обязании ответчика с 16.04.2024 в течение 60 дней восстановить в полном  объеме нарушенное благоустройство после проведения земляных работ по адресу:  Нижегородская область, г.Саров, кв. 3,5 (кадастровый квартал 52:60:0010009), а именно  выполнить работы, указанные в акте приема-сдачи восстановленного благоустройства  от13.11.2023 (с учетом уточнений),  

 при участии представителя истца ФИО1 по доверенности от 27.09.2023,  

установил:

Департамента городского хозяйства Администрации г. Сарова обратился  в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием о восстановлении  благоустройства земельного участка по адресу: Нижегородская область, г.Саров,  теплосеть кв.3,5 с кадастровым номером 52:60:0010009 к ООО "СпецСанТех".  

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО "Саровская  теплосетевая компания".  

В судебном заседании 16.11.2023 истец уточнил исковые требования и просил  обязать ответчика восстановить в полном объеме нарушенное благоустройство после  проведения земляных работ по адресу: Нижегородская область, г.Саров, кв. 3,5  (кадастровый квартал 52:60:0010009), а именно выполнить работы, указанные в акте  приема-сдачи восстановленного благоустройства 13.11.2023.  

В судебном заседании 12.12.2023 истец просил уточнить требования и просил  обязать ответчика с 16.04.2024 в течение 60 дней восстановить в полном объеме  нарушенное благоустройство после проведения земляных работ по адресу:  Нижегородская область, г.Саров, кв. 3,5 (кадастровый квартал 52:60:0010009), а именно  выполнить работы, указанные в акте приема-сдачи восстановленного благоустройства  13.11.2023.  

Суд в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса принял  данное уточнение.  

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом уведомленные о времени и месте  проведения судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, явку уполномоченных представителей в судебное  заседание не обеспечили.  

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного заседания, указав, что не  получал исковое заявление и приложенные к нему документы, а также определение  Арбитражного суда Нижегородской области о принятии искового заявления к  производству.  

Судом установлено, что копия искового заявления, копия уточнения, копия  определения Арбитражного суда Нижегородской области от 10.10.2023, а также копия  определения Арбитражного суда Нижегородской области от 16.11.2023 были направлены  ответчику по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, и не получены последним  Указанные документы были возвращены отправителям (отправление с копией искового  заявления - истцу, отправления с копиями определений - в суд) в связи с истечением срока  хранения, что подтверждается отчетами об отслеживании почтовой корреспонденции.  

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо  несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1),  доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических  лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.  Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре  юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не  находится по указанному адресу.  

При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения  ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства.  

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие по имеющимся  доказательствам.  

В обоснование своих требований истец указал, что Департаментом городского  хозяйства Администрации г.Саров по заявлению ООО «СпецСанТех» о выдаче разрешения на  проведение земляных работ на территории города Сарова 21.04.2021 выдано разрешение на  проведение земляных работ № 15.02-07/46 по адресу: Нижегородская область, г. Саров, теплосеть  кв.3,5. На данном участке проводилась реконструкция тепловой сети К-З-К-2.1-58.  

Общий срок выполнения работ, в том числе по восстановлению благоустройства, установлен  с 30.09.2021 по 21.12.2021. В срок работы Ответчиком не выполнены.  

В адрес Департамента от исполнительного директора АО «Саровская теплосетевая  Компания» поступило письмо (от 29.12.2021 № 084/1966) в котором сообщалось, что  восстановление благоустройства кв. 3 после окончания работ по капитальному ремонту теплосети  ООО «СпецСанТех» в полном объеме будет выполнено до 30.05.2022.  

01.06.2022 от ООО «СпецСанТех» поступило заявление о продлении срока действия  разрешения на проведение земляных работ на территории города Сарова в связи с  неблагоприятными погодными условиями для укладки асфальтобетонного покрытая до 30.06.2022.  

В пояснительной записке к заявлению Ответчик сообщал, что срок требуется продлить в  целях завершения благоустройства территории объекта строительства «Реконструкция тепловой  сети кв. 3, 5 на участке К К-З-К-2.1-58.  

Предусмотрено выполнение работ: -устройство асфальтного покрытия—200 кв.м; - установка МАФ; - посев газонной травы. 

На основании приказа Департамента городского хозяйства Администрации г.Саров от  02.06.2022 № 212-П срок действия разрешения на проведение земляных работ на территориях  общего пользования города Сэров продлен до 30.06.2022.  

Согласно абз. 3 п. 15 Порядка продление срока действия разрешения на проведение земляных  работ допускается однократно.  

По истечению указанного срока Ответчик  благоустройство в полном объеме не восстановил,  акт приема-сдачи восстановленного благоустройства не подписан.  

04.08.2022 Департаментом в адрес Ответчика было направлено уведомление об окончании  сроков производства работ с учетом восстановления благоустройства.  

26.09.2022 Департаментом совместно с ООО «СпецСанТех», АО «Саровская Теплосетевая  Компания» проведено совещание по вопросу восстановления благоустройства по вышеуказанному  адресу.  

По результатам данного совещания был составлен протокол, где указаны недостатки при  восстановлении благоустройства, а именно:  

- у д.16 по ул. Мира у дренажного колодца появилась яма, отмостка дома после проведения  работ треснула;  

- в зоне проведения работ во многих местах просел асфальт, где после дождя собираются  огромные лужи;  

- не вывезены кучи щебня; 

- по ул. ФИО2, д. 10 не приведен в порядок земельный участок, на котором вместо грунта  и зоны зеленых, насаждений лежит грязь;  

- сушилки для белья не восстановлены; - пешеходные дорожки не выполнены в тех местах, где они ранее находились; - не установлены скамейка со спинками, 2 шт.; 

- по ул. Гагарина не восстановлено квартальное ограждение с металлической конструкцией.  Дата принятия благоустройства 30.10.2022.  

На контрольную дату недостатки Ответчиком не устранены.  

Истцом в адрес Ответчика направлена претензия с требованием в срок до 31.05.2023  восстановить нарушенное благоустройство согласно рабочей документации по благоустройству  территории.  

В указанный срок благоустройство не восстановлено. 

За, нарушения требований в сфере благоустройства при осуществлении контроля  Администрацией города Сарова ООО «СпецСанТех» объявлено предостережение от 09.06.2023 о  недопустимости нарушения обязательных требований. ОOO «СпецСанТех» предложено принять  меры в срок до 01.09.2023 по обеспечению соблюдения обязательных требований в части  восстановления элементов благоустройства. В установленный срок требования по восстановлению  благоустройства Ответчиком не выполнены.  

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с  вышеуказанными требованиями.  

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.  

Согласно пп.1 п.4 статьи 5 Закон Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З "Об  обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области" обязанности по  обеспечению чистоты и порядка, кроме случаев, предусмотренных частями 2 и 3  настоящей статьи, возлагаются в отношении мест производства земляных, строительных,  дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ  по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств  размещения информации, а также в отношении прилегающей к ним территории, - на  производителей работ (генеральных подрядчиков).  

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита  гражданских прав осуществляется, кроме прочего, путем присуждения к исполнению  обязанности в натуре.  

Судом установлено, Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров по  заявлению ООО «СпецСанТех» о выдаче разрешения на проведение земляных работ на  территории города Сарова 21.04.2021 выдал разрешение на проведение земляных работ № 15.0207/46 по адресу: Нижегородская область, г. Саров, теплосеть кв.3,5. На данном участке  проводилась реконструкция тепловой сети К-З-К-2.1-58. Из разрешения следует, что должны быть  проведены также работы по восстановлению благоустройства.  

Между тем срок производства работ с восстановлением благоустройства истек, однако  нарушенное благоустройство после проведения земляных работ в полном объеме не  восстановлено.  

Указанное подтверждается актом приема-сдачи восстановленного благоустройства от  13.11.2023, в котором установлено, что ответчиком не были выполнены:  

- восстановление асфальтобетонного покрытия проездов и уширений проездов по  всей площади восстановления (некачественная укладка а/б покрытия, просадки,  водостояние, неровное примыкание к существующему покрытию);  

- восстановление плиточного покрытия площадок для сушки белья с подходами  площадью до 56м2;  

- восстановление плиточного покрытия тротуарных дорожек (бетонные тротуарные  плиты 70x70 толщиной 7см без основания) площадью до 15 м2;  

- восстановление газона на всей площади повреждения (до 1000 м2); 

- восстановление стоек для сушки белья 6 шт. ( ФИО2,4 -2 шт., ФИО2,6 - 2 шт,  ФИО2, 8 -2 шт.);  

-  восстановление стоек для чистки вещей (выбивалок) 2 шт. (ул.Чапаева,2, ул.  ФИО2,8);  

- восстановление квартального ограждения (кирпичные армированные столбы с  металлическими решетками аналогичные существующим) 1 столб + 1 решетка;  

- не восстановлен бортовой камень в проезде между домами ул. Гагарина, 3 и 5 - 4  м.п.;  

- не восстановлен уровень асфальтобетонного покрытия проезда в районе  водоприемного колодца ливневой канализации ул.ФИО2,4 (площадью до 10м2).  

О дате, времени и месте подписания указанного акта ответчик был извещен  телефонограммой № 968 от 10.11.2023. Представитель ответчика отказался от подписания  акта.  

Кроме того, в подтверждение также были представлены фотоматериалы. 

Таким образом, факт невосстановления в полном объеме нарушенного  благоустройства после проведения земляных работ по адресу: Нижегородская область,  г.Саров, кв. 3,5 (кадастровый квартал 52:60:0010009) подтверждается материалами дела и  не оспорен ответчиком.  

При таких обстоятельствах, суд считает требование истца обоснованным и  подлежащим удовлетворению.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы относятся на ответчика и взыскиваются с него в сумме 6000  рублей в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СпецСанТех" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Саров, Нижегородская область, с 16.04.2024 в  течение 60 дней восстановить в полном объеме нарушенное благоустройство после  проведения земляных работ по адресу: Нижегородская область, г.Саров, кв. 3,5  (кадастровый квартал 52:60:0010009), а именно выполнить работы, указанные в акте  приема-сдачи восстановленного благоустройства от 13.11.2023.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СпецСанТех" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Саров, Нижегородская область, в доход  федерального бюджета 6 000 рублей госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  Исполнительный лист на обязание выдать по заявлению взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, при  условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного  суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.Д. Окороков