27/2014-76132(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 24 ноября 2017 года 

по делу № А33-23012/2017 Красноярск

24 ноября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в муниципальный контракт № 21 от 27.04.2017 на выполнение  проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство автодороги пр. Молодежный от  дома № 31 до ул. Преображенской» в г. Красноярске, заключенный между муниципальным  казенным учреждением города Красноярска «Управление капитального строительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и акционерным обществом "Территориальный  градостроительный институт "Красноярскгражданпроект"  (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) изложив в следующей редакции:  

- пункт 3.1: «Срок начала выполнения работ- с момента заключения муниципального  контракта;  

Срок завершения работ - 01 июня 2018 года»; 

- пункт 2.5: «Оплата выполненных работ производится за счет бюджета 2017-2018 года.  

 Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на  расчетный счет Подрядчика на основании актов сдачи-приемки работ, подписанных  сторонами, счетов-фактур (счета).  

 Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика. 

-абзац 2 пункта 4.1: «- представить Заказчику график производства работ с разбивкой по  этапам, не позднее 15.12.2017»;  

-пункт 5.1: «По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи- приемки выполненных работ, комплектную проектно-сметную документацию.  

Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (ее результатов) и подписывает акты сдачи  - приемки выполненных работ по 1 этапу в течение 15 рабочих дней с момента получения.  

Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (ее результатов) и подписывает акты  

сдачи - приемки выполненных работ по 2 этапу после получения положительного заключения  государственной экспертизы в течение 15 рабочих дней»;  

- пункт 11.1: «Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 29 декабря  2018 года».  

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем  подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.А. Куликовская