Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-44815/18-68-328

г. Москва

18 июля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 июля 2018 года

 

Судья   Абрамова Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление по делу по иску ООО "СК "Электромонтажпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 140185, 

<

...>)

к ПАО «МОЭСК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 115114, 

<

...>)

о взыскании денежных средств

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 30.05.2018 № б/н 

от ответчика: ФИО3 по дов. от 02.02.2018 № б/н

УСТАНОВИЛ:

ООО "СК "Электромонтажпроект" обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО «МОЭСК» о расторжении договора строительного подряда № 412ЮС/14 от 13.02.2014, о взыскании задолженности 43 233 866,20, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период  с 06.02.2018 по 07.03.2018 в размере 268 286,20 рублей.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме и просил удовлетворить. Представил письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела.

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал. Возражал против его удовлетворения по мотивам отзыва.

Исследовав и оценив в порядке ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, отзыв, письменные пояснения, заслушав представителей сторон, суд пришёл к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Истцом и Ответчиком заключен договор строительного подряда № 42ЮС/14 от 13.02.2014 (далее — Договор), согласно условиям которого Заказчик  поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: «Строительство РП-10 кВ на 22 яч., отпайки КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №605, установка ячейки в 3 секц. РУ-10 кВ ПС №605 «Бронницы», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Холуденево для нужд ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»(п. 1.1. Договора).

Согласно п. 2.1. Договора общая стоимость работ согласована сторонами в размере 52 785 492,71 руб.

В соответствии с п.2.4. Договора Оплата работ по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в сроки, установленные Графиком финансирования работ (Приложение № 2), путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Исходя из п. 2.4.1. Договора оплата за выполненные работы осуществляется только в случае надлежащего исполнения Подрядчиком условий раздела 6 настоящего Договора в части заключения договора страхования строительно-монтажных работ.

Пунктом 2.4.2. Договора Оплата выполненных строительно-монтажных и  пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 (тридцати банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме  № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

Оплата выпoлнeнных проектно- изыскaтeльcкиx работ производится в срок не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком при условии, его Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работе

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.

Сроки выполнения работ и порядок сдачи –приемки работ предусмотрен разделом 3 настоящего договора.

Начало работ: 13.02.2014; Окончание работ:31.03.2014

Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения подрядчиком  недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение №3). Под этапом подразумевается выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом  сдачи-приемки.

Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:

Порядок сдачи строительно-монтажных и пусконаладочных работ: Подрядчик за 3 (Три) рабочих дня до представления форм № КС-2, № КС-3 в бухгалтерию Заказчика обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (формы №№ КС-2, КС- 3,), а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций. Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место и либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №№ КС-2, КС-3), либо в течение 5-ти рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно ст.9 настоящего Договора.

Порядок сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ. Готовность проектно - сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи - приемки, который оформляется в следующем порядке. '

В сроки, установленные Графиком производства этапов работ, Подрядчик передает по накладной уполномоченному представителю Заказчика проектно-сметную документацию с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного со своей стороны. Оформление накладной подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно - сметной документации.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно - сметной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи - приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и субъектов РФ, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственных экспертных учреждений (в случае необходимости проведения государственной экспертизы), а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

Согласно п.3.7. Датой окончания  работ  по Договору сдачи результата работ Заказчику является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всех работ по Договору в соответствии с п.3.9 Договора.

В пункте 6.1. Договора стороны предусмотрели, что подрядчик обязался  обеспечить гарантии исполняя обязательств по договору на эксплуатационный период путем комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства , материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции),  и ответственности 

В соответствии с п. 11.2 Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке (в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ) без возмещения убытков Подрядчика, если:

-    Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору.

-    Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 (тридцати) дней.

-          при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления.

Пунктом 11.3.Договора предусмотрено, то в случае не исполнения Подрядчиком обязанности, установленной п.4.37. настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

Истец во исполнение условий договора выполнил работы на общую сумму 43 233 866,20 руб., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.12.2014 (ф. КС-3), Актов о приемке выполненных работ № 1 от 10.12.2014 (ф. КС-2), Актом сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 10.12.2014 . Акты подписаны сторонами без замечаний. 

Возражения ответчика сводятся к тому, что обязательства по оплате не наступили, поскольку при рассмотрении арбитражного дела № А40-29241/17-113-280 по иску истца о взыскании с ответчика 43 233 866,20 руб. за фактически выполненные работы установлено, что договор является действующим и предусмотренная договором стоимость работ подлежит перечислению только после их выполнения и сдаче в полном объеме.

Против расторжения договора ответчик также возражает, ссылаясь , что банкротство ответчика не является основанием для расторжения договора. 

Между тем, согласно п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства: срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим; совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, допускается исключительно в порядке, установленном настоящей главой. Следовательно, если требование кредитора о взыскании полной оплаты по договорам поставки оборудования удовлетворено и это требование включено в реестр требований кредиторов, то оборудование, указанное в этих договорах поставки должно быть передано должнику.

Согласно п. 3. ст. 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе: заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном статьей 102 настоящего Федерального закона; подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

В соответствии с п. 4 ст. 102 Закона о банкротстве, о порядке отказа от исполнения сделок должника, сторона по договору, в отношении которого заявлен отказ от исполнения, вправе потребовать от должника возмещения убытков, вызванных отказом от исполнения договора должника.

 

Кроме того, как следует из информации, размещенной на электронной торговой площадке b2b-mrsk.ru, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК» 10.11.2017 опубликовало сведения о проведении Запроса цен № 920155 по определению подрядчика на выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:

«Строительство РП-10 кВ на 22 яч., отпайки КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №605, установка ячейки в 3 секц. РУ-10 кВ ПС №605 «Бронницы», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Холуденево для нужд ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»

 

Указанный титул объекта работ полностью совпадает с титулом объекта работ, предусмотренным п. 1.1. Договора заключенного между Истцом и Ответчиком.

Стоимость закупки -15 497 130 руб.

Срок выполнения работ — с момента подписания договора по 30.12.2017

Указанная информация также содержится в письме ПАО «МОЭСК»: Приглашение участникам о проведении запроса цен от 10.11.2017 № 920155.

На размещенном ПАО «МОЭСК» на торговой площадке первом листе Технического задания к закупке № 920155 в верхнем левом углу содержится ссылка на Договор № 42юс/14, заключенный ранее с ООО «СК «Электромонтажпроект».

Текст указанного Технического задания аналогичен Техническому заданию, согласованному между Истцом и Ответчиком к договору № 42юс/14.

24.11.2017 согласно Протоколу № М/4154 заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен № 920155 победителем запроса цен признано ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" (101000, Россия, 

<

...>) с заявкой о выполнении предусмотренной титулом работ за 15 419 644,35 руб. 

Соответственно ответчик на доделывание работ, которые не имеет возможности выполнить истец стоимостью 9 551 626,51 руб. уже привлек другую организацию — ООО «БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ» за 15 419 644,35 руб. и указанные работы должны быть уже им выполнены в срок по 30.12.2017.

По мнению истца, Ответчик своими фактическими действиями в одностороннем порядке отказался от исполнения заключенного с Истцом Договора, привлекая для достройки объекта другую организацию, но уклоняется от оплаты выполненных Истцом работ стоимостью 43 233 866,20 руб., чем злоупотребляет правами. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

При указанных выше обстоятельствах, исходя из фактического поведения ответчика и банкротства истца, суд считает требование о расторжении договора и взыскании стоимости выполненных и принятых ответчиком работ подлежащими удовлетворению.

Истец просит взыскать также в порядке ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами, за период с 06.02.2018 по 07.03.2018 сумма которых согласно расчету истца составляет 268 286,20 руб.

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ).

Между тем, проценты на сумму неосновательного обогащения (предмет заявленного иска), подлежат начислению с момента расторжения договора, тогда как проценты начислены истцом до этого момента.  В связи с этим в удовлетворении соответствующего требования суд отказывает.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании ст.ст. 8, 11, 12, 717, 450, 452, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор строительного подряда от 13.02.2014 № 42ЮС/14.

Взыскать с ПАО "МОЭСК" в пользу ООО "СК "Электромонтажпроект" стоимость выполненных работ в сумме 43.233.866 руб. 20 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 198.766 руб. 64 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

 

Судья                                                                                                Е.А. Абрамова