Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-13396/18

10 апреля 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального казенного  предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия» к обществу с ограниченной  ответственностью «Москапстрой» об обязании устранить недостатки и дефекты, возникшие  в результате выполнения строительно-монтажных работ по государственному контракту,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Москапстрой» до 1 мая 2018 года  устранить недостатки и дефекты, возникшие в результате выполнения строительно- монтажных работ по государственному контракту № 0548100000215000031/251.4576.К16 от  15 февраля 2016 года в рамках гарантийных обязательств, а именно:  

Недостатки 

Мероприятия по устранению 

Здание 16 

Выполнить. 

1. Не выполнены работы по кладке кирпичных стен  

и перегородок, перегородок из ГКЛ. 

2. Не выполнена отделка перегородок с окраской.  

Выполнить. 

3. Не выполнена облицовка стен керамической  

Выполнить. 

глазурованной плиткой. 

4. Не выполнена отделка дверных и оконных  

Выполнить. 

откосов. 

5. Не выполнена отделка потолков с окраской  

Выполнить. 

6. Не выполнена отделка дверных и оконных  

Выполнить. 

откосов. 

7. Не смонтирована система водостока по фасаду.  

Выполнить. 

8. Не установлены электронагреватели -3 шт.  

Выполнить. 

9. Не смонтированы системы вытяжной 

Выполнить 

вентиляции В1, В2, ВЗ, В4. 

10. Не смонтированы системы приточной  вентиляции П1, ПВ1.  

Выполнить. 

11. Не смонтировано вентиляционное оборудование.  

Выполнить. 

12. Не выполнена автоматизация систем отопления и  

Выполнить. 

вентиляции. 

13. Не выполнено электроосвещение. 

Выполнить. 

14. Не выполнены работы по устройству силового  

Выполнить. 

электрооборудования. 

15. Не смонтирована система АПС. 

Выполнить. 

16. Не смонтирована система оповещения и  

Выполнить. 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

17. Не смонтирована система охранной 

Выполнить. 

сигнализации (СОС). 

18. Не выполнена телефонизация в здании. 

Выполнить. 

Здание 24 

1. Не выполнены работы по кладке кирпичных  

Выполнить. 

стен и перегородок, перегородок из ГКЛ.  

2. Не выполнена отделка потолков с окраской. 

Выполнить. 

3. Не устроены полы (тип 1, 2) с установкой  

Выполнить. 

металлических порожков и плинтусов. 

4. Не выполнена отделка перегородок с окраской.  

Выполнить. 

5. Не выполнена облицовка стен керамической  

В ы полнить. 

глазурованной плиткой. 

6. Не выполнена облицовка наружных оконных и  

Выполнить. 

дверных откосов. 

7. Не выполнено обезжиривание кровли с  

Выполнить. 

последующей окраской и устройством карниза. 

8. Не смонтирована система водостока по фасаду.  

Выполнить. 

9. Не установлены электронагреватели -Зшт. 

Выполнить. 

10. Не выполнено электроосвещение здания.  

Выполнить. 

11. Не смонтированы системы вытяжной вентиляции  

Выполнить. 

В1, В2, ВЗ, В4. 

12. Не смонтированы системы приточной  

Выполнить. 

вентиляции П1, ПВ1. 

13. Не смонтировано вентиляционное оборудование.  

Выполнить. 

14. Не выполнена автоматизация систем отопления и  

Выполнить. 

вентиляции. 

15. Не выполнены работы по устройству силового  

Выполнить. 

электрооборудования. 

16. Не смонтирована система АПС. 

Выполнить. 

17. Не смонтирована система оповещения и  

Выполнить. 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

18. Не смонтирована система охранной сигнализации  

Выполнить. 

(СОС). 

19. Не выполнена телефонизация в здании.  

Выполнить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Москапстрой» в пользу  Федерального казенного предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия»  государственную пошлину в размере 6000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня принятия.