АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-3987/2023

07 ноября 2023 года

город Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2023 года.  Решение изготовлено в полном объеме 07 ноября 2023 года.  

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  

протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Грибань Д.А., 

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы искового  

заявления: 

Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов Республики Крым» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой»  о взыскании 65 316,35 рублей.  

При участии: от истца – ФИО2, представитель по доверенности; от ответчика – не явились. 

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов Республики Крым» обратилась в Арбитражный суд Республики  

Крым с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» о взыскании  

65 316,35 рублей неустойки по договору № РТС291А170033 от 10.11.2017. 

Определением суда от 14.02.2023 суд принял исковое заявление, и определил  

рассмотреть его в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным  

статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением суда от 10.04.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим  

правилам искового производства. 

 В судебное заседание, назначенное на 23.10.2023, явился уполномоченный  представитель истца, ответчик явку уполномоченных представителей не обеспечил,  уведомлен надлежащим образом и своевременно.  

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 30.10.2023.  

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда. 

В ходе судебного разбирательства, ответчик извещался о рассмотрении  Арбитражным судом Республики Крым дела № А83-3987/2023 согласно адресу  регистрации.  

В адрес ответчика была отправлена судебная корреспонденция с уведомлениями о  вручении почтовых отправлений. Почтовые отправления, направленные ответчику, были  возвращены почтовым отделением связи с отметкой «истёк срок хранения» (почтовые  отправления № 29500080206248, № 29500082204372).  

Согласно пункту 1 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного  процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если  адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован  организацией почтовой связи или арбитражным судом.  

Как указано в пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I  части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», юридически значимое  сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому  оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или  адресат не ознакомился с ним (ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается  доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи,  в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения  поступившей корреспонденции несет адресат. Согласно п. 68 указанного постановления  ст. 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если  арбитражным процессуальным законодательствам не предусмотрено иное.  

Поскольку риск неполучения корреспонденции, направленной в адрес ответчика,  несет само общество, то суд пришел к выводу о том, что ответчик надлежащим образом  уведомлен о времени и месте проведения судебного заседания.  

Информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном  сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет http://www.crimea.arbitr.ru и  сайте http://kad.arbitr.ru.  

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте  рассмотрения дела, в том числе путем опубликования указанной информации на  официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет", с учетом положений части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, обязывающих участников арбитражного процесса после  получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно  предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием  любых источников такой информации и любых средств связи, в связи с чем, суд на  основании статей 121, 123, 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при  имеющейся явке.  

Исследовав обстоятельства дела, имеющиеся в материалах дела доказательства,  пояснения сторон судом установлено следующее.  

10.11.2017 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Республики Крым», действующее в соответствии с  

615 ПП РФ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с  ограниченной ответственностью «КапРемСтрой», именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в  отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской  Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства  РФ от 01.07.2016 N° 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания  услуг й (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях  выполнения функций специализированной некоммерческой организации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление  Правительства РФ. № 615-ПП) и иных правовых актов Российской Федерации и  Республики Крым, по результатам электронного аукциона на выполнение работ  выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту  общего имущества (ремонт фасада и кровли) и выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества (ремонт фасада и кровли) в многоквартирном (-ых) доме (-ах)  по адресу: Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул.Солнечная, д.9, (протокол  

 № РТС291А170033 от «27» октября 2017 года) заключили Договор № РТС291А170033 на  выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту  общего имущества (ремонт фасада и кровли) и выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества (ремонт фасада и кровли) в многоквартирном (-ых) доме (-ах)  

по адресу: Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Солнечная, д.9 (далее -  договор).  

В соответствии с п. 2.1 договора по настоящему Договору Заказчик поручает, а  Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием  (Приложение № 9 к настоящему Договору) своими силами и средствами и/или силами  привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных  материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по  разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества  (ремонт кровли и фасада) и выполнение работ по капитальному ремонту общего  имущества (ремонт кровли и фасада) в многоквартирном (-ых) доме (-ах) по адресу(-ам)  Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул.Солнечная, д.9 (далее «Работы»), по  адресу(ам), предусмотренным .Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему  договору), (далее «Объект» / «Объекты»), включая разработку проектной документации,  выполнение строительно- монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов,  Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу каждого  Объекта (-ов) по Акту приемки выполненных работ по разработке проектной  документации, Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в  течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик  принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в  порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

Согласно п. 3.1 договора цена Договора определяется на основании Смет (-ы)  (Приложение № 8.1 - 8. .), Адресного перечня (Приложение № 2), с учетом процента  снижения, установленного по результатам электронного аукциона на выполнение работ  по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества  (ремонт кровли и фасада) и выполнение работ по капитальному ремонту общего  имущества (ремонт кровли и фасада) в многоквартирном (-ых) доме (-ах) по адресу(-ам)  Республика Крым, г. Алушта, пгт.Партенит, ул.Солнечная, д.9 (протокол №  РТС291А170033 от «27» октября 2017 г.) составляет 3274794,86 рубля (три миллиона  двести семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре рубля 86 копеек)., без НДС  (основание ст. 346.11 НК РФ)., и включает все затраты Генподрядчика, так или иначе  связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте(-ах).  

Права и обязанности заказчика оговорены в разделе 5 договора. Права и  обязанности генподрядчика - в разделе 6 договора. Порядок приемки выполненных работ  - в разделе 7 договора. Ответственность сторон - в разделе 12 договора.  

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются  Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются  дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор  передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Крым в установленном  порядке (п. 15.1 договора).  

Исполнение ответчиком обязательств с просрочкой послужило основанием для  начисления неустойки, которая в добровольном порядке оплачена не была.  

Вышеуказанные обстоятельства стали основанием для обращения истца в суд с  настоящим исковым заявлением.  

В силу норм статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) обязательства возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе  из договоров и иных сделок.  

Договорные правоотношения сторон, являющиеся предметом данного судебного  разбирательства, по своей правовой природе относятся к договору подряда и  регулируются нормами, закрепленными в главе 37 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ), Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О  порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения  работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке  осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций  специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,  направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах" (вместе с "Положением о привлечении специализированной  некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на  обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме").  

К отношениям сторон подлежат применению общие нормы о договоре подряда и  обязательствах, которые регламентируются положениями статей 702, 708, 711, 720, 740,  746, 758, 763, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица,  

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения  ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).  

В соответствии с частью 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только  те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.  

Как указано в статье 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону  должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться  в арбитражном суде иными доказательствами.  

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).  

В силу пп. 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2 договора Генподрядчик обязуется выполнить Работы  по Договору, как в целом, так и по отдельным Объектам работ в соответствии с Графиком  производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). Никакие  задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования  Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев,  специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами  действующего законодательства РФ и ПП РФ № 615 от 01.07.2016. Сроки начала и  окончания выполнения работ по каждому Объекту, а также работ в целом, являются  исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения  Генподрядчиком сроков производства Работ. Продолжительность производства работ на  Объекте(-ах) определяется Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к  настоящему Договору). При необходимости проведения работ в квартирах  многоквартирного дома, продолжительность проведения работ в каждой из квартир - не  более 7 (семи) дней (без учета выходных и праздничных дней). Начальный срок  выполнения работ - согласно Графика производства и стоимости работ (Приложение № 1  к настоящему Договору). Конечный срок выполнения работ — последний день  установленного срока выполнения работ согласно Графика производства и стоимости  работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

В соответствии с графиком производства работ срок выполнения работ начинает  исчисляться со дня заключения договора - 10.11.2017 и оканчивается - 01.07.2018.  

В силу п. 7.5. договора работы по договору по каждому объекту считаются  выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки  выполненных в полном объеме работ на объекте по акту приемки выполненных работ по  объекту и подписания сторонами оформленных актов приемки выполненных работ  (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

Согласно актам работы по капитальному ремонту общего имущества по адресу: 

г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Солнечная, д. 9, сданы Генподрядчиком и приняты  Заказчиком 25.07.2018.  

Стоимость выполненных работ на объекте составила 2 839 841, 26 руб. Заказчиком работы оплачены в полном объёме 

В соответствии с положениями главы 25 Гражданского кодекса РФ взыскание  неустойки является мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение  обязательства.  

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренными законом или договором.  

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание  неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.  

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор  не обязан доказывать причинение ему убытков. Таким образом, гражданское  законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения  обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или  ненадлежащее исполнение.  

При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ и Договором (п. 12.1 договора).  

В соответствии с п. 12.7.9 договора в случае задержки Генподрядчиком срока  начала и/или завершения работ по капитальному ремонту общего имущества по Объекту в  соответствии с Графиком производства и стоимости Работ (начальный и конечный сроки  выполнения Работ) Генподрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от  стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества по Объекту за каждый день  просрочки.  

Суд, проверив расчет истца, признал его арифметически и математически верным в  части определения периода начисления, суммы, подлежащей взысканию.  

По состоянию на день принятия решения по делу надлежащие и допустимые  доказательства погашения суммы неустойки суду не представлены.  

Контррасчет со стороны ответчика в материалы дела представлен не был. 

Заявления в порядке статьи 333 ГК РФ в материалы дела не поступало.  

Правом, предусмотренным статьей 131 процессуального закона, ответчик не  воспользовался, письменный отзыв суду не представил.  

Ответчик не оспорил в рамках настоящего дела те обстоятельства, на которые  ссылается истец в обоснование своих требований.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными  другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные  возражения относительно существа заявленных требований.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде  осуществляется на основе состязательности. Следовательно, непредставление  доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения  того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные  документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не  совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого  своего поведения.  

На основании вышеизложенного, исковые требования о взыскании 

неустойки в размере 65 316,35 рублей за период 03.07.2018-25.07.2018 по договору   № РТС291А170033 от 10.11.2017, суд признает обоснованным и подлежащим  удовлетворению.  

Как установлено в части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Так, истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в сумме 2 613,00 рублей, что подтверждается платежным поручением № 268 от 003.02.2023. 

Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражные  суды установлены в статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 613,00 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» в  пользу Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Республики Крым» сумму неустойки в размере 65 316,35 рублей  за период 03.07.2018-25.07.2018 по договору № РТС291А170033 от 10.11.2017; расходы по  оплате государственной пошлины в размере 2 613,00 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Судья И.А. Ищенко