АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

05 сентября 2017 года

Дело №

А55-15954/2017

Резолютивная часть решения объявлена 29.08.2017,

в полном объеме решение изготовлено 05.09.2017

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Колодиной Т.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шишкиной Е.С., 

рассмотрев в судебном заседании 29.08.2017 дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Спецзащита"

к Обществу с ограниченной ответственностью "ВМА-Строй"

о взыскании 1 035 737 руб. 50 коп.

при участии в заседании

от истца – ФИО1, доверенность от 06.02.2017,

от ответчика – не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Спецзащита" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к  Обществу с ограниченной ответственностью "ВМА-Строй"  о взыскании 1 035 737 руб. 50 коп., в том числе:

- 950 000 руб. – долг по договору от 26.08.2016 № 08/16;

- 85 737 руб. 50 коп. – пени за период с 16.12.2016 по 20.03.2017.

Ответчик явку представителя не обеспечил, считается извещенным надлежащим образом в силу п. 2 ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отзыв на иск ответчик не представил, что в силу ч. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.  

До завершения рассмотре6ния дела по существу истец заявил об уменьшении размера исковых требований в части суммы неустойки до 45 125 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Поскольку уменьшение истцом размера исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, такое уменьшение в силу ч. 5 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует принять.

 Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов сторон, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, взаимоотношения сторон обусловлены договором от 26.08.2016 № 08/16 (далее по тексту – договор), по условиям которого истец обязался выполнить работы по устройству наружных сетей канализации в районе секций 13/1, 36-40, а ответчик, в свою очередь, принял на себя обязательство принять и оплатить выполненные работы. Объект выполнения работ указан в п. 1.2. договора.

Анализ условий договора позволяет квалифицировать его в качестве договора строительного подряда, к которому подлежат применению нормы §1, §3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

 Стоимость работ согласована сторонами в п. 2.1. договора и составила 1 850 000 руб. 

Согласно п. 2.6. договора оплата производится поэтапно: аванс в размере 500 000 руб. в течение двух рабочих дней с даты подписания договора, который затем подлежит зачету при оформлении актов приемки выполненных работ. 

Пунктом 2.6.2. договора установлено, что оплата работ производится за минусом суммы в размере 5 % от стоимости этапа выполненных работ, данная суммы будет выплачена в полном размере по истечении 60 рабочих дней с даты выполнения работ в полном объеме.

Пунктом 2.6.3. договора стороны предусмотрели, что оплата работ производится до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Истцом в подтверждение выполнения работ, предусмотренных договором, представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 26.09.2016 № 01 на сумму 816 348 руб. 85 коп. (период выполнения работ с 26.08.2016 по 26.09.2016), от 28.10.2013 № 02 на сумму 744 363 руб. 92 коп. (с указанием в акте на период выполне6ния работ в период с 27.09.2016 по 28.10.2016), от 30.11.2013 № 03 на сумму 289 287 руб. 23 коп. (период выполнения работ с 31.10.2016 по 30.11.2016) итого на 1 850 000 руб., а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на те же суммы.

Указанные документы подписаны ответчиком без замечаний и возражений. Однако оплата произведена ответчиком не в полном объеме, работы не оплачены на сумму 950 000 руб., что подтверждается актом сверки (при этом суд исходит из того, что подпись представителя ответчика в акте сверки заверена печатью организации, что свидетельствует о полномочности такого лица выступать от имени данной организации (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2009 № ВАС-14824/09).

Претензия истца от 10.03.2017 оставлена ответчиком без удовлетворения.

Согласно нормам ст. 309, ч. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Нормами действующего гражданского законодательства установлен принцип возмездного перехода ценностей в гражданском обороте между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, согласно которому приобретатель, получивший в свою собственность имущество (работы, услуги), обязан предоставить прежнему собственнику встречное исполнение в виде оплаты стоимости перешедшего к нему имущества (работ, услуг). Уклонение от предоставления встречного исполнения влечет обогащение одного лица за счет другого, что является недопустимым.  

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Частью 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В ходе рассмотрения дела ответчик факт ненадлежащего исполнения обязательств не опроверг, доказательства уплаты долга в материалы дела не представил, мотивированных возражений против предъявленных требований не заявил. В этой связи оценка требований истца была осуществлена судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания, поскольку непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. 

Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11 по делу № А56-1486/2010). 

На основании изложенного требования истца о взыскании долга в размере 950 000 руб. являются правомерными и подлежат удовлетворению. 

Согласно п. 8.11. договора за нарушение срока оплаты установлена ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5%.

В связи с просрочкой в оплате работ истец предъявил к взысканию неустойку в размере 45 125 руб., начислив ее на сумму долга в размере 902 500 руб. (с учетом п. 2.6.2. договора) за период с 16.12.2016 по 20.03.2017, учтя ограничение размера пени, установленное п. 8.11.

Начисление пени суд считает правомерным, поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком денежного обязательства по своевременной оплате выполненных истцом работ в то время как в силу норм ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации пеней признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Таким образом, иск следует удовлетворить в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине в сумме 22 903 руб., понесенные истцом при предъявлении иска, подлежат возмещению за счет ответчика.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу следует возвратить из федерального бюджета госпошлину в размере 454 руб., уплаченную по платежному поручению от 17.03.2017 № 100. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Принять уменьшение размера исковых требований в части суммы неустойки до 45 125 руб., ценой иска считать 995 125 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ВМА-Строй" Общества с ограниченной ответственностью "Спецзащита" 995 125 руб., в том числе долг в размере 950 000 руб. и неустойку в размере 45 125 руб., а также 22 903 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Спецзащита" справку на возврат из федерального бюджета госпошлины по иску в размере 454 руб., уплаченной по платежному поручению от 17.03.2017 № 100.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

Судья

/

Т.И. Колодина