209/2019-74875(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-9965/2018

07 ноября 2019 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению закрытого  акционерного общества «Центральная управляющая компания» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>)  

к Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта  кровли дома № 75 по улице Ташкентская города Иванова, и о взыскании судебных  расходов,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ЗАО «Центральная управляющая компания»  удовлетворить.  

Обязать НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Ивановской области» устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта кровли дома № 75 по улице Ташкентская города Иванова, а именно:  

1) Выполнить демонтаж гидроизоляционной пленки. 

2) Обеспечить нахлест профлистов в продольном соединении на одну волну в  соответствии с требованиями п. 7.19 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».  

3) Соединение листов кровельной стали в конструкции обшивки слуховых окон  выполнить с устройством фальцевых соединений в соответствие с требованиями п.7.9  МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».  

4) Соединения элементов фартуков в узлах примыканий выполнить одинарным  лежачим фальцем в соответствии с требованиями п. 6.4.24 СП 17.13330.2011 «Кровли».  

5) Выполнить примыкания кровли к вентиляционным и фановым трубам с  устройством патрубков и фартуков в соответствие с требованиями п.7.12 МДС 12- 33.2007 «Кровельные работы».  

6) Завести фартуки примыкания кровли к вентиляционным шахтам в штрабы  выше кровли на 15 см., а в штрабе герметизировать в соответствие с требованиями  п.4.6.1.13 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».  

7) Крепление стоек ограждений выполнить при помощи болтового соединения в  

2 А17-9965/2018 

соответствие с требованиями п. 7.13 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».  

8) Заменить крепление элементов кровли на кровельные саморезы с  уплотнительными шайбами.  

9) Обеспечить вентиляцию чердачного помещения путем устройства входных,  выходных отверстий в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные  патрубки и т.д.), суммарная площадь которых должна составлять не менее 1/300 площади  горизонтальной проекции кровли в соответствие с требованиями п. 4.4, 4.5 СП  17.13330.2011 «Кровли». Альтернативой дополнительного выведения воздуха может  служить устройство аэраторов, количество которых определяется исходя из площади  кровли.  

10) Обеспечить нормативные требования параметра температурно-влажностного  режима чердачного помещения равного 2-4 градусам в соответствии с п. 4.6.3.1. Правил и  норм технической эксплуатации жилищного фонда.  

11) Закрепить фановые трубы и обеспечить их герметичность. 

Взыскать с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» в пользу ЗАО «Центральная управляющая компания»  расходы по оплаты государственной пошлины в размере 6 000 руб. и расходы на  проведение судебной экспертизы в размере 42 300 руб.  

2. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд  (610007, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия в соответствии  со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276  Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса  «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Скобелева Е.Г.  

209/2019-74875(1) # 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 16:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна