АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-3697/2019

г. Уфа

03 июня 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 280 576руб.  

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)   о взыскании 863 500руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК- ПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) сумму долга по договору субподряда № 1 от  04.10.2018 г. в размере 256 000руб., неустойку за период с 20.11.2018 г. по  05.02.2019 г. в размере 5 120 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Встречные исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ- ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Обществу с  ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) сумму неустойки за нарушение сроков выполнения  работ в размере 616 500руб. за период с 07.11.2018г. по 31.03.2019г.,  неустойку за неисполнение субподрядчиком требования генподрядчика об  устранении дефектов/недостатков в выполненных работах и/или  конструкциях в размере 65 000руб. за период c 08.11.2018г. по 20.11.2018г.  сумму убытков в размере 128 000руб., сумму штрафа в размере 20 000руб.,  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 472 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет взысканных с Общества с ограниченной  ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" и Общества с ограниченной  ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" денежных сумм и в результате  зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  

"ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН 0277929650, ОГРН 1180280039983) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН  5610212823, ОГРН 1155658011002) задолженность в размере 587 852 руб.  04 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ- ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета госпошлину по первоначальному иску в сумме 597 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК- ПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета госпошлину по первоначальному иску в сумме 8 014 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов