АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Климова, 62, Курган, 640021, https://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-11004/2023

г. Курган

16 сентября 2024 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Самсонова В.Е. при ведении  протокола судебного заседания секретарём Томашевской Н.В., с использованием средств  аудио и видеозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального  казенного учреждения культуры «Частоозерский центр культурного развития» (ОГРН  1114512000558, ИНН 4521003262) к 1. обществу с ограниченной ответственностью  «РЕМиСТР» (ОГРН 1028600613546, ИНН 8602107193), 2. обществу с ограниченной  ответственностью «Арагацстрой» (ОГРН 1087207000781, ИНН 7207011121), об обязании  совершить действия,  

третьи лица: 1) государственное казенное учреждение «Управление капитального  строительства Курганской области» (ОГРН 1034500030421, ИНН 4501106213, адрес:  640002, Курганская область, город Курган, улица Коли Мяготина, дом 125), 2)  Акционерное общество «Территориальный проектный институт гражданского  строительства «Кургангражданпроект» (ОГРН 1134501004692, ИНН 4501186699, адрес:  640002, Курганская область, город Курган, улица Гоголя, стр. 25),  

при участии: данные в протоколе. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента  вступления решения суда в законную силу, в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту строительного подряда № 3/20 от 27.07.2020 на объекте  «Центр культурного развития» по адресу: 

<

...> произвести следующие работы:  

- выполнить ремонт кровельного покрытия и привести в соответствие с  требованиями п. 7.3.16 СП 70.13330.2012 при устранении результатов некачественной  постановки крепежа у кровли;  

- выполнить ремонт кровельного покрытия и привести в соответствие с  требованиями п. 7.3.4 СП 70.13330.2012 по герметизации нахлестов поперечных стыков  кровельных панелей в осях А-Г; 1-14 и в осях Д-И; 1-14;  

- выполнить указания таблицы 5.6 СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные  и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», устранив  деформации и просветы у коньковых элементов;  

- заменить плитки потолочные в количестве 50 штук поврежденных в результате  выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ в помещениях: вестибюля,  коридоров в районе санузлов мужского и женского и универсального; конференц-зала;  хореографии; кружковой; костюмерной; бильярда; библиотеки (зоны открытого доступа).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  культуры «Частоозерский центр культурного развития» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 22 500 руб. в возмещение расходов по оплате экспертизы.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда Курганской  области денежные средства в размере 80 200 руб.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Арагацстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 (тридцати) календарных дней после  выполнения работ ООО «РЕМиСТР», в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 77 от 29.07.2022 года на объекте «Центр культурного  развития» по адресу: 

<

...>  произвести следующие работы:  

- выполнить ремонт кровельного покрытия и привести в соответствие с проектной  документацией, по использованным при монтаже снегозадерживающих устройств и  ограждений, крепежным элементам;  

- выполнить ремонт кровельного покрытия в соответствии с проектным решением  по монтажу ограждений кровли и снегозадержателей на уплотнительные ленты;  

- выполнить ремонт кровельного покрытия и устранить повреждения у верхних  листов кровельных панелей, в местах вырванных креплений снегозадерживающих  устройств и ограждений;  

- устранить наличие щелей в местах примыкания кровли к вытяжной шахте  системы вентиляции, расположенной в осях А-Г и 7-14;  

- провести обработку герметизирующими составами мест примыканий  вертикальных поверхностей вытяжной шахты системы дымоудаления, расположенной над  конференц-залом;  

- заменить плитки потолочные в количестве 50 штук поврежденных в результате  выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ в помещениях: вестибюля,  коридоров в районе санузлов мужского и женского и универсального; конференц-зала;  хореографии; кружковой; костюмерной; бильярда; библиотеки (зоны открытого доступа).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арагацстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арагацстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  культуры «Частоозерский центр культурного развития» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 22 500 руб. в возмещение расходов по оплате экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления его в полном объёме).  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской области. 

Судья В.Е. Самсонов