РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-156447/23-110-1278

г. Москва

02 февраля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15 января 2024 года 

Решение в полном объеме изготовлено 02 февраля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "ДОМ И ТЕХНИКА" (199155, 

<

...> ЛИТЕР Е, ПОМЕЩЕНИЕ 23Н ОФИС 9, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА ГОРОД, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ VI КОМ 2, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 57 693 219,37 руб.,

третье лицо: открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>),

при участии:

от истца – ФИО3 по дов от 01.12.2022

от ответчика- ФИО4, ФИО5, ФИО6  по дов от 18.07.2023

от третьего лица – не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "ДОМ И ТЕХНИКА" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью  "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" о взыскании 57 693 219,37 руб. неустойки по договору субподряда №414-211022-1 от 04.10.2021.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ",  которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск о взыскании 7 593 485,81 руб. задолженности по договору от 22.10.2021 №414-211022-1.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 04 октября 2021 года между ООО «Дом и Техника» (далее - Истец или Генподрядчик) и ООО «МосЭнергоСтрой» (далее - Ответчик или Подрядчик) был заключен договор субподряда №414-211022-1 (далее - Договор) по текущему ремонту в рамках заключенного между Генподрядчиком и ОАО «РЖД» (далее - «Заказчик») договора на выполнение работ по текущему ремонту №414/ОКЭ-МОСК/21/1/1.

Согласно п. 1.1. Договора Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту объекта, именуемые в дальнейшем «Работы», в рамках, заключенных между Генподрядчиком и ОАО «РЖД» договоров на выполнение работ по текущему ремонту №414/ОКЭ-МОСК/21/1/1.

Пунктом 3.1 Договора установлено, что Подрядчик обязан выполнить все Работы по ремонту Объектов в объеме и в сроки, предусмотренные настоящими Договором, и сдать Объекты Генподрядчику готовыми к эксплуатации в установленные сроки в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объектов.

Приложением № 1 к Договору 1 установлен Сторонами согласован срок выполнения работ Подрядчиком - не позднее 28 февраля 2022 года.

Истец по первоначальному иску сослался на то,  что в ходе проверки Заказчиком были выявлены невыполненные работы на общую сумму 1 819 975 (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 37 (тридцать семь) копеек, по Договору, данный факт подтверждается подписанием корректировочных актов о приемке выполненных работ к актам о приемке работ по форме КС-2 (далее - корректировочный акт по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 между Заказчиком и Генподрядчиком.

Таким образом, 31.05.2022 г. между Заказчиком и Генподрядчиком составлены и подписаны корректировочный акт по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 к Договору 1. Данными документами была уменьшена сумма выполняемых работ на объекте здания дома отдыха локомотивных бригад ст. Ряжск, инв. №11339/2895 на 1 811 858 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 16 (шестнадцать) копеек без учета НДС, с учетом НДС -2 174 229 (два миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 79 (семьдесят девять) копеек, поскольку работы на данном объекте не были выполнены. Из этого следует, что Истец имеет право удержать 2 174 229 (два миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 79 (семьдесят девять) копеек от Ответчика, поскольку работы на данном объекте на данную сумму не были произведены.

По некоторым объектам по Договору 1 в результате корректировок Истец заплатил сумму выше изначально установленной. Отсюда следует, что Истец вправе уменьшить сумму требований по объекту здания дома отдыха локомотивных бригад ст. Ряжск. инв. №11339/2895 с 2 174 229 (двух миллионов ста семидесяти четырех тысяч двухсот двадцати девяти) рублей 79 (семидесяти девяти) копеек до 1 819 975 (одного миллиона восьмисот девятнадцати тысяч девятисот семидесяти пяти) рублей 37 (тридцати семи) копеек на основании п.1 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно п. 15.2. Договора за каждый случай нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере коэффициент 0,1 от стоимости просроченных выполнением работ за каждый день просрочки.

Пунктом 15.10. Договора сообщается, что перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Генподрядчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика, а также путем удержания суммы, штрафных санкций из обеспечительного платежа или платежа по банковской гарантии а соответствии с п. 19.2. настоящего Договора. Если Генподрядчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Генподрядчика.

Таким образом, пеня по Договору 1 составляет 1 819 975 р. 37 коп. * 317 дней * 0,1 = 57 693 219 р. 23 коп.

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 780 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.

Вместе с тем, ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» надлежащим образом выполнены работы по Договору субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на спи Ряжск (инвентарный номер; 11339/2895) на общую сумму в размере 1 956 806 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 64 копеек (с учетом НДС 20%) и приняты ООО «ДОМИ ТЕХНИКА» без замечаний.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с пунктом 3 статьи 720 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчику принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с пунктом 8.1 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г выполненные Подрядчиком Работы, с учетом поставленных строительных материалов, изделий, комплектующих и оборудования, принимаются Генподрядчиком ежемесячно. Оформление акта формы № КС-2 с перечнем материалов и комплектующих на основании журнала учета выполненных Работ формы № КС-ба и справки формы № КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Генподрядчику не позднее 26 (двадцать шестого) числа отчетного месяца по реестру.

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3.1.17 пункта 3.1 Договора субподряда № 414-211022-1 от 22 октября 2021 г. для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата акта приемки Работ по форме № КС-2.

В соответствии с пунктом 8.9 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.в случае отказа Генподрядчика подписать акт о приемке выполненных работ, он обязан представить Подрядчику мотивированный отказ в подписании в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ. При отсутствии возражений все работы считаются принятыми Генподрядчиком без проверки, что лишает Генподрядчика права ссылаться на недостатки работ, в том числе на те, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (ст. 720 ГКРФ).

«29» декабря 2021 г. между ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» и ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» были составлены следующие приемо-сдаточные документы (в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск):

а) Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-2) на общую сумму в размере 1 956 806 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 64 копеек (с учетом НДС 20%);

б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-3) на общую сумму в размере 1 956 806 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 64 копеек (с учетом НДС 20%).

Таким образом, работы (в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на cm, Ряжск), фактически выполненные ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» на общую сумму в размере 1 956 806 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 64 копеек (с учетом НДС 20%), приняты ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» в полном объеме и без замечаний.

Работы по Договору субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г, в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряже к (инвентарный номер: 11339/2895) выполнены в соответствии с Календарным графиком выполнения работ, что подтверждается приемо-сдаточными документами (по форме № КС-2, КС-3), подписанными между ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» и ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ».

Начисление неустойки (пени) в соответствии с пунктом 15.2 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. неправомерно.

В соответствии с пунктом 1.3 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору: с момента подписания Договора. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору устанавливается согласно графику производства Работ.

Срок выполнения Работ по объекту определяется в Календарном плане, являющемся Приложением Ml к настоящему Договору».

В соответствии с Календарным планом, работы в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск (инвентарный номер: 11339/2895) должны быть окончены в следующие сроки:

подготовительные работы: «11»- «20» января 2022 г.;

ремонт фасада и крыльца: «21» - «28» февраля 2022 г.;

ремонт канализации: «01» - «21» февраля 2022 г.;

ремонт ограждения: «31» декабря 2021 г. - «31» января 2022 г.

В соответствии с пунктом 15.2 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «За каждый случай нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере коэффициент 0,1 от стоимости просроченных выполнением работ за каждый день просрочки.

Для целей настоящего Договора под отчетным периодом понимается календарный месяц, в котором выполнялись работы».

Приемо-сдаточные документы в отношении объекта -Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск {Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-3) были подписаны между ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» и ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» - «21» декабря 2021 г., что свидетельствует о выполнении работ в соответствии с Календарным графиком.

Неустойка (пени), как один из способов обеспечения исполнения обязательства, представляет собой меру, влекущую наступление негативных последствий для лица, в отношении которого она применяется, является средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств, но при этом не является основанием для получения необоснованной коммерческой выгоды. Применение такой меры носит компенсационно-превентивный, а не карательный характер.

Вместе с тем, в рамках правоотношений, сложившихся между ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» и ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ», в результате заключения Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г., начисление неустойки {пени) неправомерно, поскольку работы в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск {инвентарный номер: 11339/2895) выполнены ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с Календарным графиком выполнения работ и приняты ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» без замечаний.

Таким образом, начисление неустойки {пени) в соответствии с пунктом 15.2 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. неправомерно, поскольку отсутствует факт нарушения сроков выполнения работ в отношении объекта -Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск {инвентарный номер: 11339/2895).

В соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Генподрядчик обязан: до начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию Работ».

В соответствии с подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Генподрядчик обязан: осуществлять технический надзор за выполнением Работу).

В соответствии с подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Генподрядчик вправе: проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность».

В соответствии с подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Генподрядчик вправе: запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору».

В соответствии с подпунктом 3.5.4 пункта 3.5 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Заказчик вправе осуществлять проверки надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора. По результатам проверки составляется акт, который подписывается не менее чем 3 представителями Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика».

В соответствии с пунктом 11.1 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Генподрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов».

Следовательно, Договором субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. закреплено право Генподрядчика (ООО «ДОМ И ТЕХНИКА») на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, а также за соблюдением сроков их выполнения.

Вместе с тем, с даты подписания Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. и до даты сдачи работ, выполненных в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск (инвентарный номер: 11339/2895) («29» декабря 2021 г.), от ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» в адрес ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» не поступило ни одной претензии (жалобы) на работы, выполняемыми работниками ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» (ни по качеству/ни в части сроков выполнения работ).

«23» августа 2021 г. между ОАО «РЖД» (Заказчик) и ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» (Подрядчик) заключен Договор подряда № 414/ОКЭ-МОСК/21/1/1 (далее по тексту -Договор подряда № 414/ОКЭ-МОСК/21/1/1 от «23» августа 2021 г.), в соответствии с которым ОАО «РЖД» поручает, а ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту объектов.

«29» декабря 2021 г. между ОАО «РЖД» и ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» были составлены следующие приемо-сдаточные документы (в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск):

а) Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС~2) на общую сумму в размере 1 811 858 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек;

б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-3) на общую сумму в размере 2 174 229 (два миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 79 копеек (с учетом НДС 20%).

Таким образом, работы, выполненные в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск (инвентарный номер: 11339/2895) приняты ОАО «РЖД» без замечаний.

Далее, «31» мая 2022 г. между ОАО «РЖД» и ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» были составлены следующие документы (в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряэюск):

а)Корректировочный Акт о приемке выполненных работ № 2/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-2) к Акту о приемке выполненных работ № 1/7 от «29» декабря 2021 г. на общую сумму в размере 1 811 858 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек;

б)Корректировочная Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/7 (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-3) на общую сумму в размере 2 174 229 (два миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 79 копеек (с учетом НДС 20%).

Указанные документы подписаны между ОАО «РЖД» и ООО «ДОМ И ТЕХНИКА», подпись уполномоченного представителя ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» — отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ: «Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику».

В соответствии с пунктом 2 статьи 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении».

В соответствии с пунктом 3 статьи 720 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

В соответствии с пунктом 4 статьи 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

В соответствии с пунктом 3 статьи 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»: «По общему правилу, предусмотренному пунктом 3 статьи 308 ГК РФ, обязательство не создает прав и обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Соответственно, стороны обязательства не могут выдвигать в отношении третьих лиц возражения, основанные на обязательстве между собой, равно как и третьи лица не могут выдвигать возражения, вытекающие из обязательства, в котором они не участвуют.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Корректировочный Акт о приемке выполненных работ № 2/7 от «31» мая 2022 г. (за отчетный период: «01» декабря 2021 г. - «29» декабря 2021 г.) (по форме № КС-2) к Акту о приемке выполненных работ № 1/7 от

ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» не является стороной Договора подряда № 414/ОКЭ-МОСК/21/1/1 от «23» августа 2021 г., заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «ДОМ И ТЕХНИКА».

Более того, ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» в материалы настоящего дела не представлены доказательства, подтверждающие наличие скрытых недостатков в работе, выполненной ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» в отношении объекта - Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск (инвентарный номер: 11339/2895), по Договору субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г., заключенному непосредственно между ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» и ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ».

Между тем, исковые требования Истца фактически состоят из неустойки, который Истец рассчитывает как 1 819 975,37 руб. (сумма невыполненных работ) * 317 дней просрочки *0,1 (согласно п. 15.2 Договора).

Пункт 15.2 Договора звучит следующим образом:

«15.2. За каждый случай нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости работ в отчетном периоде по Объекту, в отношении которого допущено нарушение сроков.

Для целей настоящего Договора под отчетным периодом понимается календарный месяц, в котором выполнялись работы».

Таким образом, сумма неустойки по п. 15.2 может быть рассчитана следующим образом:

1 819 975,37 руб. *10%= 181 997,53 руб.

Размер начисленной неустойки сделан без учета действия моратория на применение финансовых санкций, и является чрезмерным и завышенным.

Пунктом 1 ст. 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. Согласно подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021. с изм. от 03.02.2022) "О несостоятельности (банкротстве)", на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов). Срок действия моратория с 01.04.2022 г. до 01.10.2022 г.

Согласно п.3 ст.9.1 Закона РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым -десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

В силу абз.10 п.1 ст.63 Закона о банкротстве не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Согласно п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12..2020 г. N 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с п.1 ст.9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства РФ о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Исходя из этого в период с 01.04.2022 г. до 01.10.2022 г. за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств не может начисляться неустойка, в том числе по обязательствам, возникшим до введения моратория.

Истцом никаких доказательств в приведении размера действительного ущерба, причиненного действиями Ответчика, не предоставлено.

Между тем, в рамках договора №414/ОКЭ-МОСК/21/1/1 от 23 августа 2021 г., заключенного между ООО «Дом и Техника» и ОАО «РЖД» принятые на себя обязательства Заказчиком исполнены в полном объеме.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск не подлежит удовлетворению.

При этом встречный иск подлежит удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, «22» октября 2021 г. между ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» (Генподрядчик) и ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» (Подрядчик) заключен Договор субподряда № 414-211022-1 (далее по тексту - Договор субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.), в соответствии с которым ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» поручает, а ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту объекта в рамках заключенного между ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» и ОАО «РЖД» Договора на выполнение работ по текущему ремонту № 414/ОКЭ- МОСК/21/1/1.

Перечень Объектов текущего ремонта определен в Приложении № 5 к Договору субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. и включает в себя следующие объекты:

№ п/п

Наименование объекта

Инвентарный номер

1.

Здание кладовой, г. Ряжск

11070/2895

2.

Здание мастерской дистанции пути, г. Ряжск

11075/2895

3.

Здание цеха кузнечно-прессового, г. Ряжск

11085/2895

4.

Здание Поста дежурного восстановительного поезда, г. Ряжск

110000005831/2895

5.

Здание поста стрелочников №3, г. Ряжск

11340/2895

6.

Гараж с мастерской, г. Ряжск

110000005838/2895

7.

Здание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Ряжск

11339/2895

8.

Техническая контора ДС Ряжск, Ряжский район

10420/2895

9.

Здание поста МРЦ ст. Ряжск 1, Ряжский район

10422/2895

10.

Здание служебно-бытовое, Ряжский район

11094/2895

11.

Стрелочная будка 1 ст. Ряжск 1, Ряжский р-он

10423/2895

12.

Забор сплошной, ст. Ряжск, Ряжский район

724003/2895

13.

Мощение и асфальтное покрытие у здания КИПА, ст. Ряжск, г. Ряжск

24020/2895

14.

Здание служебно-техническое (переезд) 314 км. г. Ряжск, Ряжский район

110000000110/2680/2895

В соответствии с пунктом 1.2 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.:

«В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет комплекс Работ, вкчючая производимые в ходе текущего ремонта основных средств ремонтно- монтажные работы, комплектацию материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в полном объеме».

Согласно пункту 8.1 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Выполненные Подрядчиком Работы, с учетом поставленных строительных материалов, изделий, комплектующих и оборудования, принимаются Генподрядчиком ежемесячно. Оформление акта формы № КС-2 с перечнем материалов и комплектующих на основании журнала учета выполненных Работ формы № КС-ба и справки формы № КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Генподрядчику не позднее 26 (двадцать шестого) числа отчетного месяца по реестру».

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3.1.17 пункта 3.1 Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата акта приемки Работ по форме № КС-2».

В соответствии с ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно абз. 1 пункта 9.1. Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.:

«Генподрядчик ежемесячно осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Договору Работ в размере 95% (девяносто пять процентов) от стоимости выполненных Работ в отчетном месяце, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком акта формы № КС-2 и справки формы 7V? КС-3 и оплаты Заказчиком - ОАО «РЖД» соответствующего объема работ»

В силу пункта 9.2. Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г.: «Выплата удержаний, указанных в пункте 9.1. настоящего Договора в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком Работ по соответствующему Объекту. Генподрядчик производит после осуществления приемки Объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком полного комплекта документов (счет, счет-фактура, акт формы № ОС-3, подписанный Генподрядчиком и Подрядчиком, включая устранение дефектов, выявленных при приемке объекта) и возвращения заказчиком - ОАО «РЖД» гарантийных удержаний за соответствующий объем работ».

По Договору субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» были выполнены и приняты ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» работы общей стоимостью 17 343 628,32 (семнадцать миллионов триста сорок три тысячи шестьсот двадцать восемь рублей 32 копейки, при этом предусмотренные п. 9.1. Договора субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. Гарантийные удержания ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» не осуществлялись, что подтверждается подписанными сторонами приема-передаточными документами:

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/1 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/1 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/2 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/2 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/2 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/3 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/3 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/3 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 3/3 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3/3 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/4 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/4 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/4 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/5 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/5 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/5 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 3/5 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3/5 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/6 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/6 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/7 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/7 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/8 от 30.11.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/8 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/8 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/8 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/9 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/9 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/10 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/10 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/10 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 3/10 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3/10 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/11 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/11 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/11 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 3/11 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3/11 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/12 от 30.11.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 1/13 от 29.12.2021 г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/13 от 29.12.2021 г.; Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/13 от 29.12.2021 г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/13 от 29.12.2021 г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1/14 от 30.11.2021 г.; Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 2/14 от 29.12.2021 г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/14 от 29.12.2021 г.;

Акт о приемке выполненных работ по локальной смете № 3/14 от 29.12.2021 г.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3/14 от 29.12.2021 г.

Между тем, оплату выполненных по Договору субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» произвел не в полном объеме, в связи с чем, задолженность по оплате выполненных работ составляет 7 593 485,81 (Семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 81 копейка.

Учитывая то обстоятельства, что работы по Договору субподряда № 414-211022-1 от «22» октября 2021 г. были выполнены надлежащим образом и в соответствии с Календарным графиком и приняты ООО «ДОМ И ТЕХНИКА», а также то обстоятельство, что указанные работы были приняты Заказчиком - ОАО «РЖД», уклонение ООО «ДОМ И ТЕХНИКА» от исполнения обязательств по оплате выполненных работ и Гарантийных удержаний в размере 5 % от стоимости выполненных работ является неправомерным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью  "ДОМ И ТЕХНИКА" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу  обществу с ограниченной ответственностью  "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>) 7 593 485 руб. 81 коп. задолженности, 60 967 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко