4280/2019-373074(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30874/2019

27 июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Т.А. Косенко при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью «Юган СПб» (адрес: Россия 195009  Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 19, лит. А, ОГРН: 

<

***>)  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «МетроАлюм» (адрес: Россия  190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, корп. 12, лит. Ч, ОГРН:  

<

***>)  

о взыскании при участии от истца: не явился, извещен от ответчика: не явился, извещен 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН СПБ» (далее –  ООО «ЮГАН СПБ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «МЕТРОАЛЮМ» (далее – ООО «МЕТРОАЛЮМ») о взыскании 367 400 руб.  задолженности по договору от 07.03.2018 № 5.  

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного  разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу  части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.  

На основании части 4 статьи 137 АПК РФ суд завершил предварительное  судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.  

Отзыв с возражениями по заявленным требованиям ответчик не представил. 

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства суд  приходит к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, ООО «МЕТРОАЛЮМ» (Субподрядчик) и  ООО «ЮГАН СПБ» (Субсубподрядчик) заключили договор подряда от 07.03.2018 № 5,  по условиям которого Субсубподрядчик обязуется в установленный договором срок по  заданию Субподрядчика и на основании проектной документации выполнить  собственными силами работы по огнезащитной обработке и окраске металлических  конструкций перегородок на объекте «Станционный комплекс «Улица Савушкина» для  обеспечения огнестойкости 45 мин. Перечень и объем выполняемых работ представлен  в калькуляции (приложение № 1 к договору).  

Согласно пункту 1.2 договора работы по договору выполняются  Субсубподрядчиком во исполнение обязательств Субподрядчика по договору от  15.05.2017 № 14/04-17 обязательств ООО «Строительно-Монтажное Управление № 13  Метрострой» (Подрядчик) по договору подряда от 20.10.2015 № 24-37-013 и  обязательств ОАО по строительству метрополитенов в городе Санкт-Петербурге  «Метрострой» (Генподрядчик) по Государственному контракту от 23.09.2015 № КСМ- 12/2015, заключенного с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры  Санкт-Петербурга (Заказчик).  

Работы выполняются Субсубподрядчиком на основании лицензии МЧС России  от 26.02.2013 № 2-Б/01125 в соответствии с пунктом 1.2.1 договора.  

Сроки выполнения работ установлены разделом 2 договора, согласно которому  Субсубподрядчик приступает к работам в течение 3 рабочих дней с момента  поступления аванса на его расчетный счет при условии готовности конструкций для  производства окрасочных работ. Работы выполняются в течение 14 рабочих дней с  момента начала.  

Как следует из пункта 3.1 договора, общая стоимость работ составляет  767 400 руб. в соответствии с калькуляцией, находящейся в приложении № 1 к  договору.  

Пунктом 3.3 договора установлено, что основанием для оплаты выполненных  Субсубподрядчиком работ являются подписанные акты о приемке выполненных работ  формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3,  справки о стоимости работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ, а  также счета и счета-фактуры, выставляемые Субсубподрядчиком.  

В соответствии с разделом 4 договора Субсубподрядчик обязуется выполнить  работы, представить необходимую исполнительную документацию, предоставить  гарантию на срок 5 лет при соблюдении условий эксплуатации огнезащитного  покрытия, а Субподрядчик обязуется предоставить Субсубподрядчику фронт работ в  сроки, согласованные сторонами, доступ к месту проведения работ в течение всего  срока, а также оплату выполняемых Субсубподрячиком работ в соответствии с  условиями договора.  

Субсубподрядчик представил в материалы дела в обоснование требований акты о  приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных  работ и затрат формы № КС-3 от 14.05.2018 № 1 на сумму 767 400 руб., от 14.05.2018   № 1 на сумму 70 280 руб., подписанные сторонами и заверенные печатями без  замечаний и возражений.  

ООО «МЕТРОАЛЮМ» частично оплатило работы платежными поручениями от  03.05.2018 № 745, от 12.03.2018 № 206.  

Субсубподрядчик направлял в адрес Субподрядчика претензию от 07.03.2018   № 5 с требованием оплатить задолженность.  

Отказ ООО «МЕТРОАЛЮМ» удовлетворить названное требование послужил  основанием для обращения ООО «ЮГАН СПБ» в арбитражный суд с настоящим иском.  

Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ) предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной  работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную  цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа  выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика  досрочно (статья 711 ГК РФ).  

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в  сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика  

осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в  работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При  отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт  подписывается другой стороной.  

В соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные сторонами в материалы  дела доказательства оцениваются арбитражным судом полно, всесторонне и  объективно, в их совокупности и взаимной связи.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания  акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.  

Выполнение работ по спорному договору подтверждено двусторонними актами  формы КС-2 и справками формы КС-3 от 14.05.2018 № 1 на сумму 767 400 руб. и от  14.05.2018 № 1 на сумму 70 280 руб.  

ООО «МЕТРОАЛЮМ» оплатило работы на общую сумму 470 280 руб. 

Доказательств оплаты работ в полном объеме ООО «МЕТРОАЛЮМ» не  представило, в связи с чем требования ООО «ЮГАН СПБ» о взыскании 367 400 руб.  задолженности подлежат удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЕТРОАЛЮМ» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮГАН СПБ» 367 400 руб.  задолженности и 10 348 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Косенко Т.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.06.2019 13:59:59

 Кому выдана Косенко Татьяна Александровна