Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

 

25 марта 2019 года                                                              Дело № А56-5907/2019

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Яценко О.В.,

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (адрес: 191023 город Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 11, ОГРН:  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Петроспецмонтаж" (адрес: 199026, 

<

...>, литер А, помещение 30-Н, ОГРН:  

<

***>)

 

о взыскании 247 261 руб. неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 23.06.2016 № 6/КР/8/2016 за период с 29.08.2016 по 14.11.2016

 

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Петроспецмонтаж" в пользу некоммерческой организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" 247 261 руб. неустойки и 7 945 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" из федерального бюджета 64 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.12.2018 № 29792.

 

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Яценко О.В.