Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-3333/2022

г. Рязань

05 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 28 ноября 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2023 года.

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Колбасовой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Основа" (ОГРН 

<

***>; 390023, 

<

...>, лит.А, пом/офис Н4/802)

к администрации муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области (ОГРН 

<

***>; 391550, 

<

...>),

к ФИО2 (391550, Рязанская область, Шацкий район).

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (390046, 

<

...>, стр3, ОГРН: 

<

***>), ООО "СтройИнжиниринг" (125362, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Большая набережная, д.25/1, этаж 1, пом.I, ком.22 офис Х-08; ОГРН: 

<

***>), ООО "Строй-Инжиниринг" (344019, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>).

об обязании согласовать (подписать) акт приемки выполненных работ № 1 от 11.06.2021.

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 09.08.2022,  ФИО4, представитель по доверенности от 22.08.2022;

от ответчиков: не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

от третьего лица (Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области): ФИО5, представитель по доверенности от 15.05.2023, личность установлена на основании предъявленного паспорта, квалификация подтверждена дипломом,

от иных третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Основа" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к администрации муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области об обязании согласовать (подписать) акт приемки выполненных работ № 1 от 11.06.2021.

Определением суда от 27.05.2022 исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Основа" принято, возбуждено производство по делу, в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Определением суда от 06.12.2022 в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "СтройИнжиниринг" (ОГРН: 

<

***>).

Определением суда от 10.01.2023 в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО2.

Определением суда от 27.04.2023 в соответствии со статьей 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФИО2 привлечена к участию в деле в качестве соответчика.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие ответчиков и третьих лиц (ООО "СтройИнжиниринг", ОГРН: 

<

***>, ООО "Строй-Инжиниринг", ОГРН: 

<

***>), извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке, предусмотренном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, арбитражный суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, 24 августа 2020 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Основа" (Подрядчик) в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона на право заключить договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Рязанской области №РТС262А200087от 13 августа 2020 г.),  заключен договор №РТС262А200087(Д) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее- "Объект(ы)") по адресам и видам работ, указанным в Приложении № 1.

Согласно пункту 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения общая стоимость услуг и (или) работ по настоящему Договору определяется сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2) и составляет 2845097 руб. 30 коп. без учета НДС.

Стоимость по каждому виду услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме указана в Приложениях № 1 и № 2.

Цена Договора включает в себя стоимость материалов, конструкций, оборудования, все расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика при оке и (или) выполнении работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов    и    других    обязательных    платежей,    предусмотренных   действующим законодательством.

Дата начала выполнения работ: день, следующий за датой заключения Договора. Дата окончания выполнения работ: не позднее 01 декабря 2021 г. (пункт 3.1 Договора).

В силу пункта 2.2. договора оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ по настоящему Договору осуществляется в течение 730 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика Акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма КС-2) подписанного со своей стороны и согласованного с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ и акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - рабочей (приемочной), комиссии, по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме в соответствии с п.5 ч.2 ст. 182 ЖК РФ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

Оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ производится на основании акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма КС-2) согласованного надлежащим образом, справки о стоимости оказанных услуг и (или) выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме.

Согласно пунктам 6.2.2., 6.2.3 договора по завершении работ, предусмотренных Техническим заданием, проектной (при ее наличии), сметной документацией и Договором Подрядчик нарочно, с сопроводительным письмом, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предусмотренного Договором срока окончания оказания услуг и (или) выполнения работ, предоставляет на проверку Заказчику Акты о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) по каждому виду услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме, подписанные со своей стороны в 5 (пяти) экземплярах, с отметкой организации осуществляющей строительный контроль.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней проверяет соответствие объемов работ, указанных в Актах о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) фактически выполненным объемам, требованиям Технического задания, проектной (при ее наличии), сметной документации, а также правильность применения сметных нормативов при определении стоимости выполненных работ.

В случае отсутствия замечаний, лицо уполномоченное Заказчиком ставит отметку о проверке и возвращает Подрядчику 4 (четыре) экземпляра для согласования Актов о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) с органами местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений.

При наличии несоответствий Подрядчику направляется уведомление с указанием замечаний и сроков их устранения.

После устранения замечаний в сроки, указанные в уведомлении Заказчика, Подрядчик нарочно, с сопроводительным письмом, повторно предоставляет Заказчику Акты о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) по каждому виду услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме, подписанные со своей стороны в 5 (пяти) экземплярах, с отметкой организации осуществляющей строительный контроль.

Устранение замечаний, выявленных Заказчиком в документации и на Объекте при проверке Акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2)не является основанием для продления срока оказания услуг и (или) выполнения работ указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) по каждому виду услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме, подписанные со своей стороны в 4 (четырех) экземплярах, с отметкой организации осуществляющей строительный контроль, согласованные надлежащим образом с лицами, указанными в п.2.2.

Дата составления Акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) должна соответствовать дате, указанной в графе "Окончание отчетного периода".

Подрядчик предоставляет Справку о стоимости оказанных услуг и (или) выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Общий журнал работ (форма № КС-6), Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме подписанные со своей стороны.

Во исполнение условий договора общество с ограниченной ответственностью "Основа" выполнило работы на общую сумму 2 845 097 рублей 30 копеек и уведомило Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области об окончании работ письмом от 06.11.2020 № 73.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.06.2021 на сумму 2 845 097 руб. 30коп. подписан без замечаний заказчиком (Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области), а также представителем строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг".

Письмом исх. № 125 от 22.12.2020 истец уведомил администрацию муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области о завершении работ, приложив акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.06.2021.

Письмом от 22.07.2021 №  252 истцом в адрес администрации муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области повторно направлялся акт о приемке выполненных работ.

Письмом от 29.07.2021№61/1-2034 администрация муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области отказала в подписании акта приемки выполненных работ, ссылаясь на наличие претензий собственников помещений к качеству выполнения работ по капитальному ремонту.

09.12.2021 истец направил в адрес ответчика (администрации муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области) претензию с требованием подписать акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.06.2021, которая  оставлена администрацией муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходит из следующего.

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Сложившиеся правоотношения сторон регламентируются нормами параграфа 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и общими нормами об исполнении обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании положений статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Акт приемки работ является основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ (пункт 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

При этом, согласно пункту 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Обоснованными мотивами для отказа от подписания акта могут быть: отрицательные результаты испытаний при приемке; нарушение процедуры приемки работ, предусмотренной договором или установленной нормативно-правовыми актами для отдельных объектов строительства; обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком и др.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.06.2021 на сумму 2 845 097 руб. 30 коп. подписан без замечаний заказчиком (Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области), а также представителем строительного контроля (ООО "Строй-Инжиниринг").

В силу пункта 1 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор обеспечивает финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Согласно пункту 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ (за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи). Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, ООО "Основа" письмами от 22.12.2020 № 125, от 22.07.2021 № 252 направило в адрес администрации муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.06.2021.

Письмом от 29.07.2021 №61/1-2034 администрация муниципального образования - Шацкое городское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области отказала в подписании акта приемки выполненных работ, ссылаясь на наличие претензий собственников помещений к качеству выполнения работ по капитальному ремонту, не указывая при этом конкретных замечаний.

29 октября 2019 года согласно Протоколу № 1 "Внеочередного общего собрания собственников помещений (МКД) о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

...> е" принято решение о назначении уполномоченного представителя от имени всех собственников вышеуказанного многоквартирного дома ФИО2.

18.04.2023 года проводилось комиссионное обследование многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, составлен рекламационный акт.

Актом устранения замечаний от 24.04.2023 года дефекты, описанные в рекламационном акте от 18.04.2023, устранены. Представитель собственников ФИО2. акт устранения замечаний от 24.04.2023 не подписала.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В связи с отсутствием мотивированных замечаний с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения от ответчиков, работы, указанные в акте о приемке выполненных работ № 1 от 01.06.2021, считаются принятыми.

Немотивированные доводы о выполнении работ с недостатками, не дают оснований уклоняться от приемки и оплаты выполненных работ.

Между тем, несмотря на установленный договором от 24.08.2020 №РТС262А200087(Д) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и действующим законодательством порядок сдачи-приемки выполненных работ, ответчики акт выполненных работ не согласовали, при этом конкретных возражений по количеству и качеству передаваемых работ не заявили, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что обязанность ООО "Основа" по сдаче работ признается исполненной надлежащим образом, в связи с чем выполненные работы подлежат оплате.

При изложенных обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения  исковых требований об обязании согласовать (подписать) акт приемки выполненных работ № 1 от 11.06.2021.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

 

Судья                                                                                                           Е.В. Колбасова