АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-4531/2019

03 октября 2019 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л. Ф.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства строительства и  модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 316032700061542, ИНН 

<

***>) об обязании  безвозмездно устранить выявленные недостатки в жилых помещениях в месячный срок со  дня вынесения решения суда,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить полностью. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 316032700061542, ИНН 

<

***>) устранить недостатки в жилых  помещениях по адресам : с.Кабанск,  

1. ул. Зеленая 1А, кв.1 

1.1.Обеспечить нормативное значение сопротивления теплопередачи  ограждающих конструкций (наружные стены) согласно СП 50.13330.2012, путем  проведения работ по утеплению стен фасада и углов, с предоставлением заключения  тепловизионного обследования жилого помещения, после проведения указанных  работ.  

1.2.Обеспечить нормативное значение сопротивления теплопередачи  

ограждающих конструкций (чердачное перекрытие; согласно СП 50.13330.2012,  

путем проведения следующих работ: -герметизации швов пароизоляииоииой пленки чердачного перекрытия; 

-монтажа теплоизоляционного материала согласно технологии монтажа, указанной  

производителем материала; -монтажа ветро-влагозащитной пленки. 2. ул.Зеленая 1А , кв.3 

2.1.Провести обследование технического состояния и степени износа фундаментов и  

устранить причины появления выявленных трещин на поверхности стен. 

2.2.Обеспечить нормативное значение сопротивления теплопередачи ограждающих  

конструкций (наружные стены) согласно СП 50.13330.2012, путем проведения следующих  

работ: -монтажа теплоизоляционного материала на углах фасада; 

-проведения тспловизиопного обследования наружных стен после проведенных работ.  

2.3. Провести монтаж вентиляционных каналов в санитарном узле, в кухне-  

нише для обеспечения естественной вентиляции в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.1.2.2645-10; 

2.4. Обеспечить нормативное значение сопротивления 'теплопередачи  

ограждающих конструкций (чердачное перекрытие) согласно СП 50.13330.2012,  

путем проведения следующих работ: - герметизации швов пароизоляционной пленки чердачного перекрытия; 

- монтажа теплоизоляционного материала согласно 'технологии монтажа, указанной  

производителем материала; - монтажа ветро-влагозащитпой пленки. 3. ул.Зеленая 1А, кв.4 

3.1. Заменить ослабленные подвесные крепежные детали конструкции  

потолка системы «Армстронг». 

3.2. Обеспечить нормативное значение сопротивления теплопередачи  

ограждающих конструкций (наружные стены) согласно СП 50.13330.2012, путем  

проведения следующих работ: - монтажа теплоизоляционного материала па углах, фасада: 

 - проведения тспловизиопного обследования наружных стен после проведенных  работ.  

3.3. Обеспечить нормативное значение сопротивления теплопередачи  

ограждающих конструкций (чердачное перекрытие) согласно СП 50.13330.2012,  

путем проведения следующих работ: 

 - герметизации швов пароизоляционной пленки чердачного перекрытия;  

- монтажа теплоизоляционною материала согласно технологии монтажа, указанной  

производителем материала; - монтажа ветро-влагозащитной пленки; 

3.4. Провести монтаж вентиляционных каналов в санитарном узле, в кухне-  

нише для обеспечения естественной вентиляции в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.1.2.2645-10 4. ул.Рассветная За, кв.4 

4.1. Установить подвесные крепежные детали на обрушившимся участке  

подвесного потолка, с дальнейшей установкой элементов потолочной конструкции; 

4.2. Провести обследование технического состояния и степени износа  

фундаментов и устранить причины появления выявленных трещин на поверхности  

стен. 

4.3. Произвести дополнительное утепление пораженного участка с наружной  

стороны стены, с целью перенесения точки росы в 'толщу конструкции стены; 

4.4. Провести косметический ремонт пораженного участка. 4.5, Обеспечить нормативное значение сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций (наружные степы) согласно СП 50.13330.2012, путем проведения следующих работ: 

- монтажа теплоизоляционного материала на углах фасада;  - проведения тепловизионного обследования наружных стен после проведенных работ;  

5. ул.Расветиая 10, кв.4 

5.1. Провести обследование технического состояния и степени износа фундаментов и  

устранить причини появления выявленных трещин на поверхности стен. 

5.2. Обеспечить нормативное значение сопротивления теплопередачи Офаждающих  

конструкций (наружные стены) согласно СП 50.13330.2012. путем проведения следующих  

работ: 

- монтажа теплоизоляционного материала на углах фасада:  - проведения тешювизионного обследования наружных стен после проведенных работ.  

Установить срок устранения недостатков один месяц со дня вступления решения суда в законную силу. 

В случае, если ответчик - индивидуальный предприниматель Коновалов Михаил  Валентинович (ОГРНИП 316032700061542, ИНН 030901007258) не исполнит решение суда в  установленный месячный срок со дня вступления решения в законную силу, истец -  Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия (ОГРН 1020300971415, ИНН 0326004709)вправе осуществить  соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 316032700061542, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб  00 коп - государственную пошлину.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Республики Бурятия.  

Судья Л.Ф. Салимзянова