Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, 

<

...>, тел. 

<

***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-24848/2024

02 июля 2025 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения оглашена 18 июня 2025 г.

Решение в полном объеме изготовлено 02 июля 2025 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания Корневой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городского хозяйства» (628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «РемАвтоДорНягань» (628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 1 100 000 рублей 00 копеек,

при участии представителей сторон:

от истца (веб-конф.) –  ФИО1 по доверенности № 3 от 09.01.2025,

от ответчика –  не явились,

установил:

в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило заявление муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городского хозяйства» (далее – истец) к обществу с ограниченной ответственностью «РемАвтоДорНягань» (далее – ответчик) о взыскании 1 100 000 руб. 00 коп. убытков.

Протокольным определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.04.2024 разбирательство по делу № А75-24848/2024 отложено на 18 июня 2025 г. на 14 час. 30 мин.

Представитель истца принял участие в судебном заседании посредством веб-конференции с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел", на заявленных требованиях настаивал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечил, ранее представил отзыв на иск, в котором требование истца не признал, указал, что претензий относительно качества выполненных работ истец не предъявлял, требований о возмещении ущерба не направлял.

Судебное заседание проводится в отсутствие представителей ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, в рамках заключенного контракта от 30.03.2022 № 0187300008122000042, исполнитель (ответчик) обязался оказать собственными или привлеченными силами услуги по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры в микрорайонах Центральный, Южный, Приурал, промзоне города Нягани на 9 месяцев 2022 года, на 2023 и 2024 годы, (далее -услуги), в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта (далее -контракта), технического задания (Приложение № 1 ), ежедневными планами оказания уедут (далее- план), обеспечить круглогодичное, безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, а муниципальный заказчик (истец) обязался принять результат и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Перечень услуг, виды услуг, объем услуг, определены в Техническом задании (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Виды услуг и объем услуг, которые Исполнитель обязан оказать определяются ежедневным плане оказания услуг (приложение №3). План оказания услуг направляется Исполнителем ежедневно до 16-00 часов дня, предшествующего дню выполнения работ (пункт 1.3. контракта).

Согласно п. 1.4. контракта во внештатных ситуациях, в том числе осадки, образование зимней скользкости, образование наледи, в том числе в результате порыва на сетях, препятствующих проезду транспортных средств, в целях обеспечения безопасности движения, Исполнитель обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечить оказание услуг по расчистке проезжей части дороги и другие необходимые мероприятия, в соответствии в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего муниципального контракта.

Срок оказания услуг: с 01.04.2022 по 31.12.2024 года (по заявке муниципального заказчика) (пункт 4.1. контракта).

Подпунктом 7.2.1. пункта 7.2 контракта подрядчик обязался выполнить указанные в п.1.1. Контракта услуги качественно и в установленный срок, в полном соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта, ежедневными планами оказания услуг, согласованными с муниципальным заказчиком, нормами и требованиями ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", постановлением Администрации города Нягани от 14.12.2016 № 3648 «Об утверждении Технического регламента по содержанию, обеспечению сохранности и текущему ремонту автомобильных дорог местного значения», в соответствии с табл. 6.5 Отраслевого Дорожного Методического документа «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятого и введенного в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис и иными стандартами к данным видам работ, либо иного муниципального правового акта, регламентирующего содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими данные виды услуг.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 07.02.2024 предусмотрено механизированная патрульная снегоочистка дороги от рыхлого снега, в том числе по ул. Лазарева, пр. Нефтяников г. Нягани.

Подрядной организацией по завершению механизированной патрульной снегоочистки дороги от рыхлого снега по пр. Нефтяников не были вывезены снежные валы в связи с чем Муниципальный заказчик был привлечен к административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ.

15 февраля 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046730 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 07.02.2024 с 09 часов 30 минут до 09 часов 50 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТ и ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно:

- на ул. Лазарева от пересечения с ул.Сибирская до пересечения с ул.Лазарева (район ж/д переезда) г.Нягани на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (снежный накат) толщиной 1 см., 1,2 см., 1 см.

- на пр. Нефтяников от пересечения с ул. Ташкентская до пересечения с ул. Сибирская (пешеходных переходов ул. Сибирская -пр. Нефтяников) сформирован снежный вал ближе 10 метров к пешеходному переходу, замер показал 1,5, до ПП 3 ,2 м. сформированы снежные валы ближе 10 метров от пешеходного перехода, замер показал 8,74 м, 3,24 м., высота более 2 м., в нарушение требований п.8.1 ГОСТ Р 50597-2017.

14.03.2024 года мировым судьей судебного участка № 1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 01.04.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 270 от 01.04.2024.

10.10.2024г. в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо №ИсхУГХ-3926-005 с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 15.03.2024, 16.03.2024, 17.03.2024, 18.03.2024 предусмотрено механизированная патрульная снегоочистка дороги от рыхлого снега, в том числе по пр. Нефтяников г. Нягани.

Подрядной организацией по завершению механизированной патрульной снегоочистки дороги от рыхлого снега по пр. Нефтяников не были вывезены снежные валы в связи с чем Муниципальный заказчик был привлечен к административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ.

21 марта 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 0467 41 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ г. Нягани «УГХ», согласного которому 18.03.2024 с 09 часов 20 минут до 16 часов 37 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТ и ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно:

- на пр. Нефтяников от пересечения с ул. Речная до пересечения с ул. Сибирская (район пр.Нефтяников, 11) г. Нягани на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (снежный накат) толщиной 0,5 см., 0,5 см., 0,5 см.

- на пр. Нефтяников от пересечения с ул. Речная до пересечения с ул. Сибирская (район пр.Нефтяников, 11) в районе треугольной видимости сформированы снежные валы, замеры показали: вал 1: ширина 5,29 м., длина 5,50 м., высота 1,2 м., вал №2: ширина 5,86, длина 9,79, высота 0,9, в нарушение требований п.8.1, 8.7 ГОСТ Р 50597-2017.

25.04.2024 года мировым судьей судебного участка № 1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 13.05.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 494 от 13.05.2024.

20.11.2024г. в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо №ИсхУГХ-4482-005 с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 05.03.2024 предусмотрено механизированная очистка дороги от рыхлого снега, от уплотненного снега и наледи, с последующим распределением противогололедных материалов, в том числе по пр. Нефтяниокв, г. Нягани.

11 марта 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046739 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ г. Нягани «УГХ», согласного которому 05.03.2024 с 15 часов 54 минут до 16 часов 02 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТ и ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г.Нягани, а именно:

- на пр. Нефтяников от пересечения с ул.Речная до пересечения с ул.Сибирская (район ул.Уральская) г. Нягани на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (снежный накат) толщиной 1 см., 1,5 см., 2 см.

- на пр. Нефтяников от пересечения с ул.Речная до пересечения с ул.Сибирская (район пр.Нефтяников, 11) в районе треугольной видимости сформированы снежные валы, замеры показали: вал 1: ширина 3,5 м., длина 6,55 м., высота 1,4 м., вал №2: ширина 4,10, длина 6,04, высота 1,6, в нарушение требований п.8.1, 8.7 ГОСТ Р 50597-2017.

25.04.2024 года мировым судьей судебного участка №1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 13.05.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 496 от 13.05.2024.

05.11.2024г. №ИсхУГХ-4278-005 в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 06.03.2024 предусмотрено механизированная очистка дороги от рыхлого снега, в том числе по ул. Декабристов, г. Нягани.

13 марта 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046740 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ г. Нягани «УГХ», согласного которому 06.03.2024 с 14 часов 59 минут до 15 часов 05 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТиДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно на ул. Декабристов от пересечения с ул. Сибирская до пересечения с ул. Московская (район ул. Декабристов, д.50) г. Нягани, на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (снежный накат) толщиной 3 см., 3 см., 4 см., в нарушение требований п.8.1 ГОСТ Р 50597-2017.

25.04.2024 года мировым судьей судебного участка №1 ФИО3 было вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 13.05.2024 года, в размере 100 ООО рублей, что подтверждается платежным поручением № 495 от 13.05.2024.

05.11.2024г. в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо №ИсхУГХ-4279-005 с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 23.01.2024 предусмотрено механизированная очистка дороги от уплотненного снега и наледи с одновременной расчисткой заездов, в том числе по ул.Лазарева, г. Нягани.

25 января 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046712 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 23.01.2024 с 16 часов 00 минут до 16 часов 10 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТ и ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно на улице Лазарева от пересечения с ул.Сибирская до пересечения с ул. Лазарева (район ж/д переезда) г. Нягани, на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (нежный накат) толщиной 3,5 см. 4,5 см., в нарушение требований п.8.1 ГОСТ Р 50597-2017.

27.02.2024 года мировым судьей судебного участка №l ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 13.03.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 205 от 13.03.2024.

23.10.2024г. №ИсхУГХ-4099-005 в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 06.12.2024 предусмотрено механизированная патрульная снегоочистка дороги от рыхлого снега и наледи, в том числе по пр.Нефтяников, г. Нягани.

21 декабря 2023 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046701 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 06.12.2023 с 11 часов 05 минут до 11 часов 25 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, начальником отдела ОТ и ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани майором полиции ФИО4, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно на улице (карман 1 микрорайона) проспекта Нефтяников, г. Нягани, на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (укатанный снег) толщиной 3.8 см., в нарушение требований п.8.1 ГОСТ Р 50597-2017.

09.02.2024 года мировым судьей судебного участка №1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 22.02.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 108 от 22.02.2024.

12.08.2024г. №ИсхУГХ-3501-005 в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 29.01.2024 предусмотрено механизированная очистка дороги от уплотненного снега и наледи с одновременной расчисткой заездов, работа грейдера, в том числе по пр. Нефтяников, г. Нягани.

31 января 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046724 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 29.01.2024 с 09 часов 50 минут до 09 часов 58 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТиДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно:

- на пр. Нефтяников от пересечения с ул.Речная до пересечения с ул.Сибирская (район ул.Авиационная, 9А) г. Нягани, на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (снежный накат) толщиной 2 см., 2,5 см., 2,6 см;

- на пр. Нефтяников от пересечения с ул.Речная до пересечения с ул. Сибирская (район опоры освещения № 12) на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (снежный накат) толщиной 2 см. 1,8 см., 1,5 см., в нарушение требований п.8.1, 8.3 ГОСТ Р 50597-2017.

11.03.2024 года мировым судьей судебного участка №1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 27.03.2024 года, в размере 100 ООО рублей, что подтверждается платежным поручением № 240 от 27.03.2024.

30.09.2024г. №ИсхУГХ-3706-005 в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 24.01.2024 предусмотрено механизированная патрульная снегоочистка дороги от рыхлого снега, в том числе по ул.Декабристов, г. Нягани.

Подрядной организацией по завершению механизированной патрульной снегоочистки дороги от рыхлого снега по ул. Декабристов не были вывезены снежные валы в связи с чем Муниципальный заказчик был привлечен к административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ.

26 января 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046723 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 24.01.2024 с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТиДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно:

- на ул. Декабристов от пересечения с ул.Сибирская до пересечения с ул.Московская (Район заездов ул.20 лет г. Нягани, ул. Дерибасовская) сформированы снежные валы в зоне треугольника видимости высотой 1,3 м., длиной более 15 м., высотой более 2 м., длиной более 15 м.;

- на ул. Декабристов от пересечения с ул.Сибирская до пересечения с ул.Московская (район остановочного пункта маршрутных ТС «ул.20 лет Нягани»), сформированы снежные валы высотой 1,4 м., длиной 5.5. м., высотой более 2 м., длиной 15 м.,, в нарушение требований п.8.7., 8.8 ГОСТ Р 50597-2017.

05.03.2024 года мировым судьей судебного участка №1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным: в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 15.03.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 227 от 15.03.2024.

01.10.2024г. №ИсхУГХ-3725-005 в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г.Нягань на 27.12.2023 предусмотрено механизированная патрульная снегоочистка дороги от рыхлого снега, в том числе по ул.Сибирская г. Нягани.

11 января 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046704 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 27.12.2023 с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТиДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно на улице Сибирская от пересечения с улицей Сибирская 42 (бывший пост ДПС) до пересечения с пр. Нефтяников г. Нягани, на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (рыхлый снег) толщиной 11 см., в нарушение требований п.8.1 ГОСТ Р 50597-2017.

15.02.2024 года мировым судьей судебного участка №l ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 05.03.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №128 от 05.03.2024.

27.09.2024г. в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо №ИсхУГХ-3670-005 с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 23.01.2024 предусмотрено механизированная очистка дороги от уплотненного снега и наледи с одновременной расчисткой заездов, в том числе по ул. Ленина г. Нягани.

25 января 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046715 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 23. О 1.2024 с 16 часов 5 О минут до 17 часов 00 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТ и ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантш.1 полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно на улице Ленина от пересечения с ул.Ленинградская до пересечения с ул.Декабристов г. Нягани, на асфальтобетонном покрытии проезжей части имеется зимняя скользкость (нежный накат) толщиной 1 см., в нарушение требований п.8.1 ГОСТ Р 50597-2017.

27.02.2024 года мировым судьей судебного участка № 1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 13.03.2024 года, в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 206 от 13.03.2024.

12.08.2024г. в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо № ИсхУГХ-3503-005 с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Согласна плану выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети г. Нягань на 23.01.2024 предусмотрено механизированная очистка дороги от уплотненного снега и наледи с одновременной расчисткой заездов, работа грейдера, в том числе по ул. Сибирская, г. Нягани.

25 января 2024 года ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани составлен протокол № 86 АА 046713 об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом в отношении МКУ МО г. Нягань «УГХ», согласного которому 23.01.2024 с 16 часов 15 минут до 16 часов 20 минут в ходе повседневного надзора за эксплуатационным: состоянием улично-дорожной сети г. Нягань, старшим государственным инспектором ДН ОТ и ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани старшим лейтенантом полиции ФИО2, был выявлен факт нарушения в содержании улично-дорожной сети г. Нягани, а именно на улице Сибирская от пересечения с пр.Нефтяников до пересечения с ул.Сибирская (Сибирская, 42 бывший пост ДПС) в районе пешеходного перехода по ул.Лазарева, г.Нягани, сформирован снежный вал ближе 10 метров к пешеходном переходу, замер показал 3,6 м, в нарушение требований п. 8.8 ГОСТ Р 50597-2017.

27.02.2024 года мировым судьей судебного участка №1 ФИО3 вынесено постановление о назначении административного наказания, МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000,00 рублей.

Штраф оплачен на основании п. 1.3. ст.32.2 КоАП РФ 13.03.2024 года, в размере 100 ООО рублей, что подтверждается платежным поручением № 204 от 13.03.2024.

01.10.2024г. в адрес ООО «РемАвтоДорНягань» направлено претензионное письмо № ИсхУГХ-3728-005 с требованием оплатить убытки, понесенные муниципальным заказчиком, в размере 100 000,00 рублей.

По состоянию на 09.12.2024г. требование МКУ МО г.Нягань «Управление городского хозяйства» ответчиком не выполнено.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (статья 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397) (пункт 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу положений статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствие с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков возможно при наличии условий, предусмотренных законом.

Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать причинение вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением и наступлением вреда, размер убытков. Отсутствие вины доказывает причинитель вреда.

Услуги, оказанные по настоящему контракту должны соответствовать требованиям муниципального контракта, ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. № 245-ст, в соответствии с постановлением Администрации города Нягани                       № 3648 от 14.12.2016 "Об утверждении Технического регламента по содержанию, обеспечению сохранности и текущему ремонту автомобильных работ местного значения" и иными стандартами и требованиям к данным видам услуг (пункт 7.2.1. контракта).

Нарушения в содержании улично-дорожной сети зафиксированы в течение установленного контрактом периода выполнения работ.

Исходя из условий контракта обязанность по содержанию автодорог в микрорайонах Центральный, Южный, Приурал, промзоне муниципального образования город Нягань лежит на ответчике.

Факт ненадлежащего исполнения указанной обязанности подтверждается постановлениями мирового судьи по делам об административных правонарушениях.

 Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Согласно положений пункта 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Вместе с тем, доказательств уплаты задолженности на момент рассмотрения дела в арбитражный суд не представлено.

В соответствии с нормой статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципа состязательности, а лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Оценив в соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, суд полагает требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга (убытков) в размере 1 100 000 рублей 00 копеек обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В связи с удовлетворением исковых требований, на основании статей 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РемАвтоДорНягань» в пользу муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городского хозяйства» убытки в размере 1 100 000 рублей 00 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РемАвтоДорНягань» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 58 000 рублей 00 копеек.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

            Судья                                                                                                            А.Х. Агеев