358/2023-133466(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  19 июля 2023 года А46-16088/2022  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению казенного учреждения  Омской области «Центр материально-технического обеспечения» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Омрегионпромстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки, взыскании 5 000 руб.,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Престиж - ЛТФ»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

в судебном заседании приняли участие:  

от истца – ФИО2 по доверенности от 30.12.2022 (паспорт гражданина РФ, диплом),  ФИО3 по доверенности от 30.12.2022 (паспорт гражданина РФ, диплом),  

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 01.06.2022 (паспорт гражданина РФ,  диплом), ФИО5 директор (паспорт гражданина РФ),  

от третьего лица – не явились, извещены, 

от общества с ограниченной ответственностью «Бюро судебных экспертиз» – ФИО6  эксперт (паспорт гражданина РФ);  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Омрегионпромстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления решения  суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки и дефекты выполненных работ по  государственному контракту от 09.08.2021 № 0152200004721001027, а именно произвести  следующие работы по восстановлению качества выполненных работ в помещениях на первом  этаже здания, расположенного по адресу 

<

...>:  

1) устранить растрескивание и отслаивание отделочных материалов (штукатурка,  шпаклевка, краска) размером 3 м² по углам у входной двери на улицу Красногвардейская,  размером 1,5 м² в помещении входной группы в «башне», выход на улицу Тарская;  

2) устранить растрескивание и отслаивание отделочных материалов (штукатурка,  шпаклевка, краска) в помещениях «Информационное окно № 8» и «Информационное окно   № 10» на оконных откосах размером 70 см2;  

3) отремонтировать (устранить течь) системы отвода дренажной системы вентиляции  (кондиционер, информационное окно № 9, информационное окно № 6);  

4) укрепить светильники (30 шт.) на потолке по всей площади;  

5) устранить растрескивание и отслаивание отделочных материалов (штукатурка,  шпаклевка, краска) размером 60 см2 в помещении «Информационный зал», укрепить углы  

колонн;  

6) закрепить деревянную отделку из реек в информационном зале (рейки и  крепления конструкции) в объеме 1,2 м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Омрегионпромстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу казенного учреждения Омской области «Центр  материально-технического обеспечения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 000 руб.  штрафа по государственному контракту от 09.08.2021 № 0152200004721001027.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Омрегионпромстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 8 000 руб.  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Омрегионпромстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Бюро судебных экспертиз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес: 644119, 

<

...>, юридический адрес: 644119, 

<

...>)  13 364 руб. за проведение судебной экспертизы.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в  порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления  в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда:  http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.А. Чекурда 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.03.2023 4:11:00Кому выдана Чекурда Евгений Андреевич