Арбитражный суд Челябинской области,

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-45726/2019

г. Челябинск

12 марта 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена  04 марта 2020 г.

Полный текст решения изготовлен           12 марта 2020 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Котельниковой Ю.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Капитал Строй», ОГРН 1147448000545, г. Челябинск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «13 Дом», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, г. Златоуст,

о взыскании 834 984 руб. 96 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 – директора, предъявлен паспорт, 

от ответчика: ФИО4 – представителя по доверенности от 09.01.2020, сроком по 31.12.2020, предъявлен паспорт. 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Капитал Строй», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «13 Дом», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск о взыскании задолженности по договору подряда № 01Б от 15.08.2017 в размере 100 421 руб. 39 коп., по договору № 02Б от 14.05.2018 в размере 734 563 руб. 57 коп., всего 834 984 руб. 96 коп.

Определением от 17.12.2019 в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО5.

Согласно адресной справке УВМ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО5 сменила фамилию на ФИО2, зарегистрирована по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Салавата Юлаева, д. 23А, кв. 57.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, представил отзыв (л.д. 36), считает, что требования удовлетворению не подлежат, поскольку договор подряда № 02Б от 1405.2018 подписан директором ФИО5, без решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «13 Дом». Директор ФИО5 превысил полномочия. Кроме того, ответчик считает, что истцом не представлен комплект исполнительной документации к актами о приемке выполненных работ КС- 2 по договору № 01Б от 15.08.2017. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебное заседание не явилось, извещено по адресу: 

<

...>, с данного адреса вернулся конверт с отметкой органа связи «истек срок хранения» (л.д. 55), пояснения не представило, представителя не направило.

В судебном заседании 26.02.2020 объявлен перерыв до 04.03.2020 до 11 час. 15 мин. в соответствии со ст. 163 АПК РФ с размещением информации о перерыве на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После окончания перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей истца и ответчика.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 12.03.2020 в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «13 Дом», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, о приостановлении производства по делу до рассмотрения заявления о признании договора подряда от 14.05.2018 недействительным, отказано.

Заслушав стороны, исследовав и оценив в соответствии со ст. 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

15.08.2017 между ответчиком (Заказчиком) и истцом (Подрядчиком) был подписан договор подряда № 01Б (л.д. 7-8), в соответствии с п.1.1.-1.3. которого Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы (устройство дренажной системы котлована) (далее - работы) на строительном объекте: «Жилой дом со встроенными помещениями торгово-офисного назначения, подземной автостоянкой и газовой котельной по ул.Бейвеля/ул.Благих.» (далее по тексту - Объект) согласно Локальным Сметам и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Работы по договору выполняются с помощью инструмента, материалов и силами Подрядчика совместно с привлеченными им для выполнения работ организациями. Работа выполняется с помощью башенного крана Заказчика, Заказчик обеспечивает подрядчика электроэнергией и водой, необходимыми для качественного выполнения работ в установленные Договором сроки. Стороны определили следующие сроки выполнения работ: Начало работ: В течении трех дней с момента подписания договора. Окончание работ: Не позднее 30 ноября 2017 г. Стороны оформляют в качестве Приложения к настоящему Договору График производства работ, который с момента его подписания Сторонами станет неотъемлемой частью настоящего Договора. Сдача и приемка работ производится и подтверждается Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, составляет 100 421,39 рубль (в том числе НДС - 18%), в соответствии с локальной сметой №1 на 14 989,13 рублей в ценах 2000г. без НДС (Приложение № 1). Помимо сметы Заказчик оплачивает Подрядчику следующие услуги: аренда строительного вагончика из расчета 10 000 рублей в т.ч. НДС 18% в месяц, за фактическое время аренды, перебазировка вагончика на строительную площадки и со строительной площадки из расчета 40 000 рублей в т.ч. НДС 18%. Данные услуги отражаются в актах выполненных работ при закрытии объемов (п.2.1. договора). 

Согласно п.4.1.-4.4. договора Подрядчик по завершение этапа работ (в срок до 25-го двадцать пятого числа отчетного месяца предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ /форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Подрядчик обязан в указанные сроки предоставить Заказчик) указанную документацию, а также исполнительную документацию по «выполненным работам в полном объеме. Заказчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ принимает работы и подписывает Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) или предоставляет мотивированный отказ в приемке работ (части работ). При не предоставление мотивированного отказа в указанный срок работы считаются принятыми. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны обязуются в срок не более 3 (Трех) рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, провести совместную приемку и составить Акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. По окончании выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан передать Заказчику подписанные Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и 2 (Два) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что в соответствии с условиями договора работы выполнены в полном объеме, что подтверждается представленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ № 1 от 06.07.2018 (л.д. 10), подписанным между истцом и ответчиком без замечаний по объему и качеству на сумму 100 421 руб. 39 коп.

Работы на день вынесения решения ответчиком не оплачены.

14.05.2018 между истцом (Подрядчиком) и ответчиком (Заказчиком) был подписан договор подряда № 02Б (л.д. 11-13), в соответствии с п.1.1.-1.3. которого Подрядчик обязуется выполнять строительно-монтажные работы (далее - работы) на строительном объекте: жилой дом .4° 13(стр.) со индивидуальному проекту со встроенно-пристроенным универсамом, кафе, КБО №13-А(стр.) и встроенным подземным гаражом-стоянкой №15(стр) по ул. Бейвеля,  Мкр.№47 жилого района №11 Краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе г. Челябинска (далее по тексту - Объект) согласно Локальным Сметам и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Работа выполняется с помощью оборудования, техники, электроэнергии, водных ресурсов Заказчика, необходимыми для качественного выполнения работ в установленные Договором сроки. Работы по договору выполняются с помощью инструмента, материалов и силами Подрядчика совместно с привлеченными им для выполнения работ организациями. Стороны определила следующие сроки выполнения работ: Начало работ: 15.05.2018. Окончание работ: 31.07.2018. Стороны оформляют в качестве Приложения к настоящему Договору График производства работ (Приложение № 2) и График финансирования работ (Приложение №3), которые с момента их подписания Сторонами станут неотъемлемой частью настоящего Договора. Сдача и приемка работ производится и подтверждается Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, составляет 29 748 315,87 рублей (в том числе НДС- 18%), в соответствии с локальными сметами№1 (Приложение №1) на 3 436 831 рублей в ценах2000г. без НДС и №2 (Приложение №1) на 369 72730 рублей в ценах 2000г. без НДС (п.2.1. договора).

Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: Заказчик обязан перечислить Подрядчику расчет за выполненные работы в течение 30 дней после сдачи этапа работ. Общий объем выполняемых работ разбивается на следующие этапы: Устройство котлована в осях А-К/15-20; Подготовка основания, устройство бетонной подготовки А-К/15-20; Устройство арматурного каркаса и опалубки фундаментной плиты А-К/15-20; Устройство фундаментной плиты А-К/15-20; Устройство котлована в осях А-К/1-15; Подготовка основания, устройство бетонной подготовки А-К/1-15; Устройство арматурного каркаса и опалубки фундаментной плиты А-К/1 -15; : Устройство фундаментной плитъ1А-КЛ-15. Расчет производится за фактически выполненные и принятые объемы работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик принимает на себя обязательство в течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания договора оплатить Подрядчику аванс на приобретение материалов и ГСМ в размере не менее 5% от стоимости работ по договору. В случае неоплаты Заказчиком фактически выполненных и принятых работ в течение указанного срока, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ вплоть до полного прекращения выполнения работ на объекте. В этом случае прекращенные работы будут возобновлены Подрядчиком после оплаты Заказчиком фактически выполненных и принятых работ (2.4. договора).

20.06.2018 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 02Б от 14.05.2018 (л.д. 15), в соответствии с п.1.-6. которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы: Земляные работы в осях А-К/15-20 (разработка котлована) согласно Сметы №1 (приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению) на объекте: «:Жилой дом №13(стр.) по индивидуальному проекту со встроенно-пристроенным универсамом, кафе, КБО №13-А(стр.) и встроенным подземным гаражом-стоянкой №15(стр) по ул.Бейвеля, Мкр.№47 жилого района №11. Краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе г.Челябинска (далее по тексту -Объект).» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена работ, оборудования, материалов по настоящему Дополнительному соглашению определена в локальной смете №1 (Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению) и может быть скорректирована по фактически выполненным и принятым объемам работ. Состав сметы по договору является исчерпывающим и не допускает добавления позиций без обоюдного согласия сторон. В стоимость работ не включены и поставляются Заказчиком следующие материалы и ресурсы: электроэнергия, вода, охрана, работа башенного крана. Ранее подписанная смета №2 Раздел 1 Земляные работы в осях А-К/15-20 (Приложение №1 к договору подряда №02Б от 14 мая 2018г.) на сумму 71 143,66 рубля в базисных ценах, с момента подписания данного дополнительного соглашения считается недействительной. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в соответствии с договором поле подписания сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта о приемке исполнительной документации. Подрядчик обязуется выполнить обязательства, предусмотренные п.1. настоящего соглашения в срок до 31.07.2018 при условии предоставления Заказчиком фронта работ и соблюдения сроков расчета за выполненные работы. До начала выполнения работ Заказчик обязан передать Подрядчику этап работ по акту с указанием готовности этапа к выполнению работ. В случае задержки передачи фронта работ, срок исполнения обязательств по договору увеличивается на соразмерный период времени. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности работ или части работ к приемке должен принять результат работ и подписать акт приемки работ или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае не предоставления такого отказа в вышеуказанный срок работы считаются принятыми с момента истечения вышеуказанного срока.

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что в соответствии с условиями договора работы выполнены в полном объеме, что подтверждается представленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ № 1 от 06.07.2018 (л.д. 16), подписанным между истцом и ответчиком без замечаний по объему и качеству на сумму 734 563 руб. 67 коп.

Работы на день вынесения решения ответчиком не оплачены.

Ответчик свои обязательства по оплате в полном объеме не исполнил, задолженность ответчика перед истцом составляет 834 984 руб. 96 коп., посчитав свои права нарушенными истец обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.

Исходя из буквального толкования условий договоров (ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд полагает, что данный договор по своей правовой природе относится к договору подряда, правовое регулирование которого осуществляется в соответствии с § 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться  надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что возникшие между сторонами правоотношения  регулируются  положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде, (ст. ст. 702-729).

Как следует из абзаца 1 пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса об этих видах договоров. В силу положения пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ по договору подряда определено в качестве существенного условия договора данного вида. Иного положениями Гражданского кодекса, предусматривающими подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, не установлено.

Таким образом, существенными для договора подряда являются условия о содержании и объеме работ (предмете), а также сроках их выполнения.

При этом при оценке заключенности договора следует учитывать, что требования Гражданского кодекса Российской Федерации об определении вида и объема работ, а также периода их выполнения установлены законодателем с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон по исполнению условий договора. Произвольное признание договора подряда незаключенным нарушает волю сторон на совершение и исполнение сделки, не противоречащей закону.

Фактические обстоятельства настоящего дела свидетельствуют об отсутствии между сторонами разногласий по поводу предмета договора, таким, образом, учитывая наличия  неопределенности в отношениях сторон по исполнению условий вышеуказанного договора подряда,  арбитражный суд приходит к выводу о заключенности данного договора.

Пунктом 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ).

Согласно п. 1 и п. 3 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (части 1, 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (часть 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Доказательств понуждения ответчика к заключению спорных договоров в материалах дела не имеется, следовательно, ответчик, добровольно заключая вышеуказанные договоры, согласился с изложенными в них условиями, приняв на себя обязательства, что подтверждается выполненными работами.

В связи с тем, что все существенные условия договороы подряда сторонами согласованы, договор подряда представленный в материалы дела является заключенным в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств оплаты работ, выполненных истцом в полном объеме (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), то в силу положений ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающих обязанность исполнять обязательства надлежащим образом и недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, арбитражный суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 834 984 руб. 96 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме на основании ст. 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Довод ответчика о том, что договор подряда № 01Б является крупной сделкой, заключен без одобрения общего собрания акционеров, суд признает необоснованным поскольку ответчик не представил доказательств того, что истец знал о необходимости одобрения спорной сделки общего собрания акционеров, а также доказательства признания спорного договора недействительным материалы дела не содержат.

Доводы ответчика о том, что договор подряда № 02Б подписан директором ФИО5 с превышением полномочий, т.к. у директора ФИО5 полномочия были отозваны досрочно 12.10.2018, так же не принимается арбитражным судом поскольку договор подряда № 2Б  от 14.05.2018 и акт приемки выполненных работ к данному договору, подписаны ответчиком до прекращения полномочий.

Доказательств, подтверждающих отсутствие соответствующих полномочий на подписание договора подряда № 2Б от 14.05.2018 у ФИО5 ответчиком в материалы дела не представлено. 

Из материалов дела также не следует, что ООО "13 Дом" в установленном порядке полномочия директора ФИО5 на подписание договора подряда № 2Б от 14.05.2018 оспорило, либо признало факт прекращения договорных отношений с истцом на основании подписанного договора подряда № 2Б от 14.05.2018.

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в суд подлежит уплате в соответствии со ст.333.18 Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ) с учетом ст.ст.333.21, 333.22, 333.41 НК РФ.

Поскольку исковые требования удовлетворены, а истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до вынесения решения, то в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Капитал Строй», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск,  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «13 Дом», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск в пользу общества с ограниченной ответственностью «Капитал Строй», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, задолженность в размере 834 984 руб. 96 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «13 Дом», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск в доход федерального бюджета государственную пошлину – 19 700 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья                                                                                Е.А. Бахарева

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной  жалобы можно получить  соответственно  на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru