Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-31383/2019

07 июня 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  07 июня 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Дороховой Н.Н., 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 22.01.1993, место регистрации: Россия, 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 1)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 30.10.2014, дата рождения: 23.04.1975, место рождения: Кировоградская обл, Маловисковский район, ,с. Большая Виска, место регистрации: Россия, 188684, 

<

...>)

о взыскании,

при участии

- от истца: ФИО3, по доверенности от 06.12.2018,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго») обратилось в суд с иском заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – ИП ФИО2, предприниматель):

- 1 649 998 рублей 40 копеек задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16.09.2015 № ОД-16433-15/22016-Э-15, 

- 40 249 рублей 65 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации  за просрочку внесения платежа № 1 за период с 02.10.2015 по 12.04.2016,

- 481 758 рублей 98 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 2 за период с 16.11.2015 по 09.11.2017,

- 273 869 рублей 68 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 3 за период с 15.03.2016 по 10.11.2017,

- 163 869 рублей 15 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 4 за период с 02.03.2018 по 27.12.2018,

- 55 177 рублей 54 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 5 за период с 27.02.2018 по 27.12.2018,

- неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 16.06.2018 по 30.11.2018,

- процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты этих средств ПАО «Ленэнерго»

 - неустойку по день фактического исполнения обязательств.

ИП ФИО2 явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил, возражение против перехода из предварительного судебного заседание в судебное заседание суда первой инстанции не заявил. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» и частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в суде первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца настаивает на удовлетворении требования.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы истца, арбитражный суд установил следующее.

Из материалов дела следует, что между ПАО «Ленэнерго» (сетевая организация) и ИП Ралько (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16.09.2015 № ОД-16433-15/22016-Э-15, в соответствии с которым сетевая организация в соответствии с действующим законодательством обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя к электрическим сетям по техническим условиям (далее — услуга), а заявитель - оплатить услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской Области от 26.12.2014 № 506-п и составляет 8 994 998 рублей 40 копеек, включая НДС 18 % -1 372 118 рублей 40 копеек. и уплачивается в следующем порядке:

а) 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 899 499,84 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 15 дней с даты заключения Договора;

б)30% платы за технологическое присоединение, что составляет 2 698 499,52 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 60 дней с даты заключения Договора;

в)20% платы за технологическое присоединение, что составляет 1 798 999,68 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 180 дней с даты заключения Договора;

г)30%о платы за технологическое присоединение, что составляет 2 698 499,52 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д)10% платы за технологическое присоединение, что составляет 899 499,84 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

Дополнительным соглашением №1 от 13.10.2017 к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 15.03.2018.

17.01.2018 Заявителем получен зарегистрированный акт допуска приборов учета (измерительного комплекса, системы учета) электрической энергии в эксплуатацию №Д-129957 и акт о выполнении технических условий №15-22016/АВ.

14.02.2018 Заявителем ползшей зарегистрированный акт об осуществлении технологического присоединения №258225.

Учитывая условия Договора, сетевая организация выполнила взятые на себя обязательства, однако ее услуги были оплачены Заявителем не своевременно и не полностью.

В связи с неисполнением обязательств по Договору, в адрес ИП ФИО2 направлены уведомления от 08.02.2016 №ЛЭ/16-301/155, от 11.04.2016 №ЛЭ/16-301/614, от 31.05.2016 №ЛЭ/16-31/41, а в целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора направлены претензии от 15.09.2017 №ЛЭ/16-02/5210, от 22.05.2018 №ЛЭ/16-02/2855, от 08.10.2018 №ЛЭ/16-02/4317, в которых Заявителю предлагалось в добровольном, досудебном порядке исполнить свои обязательства и перечислить на расчетный счет ПАО «Ленэнерго» сумму задолженности в размере 2 339 998,40 руб., в т.ч. НДС - 18%.

01.06.2018 сетевой организацией получен ответ на претензию от 22.05.2018 №ЛЭ/16-02/2855 (исх. от 01.06.2018 № 10/РВВ-18), которым Ответчик фактически признавал наличие просроченной задолженности на сумму 2 339 998,40 руб., в т.ч. НДС - 18%, и с просьбой о предоставлении рассрочки платежа по следующему графику:

до 30.06.2018 - оплата в сумме 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

до 31.07.2018 - оплата в сумме 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

до 31.08.2018 - оплата в сумме 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%);

до 30.09.2018 - оплата в сумме 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

до 31.10.2018 - оплата в сумме 339 998,40 руб., в т.ч. НДС 18%.

Дополнительное соглашение к Договору в части изменения условий Договора по срокам оплаты за технологическое присоединение сторонами договора не подписано.

Ответ на претензию от 08.10.2018 №ЛЭ/16-02/4317 не поступил.

ИП Ралько просрочил оплату услуги по технологическому присоединению (в том числе нарушил график внесения авансовых платежей по договору, технические условия выполнил с просрочкой), что послужило основанием к начислению 1 014 925 рублей 00 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения авансовых платежей и неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно статье 26 Закона об электроэнергетике по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Правила № 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил № 861 сетевая организация на основании заявки обязана заключить с заявителем договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил № 861. К ним относятся в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых сторонами договора, указываемых в технических условиях, которые являются неотъемлемой частью такого договора, размер платы, определяемый в соответствии с действующим законодательством.

В пункте 19 Правил № 861 предусмотрено, что по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности и акт об осуществлении технологического присоединения.

Плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (пункт 2 статьи 23.2 Закона об электроэнергетике).

Сетевая компания оказала услугу по договору, сторонами подписан акт технологического присоединения.

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении указанных в договоре действий (деятельности). Отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг не допускается.

Согласно статье 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств погашения задолженности по оплате оказанных услуг по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания, иной просрочки в их уплате, подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства.

Согласно абзацу 5 пункта 8 Договора Заявитель обязуется надлежащим образом исполнять указанные в разделе III Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

В связи с просрочкой оплаты задолженности, начисление  1 014 925 рублей 00 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, является правомерным. 

Пунктом 17 Договора установлено, что в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по Договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения Договора и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения Договора (пункт 5 Договора). Дополнительным соглашением № 1 от 13.10.2017 к Договору установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 15.03.2018.

Истец считает, что Ответчик при должном исполнении условий Договора, не позднее 15.03.2018, должен был уведомить сетевую организацию о выполнении с его стороны технических условий.

Несвоевременное исполнение Заявителем своих обязательств по Договору повлекло невозможность фактической подачи сетевой организацией напряжения в установленные сроки и возможности завершения процедуры оказания услуги из-за неготовности энергопринимающих устройств Заявителя.

Учитывая изложенное, датой начала течения просрочки Заявителя в выполнении мероприятий по технологическому присоединению следует считать - 16.03.2018.

Таким образом, количество дней просрочки на дату подготовки данного искового заявления составляет 287 дней (с 16.03.2018 по 27.12.2018).

Расчет неустойки:

8 994 998,40 руб. (обилий размер платы) х 287 (дни просрочки в период с 16.03.2018 по 27.12.2018) X 0,00112 (0,014x8,25%^) = 2 891 352,29 руб.

Абзацем 1 пункта 11 Договора установлено, что первый платеж - 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 899 499,84 руб., включая НДС, уплачивается Заявителем в течение 15 дней с даты заключения Договора.

Договор заключен 16.09.2015 года, соответственно, оплата суммы первого платежа должна быть осуществлена не позднее 01.10.2015.

Абзацем 2 пункта 11 Договора установлено, что второй платеж - 30% платы за технологическое присоединение, что составляет 2 698 499,52 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 60 дней с даты заключения Договора.

Договор заключен 16.09.2015 года, соответственно, оплата суммы второго платежа должна быть осуществлена не позднее 15.11.2015.

Абзацем 3 пункта 11 Договора установлено, что третий платеж - 20% платы за технологическое присоединение, что составляет 1 798 999,69 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 180 дней с даты заключения Договора.

Договор заключен 16.09.2015 года, соответственно, оплата суммы третьего платежа должна быть осуществлена не позднее 14.03.2016.

Абзацем 4 и 5 пункта 11 Договора установлено, что четвертый платеж - 30% платы за технологическое присоединение, что составляет 2 698 499,52 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 15 дней со дня фактического присоединения и пятый платеж - 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 899 499,84 руб., включая НДС, уплачиваются Заявителем в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

14.02.2018 Заявителем получен зарегистрированный Акт об осуществлении технологического присоединения, следовательно, 14.02.2018 возможно считать датой фактического присоединения. Соответственно, датой окончания обязательства по внесению четвертого платежа следует считать 02.03.2018 (14.02.2018+15 дней), а пятого платежа - 27.02.2018^ (14.02.2018+10 дней).

На дату подачи иска в суд Ответчик не исполнил взятых на себя обязательств.

Таким образом, количество дней просрочки четвертого платежа на дату подготовки данного искового заявления составляет 301 день (с 02.03.2018 по 27.12.2018), пятого платежа - 304 дня (с 24.02.2018 по 27.12.2018).

Итого: задолженность по оплате технологического присоединения составляет 2 339 998,40 руб.; сумма процентов за пользование чужими денежными средствами - 1 014 925 руб.; сумма неустойки, образовавшаяся в связи с неисполнением договорных обязательств - 2 891 352,29 руб.

В пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Кроме того, в пункте 65 данного постановления указано, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, ис'1ец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входит государственная пошлина.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

- 1 649 998 рублей 40 копеек задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16.09.2015 № ОД-16433-15/22016-Э-15, 

- 40 249 рублей 65 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации  за просрочку внесения платежа № 1 за период с 02.10.2015 по 12.04.2016,

- 481 758 рублей 98 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 2 за период с 16.11.2015 по 09.11.2017,

- 273 869 рублей 68 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 3 за период с 15.03.2016 по 10.11.2017,

- 163 869 рублей 15 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 4 за период с 02.03.2018 по 27.12.2018,

- 55 177 рублей 54 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа № 5 за период с 27.02.2018 по 27.12.2018,

- неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 16.06.2018 по 30.11.2018,

- процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты этих средств ПАО «Ленэнерго»

 - неустойку по день фактического исполнения обязательств.

- 36 325 рублей 00 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Возвратить публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго» из федерального бюджета 18 611 рублей 00 копеек государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 28.09.2017 № 11120.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Дорохова Н.Н.