49/2017-107307(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 690600, г. Владивосток, ул. Светланская, д.54 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А51-9961/2017

г. Владивосток

29 июня 2017 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Шклярова С.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления жилищно- коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной  деятельности, строительства и архитектуры администрации городского  округа ЗАТО город Фокино (ИНН 2512305753, ОГРН 1132503000123)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальстройподряд» (ИНН  2508079614, ОГРН 1072508002533)  

третье лицо: ООО «Фокинская управляющая компания № 1» 

о присуждении обязанности устранить недостатки и взыскании 299 765  рублей 10 копеек  

Руководствуясь статьями 110, 164-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Дальстройподряд» в течение месяца с момента вступления в силу судебного  акта безвозмездно устранить недостатки в работах, выполненных по  муниципальному контракту № 0120300001714000283 от 19.08.14, а именно:  

 демонтировать и снять подъемное устройство; 

 выполнить покрытие кровли из рулонных направляемых материалов в  

1 слой площадью 2 472 м.кв.; 

 выполнить примыкания к стенам парапетов, будок выхода на крышу,  

стенок вентиляционных шахт площадью 654 п.м., стояков КНС в  

количестве 42 шт., мачт для крепления кабелей в количестве 7 шт.; 

 для устройства покрытия из направляемого материала плит покрытия  

вентиляционных шахт – выполнить цементную стяжку общей  

площадью 30,24 м.кв., толщиной 20 мм. 

Взыскать с открытого общества с ограниченной ответственностью  «Дальстройподряд» в пользу Управления жилищно-коммунального  хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства  и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино  299 765 (двести девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 10  копеек штрафа.  

Взыскать с открытого общества с ограниченной ответственностью  «Дальстройподряд» в доход федерального бюджета 14 995 (четырнадцать  тысяч девятьсот девяносто пять) рублей государственной пошлины по иску.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления решения в законную силу в Арбитражный суд  Дальневосточного округа, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья С.Н. Шкляров