1259/2017-24065(4) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 01 февраля 2017 года 

по делу А33-27516/2016 Красноярск 

01 февраля 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Внести изменения в муниципальный контракт от 19.10.2016 «На проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайной  ситуации техногенного характера в жилом доме № 139 по ул. Карла Маркса у субъектов ма- лого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческий организацией», за- ключенный между Акционерным обществом "Научно-технический прогресс" и Департамен- том городского хозяйства Администрации города Красноярска в части срока завершения работ (раздел 3), изложив его в следующей редакции: «Срок завершения работ – 01.05.2017».  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красно- ярского края.  

Судья О.С. Щёлокова