Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Волгоград                                                                                              Дело №А12-19986/2017

«07» августа 2017 года

Резолютивная часть решения изготовлена 07 августа 2017 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску государственного учреждения здравоохранения «Клиническая больница №4» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «НВЭК-Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №4» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «НВЭК-Сервис» о взыскании неустойки в сумме 19 491 руб. 36 коп.

До рассмотрения дела по существу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил исковые требования до 11 277 руб.

На основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Исследовав материалы дела, оценив фактические обстоятельства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 05.07.2016г. между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен контракт №465447-168, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по промывке и опрессовке системы отопления, текущему ремонту системы отопления, водоснабжения, водоотведения и передать Заказчику Объект готовый к эксплуатации.

В соответствии с пунктом 3.3 контракта стоимость работ составляет 280 000 руб.

Согласно пункту 3.4 контракта, расчет за выполненные работы производится в течение 90 дней, но не позднее 31.12.2016.

Дата начало выполнения работ – с момента заключения контракта, дата завершения выполнения работ – 15.08.2016 (пункт 7.1 контракта).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени, которая начисляется за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П=(Ц-В) х С (пункты 8.5, 8.6 контракта).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Работы по контракту выполнены ответчиком 20.09.2016, что подтверждается актом (КС-2) №117 от 20.09.2016 и справкой о стоимости (КС-3) №117 от 20.09.2016.

В связи с допущенным ответчиком нарушением установленных контрактом сроков выполнения работ истцом начислена неустойка, исходя из установленного контрактом, на сумму 11 277 руб.

Представленный расчет обоснован, судом проверен, ответчиком не оспорен.

16.03.2017 ответчику направлено требование об уплате пени.

В связи с изложенным, требования о взыскании неустойки в сумме 11 277 руб. подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса с ответчика подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НВЭК-Сервис» в пользу государственного учреждения здравоохранения «Клиническая больница №4» неустойку в сумме 11 277 руб., а также расходы по оплате услуг представителя в сумме 2 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                       С.А.Шутов