79_14908049 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-30649/22

06 декабря 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующий судья Н.А. Кондратенко ,при ведении протокола  судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по заявлению ООО "ЕДС-ЩЁЛКОВО" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании  

Третьи лица: ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА"; ООО  

"СТАРТЕН"; ООО "Строительная Компания" (ИНН: 

<

***>); Страховое  АО "ВСК" (ИНН: 

<

***>)  

При участии в судебном заседании- согласно протоколу  

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

1.  Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов не позднее 155 дней со дня вступления решения  суда в законную силу разработать новую проектную документацию по  замене кровельного покрытия, обрешетки, стропильной системы  (включая замену системы водостока как горизонтальной, так и  вертикальной) в соответствии с государственными нормами, правилами и  стандартами РФ, действующими на момент вступления в силу решения  суда.  

2.Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных  

домов устранить неисправности в соответствии с вновь разработанной  

проектной документацией не позднее 6 месяцев с момента получения  положительного заключения государственной экспертизы.  

  3. Взыскать с ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ в пользу ООО «ЕДС- ЩЁЛКОВО» по истечении 6 месяцев со срока, установленного в п.2 судебную  неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 000 рублей за каждый  день неисполнения до момента фактического исполнения.  

 4. Взыскать с ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ в пользу ООО «ЕДС-ЩЁЛКОВО» 37 000  руб. за проведение досудебной экспертизы, расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

 В остальной части неустойки отказать. 

 В части требования о взыскании 65 000 руб. расходов на ремонт крыши  оставить без рассмотрения.  

Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки, установленные  АПК РФ.  

Судья Н.А. Кондратенко