Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-87382/2023

06 декабря 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" (адрес:  Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТОБОЛЬСКАЯ УЛ. 6, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-Реконструкция" (адрес:  Россия 188650, г.Сертолово  Всеволожского  района, Ленинградская область, Восточно-Выборгское 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 203 078руб. 10коп. 

 

установил:

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ПСК-Реконструкция» (далее – ответчик)  о взыскании 203 078руб. 10коп. пени по договору  от 07.07.2020г. №3/12/13/18-709/Д/КР/2020.

Определением суда от 18 сентября 2023 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Истец и ответчик надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве, в том числе ссылаясь на отсутствие в действиях подрядчика (ответчика) виновных действий (бездействий) повлекших нарушения сроков подписания актов приемки выполненных работ по договору заказчиком (истцом).

В соответствии со статьями 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Резолютивная часть решения вынесена 18 ноября 2023 года.

От ответчика поступила апелляционная жалоба, в связи с чем изготовлено решение в полном объеме.

Исследовав представленные документы сторон, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа арбитражный суд установил следующее.

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Фонд, Истец, Заказчик) заключила с обществом с ограниченной ответственностью «ПСК-Реконструкция» (далее–Ответчик, Подрядчик) договор от 07.07.2020 № 3/12/13/18-709/Д/КР/2020 (далее – Договор) на выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества (крыши и фасад) в многоквартирных домах по адресам согласно приложению № 1 к Договору, а именно:

- Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 58 корп. 2 лит. К;

- Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 28 лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 28 лит. Б;

- Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5 корп. 6 лит. А;

- Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5 корп. 13 лит. А;

- Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 13/2 лит. А;

- Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 54/31 лит. А;

- Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 8 лит. А;

- Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 17 лит. А;

- Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 17 лит. Б.

Согласно пункту 3.2 Договора, срок окончания выполнения работ наступает через 19 недель (133 календарных дня) с момента подписания сторонами Договора, то есть 27.10.2020.

В соответствии с пунктом 1.1.12 Договора этап выполнения работ определяется как группа (перечень) объектов, объединенных по общему признаку: одинаковый срок выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.

Приложение № 4 к Договору содержит этап 2 – Разработка подрядчиком проектной (рабочей) документацией.

В соответствии с пунктом 11.2.1 Договора, за нарушение срока окончания этапа выполнения работ, установленного Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому были нарушены.

Проектная документация на проведение капитального ремонта общего имущества по адресу Караванная ул., д. 8 лит. А поступила в Фонд 12.08.2020. После неоднократного выставления замечаний исправленная проектная документация, согласованная Фондом, была направлена 20.01.2021 (приложение № 5). Период просрочки за период с 27.10.2020 по 20.01.2021 составил 85 календарных дней.

Фонд рассчитал пени за нарушение Подрядчиком срока окончания этапа выполнения работ по Договору по формуле 2 389 154,11 руб. (стоимость работ по пункту 4.1 Договора в редакции дополнительного соглашения) * 0,1 % * 85 календарных дней просрочки = 203 077,75 руб.

Согласно абзацу 3 пункта 14.2 Договора, сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения.

Фонд направил в адрес Подрядчика претензию за исх. № 2-61295/21 от 25.11.2021 с требованием об уплате 203 077,75 руб. пени по приложенным реквизитам (приложение № 6). 

По данным отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80097466722061, Претензия была вручена Подрядчику 22.12.2021 (приложение № 7).

На момент подачи искового заявления претензия Фонда об уплате 203 077,75 руб. пени в добровольном порядке Подрядчиком не исполнена.

С учетом допущенной арифметической ошибки при расчете пени в претензии Фонд уточнил размер исковых требований до 203 078,10 руб. согласно формуле, приведенной выше. 

Доказательства направления истцу (заказчику) писем о недействительных исходных данных к отзыву не приложены, т.е. согласно ст.65 АПК РФ являются не доказанными.

 

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО "ПСК-Реконструкция" (адрес:  Россия 188650, г.Сертолово  Всеволожского  района, Ленинградская область, Восточно-Выборгское 

<

...>, ОГРН:  

<

***>) в пользу НО "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" (адрес:  Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТОБОЛЬСКАЯ УЛ. 6, ОГРН:  

<

***>) 203 078руб. 10коп. пени по договору от 07.07.2020г. ;3/12/13/18-709/Д/КР/2020 и 7 062руб. расходов по госпошлине.

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Кузнецов М.В.