Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

город Пермь        

21.04.2023 года                                                             Дело № А50-28862/22

Резолютивная часть решения объявлена 18.04.2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 21.04.2023 года.

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н.,   при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору подряда 

 

при участии в судебном заседании:

от  истца – ФИО2 (доверенность от 06.03.2023, паспорт, диплом),

от ответчика – не я вился, извещен 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» далее- Общество «АудитЭнергоПроект»)  обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (далее – Фонд) о взыскании задолженности по договору №ПД-000040/2019/ЭА в сумме 3389375 руб. (с учетом уточнения исковых требований принятых удом в порядке ст. 49 АПК РФ).

По встречному иску некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" к обществу с ограниченной ответственностью «АудитЭпергоПроект» о взыскании неустойки  и штрафа  за расторжение договора в размере 606 227 руб. 45коп.

В судебном заседании представитель истца по первоначальному иску  поддержал заявление направленное через систему «Мой арбитр», в котором просит принять к рассмотрению ходатайство об уточнении исковых требований от 14.11.2022 № б/н по делу № А50-29140/2021 после рассмотрения и удовлетворения ходатайства о выделении из дела № А50-29140/2021 в отдельное производство требования ООО «АудитЭнергоПроект» о взыскании с Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» 1 978 198, 29 руб. задолженности по оплате фактически выполненных работ по договору от 26.04.2019 № ПД-000040/2019/ЭА.

Определением суда от 16.11.2022 требование общества «АудитЭнергоПроект» о взыскании с Фонда 1 978 198, 29 руб. задолженности по оплате фактически выполненных работ по договору от 26.04.2019 № ПД-000040/2019/ЭА выделено в отдельное производство с присвоением  номера делу № А50-28862/2022.

Как следует из материалов дела, между Обществом  «АудитЭнергоПроект» (Подрядчик)  и Фондом (Заказчик) 26.04.2019   заключен договор № ПД-000040/2019/ЭА, в соответствии с условиями которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее - Проектная документация) расположенных на территории Пермского края (далее - Работы)  в соответствии с адресным перечнем многоквартирных домов – Приложение 1 к договору (далее – объект, МКД) в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

Согласно п. 5.1 Общая стоимость Работ по настоящему договору составляет 3 706 321 рубль 31 копейка (НДС не облагается), в том числе по каждому объекту в соответствии с Приложением 1 к договору.

В соответствии с п. 1.5 Договора Сроки выполнения Работ в соответствии с настоящим разделом:

1.5.1. Начало - с даты заключения договора.

1.6. Окончание - не позднее 100 (ста) календарных дней с даты заключения договора.

Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по каждому МКД договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты подписания документации в порядке, установленном настоящим договором.

В соответствии с приложением № 1 к Договору объектами по Договору являются следующие МКД:

 

№ п/п

Адрес МКД

Вид работ

Стоимость ПСД по видам

Стоимость ПСД по факту

1

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

78 526,60 Р

316 442,28

 

Ремонт крыши

121 722,19 р

 

 

Ремонт фасада

114 180,93 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,56 р

 

2

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

22 887,07 р

91 642,51

 

Ремонт крыши

35 476,69 р

 

 

Ремонт фасада

33 278,75 р

 

3

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

30 421,67 р

121 811,94

 

Ремонт крыши

47 155,90 р

 

 

Ремонт фасада

44 234,37 р

 

4

<

...>

Ремонт внутридомовых "инженерных систем (холодного водоснабжения)

30 276,00 р

121 228,66

 

Ремонт крыши

46 930,10 р

 

 

Ремонт фасада

44 022,56 р

 

5

<

...>

Ремонт внутридомовых ^ инженерных систем (холодного водоснабжения)

30 089,86 р

120 483,33

 

Ремонт крыши

46 641,57 р

 

 

Ремонт фасада

43 751,90 р

 

6

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 830,88 р

119 446,35

 

Ремонт крыши

46 240,13Зр

 

 

Ремонт фасада

43 375,34 р

 

7

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

35 965,40 р

146 022,23

 

Ремонт крыши

55 749,09 р

 

 

Ремонт фасада

52 295,17 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,57 р

 

8

<

...>

. Ремонт внутридомовых

инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 838,98 р

119 478,77

 

Ремонт крыши

46 252,68 р

 

 

Ремонт фасада

43 387.11 р

 

9

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

26 706,98 р

108 950,43

 

Ремонт крыши

41 397,84 р

 

 

Ремонт фасада

38 833,05 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,56 р

 

10

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 928,00 р

183 108,14

 

Ремонт фасада                               43 516,55р

 

 

Утепление фасада

107 651,02 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,57 р

 

11

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 193,15 р

118 905,37

 

Ремонт крыши

45 251,60 р

 

 

Ремонт фасада

42 448.05 р

 

 

Установка коллективных

 

 

(общедомовых) приборов учета'потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,57 р

 

¦

12

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 193,15 р

223 913,14

 

Ремонт крьппи

45 251,60 р

 

 

*" Ремонт фасада

42 448,05 р

 

 

Утепление фасада

105 007,77 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,57 р

 

13

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

30 923,44 р

125 833,64

 

Ремонт крыши

47 933,68 р

 

 

Ремонт фасада

44 963,96 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,56 р

 

14

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 121,13 р

116 604,40

 

( "   Ремонт крыши

45 139,95 р

 

 

Ремонт фасада

42 343,32 р

 

15

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 426,23 р

119 838,65

 

Ремонт крыши

45 612,89 р

 

 

Ремонт фасада

42 786,96 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,57 р

 

16

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 121,13 р

116 604,40

 

Ремонт крыши

45 139,95 р

 

 

Ремонт фасада

42 343,32 р

 

17

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 209,34 р

118 970,18

 

Ремонт крыши

45 276,69 р

 

 

Ремонт фасада

42 471,59 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов )(холодной воды)

2 012,56 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

 

18

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 65

 

35 355,99 р

143 582,10

 

Ремонт крыши

54 804,47 р

 

 

Ремонт фасада

51 409,07 р

 

 

.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды)

2 012,57 р

 

19

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

28 884,81 р

117 670,74

 

Ремонт крыши

44 773,65 р

 

 

Ремонт фасада

41 999,71 р

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов __-_(холодной воды)

2 012,57 р

 

20

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

25 816,74 р

103 373,26

 

Ремонт крыши

40 017,91 р

 

 

Ремонт фасада

37 538,61 р

 

21

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

8 918,32 р

247 587,31

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения)

99 684,24 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

25 331,16р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

25 331,16 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

51 489,87 р

 

 

Ремонт фасада

36 832,56 р

 

22

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

16 241,02 р

202 268,97

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

46 130,23 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

46 130,23 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

93 767,49 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

9 459,68 р

156 881,21

23

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

26 868,84 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем . (горячехо водоснабжения)

26 868,84 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

54 615,45 р

 

 

Ремонт фасада

39 068,40 р

 

24

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

5 983,53 р

74 520,15

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

16 995,35 р

 

 

Ремонт внутридомовых . ,  инженерных систем (горячего водоснабжения)

16 995,35 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

34 545,92 р

 

<

...>

Ремонт внутридомовых

инженерных систем (электроснабжения)

11 474,14 р

 

25

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения)

128 251,90 р

271 153,15

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

32 590,60 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

32 590,60 р

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

66 245,91 р

 

Общество «АудитЭнергоПроект» свои обязательства согласно условий Договора выполнено в полном объеме, передало Фонду, однако оплату по выполненным работам не получило.

31.08.2021 на электронную почту  Общества «АудитЭнергоПроект» Фондом было направлено Уведомление от 23.08.2021 Исх. № СЭД-02-08-исх-3883 о расторжении Договора № ПД-000040/2019/ЭА.

В Уведомлении Заказчик указывает,  что в адрес Подрядчика от Фонда было направлено требование об исполнении условий Договора от 31.05.2021  № СЭД-02-08-исх-2495, но данного требования Подрядчику не поступало. Также Заказчик указывает, что работы проведены не в полном объеме.

С решением о расторжении Договора не согласны по причине того, что в рамках Договора обязательства со стороны Подрядчика исполнены в полном объеме, о чем свидетельствуют сопроводительные письма, направленные ранее в адрес Заказчика.

По мнению Общества «АудитЭнергоПроект» важным обстоятельством является то, что Подрядчик исполнил свои обязательства по Договору и результатом его работы, а именно разработанной Подрядчиком проектно-сметной документацией Фонд пользуется и проводит на основании ее работы по капитальному ремонту МКД.

Подрядчиком неоднократно (2203.21, 18.06.21, 14.09.21, 15.09.21, 01.10.21) направлялись результаты работы по Договору и документы на оплату, но от Фонда не поступило ни возражений, ни оплаты.

В связи с тем, что Договор 26.04.2019 г. за № ПД-000040/2019/ЭА исполнен Подрядчик направил в адрес Фонда письмо с приложением документов на оплату и повторно направил проектно-сметную документацию. Данным письмом Подрядчик просил подписать акты и произвести оплату по Договору на основании выставленного счета. Также Подрядчик просил, в целях урегулирования вопроса по расторжению Договора, отозвать Уведомление от 23.08.2021 г. за Исх. № СЭД-02-08-исх-3883 о расторжении Договора от 26.04.2019 года № ПД-000040/2019/ЭА.

Все требования Общества «АудитЭнергоПроект» оставлены Фондом без ответа, что послужило основанием для обращения Общества «АудитЭнергоПроект» с исковым заявлением в суд о взыскании задолженности за выполненные работы.

Правоотношения истца и ответчика по спорному требованию регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом установлено, что по  объектам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>  письмом от 10.12.2019 № 418-Ф передана  нарочно (отметка Фонда 13.12.2019, отметка сотрудника Фонда ФИО3) на согласование проектная документация в бумажном виде в 1 экз. в составе:

 

 

21

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

 

Ремонт фасада; ПЗ, ПОКР

22

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения); ПЗ, ПОКР

23

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

 

Ремонт фасада, ПЗ

24

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения), ПЗ, ПОКР

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

Письмом от 13.01.2020 № 438-Ф передана нарочно (отметка Фонда 14.01.2020, отметка сотрудника Фонда ФИО4) на согласование проектная документация в бумажном виде в 1 экз. в составе:

21

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

22

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения);

23

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

24

Г. Оса, ул. Садовая 5

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения

Сообщением от 07.07.2020 № 508 Фонд уведомил ООО «АудитЭнергоПроект» о дате, времени (15.07.2020) и месте приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации по объектам: 

<

...>

Дата приемки 15.07.2020, назначенная Фондом в сообщении от 07.07.2020 № 508, совпадает с датой приемки, указанной Фондом во встречном исковом заявлении по делу № А50-29140/2021, что подтверждает выполнение Подрядчиком работ 15.07.2020.

Письмом от 10.07.2020 № 558-Ф (указанная в письме ссылка актуальна) передана нарочно (отметка Фонда 10.07.2020) на рассмотрение и согласование проектно-сметная документация в электронном виде в составе:

 

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (электроснабжения) ПД-40-2019-21-ЭС

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (теплоснабжения) ПД-40-2019-21-ОВ

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения) ПД-40-2019-21-ВК

21

<

...>

Ремонт внугридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (водоотведения) ПД-40-2019-21-ВК

 

Ремонт фасада ПД-40-2019-21-АС;

 

Сметная документация на ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, фасада

22

<

...>

Ремонт внугридомовых инженерных систем (электроснабжения) ПД-40-2019-22-ЭС

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения) ПД-40-2019-22-ВК

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (водоотведения) ПД-40-2019-22-ВК

 

Сметная документация на ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (электроснабжения) ПД-40-2019-23-ЭС

23

г. Оса, ул. Пугачева,

Ремонт внугридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения) ПД-40-2019-23-ВК

 

д. 14Л

Ремонт внугридомовых инженерных систем (водоотведения) ПД-40-2019-23-ВК

 

Сметная документация на ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

24

<

...>

Ремонт внугридомовых инженерных систем (электроснабжения) ПД-40-2019-24-ЭС

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения) ПД-40-2019-24-

вк

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (водоотведения) ПД-40-2019-24-ВК

 

Сметная документация на ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

Письмом от 08.02.2021 № 188-ПФ передана нарочно (отметка сотрудника Фонда ФИО3 09.02.2021) проектная документация в составе:

 

21

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения) ПД-40-2019-21-ЭС пояснительная записка ПД-40-2019-21 -ПЗ.ЭС, проект организации кап.ремонта ПД-40-2019-21-ПОКР.ЭС

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения) ПД-40-2019-21-BK1, пояснительная записка ПД-40-2019-

21-ПЗ.ВК1, проект организации кап.ремонта ПД-40-2019-21 -ПОКР.ВК1

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения) ПД-40-2019-21 -BK.2, пояснительная записка ПД-40-2019-21-ПЗ.ВК.2, проект организации кап.ремонта ПД-40-2019-21 -ПОКР.ВК2

 

Ремонт фасада ПД-40-2019-21-АС, паспорт фасада ПД-40-2019-21-АСПФ;

23

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения) ПД-40-2019-23-ЭС

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения) ПД-40-2019-23-BK, пояснительная записка ПД-40-2019-23-ПЗ.ВК1, проекг организации кап.ремонта ПД-40-2019-23-ПОКР.ВК1

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (водоотведения) ПД-40-2019-23-ВК, пояснительная записка ПД-40-2019-23-ПЗ.ВК, проект организации кап.ремонта ПД-40-2019-23 -ПОКР.ВК

 

Ремонт фасада ПД-40-2019-23-АС2, паспорт фасада ПД-40-2019-23-АСПФ; пояснительная записка ПД-40-2019-23-ПЗ.АС2, проект организации кап.ремонта ПД-40-2019-23-ПОКР.АС2

 

Ремонт систем горячего водоснабжения пояснительная записка ПД-40-2019-23-ПЗ.ВКЗ, проект организации кап.ремонта ПД-40-2019-23-ПОКР.ВКЗ

24

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения) ПД-40-2019-24-ЭС

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения) ПД-40-2019-24-ВК1

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения) ПД-40-2019-24-ВК2

Письмом от 20.04.2021 № 438-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 21.04.2021) оригиналы заключений экспертизы по объектам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

Ссылка Фонда на письма от 06.11.2019 № СЭД-02-08-исх-4153 от 15.05.2020 № СЭД-02-08-исх-1596, от 22.10.2020 № СЭД-02-08-исх-3835 не состоятельна и противоречит представленной Обществом «АудитЭнергоПроект» переписке.

По объектам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, д. 54 письмом № 483-Ф 23.03.2020 в адрес Фонда направлена на согласование проектная документация в электронном виде (по видам работ: ремонт ХВС. крыша, фасад);

25.06.2020 сотрудником ООО «АудитЭнергоПроект» ФИО5 (начальник ПСО) в адрес сотрудника Фонда ФИО6 направлена разработанная проектно-сметная документация и положительные заключения экспертизы в электронном виде;

Письмом от 03.11.2020 № 381-ФП передан нарочно (отметка Фонда 06.11.2020) Подрядчик просил уточнить информацию об исключении установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды) по объектам: 

<

...>;

26.11.2020 письмом № 638-ФП переданы оригиналы заключений экспертизы.

01.12.2020 письмом № 688-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 04.12.2020, отметка сотрудника Фонда Калинина 04.12.2020) проектная документация в составе: проект, ПЗ, ПОКР, сметная документация, КС-2, КС-3.

Письмом от 18.05.2021 № 547-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 19.05.2021, отметка сотрудника Фонда ФИО7 19.05.2021) сметы на проектные (изыскательские) работы, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Письмом от 19.05.2021 № 548-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 19.05.2021) счета на оплату.

По перечисленным объектам во встречном исковом заявлении по делу № А50-29140/2021 Фондом указана дата приемки 08.07.2020, что подтверждает выполнение Подрядчиком работ 08.07.2020.

По объектам: 

<

...>  письмом от 03.11.2020 № 381-ФП передан нарочно (отметка Фонда 06.11.2020) Подрядчик просил уточнить информацию об исключении установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды).

Письмом от 13.11.2020 № 489-ФП передан нарочно (отметка Фонда 20.11.2020, отметка сотрудника Фонда ФИО6 18.11.2020) диск с ПСД.

Письмом от 18.11.2020 № 478-ФП передано нарочно (отметка Фонда 20.11.2020, отметка сотрудника Фонда ФИО6 18.11.2020) ПСД в составе: проект, пояснительная записка, проект организации строительства, сметная документация, заключение экспертизы, КС-2. КС-3.

01.12.2020 письмом № 690-ФП передан нарочно оригинал заключения экспертизы по объектам: 

<

...> (отметка Фонда 04.12.2020).

Письмом от 18.05.2021 № 547-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 19.05.2021, отметка сотрудника Фонда ФИО7 19.05.2021) сметы на проектные (изыскательские) работы, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Письмом от 19.05.2021 № 548-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 19.05.2021) счета на оплату.

По данному объекту во встречном исковом заявлении по делу № А50-29140/2021 Фондом также указана дата приемки 08.07.2020, что подтверждает выполнение Подрядчиком работ 08.07.2020.

По объектам: 

<

...>, 

<

...>, д. 66  письмом от 22.10.2020 № 639-Ф передана нарочно (отметка Фонда 28.10.2020, отметка сотрудника Фонда Калинина 22.10.2020) проектная документация в распечатанном виде в 4-х экз. в составе: проект, ПЗ, ПОКР, сметная документация.

Письмом от 03.11.2020 № 381-ФП передан нарочно (отметка Фонда 06.11.2020) Подрядчик просил уточнить информацию об исключении установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (холодной воды) по объектам: 

<

...>, 

<

...>, д. 66.

Письмом от 13.11.2020 № 488-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 20.11.2020, отметка сотрудника Фонда Калинина 18.11.2020) оригиналы заключений экспертизы.

Письмом от 18.05.2021 № 547-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 19.05.2021, отметка сотрудника Фонда ФИО7 19.05.2021) сметы на проектные (изыскательские) работы, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Письмом от 19.05.2021 № 548-ФП переданы нарочно (отметка Фонда 19.05.2021) счета на оплату.

По перечисленным объектам во встречном исковом заявлении по делу № А50-29140/2021 Фондом указана дата приемки 08.07.2020, что подтверждает выполнение Подрядчиком работ 08.07.2020.

Учитывая изложенное, а также заявление Фонда в ходе судебного заседания, состоявшегося 08.11.2022 по делу № А50-29140/2021, о том, что 11  объектов не являются спорными и стоимость выполненных работ по ним составляет 1 978 198 руб. 29 коп.

 

№

№ п/п по Приложению №1 к Договору

Адрес МКД, акт о приемке выполненных работ

Вид работ

Стоимость ПСД по видам, руб.

Дата приемки,

указанная Ответчиком во встречном исковом заявлении, в уточненном встречном исковом заявлении

1

21

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

8918,32

15.07.2020

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения)

99684,24

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

25331,16

 

 

Ремонт внугридомовых инженерных систем (водоотведения)

51489,87

 

 

Ремонт фасада

36832,56

 

 

Итого:

222 256,15

 

2

22

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

16241,02

15.07.2020

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

46130,23

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

46130,23

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

93767,49

 

 

Итого:

202 268, 97

 

3

23

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

9459,68

15.07.2020

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

26868,84

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (горячего водоснабжения)

26868,84

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

54615,45

 

 

Ремонт фасада

39068,40

 

 

Итого:

156 881,21

 

4

24

<

...> д. S

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)

5983,53

15.07.2020

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

16995,35

 

 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)

34545,92

 

 

Итого:

57 524,80

 

5

4

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

30 276,00

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

46 930,10

 

 

Ремонт фасада

44 022,56

 

 

Итого:

121 228,66

 

6

5

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

30 089,86

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

46 641,57

 

 

Ремонт фасада

43 751,90

 

 

Итого:

120 483,33

 

7

6

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 830,88

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

46 240,13

 

 

Ремонт фасада

43 375,34

 

 

Итого:

119 446,35

 

8

8

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 838,98

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

46 252,68

 

 

Ремонт фасада

43 387,11

 

 

Итого:

119 478,77

 

9

9

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

26 706,98

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

41 397,84

 

 

Ремонт фасада

38 833,05

 

 

Итого:

106 937,87

 

10

11

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 193,15

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

45 251,60

 

 

Ремонт фасада

42 448,05

 

 

Итого:

116 892,80

 

11

7

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

35 965,40

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

55 749,09

 

 

Ремонт фасада

52 295,17

 

 

Итого:

144 009, 66

 

12

16

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 121,13

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

45 139,95

 

 

Ремонт фасада

42 343,32

 

Итого:

116 604,40

 

13

17

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

29 209,34

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

45 276,69

 

 

Ремонт фасада

42 471,59

 

 

Итого:

116 957,62

 

14

18

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 65

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

35 355,99

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

54 804,47

 

 

Ремонт фасада

51 409,07

 

 

Итого:

141 569, 53

 

15

19

<

...>

Ремонт внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения)

28 884,81

08.07.2020

 

 

Ремонт крыши

44 773,65

 

 

Ремонт фасада

41 999,71

 

 

Итого:

115 658,17

 

ИТОГО (стоимость выполненных работ по объектам, которые не являются спорными), руб.:

1 978 198,29

 

 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и подлежащих их удовлетворению в заявленном Обществом «АудитЭнергоПроект» в сумме 1 978 198 руб. 29 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 753 ГК РФ принятие заказчиком результата выполненных работ является обязанностью заказчика при условии сообщения подрядчика о готовности его к сдаче. При этом сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком (ответчиком) является двусторонний акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (статьи 720, 783 ГК РФ), что в силу требований пункта 1 статьи 711 ГК РФ является основанием возникновения на стороне заказчика обязательства по оплате принятых результатов работ.

Доказательств невыполнения работ, либо выполнения работ не в полном объеме Фондом не представлено. Доказательств, свидетельствующих о некачественном выполнении работ Фондом также не представлено (ст. 65 АПК РФ)

Суд также отмечает, что ответчиком факт выполнения работ не оспорен. Возражений по существу требований, касающихся качества и объема выполненных работ, ответчиком не представлено.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Ходатайство Фонда об отложении судебного заседания судом рассмотрено и отклонено, так как загруженность всех сотрудником Фонда не является основанием для отложения, а кроме того судебное заседание по ходатайству Фонда ранее откладывалось неоднократно, вместе с тем  каких либо дополнительных доказательств в обоснование своей позиции суду не представлено.

Из материалов дела усматривается, что обязательство по оплате выполненных работ ответчиком в предусмотренные договором сроки исполнено не было, что привело к образованию перед истцом задолженности в размере 1 978 198 руб. 28 коп.

В порядке статьи 65 АПК РФ доказательства надлежащего исполнения ответчиком обязательства по оплате выполненных истцом работ по договору в полном объеме в материалы дела не представлены.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика суммы долга в размере 1 978 198 руб. рублей заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

С учетом удовлетворения исковых требований, судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с Фонда  в доход федерального бюджета, в сумме 32 782 руб., так как обществу «АудитЭнергоПроект» была предоставлена отсрочка  по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) задолженность в сумме 1 978 198 руб. 28 коп.

Взыскать с некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 32 782 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

 

Судья                                                                   О.Н. Маркеева